Арбитражный суд Краснодарского края 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

 суда от 27.10.2022г. 

по делу № А32-34946/2022 

Суд в составе: судьи Миргородской О.П., руководствуясь статьями 65, 110, 167 –  171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

Обязать МКУ МО г. Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и  транспорта» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар в течение 30 рабочих дней с даты  вступления решения суда в законную устранить недостатки выполненных работ:  

1) по объекту: Капитальный ремонт ул. 5-я Дорожная (устройство тротуара от ул.  2-я Тихая до ул. Дубравная) в пос. Северный в г. Краснодаре, подлежащие устранению до  29.04.2022:  

 п/п  

 

№ Участок ПК+(номер 

 

Наименование выявленных 

 

Срок устранения  

 

ж/с) 

 

недостатков, подлежащих устранению  

 

1 Напротив дома № 35 

 

Продольные трещины а/б 

 

29.04.2022  

 

по ул. 5-я Дорожная  

 

покрытия 1м2 

 

2 Напротив дома № 35 

 

Продольные трещины а/б 

 

29.04.2022  

 

и № 37/1 по ул. 5-я 

 

покрытия 1м2 

 

Дорожная 

 

3 Напротив ул. 2-я 

 

Продольные трещины а/б 

 

29.04.2022  

 

Тихая 

 

покрытия 2м2 

 

4 Напротив ул. 7-я 

 

Просадка основания дорожной 

 

29.04.2022  

 

Тихая 

 

одежды 50м2 

 

2) по объекту: Капитальный ремонт ул. Стременной (устройство тротуара от ул.  

Наримановской до ул. Огородной) в х. Ленина в г. Краснодаре 1 Этап, подлежащие  устранению до 29.04.2022:  

 п/п  

 

№ Участок ПК+(номер 

 

Наименование выявленных 

 

Срок устранения  

 

ж/с) 

 

недостатков, подлежащих устранению  

 

1 Напротив дома № 3 

 

Продольные трещины а/б 

 

29.04.2022  

 

по ул. Стременной 

 

покрытия 1м2 

 

2 От дома № 3 по ул.  

 

Просадка основания дорожной 

 

29.04.2022  

 

Стременной до ул.  

 

одежды 67,5 м2 

 

ФИО1 

 

3 ул. Стременная, 12/1  

 

Продольные трещины а/б 

 

29.04.2022  

 

покрытия 2м2 

 

4 От ул. Стременная, 

 

Просадка основания дорожной 

 

29.04.2022  

 

дом № 12/1 до дома № 12  

 

одежды 20м2 

 

5 Пересечение ул.  

 

Сетка трещин 1м2 

 

29.04.2022  

 

Стременная и ул.  

 

Огородная 

 

3) по объекту: Капитальный ремонт ул. Вольной (устройство тротуара от ул.  

Приморской до ул. Уманская) в х. Ленина в г. Краснодаре, подлежащие устранению до  29.04.2022:  

 п/п  

 

№ Участок ПК+(номер 

 

Наименование выявленных 

 

Срок устранения  

 

ж/с) 

 

недостатков, подлежащих устранению  

 

1 Пересечение ул. 

 

Сетка трещин а/б покрытия 

 

29.04.2022  

 

Вольная / ул. 1-я 

 

1,5м2 

 

Сторожевая 

 

2 От ул. Вольная, 41/1 

 

Продольные трещины а/б 

 

29.04.2022  

 

до ул. Оружейная 

 

покрытия 2м2 

 

3 ул. Вольная, 41  

 

Просадка основания дорожной 

 

29.04.2022  

 

одежды 2м2 

 

4 ул. Вольная, 43  

 

Просадка основания дорожной 

 

29.04.2022  

 

одежды Зм2 

 

5 От ул. Вольная, 47 

 

Продольные трещины а/б 

 

29.04.2022  

 

до ул. Тихомировская  

 

покрытия 10м2 

 

6 От ул. 

 

Просадка основания дорожной 

 

29.04.2022  

 

Тихомировская до ул. 

 

одежды 15м2 

 

Вольная, 51 

 

7 От ул. Вольная, 53 

 

Продольные трещины а/б 

 

29.04.2022  

 

до ул. Комонирская 

 

покрытия 10м2 

 

8 От ул. Вольная, 63 

 

Продольные трещины а/б 

 

29.04.2022  

 

до ул. Приморская 

 

покрытия 5м2 

 

4) по объекту: Капитальный ремонт ул. Вольной (устройство тротуара от ул.  

Приморской до ул. Уманская) в х. Ленина в г. Краснодаре, подлежащие устранению до  29.04.2022:  

 п/п  

 

№ Участок ПК+(номер 

 

Наименование выявленных 

 

Срок устранения  

 

ж/с) 

 

недостатков, подлежащих устранению  

 

1 ул. Наримановская, 

 

Сетка трещин а/б покрытия 

 

29.04.2022  

 

20 

 

1,5м2 

 

2 ул. Наримановская, 

 

Продольные трещины а/б 

 

29.04.2022  

 

19 

 

покрытия Зм2 

 

3 ул. Наримановская, 

 

Просадка основания дорожной 

 

29.04.2022  

 

17 

 

одежды 2м2 

 

4 ул. Наримановская, 

 

Просадка основания дорожной 

 

29.04.2022  

 

9 

 

одежды Зм2 

 

5 ул. Наримановская, 

 

Продольные трещины а/б 

 

29.04.2022  

 

7 

 

покрытия 10м2 

 

6 От ул. 

 

Просадка основания дорожной 

 

29.04.2022  

 

Наримановская, 2 до ул. 

 

одежды 15м2 

 

Стременная 

 

Взыскать с НАО «Темрюкское ДРСУ» (ИНН 

<

***>) г. Темрюк в пользу МКУ  

МО г. Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» (ИНН  

<

***>) г. Краснодар 40 000 рублей штрафа.  

Взыскать с НАО «Темрюкское ДРСУ» (ИНН 

<

***>) г. Темрюк в доход  федерального бюджета 8 000 рублей государственной пошлины по иску.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке  апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через  принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.  

 Судья О.П. Миргородская