Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

25 ноября 2019 годаДело № А56-105323/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭТ" (адрес:  Россия 192236, Санкт-Петербург, ул Софийская 17/А/218, ОГРН:  1057812585027);

к :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПС МОНТАЖ" (адрес:  Россия 198320, Санкт-Петербург, УЛ ПЕРВОГО МАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕРА Б (20-Н), ПОМ 33, ОГРН: 1177847212113 );

о взыскании 550 000 руб. неосновательного обогащения и 107 000 руб. штрафа по пунктам 2.4.8 и 6.2.3 договора и 90482 руб. пеней по пунктам 6.2.2 договора от 30.10.2018 № К25-10-18,

ответчик представил отзыв,

суд считает, что акты Формы КС-2 правомерно не приняты истцом, поскольку переданы заказчику 06.09.2019, в то время как решение о расторжении спорного договора получено подрядчиком 14.06.2019, с учетом пункта 9.11.7 договора вступило в силу с 25.09.2019, акты составлены по истечении длительного времени после расторжения договора, в связи с чем требование о взыскании 550 000 руб. неотработанного аванса подлежит удовлетворению.

при расчете неустойки за нарушение срока выполнения работ суд приходит к следующему выводу: поскольку пени на основании пункта 6.2.2 договора начисляются в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ, платежным поручением от 21.06.2019№ 187 ответчик частично оплатил их сумме 150 000 руб., то на дату вынесения судом решения из размер составляет 216 764,17 руб., в связи с чем подлежит удовлетворению требование в части 66 764,17 руб.

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Отказать обществу с ограниченной ответственностью " ОПС МОНТАЖ " в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОПС МОНТАЖ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭТ» 550 000 руб. неосновательного обогащения и 173764,17 руб. неустойки и 17380 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Косенко Т.А.