113/2018-39461(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-13112/2017

г. Петрозаводск

04 июля 2018 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск и заявление о возмещении судебных расходов удовлетворить.  

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Региональная  инвестиционная компания» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  срок до 31 октября 2018 года устранить недостатки выполненных работ,  допущенные при строительстве жилого дома № 10, расположенного по  адресу: 

<

...> в части работ по устройству  кровли в соответствии с нормативной документацией и инструкцией по  монтажу кровельных систем Alkorplan - соблюсти порядок укладки слоев  утеплителя требованиям проекта, согласно Рабочей документации  «Конструктивные и объемно-планировочные решения № НСИ 7/11-КР «Р»  ООО «Неосистемы Инжиниринг. Строительство» по Дому № 1  (строительный номер дома), а именно:  

• выполнить устройство внешних углов с усилением, согласно  

требованиям «Инструкции по монтажу кровельных систем Alkorplan»  

элемент усиления должен быть на всю ширину горизонтального участка  

примыкания ПВХ мембраны; 

• привести в соответствие величину нахлеста вертикального участка  

полимерной мембраны на горизонтальный при устройстве примыканий на  

парапет или стены менее 100 мм., в соответствии с инструкцией по  

монтажу кровельных систем Alkorplan; 

• устранить выявленные складки и воздушные мешки материала в углах  

при устройстве внутреннего угла из полимерной мембраны; 

• устранить выявленные по всему периметру парапета присутствующие  

складки изоляционного материала и пустоты; 

• устранить выявленные нарушения герметизации основного ковра  

(ширина сварного шва должна быть не менее 30 мм; устранить обнажение  

армирующего слоя вырезанного образца шва по все ширине сварного шва  

при его разрыве; равномерность сварки по всей длине (вдоль  

качественного сварного шва наблюдается ровный глянцевый блеск  

шириной 10 мм); устранить складки на всем протяжении шва; устранить  

выявленные признаки перегрева пленки (потеки, изменение цвета). 

• устранить размер заделок повреждений основного ковра в рамках  

предусмотренной нормы, согласно Инструкции по монтажу кровельных  

систем Alkorplan: при обнаружении дефектов необходимо выполнить  

дополнительные работы с помощью ручного сварочного оборудования,  

при обнаружении складок, пустот, а также нарушений в целостности  

самой мембраны необходимо выполнить ремонт таких участков  

наложением заплат размером не менее 150 мм в диаметре, при этом  

расстояние по всем направлениям от места повреждения до края заплат  

должно быть не менее 50 мм. Ширина сварного шва в любом направлении  

от края мембраны или среза края мембраны должна быть не менее 40 мм.;  • устранить выявленные застои воды на поверхности кровельного  

покрытия глубиной более 20 мм;. 

• устранить на ограждениях кровли обнаруженные следы коррозии  

металла; • устранить зазор между плитами утеплителя ПСБС до 22мм.; 

• заменить влажный верхний слой теплоизоляционной плиты «Rockwool  

Руф Баттс В», который находится во влажном состоянии; • устранить выявленные между плитами зазоры; 

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Региональная  инвестиционная компания» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  пользу товарищества собственников жилья «СК-10» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) 35 000 руб. расходов по составлению экспертного  заключения от 31.10.2017, 6 000 руб. расходов по оплате госпошлины, а  также 13 500 расходов по оплате услуг представителя.  

4. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья Дружинина С.И.