31_1408466  

Арбитражный суд Мурманской области улица Книповича, дом 20, город Мурманск, 183038, www.murmansk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Мурманск Дело № А42-622/2020  

26.05.2020 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

иск удовлетворить. 

Обязать ООО «Оникс» безвозмездно исполнить гарантийные обязательства по  устранению дефектов работ по договору подряда № 2А от 01.09.2016, а именно:  устранить волосяные трещины, отдельные разрушения кирпичной кладки фасада,  отслоения и растрескивания штукатурного и окрасочного слоев, устранить следы  протечек, ржавые пятна, общей площадью 1157 м2; устранить отслоение  штукатурных слоев общей площадью 24 м2; восстановить разрушенные элементы  покрытия кровли из листовой стали площадью 12 м2, разрушения кирпичной  кладки фасада площадью 70 м2; восстановить наружную облицовку цоколя здания  из искусственного декоративного камня KAMROCK общей площадью 22 м2;  восстановить поверхность примыкающей к зданию бетонной отмостки площадью  30 м2.  

Взыскать с ООО «Оникс» в пользу МАОУ города Мурманска УХЭО ОУ  судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Евсюкова А. В.