100124_198036  

Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-1023/2017

город Горно-Алтайск

11 сентября 2017 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Якшимаевой Ф. Ю., при  ведении протокола помощником судьи Утёмовой О.Ю., рассмотрев в судебном  заседании дело по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ТехноСерв  АС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Б. Черемушкинская , д. 13 стр. 4,  г.Москва) к Прокуратуре Республики Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  пер. Центральный, д. 3, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) об изменении условий  государственного контракта № 33 от 30.12.2014г.,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

уточненные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  "ТехноСерв АС" заявленные к Прокуратуре Республики Алтай удовлетворить.  

Пункт 4.2 Государственного контракта № 33, заключенного 30.12.2014 на  «Строительство административного здания для размещения трёх прокуратур  Республики Алтай» по адресу: 

<

...> (под ключ)  изменить, изложив в следующей редакции: «Сроки (периоды) выполнения работ:  01.04.2015 года по 30.09.2017. В указанный срок включены как конечный срок  выполнения строительных работ, так и конечный срок по подготовке и передаче  заказчику документов, необходимых для оформления разрешения на ввод Объекта в  эксплуатацию (в т.ч. участие в передаче Объекта или его частей в эксплуатацию  эксплуатирующей организации и обучение персонала заказчика в соответствии с  условиями Контракта).  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд. 

Судья Ф.Ю. Якшимаева