АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 350063, Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 4 Тел. 

<

***>, 201-34-08, 201-34-09 факс 

<

***> e-mail: info@fassko.arbitr.ru, http://fassko.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дело № А63-24413/2024

г. Краснодар

27 января 2026 года

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Аваряскина В.В., судей Коржинек Е.Л. и Садовникова А.В., при участии в судебном заседании от истца – публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) – ФИО1 (доверенность от 24.02.2025), от ответчика – акционерного общества «Электросетьстройпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) – ФИО2 (доверенность от 10.07.2024), при рассмотрении кассационной жалобы публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 13.05.2025 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2025 по делу № А63-24413/2024, установил следующее.

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к акционерному обществу «Электросетьстройпроект» (далее – организация) о взыскании 6 918 098 рублей 81 копейки неустойки с 10.01.2024 по 30.08.2024 с последующим начислением по день фактического исполнения обязательств (исковые требования изменены в порядке, предусмотренном в статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее – Кодекс).

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 13.05.2025 иск удовлетворен в части взыскания с организации в пользу общества 3 473 895 рублей 11 копеек неустойки с 10.01.2024 по 30.08.2024 с последующим взысканием в размере 0,1% от суммы долга (14 845 705 рублей 60 копеек) по день фактического исполнения обязательств. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2025 решение суда от 13.05.2025 отменено, с организации в пользу общества взыскано

1 484 570 рублей 56 копеек неустойки с 10.01.2024 по 23.04.2025. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе общество просит отменить обжалуемые судебные акты и удовлетворить иск полностью.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает необходимым объявить перерыв в судебном заседании до 11 часов 40 минут 10.02.2026.

Руководствуясь статьями 163, 184, 284, 285 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ОПРЕДЕЛИЛ:

объявить перерыв в судебном заседании до 11 часов 40 минут 10.02.2026.

Продолжение судебного заседания состоится в помещении суда по адресу: 

<

...>, зал № 2.

Председательствующий В.В. Аваряскин Судьи Е.Л. ФИО3 Садовников