187/2023-31953(2) 

 

Пятый арбитражный апелляционный суд  ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001  

http://5aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А24-311/2023

г. Владивосток

14 августа 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 09 августа 2023 года.  

Постановление в полном объеме изготовлено 14 августа 2023 года.  Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего Д.А. Самофала, судей Л.А. Мокроусовой, И.С. Чижикова, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью «Легион»,  

апелляционное производство № 05АП-3305/2023 на решение от 05.05.2023 судьи В.И. Решетько 

по делу № А24-311/2023 Арбитражного суда Камчатского края  

по иску краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика  Министерства строительства Камчатского края» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Легион» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

третьи лица: правительство Камчатского края; краевое государственное автономное  учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Радужный» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о возложении обязанности произвести гарантийный ремонт, при участии: 

от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 11.04.2023, сроком действия до  31.12.2023, диплом о высшем юридическом образовании (регистрационный номер 88346);  от правительства Камчатского края: представитель Л.В. Уяган по доверенности от  27.12.2022, сроком действия до 31.12.2023, диплом о высшем юридическом образовании  (регистрационный номер 3441), паспорт, представитель ФИО3 по доверенности  от 27.12.2022, сроком действия до 31.12.2023 диплом о высшем юридическом образовании  (регистрационный номер 3939),  

от ответчика, краевого государственного автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Радужный» не явились, извещены,  

УСТАНОВИЛ:

краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика Министерства  строительства Камчатского края» (далее – истец, учреждение) обратилось в Арбитражный  суд Камчатского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Легион»  (далее – ответчик, ООО «Легион») о возложении обязанности произвести гарантийный  

ремонт по государственному контракту от 06.05.2019 № 38/19-ГК на выполнение работ по  строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным  бассейном в городе Петропавловске-Камчатском».  

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 05.05.2023 исковые требования  удовлетворены в полном объеме.  

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ответчик обратился с  апелляционной жалобой.  

В письменном отзыве истец по доводам жалобы возразил, просил оставить  обжалуемое решение без изменения.  

Определением от 10.07.2023 судебное разбирательство откладывалось на  09.08.2023.  

В заседание Пятого арбитражного апелляционного суда представители ответчика,  краевого государственного автономного учреждения физкультурно-оздоровительный  комплекс «Радужный», извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного  разбирательства в судебное заседание не явились, в связи с чем суд, руководствуясь  статьями 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее -  АПК РФ), провел судебное заседание в их отсутствие.  

В судебном заседании представители истца и ответчика ходатайствовали перед  апелляционным судом об утверждении мирового соглашения, представили три  экземпляра подписанного сторонами мирового соглашения.  

Исследовав материалы дела, изучив представленный текст мирового соглашения  по настоящему делу, подписанного врио начальника краевого государственного казенного  учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края»,  генеральным директором ООО «Легион» и генеральным директором краевого  государственного автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс  «Радужный» без возражений, арбитражный суд апелляционной инстанции считает  подлежащим удовлетворению ходатайство о заключении мирового соглашения в силу  следующего.  

Согласно статье 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением  в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.  

В соответствии со статьей 139 АПК РФ мировое соглашение может быть  заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и не может нарушать  права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение  утверждается в судебном заседании арбитражным судом, в производстве которого  находится дело (статья 141 АПК РФ).  

Поскольку мировое соглашение в представленной редакции не противоречит  закону и иным нормативным правовым актам, а также не нарушает права и законные  интересы сторон и других лиц, учитывая, что суть мирового соглашения заключается в  окончании процесса мирным урегулированием спора, то есть достижением  определенности в отношениях между сторонами на основе волеизъявления самих сторон,  арбитражный суд апелляционной инстанции утверждает мировое соглашение в  предложенной сторонами редакции.  

На основании части 2 статьи 150 и пункта 3 статьи 269 АПК РФ в связи с  утверждением мирового соглашения производство по настоящему делу подлежит  прекращению, а решение Арбитражного суда Приморского края от 19.07.2021 – отмене.  

Согласно пункту 4 части 7 статьи 141 АПК РФ при утверждении мирового  соглашения суд указывает на распределение судебных расходов.  

Согласно пункту 6 мирового соглашения стороны договорились о том, что  судебные расходы в виде государственной пошлины относятся на ответчика. Расходы по  оплате услуг представителей сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно  связанные с настоящим делом, Стороны друг другу не возмещают. Указанные расходы  лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.  

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере  

50% подлежат возврату ответчику на основании статьи 333.40 Налогового кодекса РФ. 

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд, 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Камчатского края от 05.05.2023 по делу № А24311/2023 отменить, производство по делу прекратить.  

Утвердить мировое соглашение, заключенное 03.08.2023 между краевым  государственным казенным учреждением «Служба заказчика Министерства строительства  Камчатского края» и обществом с ограниченной ответственностью «Легион» в  следующей редакции:  

«Мировое соглашение по делу № А24-311/2023 Арбитражного суда Камчатского  края г. Петропавловск-Камчатский 03 августа 2023 года  

Истец - краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика  Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>), в лице временно исполняющего обязанности начальника ФИО4, действующего на основании Устава и Приказа Министерства  строительства и жилищной политики Камчатского края от 02.02.2023 № 25-к, с одной  стороны, Ответчик - общество с ограниченной ответственностью «Легион» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>), в лице генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава, с другой стороны, Третье лицо -  краевое государственное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный  комплекс «Радужный» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в лице генерального  директора ФИО6, действующего на основании Устава,  вместе именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора по делу № А24-311/2023,  рассматриваемому Пятым арбитражным апелляционным судом, руководствуясь статьями  139-142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили  настоящее мировое соглашение о нижеследующем:  

1. По настоящему мировому соглашению Стороны признают, что исполнение  Ответчиком решения Арбитражного суда Камчатского края по делу № А24-311/2023 об  устранении отслоения гидроизоляционного покрывного слоя (полимочевины) в  спортивном и детском бассейнах является нецелесообразным вследствие  эксплуатационной непригодности изоляционного и отделочного покрытия  полимочевиной «Унигард Эконом» монолитных железобетонных чаш малого и  плавательного бассейнов ФОК «Водник».  

2. Ответчик обязуется в течение 85 календарных дней (45 дней доставка  материалов на объект, 40 дней выполнение работ) со дня утверждения мирового  соглашения исполнить решение Арбитражного суда Камчатского края по делу № А24311/2023 путем выполнения комплекса работ по облицовке чаш бассейнов (плавательный  бассейн размером 25*11 м., глубиной в диапазоне 1,8-2 м., детский бассейн размером 10*6  м., глубиной в диапазоне 0,8-1,05 м.) (далее - работы) плиткой «СОКОЛ». При  выполнении работ Ответчик руководствуется проектом производства работ согласно  Приложению к настоящему мировому соглашению.  

3. Обязательства Ответчика перед Истцом в связи с исполнением решения  Арбитражного суда Камчатского края по делу № А24-311/2023 считаются надлежащим  образом исполненными с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных  работ.  

4. Ответчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов,  соответствие их спецификации государственным стандартам и техническим условиям;  качество выполнения работ в соответствии с проектной и рабочей документацией,  действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности,  

инструкциями и иными нормативными правовыми актами, содержащими требования к  выполнению данных видов работ; своевременное устранение недостатков и дефектов,  выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации  Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г.  Петропавловске-Камчатском, установленного Государственным контрактом от 06.05.2019   № 38/19-ГК.  

5. Ответчик подтверждает исполнение гарантийных обязательств на выполненные  работы в соответствии с пунктом 12.2 государственного контракта от 06.05.2019 № 38/19- ГК.  

6. Судебные расходы в виде государственной пошлины относятся на Ответчика.  Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или  косвенно связанные с настоящим делом, Стороны друг другу не возмещают. Указанные  расходы лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.  

7. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение  исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые  предусмотрены этим соглашением.  

8. Мировое соглашение, не исполненное добровольно в срок, указанный в пункте 2  указанного мирового соглашения, подлежит принудительному исполнению по правилам  раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании  исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца.  

9. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не  противоречит закону.  

10. Настоящее мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих  равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один  экземпляр для приобщения Арбитражным судом Камчатского края к материалам дела   № А24-311/2023.  

11. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным  судом и действует до полного исполнения Ответчиком своих обязательств.  

12. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139-141  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее  мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить.  

13. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3  статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам  известны».  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Легион» из федерального  бюджета 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей государственной пошлины за подачу  апелляционной жалобы, уплаченной на основании чек-ордера от 24.05.2023 (операция 24).  

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного  округа через Арбитражный суд Камчатского края в течение двух месяцев.  

Председательствующий Д.А. Самофал  

Судьи Л.А. Мокроусова 

И.С. Чижиков 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 06.03.2023 22:01:00 

Кому выдана Самофал Дмитрий Анатольевич