АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-8639/2021

г. Архангельск

15 сентября 2021 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 сентября 2021 года  

Решение в полном объёме изготовлено 15 сентября 2021 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Волкова И.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СК Белое-Море" (ОГРН 

<

***>; адрес: Россия 163046, г.Архангельск, Архангельская область, ул.Выучейского, дом 25 пом.19-20)

к ответчику - государственному казенному учреждению Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***>; адрес: Россия 163000, г.Архангельск, Архангельская область, ул. Попова, д.16)

о взыскании 904 343 руб.,

при участии представителя истца ФИО2 (доверенность от 01.07.2021г.), представителя ответчика ФИО3 (доверенность от 15.01.2021г.),  

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СК Белое-Море" обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к государственному казенному учреждению Архангельской области "Главное управление капитального строительства" о взыскании 904 343 руб. долга по государственному контракту №0124200000621000710 от 17.03.2021 (акт от 29.04.2021).

Представитель истца в судебном заседании требование поддержал. 

Ответчик в представленном отзыве  иск не признает, однако факт надлежащего выполнения работ не оспаривает. 

Изучив письменные материалы дела, заслушав представителей сторон, суд пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям. 

Между ответчиком (заказчик) и истцом (подрядчик) 17.03.2021г. заключен  государственный контракт №0124200000621000710.

По условиям заключенного контракта истец  обязался выполнить работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в дер. Гридино Няндомского района,  в  дер. Кощеевская Коношского района, в дер. Никифоровская Шенкурского района, в дер. Шиловская Вельского района Архангельской области в соответствии с проектной и рабочей документацией.

В соответствии с п. 3.1. окончание работ – не позднее 15 октября 2021г. с учетом подписания всех документов о приемке. 

В соответствии с п. 7.3. приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение. 

В соответствии с п. 9.1. оплата выполненных работ производится на основании сметы контракта по каждому объекту заказчиком промежуточными платежами за фактически выполненные объемы работ в течение 30 дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.      

В период действия контракта  истец выполнил работы  на земельном участке общей площадью 1500 кв. м. в деревне Кощеевская, участок 86 на сумму 904 343 руб., что подтверждается подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой  о стоимости выполненных работ и затрат № 2/1 от 29.04.2021г.   

  Ответчик денежные средства для оплаты услуг в полном объеме не перечислил, в связи с чем истец обратился к нему с претензией от 03.06.2021 № 93, в которой требовал оплаты выполненных работ. 

Поскольку  работы в полном объеме оплачены не были, истец обратился в суд с требованием о взыскании долга в сумме 904 343 руб. 

Как установлено статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата работы или её этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы.   

Поскольку задолженность в размере 904 343 руб. 26 коп. подтверждается материалами дела и ответчиком документально не опровергнута, она подлежит взысканию с ответчика на основании статей 309, 310, 711, 702 ГК РФ.

Доводы ответчика, указанные  в отзыве, отклоняются судом как не имеющие правового значения  для настоящего дела.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

Взыскать с государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СК Белое-Море" (ОГРН 

<

***>)  904 343 руб. задолженности, а также  21 087 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья

И.Н. Волков