34/2022-118411(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Дело № А43-17989/2022 

г. Нижний Новгород «14» сентября 2022 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

Судьи Левашовой Елены Алексеевны (шифр дела 34-259) 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником ФИО1  

рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Экситон" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

к публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании выполнить технические мероприятия при участии представителей: от истца: ФИО2 (доверенность от 17.06.2022), 

от ответчика: ФИО3 (доверенность от 26.07.2022),  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) не позднее двух месяцев с момента вступления в законную силу  

решения суда по настоящему делу выполнить обязательства, предусмотренные  

разделом Х технических условий № 21/25-7Н-3 приложение к договору  

 № 521063950 от 05.03.2021г., а именно: 

 запроектировать и построить новую ТП-6/0,4 кВ (комплектная  трансформаторная подстанция, однотрансформаторная тупикового типа,  мощностью 160 кВА);  

 запроектировать и проложить ЛЭП-6кВ от РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ  строящейся по договору № 521027055 от 29.11.2018 до новой ТП-6/0,4 кВ.  

- КЛ-6 кВ, в траншее, многожильные, бумажная изоляция, сечением 70 мм2,  ориентировочной протяженностью 0,48 км.  

 запроектировать и выполнить реконструкцию РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ,  строящейся по договору № 521027055 от 29.11.2018г., в части установки  дополнительных контактов для организации присоединения. Тип, номинал и  состав оборудования уточнить при проектировании.  

 Запроектировать и построить ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-6/0,4кВ до  границы участка заявителя:  

- КЛ-0,4кВ в траншеях, многожильные, бумажная изоляция, сечением  120мм2, ориентировочной протяженностью 0,02км.  

 Запроектировать и установить ШРС не далее 15метров во внешнюю сторону  от границы земельного участка;  

 для расчетного учета электроэнергии установить в ШРС трехфазный учет  электроэнергии с применением электросчетчиков полукосвенного включения  (с ТТ).  

 Установить после прибора учета коммутационный аппарат,  обеспечивающий самостоятельное выполнение заявителем фактического  присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье».  

 Мероприятия по реализации технических условий исполнить до точки  присоединения энергопринимающих устройств заявителя.  

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>) в пользу ООО «Экситон» (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) 6 000 руб. гос. пошлины и денежные средства в размере 1 000  

руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с даты вступления  

решения суда в законную силу и до момента фактического исполнения. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со  дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный  суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  его в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.А.Левашова