Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-7224/2019

29 октября 2021 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 23.09.2021

Полный текст решения изготовлен 29.10.2021

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Аванта» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «Саханефтегазсбыт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 318 872 711,09 руб.,

от истца: ФИО2 – по доверенности от 20.07.2021 (диплом ВСВ 0846267 рег.№05/идо-ю от 11.08.2004);

от ответчика: ФИО3 – по доверенности от 31.12.2020 № ЮР-9 (удостоверение адвоката №757 рег. №14/665 от 19.06.2015),

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Аванта» обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к акционерному обществу «Саханефтегазсбыт» о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 329 659 168,10 руб. Как указывает истец, в ходе выполнения работ систематически вносились изменения в проект в части увеличения объемов и видов выполняемых работ, возникали дополнительные работы, непредусмотренные техническим заданиями, но непосредственно связанные и необходимые для полного и последующего выполнения всего комплекса работ, сдачи объекта в эксплуатацию. 

Ответчик с иском не согласен. Возражая по иску АО «Саханефтегазсбыт» указывает, что истец вправе требовать оплату за выполненные работы в пределах твердой цены, установленной договором. При этом ответчик считает, что произвел 100 % оплату аванса, в связи с чем обязательства заказчика в части оплаты отсутствуют. Часть работ ответчик относит к дополнительным, отсутствующим в проектной документации и не относящимся ни к договорам подряда, ни к объекту емкостного парка филиала «Ленская нефтебаза».

Судом установлено следующее.

28.12.2016 между АО «Саханефтегазсбыт» (заказчик) и ООО «СеверСТрой» (подрядчик) заключен договор № 07-07/328 на строительство объекта «под ключ».

В соответствии с пунктом 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала «Ленская нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт» (1 очередь) Технологические объекты и коммуникации. Противопожарная насосная», по адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к договору), а заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях настоящего договора.

Согласно пунктам 2.1, 2.2 общая стоимость выполняемых работ по объекту составляет 90 321 111,76 руб., в том числе НДС; цена договора должна включать в себя стоимость всех выполняемых подрядчиком работ, затраты на перебазировку техники, электроснабжение, содержание вахтового поселка, командировочные расходы, прочие затраты и затраты, связанные с выполнением работ и параметрами, определенными  техническим заданием заказчика (приложение № 1 к договору), проектной документацией, условиями настоящего договора, а также расходы по уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей;

28.12.2016 между ООО «Аванта» (поручитель) и АО «Саханефтегазсбыт» (кредитор) заключен договор поручительства № 1-П (т.20 л.д. 54-55).

В пункте 1.1 договора поручительства указано, что в обеспечение исполнения обязательств, принятых ООО «СеверСтрой» (далее по тексту – должник) по договору от 28.12.2016 № 07-07/128 на строительство объекта под «ключ» (далее – Основной договор), заключенному между Должником и кредитором, поручитель обязуется нести солидарную с должником ответственность за исполнение должником его обязательств перед кредитором полностью.

Согласно пункту 2.1 договора поручительства, в соответствии с пунктом 1.1 Основного договора предметом Основного договора является выполнение подрядных работ по строительству объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала «Ленская нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт» (1 очередь) технологические объекты и коммуникации. Противопожарная насосная», расположенная по адресу:  Россия, Республика Саха (Якутия), 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Основному договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (приложение № 2 к Основному договору), в заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях основного договора.

Срок выполнения обязательств по Основному договору составляет 31.12.2017.

В соответствии с пунктом 4.1 договора поручитель отвечает перед кредитором за выполнение обязательства должником по Основному договору на сумму 90 321 111,76 руб., а также за уплату всех пеней, штрафов и неустойки, предусмотренных Основным договором. 

30.07.2015 между ОАО «Саханефтегазсбыт» (заказчик) и ООО «СеверСтрой» (подрядчик) заключен договор № 07-07/142 на строительство объекта «под ключ». В соответствии с пунктом 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала Ленская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт». (1 очередь) по адресу: Россия, 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), а заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях настоящего договора. 

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ определена по итогам проведенного запроса предложений на выполнение работ по строительств объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала Ленская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт». (1 очередь) и составляет 25 474 879,17 руб. с учетом НДС 18 %. 

Дополнительным соглашением № 2 от 08.07.2016 заказчик и подрядчик в связи с возникновением дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием, определили стоимость дополнительных работ в сумме 7 270 501,15 руб.

23.12.2016 между ООО «Аванта» (поручитель) и АО «Саханефтегазсбыт» (кредитор) заключен договор поручительства № 2-П.

В пункте 1.1 договора указано, что в обеспечение исполнения обязательств, принятых ООО «СеверСтрой» (далее по тексту – должник) по договору от 30.07.2015 № 07-07/142 на строительство объекта под «ключ», заключенному между должником и кредитором, поручитель обязуется нести солидарную с должником ответственность за исполнение должником его обязательств перед кредитором полностью.

Согласно пункту 2.1 договора поручительства в соответствии с пунктом 1.1 Основного договора предметом Основного договора является выполнение подрядных работ по строительству объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала «Ленская нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт» (1 очередь) по адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Основному договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к Основному договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях Основного договора. 

Срок выполнение обязательств по Основному договору составляет 31.12.2017.

Согласно пункту 4.1 договора поручительства поручитель отвечает перед кредитором за выполнение обязательства должником по Основному договору на сумму 32 745 380,32 руб., а также уплату всех пеней, штрафов и неустойки, предусмотренных Основным договором.

30.07.2015 между ОАО «Саханефтегазсбыт» (заказчик) и ООО «СеверСтрой» (подрядчик) заключен договор № 07-07/141 на строительство объекта «под ключ».

В соответствии с пунктом 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала Ленская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт». (1 очередь) по адресу: Россия, 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), а заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях настоящего договора. 

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ определена по итогам проведенного запроса предложений на выполнение работ по строительств объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала Ленская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт». (1 очередь) и составляет 28 343 026,01 руб.

Дополнительным соглашением № 2 от 08.07.2016 стороны в связи с возникновением дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием определили стоимость дополнительных работ в сумме 7 279 501,15 руб.

28.12.2016 между ООО «Аванта» (поручитель) и АО «Саханефтегазсбыт» (кредитор) заключен договор поручительства № 3-П.

В пункте 1.1 договора указано, что в обеспечение исполнения обязательств, принятых ООО «СеверСтрой» (далее по тексту – должник) по договору от 30.07.2015 № 07-07/141 на строительство объекта под «ключ», заключенному между должником и кредитором, поручитель обязуется нести солидарную с должником ответственность за исполнение должником его обязательств перед кредитором полностью.

Согласно пункту 2.1 договора поручительства в соответствии с пунктом 1.1 Основного договора предметом Основного договора является выполнение подрядных работ по строительству объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала «Ленская нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт» (1 очередь) по адресу:  Россия, Республика Саха (Якутия), 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Основному договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к Основному договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях Основного договора. 

Срок выполнение обязательств по Основному договору составляет 31.12.2017.

В пункте 4.1 договора указано, что поручитель отвечает перед кредитором за выполнение обязательства должником по основному договору на сумму 35 613 527,15 руб., а также на уплату всех пеней, штрафов и неустойки, предусмотренных основным договором.

23.04.2015 между ОАО «Саханефтегазсбыт» (заказчик) и ООО «СеверСтрой» (подрядчик) заключен договор № 07-07/80 на строительство объекта «под ключ» от 23.04.2015.

В соответствии с пунктом 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить порядные работы по строительству объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала Ленская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт». (Вертикальная планировка) по адресу: Россия, 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), а заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях настоящего договора. 

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ определена по итогам проведенного запроса предложений на выполнение работ по строительств объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала Ленская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт». (Вертикальная планировка) и составляет 59 030 856,88 руб. Дата окончания выполнения работ – 20.08.2015.

Дополнительным соглашением № 1 от 17.05.2016 стороны согласовали стоимость дополнительных работ в сумме 40 602 019,51 руб., дату окончания выполнения работ определили ка 30.08.2016. 

30.01.2017 между ООО «Аванта» (поручитель) и АО «Саханефтегазсбыт» (кредитор) заключен договор поручительства № 4-П.

В соответствии с пунктом 1.1 договора в обеспечение исполнения обязательств, принятых ООО «СеверСтрой» (далее по тексту – должник) по договору от 23.04.2015 № 07-07/80 на строительство объекта под «ключ», заключенному между должником и кредитором, поручитель обязуется нести солидарную с должником ответственность за исполнение должником его обязательств перед кредитором полностью.

Согласно пункту 2.1 договора поручительства в соответствии с пунктом 1.1 Основного договора предметом Основного договора является выполнение подрядных работ по строительству объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала «Ленская нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт» (1 очередь) по адресу:  Россия, Республика Саха (Якутия), 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Основному договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к Основному договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях Основного договора. 

Срок выполнение обязательств по Основному договору составляет 31.12.2017.

В пункте 4.1 договора указано, что поручитель отвечает перед кредитором за выполнение обязательства должником по основному договору на сумму 99 632 875,88 руб., а также на уплату всех пеней, штрафов и неустойки, предусмотренных основным договором.

02.03.2017 между АО «Саханефтегазсбыт» (заказчик) и ООО «Аванта» (подрядчик) заключен договор № 07-07/п на строительство объекта «под ключ». 

В соответствии с пунктом 1.1. договора подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала «Ленская нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт» (1 очередь) Технологические объекты и коммуникации. Противопожарная насосная», по адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к договору), а заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях настоящего договора.

Согласно пунктам 2.1, 2.2, 2.3 общая стоимость выполняемых работ по объекту составляет 90 321 111,76 руб., в том числе НДС; цена договора включает в себя стоимость всех выполняемых подрядчиком работ, затраты на перебазировку техники, электроснабжение, содержание вахтового поселка, командировочные расходы, прочие затраты и затраты, связанные с выполнением работ и параметрами, определенными  техническим заданием заказчика (приложение № 1 к договору), проектной документацией, условиями настоящего договора, а также расходы по уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей; заказчиком произведена оплата аванса по договору № 07-07/328 от 28.12.2016 в размере 51 001 903,36 руб.

Сроки выполнения работ по договору определены в пункте 3.1. Дата окончания выполнения работ 31.12.2017 с приемкой объекта по акту приемки законченного строительством объекта (формы КС-11).

Сторонами подписаны справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.11.2017 и акт о приемке выполненных работ № 1 на сумму 57 942 415,08 руб.

02.03.2017 между АО «Саханефтегазсбыт» (заказчик) и ООО «Аванта» (подрядчик) заключен договор № 07-07/2п на строительство объекта «под ключ». 

В соответствии с пунктом 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиал «Ленская нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт» (1 очередь), по адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к договору), а заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях настоящего договора.

Общая стоимость выполняемых работ по объекту составляет 32 745 380,32 руб., в том числе НДС (п.2.1 договора). Цена договора включает в себя стоимость всех выполняемых подрядчиком работ, затраты на перебазировку техники, электроснабжение, содержание вахтового поселка, командировочные расходы, прочие затраты и затраты, связанные с выполнением работ и параметрами, определенными  техническим заданием заказчика (приложение № 1 к договору), проектной документацией, условиями настоящего договора, а также расходы по уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей (п.2.2 договора). В пункте 2.3 договора указано, что заказчиком произведена оплата 100 % аванса по договору № 07-07/142 от 30.07.2015 в размере 32 745 380,32 руб., в связи с чем, обязательство заказчика по оплате по настоящему договору отсутствует. В случае изменения объемов работ, по согласованию сторонами, возможно изменение стоимости работ только на основании подписанного дополнительного соглашения. Работы, выполненные свыше установленных настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему, не подлежат оплате.

Сроки выполнения работ определены в пункте 3.1 договора. Начало выполнения работ по договору – с момента заключения договора (п.3.1.2). Дата окончания выполнения работ 31.12.2017, с приемкой объекта по акту приемки законченного строительством объекта (формы КС-11).

Срок выполнения работ отдельных этапов определяется графиком производства работ (Приложение № 2 к договору).  

Сторонами договора подписаны справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.03.2017 на сумму 30 485 662,89 руб., справка о стоимости выполненных работ  и затрат № 2 от 30.11.2017 на сумму 2 259 717,43 руб.

02.03.2017 между АО «Саханефтегазсбыт» (заказчик) и ООО «Аванта» (подрядчик) заключен договор № 07-07/3п на строительство объекта «под ключ».

В соответствии с п.1.1 договора подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала «Ленская нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт» (1 очередь) по адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к договору), а заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях настоящего договора.

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость выполняемых работ по объекту составляет 35 613 527,15 руб., в том числе НДС. Цена договора включает в себя стоимость всех выполняемых подрядчиком работ, затраты на перебазировку техники, электроснабжение, содержание вахтового поселка, командировочные расходы, прочие затраты и затраты, связанные с выполнением работ и параметрами, определенными  техническим заданием заказчика (приложение № 1 к договору), проектной документацией, условиями настоящего договора, а также расходы по уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей (п.2.2 договора).  

В пункте 2.3 договора стороны оговорили, что заказчиком произведена оплата 100 % аванса по договору № 07-07/141 от 30.07.2015 в 35 613 527,15 руб., в связи с чем, обязательство заказчика по оплате по настоящему договору отсутствует. В случае изменения объемов работ, по согласованию сторонами, возможно изменение стоимости работ только на основании подписанного дополнительного соглашения. Работы, выполненные свыше установленных настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему, не подлежат оплате.     

Сроки выполнения работ определены в пункте 3.1 договора. Начало выполнения работ по договору – с момента заключения договора (п.3.1.2). Дата окончания выполнения работ 31.12.2017, с приемкой объекта по акту приемки законченного строительством объекта (формы КС-11).

Срок выполнения работ отдельных этапов определяется графиком производства работ (Приложение № 2 к договору).  

Сторонами подписаны справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.03.2017 на сумму 35 613 527,15 руб.

02.03.2017 между АО «Саханефтегазсбыт» (заказчик) и ООО «Аванта» (подрядчик) заключен договор № 07-07/4п на строительство объекта «под ключ».

В соответствии с пунктом 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта «Техническое перевооружение емкостного парка филиала «Ленская нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт» (1 очередь) по адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к договору), а заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком, на условиях настоящего договора.

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость выполняемых работ по объекту составляет 99 632 875,88 руб. Цена договора включает в себя стоимость всех выполняемых подрядчиком работ, затраты на перебазировку техники, электроснабжение, содержание вахтового поселка, командировочные расходы, прочие затраты и затраты, связанные с выполнением работ и параметрами, определенными  техническим заданием заказчика (приложение № 1 к договору), проектной документацией, условиями настоящего договора, а также расходы по уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей (п.2.2 договора).  

В пункте 2.3 договора заказчиком произведена оплата 100 % аванса по договору № 07-07/80 от 23.04.2015 в 99 632 875,88 руб., в связи с чем, обязательство заказчика по оплате по настоящему договору отсутствует. В случае изменения объемов работ, по согласованию сторонами, возможно изменение стоимости работ только на основании подписанного дополнительного соглашения. Работы, выполненные свыше установленных настоящим договором  дополнительными соглашениями к нему, не подлежат оплате.  

Сроки выполнения работ определены в пункте 3.1 договора. Начало выполнения работ по договору – с момента заключения договора (п.3.1.2). Дата окончания выполнения работ 31.12.2017, с приемкой объекта по акту приемки законченного строительством объекта (формы КС-11).

Срок выполнения работ отдельных этапов определяется графиком производства работ (Приложение № 2 к договору).  

Сторонами подписаны справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.03.2017 на сумму 99 632 875,88 руб., акт о приемке выполненных работ на сумму 99 632 875,88 руб.

Фактически выполненные работы были отражены ОАО «Аванта» в актах приемки выполненных работ, акты приемки выполненных работ на сумму 329 659 168,10 руб. направлены заказчику для подписания (т.1 л.д.104-105. Акты получены заказчиком, но от их принятия и полной оплаты выполненных работ заказчик отказался письмом от 24.06.2019 № 07-05-2639 (т.1 л.д.106-107).

В связи с отказом заказчика ООО «Аванта» обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием возникновения гражданских прав и обязанностей являются, в том числе и договоры.

Заключенные между сторонами договоры являются договорами подряда на выполнение работ, правоотношения сторон по которому регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Строительные работы обладают особой спецификой, складывающейся в сфере строительства, которая в силу своего существа создает возможность выявления в ходе исполнения обязательства как дополнительных работ, так и работ исполнение которых не представляется возможным в силу принятия подрядчиком или заказчиком технических (проектных) решений на стадии фактического исполнения работ а также наличия в проектной документации недостатков.

Отношения, складывающиеся в сфере строительства, создают возможность выявления в ходе исполнения обязательства дополнительных работ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения готовности и годности результата.

К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком могут быть отнесены исключительно те работы, которые, исходя из имеющейся информации на момент подготовки документации и заключения контракта объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

В предмет судебного исследования по требованию о взыскании стоимости дополнительных работ, выполненных с превышением цены договора, входят следующие обстоятельства:

- согласование выполнения таких работ с заказчиком,

- необходимость выполнения таких работ для обеспечения годности и прочности их результата,

- факт выполнения, сдачи дополнительных работ и приемка их заказчиком без замечаний.

Истцом в подтверждение доводов о том что об увеличении объемов работ заказчику было известно, все объемы заказчиком освидетельствованы, согласованы и приняты, представлены акты освидетельствования скрытых работ (т.17 л.д. 69-150, т. 8 л.д.1-150, т. 9. л.д.1-150, т.10 л.д.1-150, т.11 л.д.1-150, т.12 л.д.1-96).

Также судом было назначено проведение судебной строительно-технической экспертизы.

Определением суда от 03.08.2020 было удовлетворено ходатайство истца о назначении судебной строительно-технической экспертизы. Проведение экспертизы поручено эксперту АНО «Сибирский центр судебных экспертиз и исследований» ФИО4. Перед экспертом поставлены следующие вопросы:

1. Соответствуют ли объемы выполненных работ составленному и подписанному сторонами техническому заданию (приложение №1 к Договорам подряда) к Договорам подряда №№ 07-07/П от 02.03.2017, № 07-07/2П от 02.03.2017, № 07-07/ЗП от 02.03.2017, № 07-07/4П от 02.03.2017?

2. Определить объемы выполненных работ и их стоимость включенных ООО «АВАНТА» в формы КС-2, КС-3, которые уже приняты и оплачены ответчиком ранее в рамках исполнения договоров подряда №№ 07-07/П от 02.03.2017, № 07-07/2П от 02.03.2017, № 07-07/3П от 02.03.2017, № 07-07/4П от 02.03.2017.

3.      Определить объемы и фактическую стоимость дополнительных работ ООО «АВАНТА», которые не вошли в договоры подряда №№ 07-07/П от 02.03.2017, № 07-07/2П от 02.03.2017, № 07-07/3П от 02.03.2017, № 07-07/4П от 02.03.2017 в ценах на момент выполнения указанных работ с выделением НДС и соответствует ли исполнительной документации и формам (КС-2, КС-3).

4.      Являлись ли дополнительные работы, отраженные ООО «АВАНТА» в формах (КС-2 и КС-3) необходимыми и безотлагательными для выполнения подрядных работ, предусмотренных Договорами подряда №№ 07-07/П от 02.03.2017, № 07-07/2П от 02.03.2017, № 07-07/ЗП от 02.03.2017, № 07-07/4П от 02.03.2017.

5.      Какова номенклатура, объем и стоимость давальческих материалов (оборудования) переданных Заказчиком и использованные ООО «АВАНТА» при производстве работ в рамках исполнения Договоров подряда №№ 07-07/П от 02.03.2017, № 07-07/2П от 02.03.2017, № 07-07/ЗП от 02.03.2017, № 07-07/4П от 02.03.2017?

6.      Какова номенклатура, объем и стоимость давальческих материалов (оборудования) переданных Заказчиком, но не использованных ООО «АВАНТА» при производстве работ в рамках исполнения Договоров подряда №№ 07-07/П от 02.03.2017, № 07-07/2П от 02.03.2017, № 07-07/ЗП от 02.03.2017, № 07-07/4П от 02.03.2017?

7.      Какие виды работ, включенные в исполнительную документацию и в формы (КС-2 и КС-3), выполнялись непосредственно ООО «АВАНТА» и каковы их объем и стоимость. Какие виды работ были выполнены ООО «СеверСтрой»?

По дополнительным работам:

1.      Установка узлов коммерческого учета нефтепродуктов на причалах филиала «Ленская нефтебаза».

2.      Бурение скважин под ЛЭП-0,4 кВ на территории филиала «Ленская нефтебаза».

3.      Замена оконных блоков.

4.      Устройство фасада филиала «Ленская нефтебаза».

1. Являются ли работы, указанные в исполнительной документации и формах (КС-2  и  КС-3),  представленные  ООО  «АВАНТА»,  дополнительными  и технологически связанными с выполнением основных работ по договорам подряда№№ 07-07/П от 02.03.2017 года, № 07-07/2П от 02.03.2017 года, № 07-07/ЗП от 02.03.2017 года, № 07-07/4П от 02.03.2017 года, либо они являются самостоятельными работами?

2. В случае выполнения ООО «АВАНТА» видов работ, указанных в

исполнительной документации и формах (КС-2 и КС-3), являлись ли данные

работы необходимыми и безотлагательными для выполнения всего комплекса

строительных работ по договорам подряда по объекту «Техническое

перевооружение емкостного парка филиала «Ленская нефтебаза»»?

3.      Какие виды работ, включенные в исполнительную документацию и в формы (КС-2 и КС-3), выполнялись непосредственно ООО «АВАНТА» и каковы их объем и стоимость. Какие виды работ были выполнены иными подрядными организациями?

4.      Имеется ли фактическое выполнение объемов работ, которые указаны в исполнительной документации и формах (КС-2 и КС-3) представленных ООО «АВАНТА»?

5. Определить объем и стоимость фактически выполненных дополнительных работ, указанных в исполнительной документации и формах (КС-2 и КС-3), представленных ООО «АВАНТА» в ценах на момент выполнения указанных работ с выделением НДС.

6. Выполнены ли работы, указанные в исполнительной документации и формах (КС-2 и КС-3), представленных ООО «АВАНТА», в соответствии с проектной документацией объекта?

В результате проведенной экспертизы, эксперт пришел к следующим выводам.

Установить достоверно соответствуют ли объемы выполненных работ составленному и подписанному сторонами техническому заданию (приложение № 1 к договорам подряда) без проведения большого объема обмерных работ, выборочного или сплошного использования методов разрушающего контроля (вскрытие конструкций и ЛКП, устройство шурфов и т.п.), использования специальной техники, что приведет к выводу из строя отдельных конструкций, не представляется возможным.

Исходя из камерального анализа документов объемы выполненных работ не соответствуют составленному и подписанному сторонами технических заданий в части работ, отмеченных в таблицах № 10, 11, 12, 13 заключения – исходя из технологии производства работ и фактически выполненного объема работ отдельные объемы работ исключены или заменены на аналогичные, отдельные объемы работ увеличены или уменьшены, отдельные виды работ учтены дополнительно.

Отвечая на  второй вопрос, эксперт привел сравнение стоимости выполенных работ в ценах по состоянию на 2015 г., включенных ООО «Аванта» в формы КС-2, КС-3, которые уже приняты и оплачены ответчиком ранее в рамках исполнения договоров подряда № 07-07/П, 07-07/2П, 07-07/3П, 07-07/4А от 02.03.2017, отметив, что в акте КС-2, неподписанные ОАО «Саханефтегазсбыт» не включена стоимость выполненных работ по монтажу 8 шт. резервуаров 1.1.1-.1.18 объемом 3 000 куб.м на общую сумму 50 949 758,33 руб. (25 474 879,17 руб. по договору подряда № 07-07/2П от 02.03.2017 + 25 474 879,17 руб. по договору подряда № 07-07/3П от 02.03.2017).

Отвечая на вопрос 3, эксперт указал, что объемы и фактическая стоимость дополнительных работ ООО «Аванта», которые не вошли в договоры подряда в ценах на момент выполнения указанных работ (04.2019) с выделением НДС, приведены в таблицах № 10,11, 12, 13 заключения. Общая стоимость выполненных работ определена экспертом в размере 365 606 257,68 руб.

Отвечая на четвертый вопрос, эксперт указал, что дополнительные работы, отраженные ООО «Аванта» в формах КС-2 и КС-3 являлись необходимыми и безотлагательными для выполнения подрядных работ, предусмотренных договорами подряда №№07-07/П от 02.03.2017, № 07-07/2П от 02.03.2017, № 07-07/3П от 02.03.2017, № 07-07/4П от 02.03.2017, за исключением работ «Технологические объекты и коммуникации 2 и 3 очереди», отмеченные в таблице № 10 заключения.

Отвечая на пятый и шестой вопросы, эксперт указал, что установить достоверно какова номенклатура, объем и стоимость давальческих материалов (оборудования), переданных заказчиком и использованных ООО «Аванта» при производстве работ не представляется возможным, как и материалов, переданных, но не использованных.     

Эксперт указал, что не представляется возможным установить достоверно, какие виды работ были выполнены ООО «СеверСтрой».

В части таких дополнительных работ, как установка узлов коммерческого учета нефтепродуктов на причалах филиала «Ленская нефтебаза», бурение скважин под ЛЭП-0,4 кВ на территории филиала «Ленская нефтебаза», замена оконных блоков, устройство фасада филиала «Ленская нефтебаза», эксперт указал, что данные работы являются самостоятельными и не являются дополнительными и технологически связанными с выполнением основных работ по договорам подряда №№07-07/П от 02.03.2017, № 07-07/2П от 02.03.2017, № 07-07/3П от 02.03.2017, № 07-07/4П от 02.03.2017.

Истец с учетом выводов экспертного заключения, а также принимая в части доводы ответчика об оплате, уменьшил размер исковых требований до 318 872 711,09 руб.

Ответчиком были заявлены ходатайства о проведении повторной и дополнительной экспертизы, которые были судом отклонены.

Экспертным заключением подтверждается, что работы по установке узлов коммерческого учета нефтепродуктов на причалах филиала «Ленская нефтебаза», бурение скважин под ЛЭП-0,4 кВ на территории филиала «Ленская нефтебаза», замена оконных блоков, устройство фасада филиала «Ленская нефтебаза» не входили в предмет заключенных сторонами договоров подряда, поэтому не являются дополнительными по отношению к договорным работам. Анализ характера работ позволяет сделать вывод, что спорные работы являются самостоятельными. Следовательно, нормы пунктов 3 и 4 статьи 743 ГК РФ не подлежат применению к результатам спорных работ (постановление Президиума ВАС РФ от 20.09.2011 N 1302/11).

Требования истца в данной части удовлетворению не подлежат.

В остальной части суд приходит к выводу о том, что подтверждается факт выполнения работ стоимостью 365 606 257,68 руб.

Выводы эксперта надлежащими доказательствами не опровергнуты.

На основании статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от их исполнения не допускается.

Согласно пункту 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" указанная норма (пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации) означает, что оформленный в таком порядке акт является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.

Определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком.

Учитывая изложенное, поскольку факт получения ответчиком актов выполненных работ подтверждается материалами дела, однако отказ от его подписания не мотивирован, требования истца обоснованы.

АО «Саханефтегазсбыт», возражая по иску, приводит доводы об оплате выполненных работ. Ответчиком в материалы дела представлены платежные поручения и соглашения о проведении взаимных расчетов (т.13 л.д. 145-147, т.14 л.д. 1-97).

Анализ представленных документов позволяет прийти к выводу об оплате на сумму 262 281 265,61 руб.

Выполнение работ ООО «Аванта» обусловлено наличием договоров поручительства в обеспечение принятых аналогичных обязательств по выполнению работ ООО «СеверСтрой».

Так, ООО «СеверСтрой» от АО «Саханефтегазсбыт» получено 218 764 468,06 руб. 

По договору №07-07/328 (договор № 07-07/П между ООО «Аванта» и АО «Саханефтегазсбыт») получено 51 001 903,31 руб.:

- соглашение о зачете № 118 на сумму 41 001 903,36 руб.;

- соглашение о зачете № 119 от 28.12.2016 на сумму 5 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 5 от 26.12.2016 на сумму 5 000 000 руб.

Кроме того, соглашением о проведении взаимных расчетов № 09 от 09.03.2017 засчитан авансовый платеж на сумму 16 000 000 руб. Однако соглашением № 80/2 от 29.09.2017 АО «Саханефтегазсбыт» засчитан возврат аванса на 16 000 000 руб. 

По договору № 07-07/142 (договор № 07-07/2П) между ООО «Аванта» и АО «Саханефтегазсбыт») ООО «СеверСтрой» получено 27 745 380,31 руб.:

- соглашение о зачете № 87 от 31.07.2015 на сумму 8 676 561,95 руб.;

- платежное поручение № 8045 от 06.08.2015 на сумму 5 668 605,20 руб.;

- платежное поручение № 8254 от 11.08.2015 на сумму 9 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 84 от 01.09.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 82 от 26.09.2016 на сумму 2 270 501,15 руб.

Соглашением № 87 от 07.09.2015 уменьшена сумма авансового платежа ООО «СеверСтрой» по договору подряда №07-07/142 от 30.07.2015 на сумму 2 870 287,99 руб. 

По договору № 07-07/141 (договор № 07-07/3П между ООО «Аванта» и АО «Саханефтегазсбыт») ООО «СеверСтрой» получено 40 613 527,15 руб.:

-  платежное поручение № 7937 от 14.07.2015 на сумму 5 094 975,83 руб.;

- соглашение о зачете № 87 от 31.07.2015 на сумму 8 676 561,95 руб.;

- платежное поручение № 8253 от 11.08.2015 на сумму 10 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 87 от 07.09.2015 на сумму 2 870 287,99 руб.;

- соглашение о зачете № 89 от 17.09.2015 на сумму 734 795,85 руб.;

- платежное поручение № 937258 от 23.08.2015 на сумму 3 500 000 руб.;

- платежное поручение № 937259 от 23.08.2015 на сумму 1 000 000 руб.;

- платежное поручение № 937322 от 24.08.2016 на сумму 5 500 000 руб.;

- соглашение о зачете № 82 от 26.09.2016 на сумму 3 236 905,53 руб.;

По договору подряда № 07-07/80 (договор №07-07/4П между ООО «Аванта» и АО «Саханефтегазсбыт») ООО «СеверСтрой» получено 99 403 657,24 руб.:

- соглашение о зачете № 22 от 26.04.2015 на сумму 1 000 000 руб.;

- платежное поручение № 4624 от 30.04.2015 на сумму 3 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 45 от 13.05.2015 на сумму 1 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 26 от 17.05.2015 на сумму 15 000 000 руб.;

- платежное поручение № 5180 от 18.05.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 49 от 25.05.2015 на сумму 2 101 180 руб.;

- соглашение о зачете № 50 от 26.05.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 51 от 27.05.2015 на сумму 14 921 504,05 руб.;

- платежное поручение № 5512 от 29.05.2015 на сумму 10 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 53 от 08.06.2015 на сумму 5 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 58 от 22.06.2015 на сумму 500 000 руб.;

- соглашение о зачете № 61 от 25.06.2015 на сумму 74 787,14 руб.;

- платежное поручение № 6737 от 03.07.2015 на сумму 3 000 000 руб.;

- платежное поручение № 6723 от 02.07.2015 на сумму 3 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 70 от 16.07.2015 на сумму 3 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 86 от 07.09.2015 на сумму 3 363 193,74 руб.;

- соглашение о зачете № 27 от 24.05.2016 на сумму 25 740 000 руб.;

- соглашение о зачете № 32 от 06.06.2016 на сумму 7 270 501,15 руб.;

- соглашение о зачете № 35 от 24.06.2016 на сумму 378 065 руб.;

- соглашение о зачете № 56 от 26.07.2016 на сумму 5 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 57 от 29.07.2016 на сумму 20 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 82 от 26.09.2016 на сумму 1 158 554,64 руб.;

- соглашение о зачете № 89 от 30.09.2016 на сумму 5 318 289,60 руб.;

Соглашением о зачете № 82 от 26.09.2016 засчитана АО «Саханефтегазсбыт» оплата на сумму 330 662,22 руб. от ООО «СеверСтрой» по договору подряда № 07-07/80 от 23.04.2015. Соглашением о зачете № 118 от 26.12.2016 АО «Саханефтегазсбыт» засчитан возврат аванса по договору подряда № 07-07/80 от 23.04.2015 на сумму 40 091 795,86 руб. Следовательно, на указанные суммы оплата подлежит уменьшению.

ООО «Аванта» получено от АО «Саханефтегазсбыт» 43 516 797,55 руб.

Так, расчет между ООО «Аванта» и АО «Саханефтегазсбыт» произведены в рамках договора №07-07/П:

- платежное поручение № 153983 от 30.03.2017 на сумму 10 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 20 от 25.04.2017 на сумму 150 000 руб.;

- соглашение о зачете № 22 от 10.05.2017 на сумму 533 005 руб.;

- соглашение о зачете № 51 от 30.06.2017 на сумму 8 558 754,64 руб.;

- соглашение о зачете № 56 от 20.07.2017 на сумму 500 000 руб.;

- соглашение о зачете № 63 от 28.08.2017 на сумму 7 000 000 руб.;

- соглашение о зачете № 64 от 31.08.2017 на сумму 4 747 612 руб.;

- соглашение о зачете № 83 от 23.10.2017 на сумму 2 829 836,76 руб.;

- соглашение о зачете № 87 от 26.10.2017 на сумму 3 129 189,50 руб.;

- соглашение о зачете № 92 от 16.11.2017 на сумму 1 164 651 руб.;

- соглашение о зачете № 93 от 16.11.2017 на сумму 407 930,63 руб.;

- соглашение о зачете № 94 от 16.11.2017 на сумму 122 246 руб.;

- соглашение о зачете № 95 от 16.11.2017 на сумму 108 938,02 руб.;

- платежное поручение № 92922 от 17.11.2017 на сумму 1 800 000 руб.;

- соглашение о зачете № 03 от 24.01.2018 на сумму 441 208 руб.;

- соглашение о зачете № 19 от 26.03.2018 на сумму 1 588 000 руб.;

- соглашение о зачете № 52 от 13.07.2018 на сумму 200 000 руб.;

- соглашение о зачете № 53 от 13.07.2018 на сумму 135 426 руб.;

- соглашение о зачете № 66 от 05.09.2018 на сумму 100 000 руб.

Итого за выполненные работы получено 262 281 265,61 руб.

В остальной части доводы АО «Саханефтегазсбыт» об оплате подлежат отклонению, как необоснованные.

Не находят своего подтверждения и доводы ответчика о передаче заказчиком материалов и оборудования.

В соответствии со статьей 704 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. 

Условия договоров подряда не предусматривают передачу материалов, оборудования заказчиком.

Учитывая, что результаты работ переданы заказчику подрядчиком, принимая во внимание недоказанность факта использования при строительстве объекта давальческих материалов, с учетом стоимости работ 365 606 257,68 руб. исковые требования подлежат удовлетворению в части – 103 324 992,07 руб.  

При обращении в суд истцом уплачена государственная пошлина в размере 200 000 руб. Также ООО «Аванта» понесены расходы по оплате проведения судебной строительно-технической экспертизы в размере 280 000 руб.

Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу абзаца 2 части 1 статьи 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  поскольку исковые требования удовлетворены в части (32,40%) с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 64 800 руб., расходы по оплате проведения судебной экспертизы 90 720 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить в части.

Взыскать с акционерного общества «Саханефтегазсбыт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Аванта» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 113 324 992,07 руб., расходы по оплате проведения судебной строительно-технической экспертизы в размере 99 512 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 71 080 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

 

Судья

                          В.С.Терских