РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 

16.08.2017 года                                                           Дело № А40-73024/17-110-692

Резолютивная часть решения объявлена 09.08.2017 года 

Решение в полном объеме изготовлено 16.08.2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (ОГРН 

<

***>, 170100, 

<

...>) к акционерному обществу «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ОГРН 

<

***>, 123104, 

<

...>) о взыскании 824 960,51 рублей,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от  31.12.2016 №12/2017

от ответчика - не явился, 

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Научно-исследовательский институт информационных технологий» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к акционерному обществу «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» о взыскании задолженности в размере 683 994 руб. 51 коп., неустойки в размере 140 966 руб. 00 коп. на основании договора №101/07-14 от 29.01.2014г.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, а также о рассмотрении спора по существу в случае его неявки и в отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в I инстанции, в заседание не явился, возражений против открытия судебного заседания в I инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не заявил. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд рассмотрел спор в его отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 29 января 2014 года между Истцом (Исполнитель) и Ответчиком (Заказчик) был заключен контракт № 101/07-14 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы шифр «Заря-СКС-НИИИТ» (далее - контракт).

Контракт заключен сторонами в рамках государственного контракта от 05.05.2011 №07001181 на выполнение ОКР шифр «Заря-СКС», заключенного между Ответчиком и Министерством обороны Российской Федерации.

Содержание, этапы и сроки выполнения составной части опытно-конструкторской работы в соответствии с условиями заключенного контракта (пункт 2.2) утверждены сторонами в ведомости исполнения работ.

29 января 2014 года между Истцом (Исполнитель) и Ответчиком (Заказчик) был заключен контракт № 101/07-14 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы шифр «Заря-СКС-НИИИТ» (далее - контракт).

Контракт заключен сторонами в рамках государственного контракта от 05.05.2011 №07001181 на выполнение ОКР шифр «Заря-СКС», заключенного между Ответчиком и Министерством обороны Российской Федерации.

Содержание, этапы и сроки выполнения составной части опытно-конструкторской работы в соответствии с условиями заключенного контракта (пункт 2.2) утверждены сторонами в ведомости исполнения работ.

В соответствии со статьями 708, 711, 778 Гражданского кодекса Российской Федерации, с требованиями ГОСТ РВ 15.203-2011, с пунктами 4.4, 5.1, 5.8, 6.3 Контракта приемка работ по Контракту и их оплата осуществляется поэтапно.

Спорный этап 1 контракта выполнен Истцом в полном соответствии с условиями Контракта, принят Ответчиком по Актам сдачи-приемки выполненных работ без каких-либо замечаний.

В адрес Ответчика 25.12.2014 в соответствии с условиями Контракта были направлены отчетные документы для закрытия работ по этапу 1 (исх. № 104-02/1756/1 от 25.12.2014).

Акты сдачи-приемки выполненных работ были подписаны со стороны Ответчика 25.12.2014 и направлены в адрес Истца 27.01.2015 (исх. № 0370 от 27.01.2015).

В соответствии с условиями Контракта (п.6.1) предельная стоимость работ, выполняемых по Контракту, составляет 5 000 000 руб. Цена каждого этапа СЧ ОКР «Заря-СКС-НИИИТ» устанавливается протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 4 к Контракту), который после подписания Сторонами является неотъемлемой частью Контракта. При этом модель цены этапа 1 - твердая фиксированная.

Сторонами 20.03.2014 был подписан протокол согласования цены на выполнение работ в рамках этапа 1 СЧ ОКР «Заря-СКС-НИИИТ» выполняемой по Контракту. Согласно данному Протоколу Стороны согласовали твердую фиксированную цену этапа 1 СЧ ОКР «Заря-СКС-НИИИТ» в размере 3 419 972 руб. 57 коп.

Согласно статье 769 Гражданского Кодекса РФ по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Согласно ст. 774 ГК РФ заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан: передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию; принять результаты выполненных работ и оплатить их.

АО «ЦНИИ ЭИСУ» перечислило АО «НИИИТ» авансовый платеж по этапу 1 Контракта в размере 2 735 978 руб. 06 коп., что подтверждается платежным поручением от 12.11.2014 № 261 и от 13.11.2014 №263.

Однако, окончательный расчет по спорному этапу Ответчиком не произведен.

По условиям пункта 6.8 Контракта (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2015 к Контракту) счета Исполнителя на расчет за выполненный этап 1 СЧ ОКР «Заря-СКС-НИИИТ» оплачиваются в течение 6 (шести) месяцев после подписанияСторонами Акта сдачи-приемки по этапу 1 СЧ ОКР «Заря-СКС-НИИИТ» и выполненияИсполнителем требований Контракта, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения окончательного расчета от Государственного заказчика за выполненный этап 3 ОКР «Заря-СКС», в рамках которого выполнялся этап 1 СЧ ОКР «Заря-СКС-НИИИТ».

Акт сдачи-приемки по этапу 1 СЧ ОКР «Заря-СКС-НИИИТ» подписан Сторонами 25.12.2014. 

Таким образом, Заказчик в срок до 25.06.2015 включительно должен был произвести окончательный расчет за выполненные работы по этапу 1 СЧ ОКР «Заря-СКС-НИИИТ» в размере 683 994 рублей 51 копейки.

Ответчик свои обязательства не исполнил, работы в срок в размере 683 994 руб. 51 коп. не оплатил, доказательств погашения задолженности не представил.

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удовлетворению.

Кроме того, в соответствии со ст. 330 ГК на основании п.8.6 договора с ответчика подлежат взысканию неустойка за каждый день просрочки в случае нарушения сроков оплаты принятой СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР). Размер неустойки установлен в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, от суммы задолженности за выполненную СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), что по расчету истца, проверенному судом, составляет 140 966 руб. 00 коп. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  акционерного общества  «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления»  в пользу акционерного общества «Научно-исследовательский институт информационных технологий» 683 994 руб. 51  коп.  задолженности, 140 966 руб. неустойки, 19 499  руб.  в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко