АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-195558/23-85-1591

г. Москва

04 сентября 2024 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе: Судьи Самодуровой К.С. при ведении протокола помощником судьи Савченковой К.С. рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛСР. ОБЪЕКТ-М" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

третье лицо: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕИМУЩЕСТВО" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об обязании произвести работы. при участии 

от истца – ФИО1 лично, ФИО2 по дов от 26.03.2024г., удостоверение  адвоката  

от ответчика - ФИО3 по дов от 11.07.2024г., дип. от 18.06.2005г.  от третьего лица – не явился, извещен;  

РЕШИЛ:

Обязать ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛСР. ОБЪЕКТ- М» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение 30 дней с момента вступления  в законную силу решения суда произвести ремонтные работы в доме по адресу 

<

...>, корп. І в целях устранения причин протечки на  потолке, намокания стен и пола в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, лот 4, помещение № 15 с кадастровым  номером: 77:05:0002004:6908, указанные в Заключении эксперта № 0018-24-А по  судебной строительно-технической экспертизе по делу № A40-195558/23-85-1591 от  26.06.2024г., а именно:  

для устранения протечек на потолке в комнатах № 1 и № 3 провести следующие  виды работ на кровле:  

 1. Демонтаж гранитного щебня фракцией 5-20 мм, толщ. 100мм;  

2. Демонтаж геоткани ТО 500г/м2; 3. Демонтаж панелей фасада жилого дома; 

4. Ремонт поврежденных мест размером до 150х150 мм ПВХ мембраной  

Logicroof V-RP 1,5 мм с предварительной просушкой, а также последующей  

обработкой жидким ПВХ; 5. Монтаж панелей фасада жилого дома; 6. Укладка геоткани 500г/м2; 7. Засыпка гранитного щебня фракцией 5-20мм, толщ. 100мм. На парапете: 1. Раскрепление мембраны с клипс крепёжной полосы; 

2. Заделка щелей между полосой и асадом жилого дома герметиком;  

3. Закрепление мембраны Logicroof V-RP 1,5 мм на клипсы крепёжной полосы;  Для устранения намокания стен и пола, трещины на стене в комнатах Nº 3и Nº 4  

провести следующие виды работ на отмостке: 1. Разборка дорожной плитки отмостки; 

2. Разборка бетонного основания толщ. 100 мм отбойным молотком;  3. Демонтаж пенополистирола толщ. 50мм;  

4. Устройство гидроизоляционного слоя (в 2 слоя) с заведением на стену; 5. Устройство пенополистирола толщ. 50мм; 6. Устройство бетонного основания толи. 100 мм; 7. Укладка дорожной плитки. В остальной части отказать. 

Взыскать с ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛСР. ОБЪЕКТ- 

М" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ИП ФИО1 ЛЮДМИЛА  

ЛЕОНИДОВНА (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы на  

проведение обследований в сумме 60 000 руб., а также расходы по оплате  

государственной пошлины в размере 6 000 руб. 

Возвратить ИП ФИО1 (ОГРНИП:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета РФ госпошлину в  

размере 6 541 (Шесть тысяч пятьсот сорок один) руб., перечисленную по платежному  

поручению № 579592 от 03.04.2024. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем  

подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья: К.С. Самодурова