Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-10829/2017

13 июня 2018 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 05 июня 2018 года

Полный текст решения изготовлен 13 июня 2018 года

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Белоновской Г. И., при ведении протокола секретарем судебного заседания Авксентьевой О.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью "Альянс-2005" (ИНН 1435166758, ОГРН 1061435001308) к администрации городского поселения "Поселок Чульман" Нерюнгринского района (ИНН 1434031420, ОГРН 1061434000100), при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика Нерюнгринской районной администрации (ИНН 1434027046, ОГРН 1031401720129),  администрации муниципального образования «Город Нерюнгри» (ИНН 1434031483, ОГРН 1061434000011) о взыскании 7 848 411, 60 рублей,

от истца: ФИО2 по доверенности, паспорту;

от ответчика: не явился, извещен;

от третьих лиц: не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Альянс-2005" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к администрации городского поселения "Поселок Чульман" Нерюнгринского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 7 848 411 руб. 60 коп. основного долга.

Определением суда от 28.02.2018 в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика привлечены Нерюнгринская районная администрация и администрация муниципального образования «Город Нерюнгри».

Суд в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации провел  судебное заседание в отсутствие ответчика и третьего лица.

До судебного заседания от третьего лица – Нерюнгринской районной администрации  в суд 04.06.2018 поступили дополнительные документы, от истца поступило возражение на отзыв ответчика, которые судом приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В судебном заседании представитель истца представил оригинал искового заявления, оригинал возражения на отзыв ответчика, оригинал письменных пояснений по проектной документации, оригинал письменных пояснений к исковому заявлению в части расчета цены иска с дополнительными документами, которые судом приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Исследовав материалы дела,  арбитражный суд установил следующее.

24 ноября 2015 года Нерюнгринская районная администрация, действующая от имени городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), именуемая в дальнейшем «Покупатель» на основании Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Чульман» органам местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» в области строительства в рамках реализации муниципальной адресной программы городского поселения «Поселок Чульман» «Переселение граждан да аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» от 06 марта 2015 № 03-14/02-7 (в редакции дополнительного соглашения от 10.09.2015 № 1) с одной стороны  и общество с ограниченной ответственностью «Альянс-2005», именуемое в дальнейшем «Продавец», в соответствии с п. 38, ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г, № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  на основании Договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса и договора аренды, зарегистрированного 03.11.2015 № 14-14/018-14/018/2015-5409/2, заключили муниципальный контракт № 46. 

Согласно п. 1.1. муниципального контракта, продавец на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Чульман, пересечение ул. О. Кошевого и ул. 35 лет Якутии, кадастровый номер: 14:19:208014:516, площадью - 11966 кв. м. обязуется построить и передать 96 (девяносто шесть) жилых помещений (квартир), общей площадью 4321,52 (четыре тысячи триста двадцать один целых пятьдесят две сотых) кв.м. в трехэтажных 24-ти квартирных жилых домах, общей площадью четырех жилых домов 5670,84 (пять тысяч шестьсот семьдесят целых восемьдесят четыре сотых) кв.м. согласно Перечня жилых помещений (квартир) (приложение № 1 к Контракту) и Техническому заданию (приложение № 2 к Контракту) в порядке и на условиях Контракта, а покупатель обязуется принять в собственность городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) и оплатить жилые помещения (квартиры) по цене и на условиях, определенных Контрактом. При этом жилые помещения подлежат оформлению в собственность городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

В соответствии с п. 1.2. муниципального контракта контракт заключается на основании Договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса и договора аренды, зарегистрированного 03.11.2015 № 1414/018-14/018/2015-5409/2 по которому продавец является единственным участником аукциона по протоколу о результатах аукциона на право заключения договора об освоении территории  в целях строительства жилья экономического класса от 02.10.2015.

Покупатель по настоящему контракту действует от имени городского поселения  «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на основании соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления юродского поселения «Поселок Чульман» органам местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» в области строительства в рамках реализации муниципальной адресной программы городского поселения «Поселок Чульман» «Переселение граждан аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» от 06 марта 2015 № 03-14/02-7 (в редакции дополнительного соглашения от 10.09.2015 № 1) во исполнение, которого собственность на приобретенные у продавца жилые помещения возникает у городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

Согласно п. 2.1. муниципального контракта цена контракта составляет 248 076 855,60 руб., в том числе НДС 37 842 232,21 руб.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения Договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса составляет 57 405 руб.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Стоимость 1 кв. м. общей площади жилых помещений, по настоящему контракту, является окончательной и изменению не подлежит. Превышение фактической площади жилого помещения над площадью, указанной в Приложении 1 к Контракту, не является основанием для изменения цены Контракта, входит в цену Контракта и дополнительно не оплачивается,

Согласно п. 2.2. муниципального контракта цена контракта включает все затраты продавца, необходимые для выполнения технического задания в полном объеме, в том числе затраты на подготовку проектной документации, на проведение экспертизы проектной документации, на проведение изыскательских работ, на подключение многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения, на получение разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, на подготовку необходимой документации на жилые помещения, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также непредвиденные расходы продавца.

Согласно п. 2.3. муниципального контракта покупатель производит оплату по контракту безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет продавца платежными поручениями в следующем порядке:

- аванс в размере 30% цены контракта, что составляет 74 423 056,68  руб., в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания контракта;

- промежуточные платежи осуществляются поэтапно, в течение 10-ти банковских дней после предоставления продавцом исполнительной документации, включающей акты освидетельствования скрытых работ, паспорта, сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы, протоколы испытаний, актов выполненных работ по форме КС-2 и справке КС-3, подтверждающих выполнение работ по строительству многоквартирных жилых домов после подписания представленных документов службой строительного контроля и авторского надзора, на сумму, соответствующую требуемой оплате с учетом аванса (сумма промежуточного платежа погашается пропорционально объему предъявленных работ в течение всего срока действия контракта).

- окончательные 10% цены контракта, что составляет 24 807 685,56 руб., в течение 10 банковских дней после государственной регистрации перехода права собственности на жилые помещения городскому поселению «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

22.09.2017 согласно актам приема-передачи жилого помещения Покупатель принял объекты строительства для оформления в собственность городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района РС (Я):

1. расположенные по адресу: РС (Я), 

<

...> – квартиры №№ 1 по 24 включительно, квартиры до передачи поставлены на кадастровый учет, каждой присвоен кадастровый номер;

2. расположенные по адресу: РС (Я), 

<

...> – квартиры №№ 1 по 24 включительно, квартиры до передачи поставлены на кадастровый учет, каждой присвоен кадастровый номер;

3. расположенные по адресу: РС (Я), 

<

...> – квартиры №№ 1 по 24 включительно, квартиры до передачи поставлены на кадастровый учет, каждой присвоен кадастровый номер.

4. расположенные по адресу: РС (Я), 

<

...> – квартиры №№ 1 по 24 включительно, квартиры до передачи поставлены на кадастровый учет, каждой присвоен кадастровый номер.

12.12.2017 со стороны ООО "Альянс-2005" направило претензию с требованием в течение 10 банковских дней с момента получения настоящей претензии произвести окончательный расчет по Муниципальному контракту № 46 от 24 ноября 2015 года в сумме  7 848 411,60 рублей.

Между тем направленная претензия оставлена без ответа, при этом замечаний к объему или к качеству выполненной работы не поступило.

Истец полагая, что ссылка покупателя на то, что на государственный кадастровый учет поставлены жилые помещения по площади квартир жилого здания определенная, как сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров и вследствие этого оплата должна быть произведена из расчета именно площади квартира (без учета лоджий и балконов) не состоятельна и не основана на законодательных нормах, обратился в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с настоящим иском.

Ответчик в отзыве на исковое заявление от 26.04.2018 и третье лицо – Нерюнгринская районная администрация в возражениях от 22.03.2018 исковые требования не признали.

Суд находит требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Правоотношения сторон свидетельствуют о заключении между ними договора купли-продажи недвижимости. 

Согласно пункту 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

Выписками из ЕГРЮЛ от 14.12.2017 подтверждается право собственности муниципального образования городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на квартиры, расположенные по адресам: Республика Саха (Якутия), 

<

...> 

В силу пункта 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

В силу пункта 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. 

Согласно пункту 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

Как следует из пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Согласно пункту 2.1. муниципального контракта цена контракта составляет 248 076 855,60 руб., в том числе НДС 37 842 232,21 руб.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения Договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса составляет 57 405 руб.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Стоимость 1 кв. м. общей площади жилых помещений, по настоящему контракту, является окончательной и изменению не подлежит. Превышение фактической площади жилого помещения над площадью, указанной в Приложении 1 к Контракту, не является основанием для изменения цены Контракта, входит в цену Контракта и дополнительно не оплачивается.

Согласно части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией.

Таким образом, часть 1 статьи 95 Закона о контрактной системе содержит исчерпывающий перечень случаев изменения существенных условий контракта при его исполнении.

Согласно пункту 9.8. контракта изменения в контракт могут быть внесены в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по соглашению сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения, подписанного сторонами и являющегося неотъемлемой частью контракта.

Как установлено судом, спорный контракт в установленном законом порядке недействительными не признан, цена контракта сторонами не изменялась.

Согласно части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе он регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Статьей 6 Закона о контрактной системе установлены принципы контрактной системы в сфере закупок, к которым относятся принципы открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

Сохранение условий государственных и муниципальных контрактов в том виде, в котором они были изложены в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в документации об аукционе, невозможность ведения переговоров между заказчиками и участниками закупок (статья 46 Закона о контрактной системе) и исполнение контракта на условиях, указанных в документации, направлены на обеспечение равенства участников размещения заказов, создание условий для свободной конкуренции, обеспечение в связи с этим эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, на предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов с тем, чтобы исключить случаи обхода закона - искусственного ограничения конкуренции при проведении аукциона и последующего создания для его победителя более выгодных условий исполнения контракта.

Согласно пункту 1.1. контракта продавец обязуется построить и передать 96 жилых помещений общей площадью 4 321, 52 кв.м.

Согласно разрешений на ввод объектов в эксплуатацию от 29.08.2017, выданных Нерюнгринской районной администрации  общая площадь жилых помещений  (с учетом балконов, лоджий) по проекту составляет 4 321, 60 кв.м.,  а фактически общая площадь жилых помещений составила 4 361,80 кв.м., то есть с превышением площади жилого помещения над площадью, указанной в контракте.

В рассматриваемом случае изменение цены контракта в одностороннем порядке в сторону уменьшения лишь на основании довода о том, что на государственный кадастровый учет поставлены жилые помещения по площади квартир жилого здания определенные, как сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров и вследствие этого оплата должна быть произведена из расчета именно площади квартир (без учета лоджий и балконов) противоречит условиям контракта и нормам права.

            Так цена контракта определена сторонами, исходя из общей стоимости площади жилых помещений определенных согласно п. 3.37. «Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации», утвержденной приказом № 37 от 04.08.1998 Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству как сумма площадей квартиры помещений, встроенных шкафов, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 1,0.

Таким образом, согласно пункту 2.1. муниципального контракта цена контракта составляет 248 076 855,60 руб., исходя из расчета 4 321,52 кв.м. * 57 405 руб. за кв.м., где 4 321,52 кв.м., общая площадь помещений, указанная в контракте, 57 405 руб. стоимость одного квадратного метра общей площади помещений, утвержденная приказом Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2015 года № 28 и предназначенной для определения по этапу 2015 года размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемых при приобретении (строительстве) жилых помещений в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 годы».

Ответчик произвел оплату в размере 240 228 444 руб. по платежным поручениям № 3240 от 02.12.2015 на сумму 19 532 100 руб., № 3241 от 02.12.2015 на сумму 1 953 207 руб. 42 коп., № 3910 от 30.12.2015 на сумму 12 784 938 руб. 81 коп., № 3911 от 30.12.2015 на сумму 40 690 809 руб. 19 коп., № 6223 от 22.07.2016 на сумму 442 685 руб. 68 коп., № 6221 от 22.07.2016 на сумму 7 848 909 руб. 78 коп., № 6222 от 22.07.2016 на сумму 13 842 688 руб. 53 коп., № 6765 от 15.08.2016 на сумму 17 922 637 руб. 23 коп., № 6766 от 15.08.2016 на сумму 36 388 384 руб. 69 коп., № 137 от 15.12.2016 на сумму 1 037 630 руб., № 135 от 15.12.2016 на сумму 3 880 195 руб. 31 коп., № 133 от 15.12.2016 на сумму 6 848 375 руб. 45 коп., № 291 от 29.12.2016 на сумму 33 399 271 руб. 63 коп., № 1445 от 30.03.2017 на сумму 10 354 783 руб. 92 коп., № 1983 от 28.04.2017 на сумму 16 342 552 руб. 40 коп., № 2454 от 31.05.2017 на сумму 1 747 186 руб. 07 коп., № 5722 от 15.11.2017 на сумму 15 212 087 руб. 89 коп.

Доказательств полной оплаты цены, установленной контрактом, в суд  не представлено. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении иска в полном объеме.

При подаче иска истцом произведена уплата государственной пошлины в сумме 62 242 руб. по платежному поручению от 26.12.2017 № 602. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При этом, освобождение администрации  от уплаты государственной пошлины на основании подпункта 1.1 пункта 1 части 1  статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации не влияет на порядок взыскания судебных расходов на основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Удовлетворив требование истца, суд взыскивает с ответчика  не государственную пошлину в доход федерального бюджета, а понесенные истцом судебные расходы, в пользу которого принято решение.

С учетом результатов рассмотрения дела, на основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом расходы истца по уплате государственной пошлины отнесены на ответчика.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с администрации городского поселения "Поселок Чульман" Нерюнгринского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за счет средств казны городского поселения "Поселок Чульман" Нерюнгринского района в пользу общества с ограниченной ответственностью "Альянс-2005" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 7 848 411 руб. 60 коп. основного долга, а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 62 242 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

      Белоновская Г. И.