АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-7036/2016

12 октября 2017 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 10.10.2017 г. Решение в полном объеме изготовлено 12.10.2017 г.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Беккер Т.А.

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Администрации Таврического муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН1025501994066) к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтное строительное управление» (ИНН5512005280, ОГРН 

<

***>)

при участии третьего лица: казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»об обязании устранить недостатки в выполненных работах,

при участии в заседании суда:

от истца - ФИО1 по доверенности от 09.01.2017г., ФИО2 по доверенности от 25.08.2017г.;

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 01.08.2017;

от третьего лица – не явились; 

 

УСТАНОВИЛ:

Администрации Таврического муниципального района Омской области (далее – Администрация, истец) обратилось в суд с иском (с учетом уточнений иска, принятых судом), просит обязать общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтное строительное управление» (далее – ООО «ДРСУ», ответчик) устранить недостатки,  в результатах выполненных работ по муниципальному контракту № 2013-1 от 17.10.2013 г., на объекте расположенным по адресу: 

<

...>, в течение 15 дней со дня вступления решения в законную силу.

Определением от 14.09.2016 г. суд назначил по делу строительно-техническую экспертизу, перед экспертами поставлены следующие вопросы:

- Соответствует ли объем и качество выполненных работ, по муниципальному контракту № 2013-1 от 17.10.2013г. по реконструкции двухэтажного здания школы под детский сад, расположенный по адресу: 

<

...>, техническим нормам и правилам, предусмотренным для данного вида работ, а так же условиям муниципального контракта № 2013-1 от 17.10.2013г. и проектной документации? Если нет, то каков объем некачественно выполненных работ?

- Каков объем выполненных работ с отступлением от условий проектной документации по муниципальному контракту № 2013-1 от 17.10.2013г. по реконструкции двухэтажного здания школы под детский сад, расположенный по адресу: 

<

...>?

- Каковы объем и виды работ необходимых для устранения некачественно выполненных работ (с учетом выполненных работ с отступлением от условий проектной документации) и выявленных дефектов по муниципальному контракту № 2013-1 от 17.10.2013г. по реконструкции двухэтажного здания школы под детский сад, расположенный по адресу: 

<

...>?

- Каков разумный срок для выполнения работ необходимых для устранения некачественно выполненных работ и выявленных дефектов по муниципальному контракту № 2013-1 от 17.10.2013г. по реконструкции двухэтажного здания школы под детский сад, расположенный по адресу: 

<

...>?

Проведение экспертизы поручено экспертам Федерального бюджетного учреждения Омская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, производство по делу приостановлено.

Определением от 08.08.2017 г. суд возобновил производство по делу.

В судебном заседании представители истца поддержали заявленные требования.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признал, по основаниям изложенным в отзыве на иск.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил, что в обоснование иска истец указывает, между Администрацией (Муниципальный заказчик) и  ООО «СПК «УРАРТУ» (правопредшественник ООО «ДРСУ») (Подрядчик) заключен муниципальный контракт №2013-1 от 17.10.2013 г., согласно условий которого, Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по реконструкции двухэтажного здания школы под детский сад, расположенный по адресу: 

<

...>. (п.1.1 Контракта)

Согласно условий пункта 5.1.1. Контракта Подрядчик обязан выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, СНиПами.

Пунктом 7.1. Контракта предусмотрено, что Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ, а также возможность эксплуатации результата выполненных работ на протяжении гарантийного срока.

Согласно пункта 7.2. Контракта гарантийный срок на выполненные по Контракту работы составляет 2 года с даты утверждения акта приемки законченных строительством работ приемочной комиссией. Подрядчику, связанные с ненадлежащим качеством выполненных строительно-монтажных работ, при нормальной эксплуатации, в течение 2 лет со дня сдачи объекта.

Согласно акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии от 22.12.2014 г. Подрядчик передал Муниципальному заказчику объект строительства.

Истец поясняет, что в течение гарантийного срока эксплуатации объекта были выявлены факты некачественно произведенных строительных работ, вследствие чего в процессе нормальной эксплуатации объекта проявились дефекты конструктивных элементов здания и элементов внутренней отделки, которые были зафиксированы актом обследования от 21.04.2016 г.

После обнаружения в декабре 2015 года недостатков выполненных Подрядчиком строительных работ Муниципальный заказчик незамедлительно в разумный срок заявил о них Подрядчику, что подтверждается письменными требованиями от 28.12.2015 № 02-15/2796, направленными Подрядчику о необходимости устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки, что предусмотрено частью 4 статьи 755 Гражданского кодекса РФ, также требования об устранении выявленных нарушений были направлены в феврале и апреле 2016 года.

Однако, Подрядчиком по настоящее время никаких действий по устранению выявленных недостатков выполнено не было, что и явилось основанием для обращения в суд с иском.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (ст. 763 ГК РФ).

В силу ст. 766 ГК РФ государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон (п.1). В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов или запроса котировок цен на работы, проводимых в целях размещения заказа на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, условия государственного или муниципального контракта определяются в соответствии с объявленными условиями торгов или запроса котировок цен на работы и предложением подрядчика, признанного победителем торгов или победителем в проведении запроса котировок цен на работы (п.2).

Статьей 767 ГК РФ установлено, что изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с уменьшением средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, допускаются по соглашению сторон только в случаях, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

    В силу статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

   При этом, заказчик вправе ссылаться на следующие недостатки: согласно пунктам 2, 3 статьи 720 ГК РФ на явные недостатки работ (те, которые могли быть установлены при обычном способе приемке) в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки);

    В силу пункта 4 статьи 720 ГК РФ заказчик вправе ссылаться на недостатки работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком. 

После приемки работ в силу статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.

В силу ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Между сторонами имеются разногласия по качеству и объему выполненных работ, поименованных в спорных актах приемки выполненных работ формы КС-2, в связи с чем по ходатайству ответчика суд назначил строительно-техническую экспертизу.

Согласно заключения эксперта № 2267/3-3 от 04.08.2017 г., объем и качество выполненных работ по муниципальному контракту №2013-1 от 17.10.2013 г. по реконструкции двухэтажного здания школы под детский сад, расположенный по адресу: 

<

...>. не соответствует техническим нормам и правилам, предусмотренным для данного вида работ, а так же условиям муниципального контракта № 2013-1 от 17.10.2013г. и проектной документации. Так же в заключении эксперта определен объем и стоимость работ по устранению выявленных дефектов.

В силу ч. 2 ст. 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются заключения экспертов.

Правовое значение заключения судебной экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами (ч. 3 ст. 86 АПК РФ).

В соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

По смыслу разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», проверка достоверности заключения эксперта слагается из нескольких аспектов: компетентен ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед экспертным исследованием, не подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в АПК РФ, соблюдена ли процедура назначения и проведения экспертизы, соответствует ли заключение эксперта требованиям, предъявляемым законом.

Обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности заключения эксперта № 2267/3-3 от 04.08.2017 г., судом не установлено.

           По правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Анализируя представленные доказательства суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению ввиду их законности и обоснованности. Материалы дела содержат достаточные и достоверные доказательства подтверждающие факт наличия дефектов в результатах выполненных ответчиком работ по муниципальному контракту № 2013-1 от 17.10.2013 г., на объекте расположенным по адресу: 

<

...>. Данные дефекты выявлены в период гарантийного срока, доказательств опровергающих вину подрядчика в обнаруженных дефектах, ответчиком не представлено. Так же ответчиком не представлено конструктивных и обоснованных возражений относительно объемов и вида работ, требуемых для устранения недостатков, определенных истцом, в связи с чем у суда отсутствуют основания для дискредитации исковых требований, как полностью, так и в части. На основании вышеизложенного, заявленные требования подлежат удовлетворению.

Определением от 08.08.2017 г. Федеральному бюджетному учреждению Омская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации выплачены денежные средства в счет оплаты услуг эксперта в сумме 167 900руб., внесенные на депозит Арбитражного суда Омской области истцом.

В соответствии со статьями 106, 107, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на ответчика.

руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 

 

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтное строительное управление» устранить недостатки, в результатах выполненных работ по муниципальному контракту № 2013-1 от 17.10.2013 г., на объекте расположенным по адресу: 

<

...>, в течение 15 дней со дня вступления решения в законную силу, а именно:

Наименование1 

Ед. изм.

Коп.

 

3 

4 

5 

Отделка потолка (помещения №151,152,153,1 этаж)

1 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%

100м2окрашиваемойповерхности 

0,35 

Водопроводная труба (помещения № 116,149,151,152,153,1 этаж)

2 

Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)

100 м2 потолка 

0,501 

3 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовкой ГФ-021 

100 м2 окрашиваемой поверхности 

0,0916 

4 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза 

100М2окрашиваемой поверхности 

0.0918 

5 

Изоляция трубопроводов диаметром 65 мм изделиями из вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 

10м трубопровода 

4.545 /10 

6 Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 65x13 мм 

м 

45 

7 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)

100 м2 потолка 

6,501

8 

икраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 

100 м2 

окрашиваемойповерхности 

0.501

Замыкание электропроводки (помещение №149 1 этаж)

9 

Прозвонка электрических сетей, протяжка и изоляция проводных и клеммных соединений прим.

100 шт. 

0,2 

Подпольные каналы {помещения 1 этажа в соответствии с планом расположения каналов)

10 

Разборка покрытий полов: из керамических плиток 

100 м2покрытия 

1,07

1112

Демонтаж стяжек цементных прим.

100 м2 стяжки 

1.07 

 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 

100 м2 изолируемой поверхности 

3.91 

13 

Исключить мастика битумная кровельная горячая 

т 

-0.9384 

14 

Проникающая гидроизоляция Пенетрон 

кг 

391 

15 

Демонтаж изоляции трубопроводов 

10 м трубопровода 

40,6 

16 

Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена («Термофлекс»):

10м трубопровода 

58 

17 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 

100 м2окрашиваемойповерхности 

0.575

18 

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза 

100 м2окрашиваемойповерхности 

0,575

19 

защитное лакокрасочное покрытие щитов перекрытия каналов в 2 слоя 

100 м2окрашиваемойповерхности 

3,0729 

20 

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 

100 м2 стяжки 

1,07 

2122 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 

100 м2 стяжки 

1,07

 

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 

100 м2 покрытия 

1.07 

23 

Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм 

м2 

109,1 

 

Ремонт стен пораженных грибком (помещения №115,149,150,1 этаж)

 

24 

Демонтаж облицовки стен из гипсокартонных листов прим.

1 100 м2 стен (за вычетом проемов)

1,2996 

25 

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарномуметаллическому каркасу из ПН и ПС профилейгипсокартонными листами в один слой (С 625): с двернымпроемом 

100 м2 стен (за вычетом проемов)

1,2996 

26 

Оклейка стеклообоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:

100 м2оклеиваемой иобиваемой поверхности 

0,4569

27 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 

100 м2окрашиваемойповерхности 

3,1954

Плитки подвесного потолка (помещения 116, 149, 1 этаж)

28 

Установка панелей подвесных потолков типа 

<

Армстронг>

100 м2поверхностиоблицовки 

0,7417

Двери эвакуационны выходов из групповых ячеек (помещения №110,131, 1 этаж. Помещения 203, 220, 2 этаж)

29 

Разборка заполнений проемов: дверных и воротных 

100 м2 

0,192

30 

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 

100 м2 проемов 

0,192

31 

Блок дверной ПВХ 5-х камерный толщиной 70-73 мм, тройное остекление 36 мм 

м2 

19,2 

32 

Облицовка дверных откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом 

100 м2 стен (за вычетом проемов)

0,1264

33 

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 

100 м2 окрашиваемойповерхности 

0,1264

34 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 

100 м2 покрытия 

0,1264

35 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 

100 м2 окрашиваемойповерхности 

0,1264

36 

Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

1 м2 проемов 

18,96

Стяжка пола в групповых ячейках (помещение №110,1 этаж. Помещение № 205, 2 этаж)

37 

Демонтаж плинтусов поливинилхлоридных 

100 м плинтуса 

0,586

38 

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 

100 м2 покрытия 

1,0598

39 

демонтаж стяжки прим.

100 м2 стяжки 

1,0523

40 

Укладка арматуры в проектное положение прим.

1 т 

0,3922

41 

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 

100 м2 стяжки 

1,0523

42 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 

100 м2 стяжки 

1,0523

43 

Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 

100 м2 покрытия 

1,0598

44 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 

100 м плинтуса 

0,586

Замена терморегулятора (помещение №112, 1 этаж)

45 

Разборка покрытий полов: из керамических плиток 

100 м2 покрытия 

0,018

46 

Демонтаж облицовки стен из гипсокартонных листов прим.

100 м2 стен (за вычетом проемов)

0,018

47 

Демонтаж терморегулятора 

10 шт.

0,1

48 

Установка термотегулятора 

10 шт.

0,1

49 

Термосмесители воды ТСВБ 

компл.

1 

50 

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом 

100 м2 стен (за вычетом проемов)

0,018

51 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:

100 м2поверхностиоблицовки 

0,018

Узлы примыкания вентиляционных шахт к кровле 

52 

Устройство примыканий из 2х слоев битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом 

1 м2 покрытия 

18,2

Замена стеклопакета (помещение № 223, 2 этаж)

53 

Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита 

100 м2 

0,021

54 

Стеклопакет СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 двухкамерный толщиной 36 мм 

м2 

2,1 

Хозяйственно бытовая канализация (помещения № 116, 149, 1 этаж)

55 

Разборка покрытий полов: из керамических плиток 

100 м2 покрытия 

0,414

56 

Демонтаж стяжек цементных прим.

100 м2 стяжки 

0,414

57 

Демонтаж теплоизоляционного слоя из экструдированного полистирола (пеноплекс)

1 мЗ изоляции 

1,449

58 

Демонтаж армироющего слоя прим.

1 т 

0,30636

59 

Разборка бетонных оснований под полы 

1 мЗ 

4,14

60 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 

100 мЗ грунта 

0,276

61 

Устройство песчаной подготовки под трубы 

1 мЗ подготовки 

0,966

62 

Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 

100 мтрубопровода сфасоннымичастями 

0,345

63 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 

100 мЗ грунта 

0,276

64 

Уплотнение грунта: щебнем 

100 м2площадиуплотнения 

0,414

65 

Устройство подстилающих слоев: бетонных 

1 мЗ подстилающегослоя 

4,14

66 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)

мЗ 

4,223 

67 

Армирование подстилающих слоев и набетонок 

1 т 

0,2553

68 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III, диаметром 10 мм 

т 

0,2553 

69 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм 

т 

0,2553 

70 

Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий 

1 мЗ изоляции 

1,449

71 

Плиты теплоизоляционные: Экструдированный вспененный полистирол "Пеноплекс-35"

мЗ 

1,478 

72 

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 

100 м2 стяжки 

0,414

73 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 

100 м2 стяжки 

0,414

74 

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 

100 м2 покрытия 

0,414

75 

Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм 

м2 

42,23 

Ремонт цементно-песчанои стяжки (чердачное помещение правое крыло здания)

76 

Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных 

100м2 покрытия 

2,52

77 

Армирование подстилающих слоев и набетонок 

1 т 

1,8648

78 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III, диаметром 10 мм 

т 

1,865 

79 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм 

т 

1,865 

80 

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 

100 м2 стяжки 

2,52

81 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 

100 м2 стяжки 

2,52

82 

Мусор строительный с погрузкой вручную 

тонна 

8,7 

83 

Вывоз строительного мусора на 5 км.

тонна 

8,7 

Замена датчиков пожарной сигнализации (помещения № 116, 138, 149, 151, 152, 153, 1 этаж)

84 

Демонтаж извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении 

1 шт.

20 

85 

Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении 

1 шт.

20 

86 

Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 СВ 

10 шт.

2 

Система наружного освещения (территория детского сада по периметру ограждения)

87 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 

100 мЗ грунта 

0,1575

88 

Устройство подстилающих слоев: песчаных 

1 мЗподстилающегослоя 

6,75

89 

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг 

100 м кабеля 

4,5

90 

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 

1000 м 

0,45 

91 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 

100 мЗ грунта 

0,1575

92 

Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой: до 8,5 м 

1 опора 

14 

93 

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:до 5 мЗ 

100 мЗ бетона ижелезобетонав деле 

0,1078

94 

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/мЗ, крупность заполнителя 10 мм, класс В12.5 (М150)

мЗ 

11 

Наружные откосы входных дверей (по периметру здания)

95 

Демонтаж облицовки: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали 

1 м2 проемов 

49,14

96 

Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

1 м2 проемов 

49,14

97 

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 

100 м2 стяжки 

0,1014

98 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 

100 м2 стяжки 

0,1014

99 

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов нескользящих 

100 м2 покрытия 

0,1014

Крыльца (по периметру здания)

100 

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 

100 м2 стяжки 

0,39

101 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 

100 м2 стяжки 

0,39

102 

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов нескользящих 

100 м2 покрытия 

0,39

Отмостка (по периметру здания)

103 

Демонтаж отмостки прим.

100 м2 покрытия 

2,32 

104 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 

100 мЗматериалаоснования (вплотном теле)

0,232

105 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 

100 мЗматериалаоснования (вплотном теле)

0,232

106 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

100 м2 покрытия 

2,32 

107 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 

100 м2 покрытия 

2,32 

Наружная канализация (территория детского сада в соответствии с планом наружных инженерных сетей)

108 

Водоотлив: из колодцев прим.

100 мЗ 

1 

109 

Очистка водопроводных и канализационных колодцев от мокрого ила и грязи прим.

1 мЗ ила, грязи 

9 

110 

гидроизоляция водопроводных и канализационных колодцев прим.1 427,23 = 5 487.95 - 0,93 х 4 366,37 

100 м2 поверхности 

0,85 

111 

Проникающая гидроизоляция Пенетрон 

кг 

102

112 

Восстановление кирпичной гладки горловин колодцев 

1 мЗ кладки 

0,45 

113 

гидроизоляция горловин колодцев прим.1 427,23 = 5 487,95 -0.93x4 366.37 

100 м2 поверхности 

0,063

114 

Проникающая гидроизоляция Пенетрон 

кг 

7,56

115 

Установка люка 

1 шт.

9 

Асфальтобетонное покрытие в районе колодцев 

116 

Демонтаж асфальто-бетонноно покрытия прим.

1000 м2 покрытия 

0,045

117 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 

100 мЗматериалаоснования (вплотном теле)

0,1125

118 

Песок природный для строительных работ средний 

мЗ 

11,25 

119 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 

1000 м2 основания 

0,045

120 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 

1000 м2 основания 

0,045

121 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ 

1000 м2 покрытия 

0,045

122 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ 

1000 м2 покрытия 

0,045

123 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 

1000 м2 покрытия 

0,045

Окраска металлических сооружений (ограждение территории, лестницы эвакуационных выходов, козырьки)

124 

Очистка поверхности щетками 

1 м2 очищаемой поверхности 

300 

125 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 

100 м2окрашиваемойповерхности 

7,18

126 

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 

100 м2окрашиваемойповерхности 

3

127 

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных 

100 м2окрашиваемойповерхности 

2,8

128 

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза 

100 м2окрашиваемойповерхности 

1,5005

Дефлектор вентиляционной шахты (кровля, центральная часть здания)

129 

Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм 

1 дефлектор 

1 

Выравнивание металлического ограждения (территория детского сада со стороны ул. Кирова)

130 

демонтаж металлических столбов высотой до 4 м прим.

100 столбов 

0,35

131 

Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание 

100 столбов 

0,35

132 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки 3,5 мм 

м 

105

133 

Бетон тяжелый, класс В10 (М150)

мЗ 

2,219 

134 

Электродуговая сварка при монтаже ограждений 

10т конструкций 

0,1 

135 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 

100м2 окрашиваемой поверхности 

0,22

136 

Окраска масляными составами поверхностей труб: стальных за 2 раза 

100 м2 окрашиваемойповерхности 

0,22

Озеленение (территория детского сада, в соответствии с планом благоустройства)

137 

Посев газонов вручную 

100 м2 

20,35

138 

Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7x0,5 м 

10 кустарников-саженцев 

21,9

139 

Акация желтая, высота 0,75-1,0 м 

шт.

156 

140 

Сирень кустовая обыкновенная с закрытой корневой системой 

шт.

23 

141 

Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м 

шт.

56 

Элементы декоративной отделки фасада (левое крыло здания со стороны ул. Западная)

142 

Демонтаж наружной облицовки поверхности стен из металлокассет по металлическому каркасу прим.

100 м2 поверхностиоблицовки 

3,8

143 

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя 

100 м2поверхностиоблицовки 

3,8

144 

Демонтаж облицовки: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

1 м2 проемов 

61,58

145 

Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

1 м2 проемов 

61,58

Замена радиаторов отопления (помещения № 105, 103, 1 этаж)

146 

смена радиаторов: стальных 

100 кВт радиаторов и конвекторов 

0,04648

147 

Радиатор отопительный алюминиевый"Термал-М" 300-185/1,18/5,05 

шт 

32

148 

Радиатор отопительный алюминиевый"Саlidог Super 500"-499,20/1,18/5,05 

шт 

8 

149 

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 

1 шт.

6 

150 

Кран шаровой муфтовый, диаметром 20 мм 

шт.

6 

      Взыскать с общества с ограниченной ответственностью обществу с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтное строительное управление» в Администрации Таврического муниципального района Омской области расходы по оплате услуг эксперта в сумме 167 900руб.

       Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтное строительное управление» в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 6 000 руб.

       Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтное строительное управление» с депозитного счета Арбитражного суда Омской области денежные средства в сумме 30 000руб., внесенные платежным поручением № 47 от 08.08.2016 г.

       Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

       Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                         В.А. Баландин