312/2020-131531(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  20 октября 2020 года А46-15462/2020  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Луговика С.В., при ведении протокола  судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Партнер» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «ТСН Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об  обязании безвозмездно устранить недостатки и дефекты работ и о взыскании 4 000 руб.,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2 по доверенности от 25.05.2020 сроком на 1 год; от ответчика – не явились, извещены надлежащим образом; 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ТСН Групп» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда в  законную силу безвозмездно устранить недостатки и дефекты работ, выполненных обществом  с ограниченной ответственностью «ТСН Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по  договору подряда от 19.08.2019 на выполнение работ по текущему ремонту внутренней  отделки в местах общего пользования лестничных клеток 1-го, 2-го этажа 1-5 подъездов  многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: 

<

...> в  2019 году, а именно:  

В 1 подъезде выполнить: - повторную облицовку лестничных клеток 1-2 этажа кафельной плиткой 20*30 см.; 

- ремонт заделки угловых линий стыковых сопряжений откосов, дверных проемов,  примыканий плит покрытия к лифтовой шахте с расчисткой/удалением «Ротгипса», и  использованием специальной армирующей ленты СС-1;  

- огрунтование стен и потолков лестничных клеток 1-го, 2-го этажа под окраску  водноэмульсионными составами на 2-й слой;  

- исправление, удаление раковин/трещин, выравнивание и выборочное шпаклевание  поверхностей стен/потолков под окраску водоэмульсионной краской;  

- окрашивание поверхностей стен и потолков лестничных клеток 1-го, 2-го этажа  водноэмульсионными составами на 2-й слой;  

- исправление, выравнивание/шлифовка и выборочное шпаклевание поверхностей  входных металлических дверей под окраску масляными составами;  

- огрунтование поверхностей входных металлических дверей под окраску масляными  составами  

- окрашивание поверхности входных металлических дверей масляными составами на 2  раза;  

- удаление подтеков, брызг, и следов на дверях жителей МКД, кнопок вызова лифта,  откосов дверного проема лифтовой шахты 1, 2 этажей;  

- устранение неровностей, искривления и трещины окраски в бордюрной окантовочной  линии в местах сопряжений поверхностей стен и потолка, окрашенных в различные цвета;  

- ремонт горизонтальной трещины с фрагментами отслоения шпаклевочно-окрасочного  слоя по всей ширине примыкания простенка длиной L=1130 мм. (над почтовыми ящиками)  между окнами лестничной клетки 2-го этажа к опорной балке/ригелю лестничного марша.  

Во 2 подъезде выполнить: 

- огрунтование стен и потолков лестничных клеток 1-го, 2-го этажа под окраску  водноэмульсионными составами на 2-й слой;  

- Исправление, удаление раковин/трещин, выравнивание и выборочное шпаклевание  поверхностей стен/потолков под окраску водоэмульсионной краской;  

- окрашивание поверхностей стен и потолков лестничных клеток 1-го, 2-го этажа  водноэмульсионными составами на 2-й слой;  

- исправление, выравнивание/шлифовка и выборочное шпаклевание поверхностей  входных металлических дверей под окраску масляными составами;  

- огрунтование поверхностей входных металлических дверей под окраску масляными  составами  

- окрашивание поверхности входных металлических дверей масляными составами на 2  раза;  

- устранение неровностей, искривления и трещины окраски в бордюрной окантовочной  линии в местах сопряжений поверхностей стен и потолка, окрашенных в различные цвета;  

- ремонт горизонтальной трещины с фрагментами отслоения шпаклевочно-окрасочного  слоя по всей ширине примыкания простенка длиной L=l 130 мм. (над почтовыми ящиками)  между окнами лестничной клетки 2-го этажа к опорной балке/ригелю лестничного марша;  

- ремонт заделки угловых линий стыковых сопряжений откосов, дверных проемов,  примыканий плит покрытия к лифтовой шахте с расчисткой/удалением «Ротгипса», и  использованием специальной армирующей ленты СС-1.  

В 3 подъезде выполнить: 

- огрунтование поверхностей входных металлических дверей под окраску масляными  составами;  

- окрашивание поверхности входных металлических дверей масляными составами на 2  раза;  

- устранение неровности, искривления и трещины окраски в бордюрной окантовочной  линии в местах сопряжений поверхностей стен и потолка, окрашенных в различные цвета;  

- ремонт горизонтальной трещины с фрагментами отслоения шпаклевочно-окрасочного  слоя по всей ширине примыкания простенка длиной L=1130 мм (над почтовыми ящиками)  между окнами лестничной клетки 2-го этажа к опорной балке/ригелю лестничного марша;  

- ремонт заделки угловых линий стыковых сопряжений откосов, дверных проемов,  примыканий плит покрытия к лифтовой шахте с расчисткой/удалением «Ротгипса», и  использованием специальной армирующей ленты СС-1;  

- огрунтование стен и потолков лестничных клеток 1-го, 2-го этажа под окраску  водноэмульсионными составами на 2-й слой;  

- исправление, удаление раковин/трещин, выравнивание и выборочное шпаклевание  поверхностей стен/потолков под окраску водоэмульсионной краской;  

- окрашивание поверхностей стен и потолков лестничных клеток 1-го, 2-го этажа  водноэмульсионными составами на 2-й слой;  

- исправление, выравнивание/шлифовка и выборочное шпаклевание поверхностей  входных металлических дверей под окраску масляными составами.  

В 3/проходном подъезде выполнить: 

- Заделку/ремонт диагональных и поперечных трещин по горизонтальной и 2-м  вертикальным линиям стыков примыкания внутренних стен холодного тамбура со стороны  главного уличного фасада входной группы III подъезда к плитам перекрытия 2-го этажа с  отслоением фрагментов шпаклевочно-окрасочного слоя до конструктивных элементов ж/б  панелей, разрушением/выкрашиванием герметизирующего заполнителя. В ходе ремонта  использовать армирующую пластиковую строительную сетку СС-1 (размер ячейки 5*5 мм.)  

указанной в п. 14 Локального сметного расчета № б/н от 19.08.2019 для улучшения  прочностных/адгезионных параметров в данной локации по линиям сопряжения.  

В 4 подъезде выполнить: 

- ремонт горизонтальной трещины с фрагментами отслоения шпаклевочно-окрасочного  слоя по всей ширине примыкания простенка длиной L=1130 мм. (над почтовыми ящиками)  между окнами лестничной клетки 2-го этажа к опорной балке/ригелю лестничного марща;  

- ремонт заделки угловых линий стыковых сопряжений откосов, дверных проемов,  примыканий плит покрытия к лифтовой шахте с расчисткой/удалением «Ротгипса», и  использованием специальной армирующей ленты СС-1;  

- огрунтование поверхностей входных металлических дверей под окраску масляными  составами;  

- окрашивание поверхности входных металлических дверей масляными составами на 2  раза;  

- устранение неровностей, искривления и трещины окраски в бордюрной окантовочной  линии в местах сопряжений поверхностей стен и потолка, окрашенных в различные цвета;  

- огрунтование стен и потолков лестничных клеток 1-го, 2-го этажа под окраску  водноэмульсионными составами на 2-й слой;  

- исправление, удаление раковин/трещин, выравнивание и выборочное шпаклевание  поверхностей стен/потолков под окраску водоэмульсионной краской;  

- окрашивание поверхностей стен и потолков лестничных клеток 1-го, 2-го этажа  водноэмульсионными составами на 2-й слой;  

- исправление, выравнивание/шлифовка и выборочное шпаклевание поверхностей  входных металлических дверей под окраску масляными составами.  

В 5 подъезде выполнить: 

- устранение неровностей, искривления и трещины окраски в бордюрной окантовочной  линии в местах сопряжений поверхностей стен и потолка, окрашенных в различные цвета;  

- огрунтование стен и потолков лестничных клеток 1-го, 2-го этажа под окраску  водноэмульсионными составами на 2-й слой;  

- Исправление, удаление раковин/трещин, выравнивание и выборочное шпаклевание  поверхностей стен/потолков под окраску водоэмульсионной краской;  

- окрашивание поверхностей стен и потолков лестничных клеток 1-го, 2-го этажа  водноэмульсионными составами на 2-й слой;  

- исправление, выравнивание/шлифовка и выборочное шпаклевание поверхностей  входных металлических дверей под окраску масляными составами;  

- ремонт горизонтальной трещины с фрагментами отслоения шпаклевочно-окрасочного  слоя по всей ширине примыкания простенка длиной L=1130 мм. (над почтовыми ящиками)  между окнами лестничной клетки 2-го этажа к опорной балке/ригелю лестничного марша;  

- ремонт заделки угловых линий стыковых сопряжений откосов, дверных проемов,  примыканий плит покрытия к лифтовой шахте с расчисткой/удалением «Ротгипса», с  использованием специальной армирующей ленты СС-1;  

- огрунтование поверхностей входных металлических дверей под окраску масляными  составами, кв.м.;  

- окрашивание поверхности входных металлических дверей масляными составами на 2  раза.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТСН Групп» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Партнер» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб.  расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТСН Групп» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Партнер» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 000 руб.  штрафа за неисполнение решения суда за каждый день просрочки исполнения с момента  

истечения 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу до дня  фактического исполнения решения суда.  

В удовлетворении остальной части требования о взыскании штрафа отказать. 

Решение вступает в законную силу и может быть обжаловано через Арбитражный суд  Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный  апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, дом 42) в  течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в  порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010,  

<

...>) в течение двух месяцев со дня  принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам,  участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копия настоящего решения на бумажном  носителе может быть направлена в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручена  под расписку.  

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья С.В. Луговик  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.08.2020 9:57:45Кому выдана Луговик Сергей Викторович