Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-13395/18

10 апреля 2018 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального казенного  предприятия «Научно-исследовательский институт «Геодезия» к обществу с ограниченной  ответственностью «Москапстрой» об обязании устранить недостатки и дефекты, возникшие  в результате выполнения строительно-монтажных работ по государственному контракту,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Москапстрой» до 1 мая 2018 года  устранить недостатки и дефекты, возникшие в результате выполнения строительно- монтажных работ по государственному контракту № 0548100000215000026/251.4379.К15 от  5 ноября 2015 года в рамках гарантийных обязательств, а именно:  

Недостатки 

Мероприятия по  

Примечания  

устранению 

Здание 16 

Выполнить. 

Выполнен 

1. Не выполнены демонтажные работы (дверные  

демонтаж 

блоки, оконные блоки, кирпичные стены, ж.б. 

оконных блоков.  

перекрытия, штукатурка со стен, плитка  

облицовочная, напольные покрытия, трубопроводы 

отопления, канализации). 

2. Не пробиты отверстия в конструкциях.  

Выполнить. 

3. Не выполнен монтаж трубопроводов системы  

Выполнить. 

отопления и водоснабжения. 

4. Не устроены каналы в полах. 

Выполнить. 

5. Не выполнена кладка кирпичных стен.  

Выполнить. 

6. Не смонтированы оконные и дверные блоки,  

Выполнить. 

Смонтированы  

ворота. 

оконные 

блоки. 

7. Не смонтированы металлические перемычки.  

Выполнить. 

8. Не устроены полы (тип. 1, 2, 3, 4) с установкой  металлических порожков.  

Выполнить. 

9. Не выполнена облицовка фасадов зданий  

Выполнить. 

металлосайдингом по слою утеплителя из  

минераловатных плит «Венти Баттс» RUCWOOL.  

10. Не выполнена облицовка наружных оконных и  

Выполнить. 

дверных откосов. 

11. Не выполнена отмостка вокруг здания.  

Выполнить. 

12. Не выполнены козырьки из профилированного  

Выполнить. 

листа над входами. 

13. Не выполнено устройство приямков.  

Выполнить. 

14. Не смонтирована система противопожарного и  

Выполнить. 

хозяйственно питьевого водопровода.  

15. Не смонтирована система горячего  

Выполнить. 

водоснабжения с установкой оборудования.  

16. Не смонтирована система бытовой канализации  

Выполнить. 

К1. 

17. Не установлены электроконвекторы отопления.  

Выполнить. 

18. He выполнены работы по устройству  

 В ы п о лнить. 

силового электрооборудования. 

Здание 24 

1. Не выполнены демонтажные работы (дверные  

Выполнить. 

Выполнен 

блоки, ворота, оконные блоки, кирпичные стены,  

демонтаж 

штукатурка со стен, плитка облицовочная,  

оконных блоков. 

напольные покрытия, трубопроводы отопления,  

канализации). 

2. Не пробиты отверстия в конструкциях.  

Выполнить. 

3. Не выполнен монтаж трубопроводов системы  

Выполнить. 

отопления и водоснабжения. 

4. Не выполнена кладка кирпичных стен.  

Выполнить. 

Смонтированы 

оконные 

блоки. 

5. Не смонтированы оконные и дверные блоки, 

Выполнить. 

ворота. 

6. Не устроены полы (тип 3, 4) с установкой  

Выполнить. 

металлических порожков. 

7. Не устроены приямки у здания. 

Выполнить. 

8. Не выполнена облицовка фасадов зданий  

Выполнить. 

металлосайдингом по слою утеплителя из  

минераловатных плит «Венти Баттс» RUCWOOL.  

9. Не выполнена облицовка наружных оконных и  

Выполнить. 

дверных откосов. 

10. Не выполнена отмостка вокруг здания.  

Выполнить. 

11. Не выполнены козырьки из профилированного  

Выполнить. 

листа над входами. 

12. Не смонтирована система противопожарного и  

Выполнить. 

хозяйственно-питьевого водопровода.  

13. Не выполнена система горячего водоснабжения  

Выполнить. 

с установкой оборудования. 

14. Не установлены электроконвекторы отопления.  

Выполнить. 

15. Не смонтирована система бытовой канализации  

Выполнить. 

К1. 

16. Не выполнены работы по устройству  

 В ы п олнить. 

силового электрооборудования. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Москапстрой» в пользу  Федерального казенного предприятия «Научно-исследовательский институт «Геодезия»  государственную пошлину в размере 6000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Е.В. Дубровская