Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-6732/2019

14 ноября 2019 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 07.11.2019

Решение изготовлено в полном объеме 14.11.2019

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ефремовым В.И., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная Компания Стандарт» (ИНН 1435172180, ОГРН 1061435047277) от 27.05.2019 № 30 к обществу с ограниченной ответственностью «СахаАльянсСтрой» (ИНН 1435257980, ОГРН 1121435011697) о взыскании неосновательного обогащения в размере 4 944 361,11 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.05.2019 по 23.10.2019 в размере 161 233,57 руб. и далее с 24.10.2019 по день фактической оплаты на сумму долга 4 944 361,11 руб. исходя из ключевой ставки Центрального Банка России, действующей в соответствующие периоды, расходы по уплате государственной пошлины, 

представители:

от истца: ФИО2 – по доверенности от 14.12.2018;

от ответчика: ФИО3 – по доверенности от 13.08.2019 № 13/08-19, ФИО4 – по доверенности от 09.01.2019 № 09/01 (в судебном заседании 05.11.2019),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная Компания Стандарт» обратилось в суд с иском от 27.05.2019 № 30 к обществу с ограниченной ответственностью «СахаАльянсСтрой» о взыскании неосновательного обогащения в размере 18 803 719,80 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.05.2019 по 27.05.2019 в размере 51 903,42 руб. и далее с 28.05.2019 по день фактической оплаты на сумму долга 18 803 719,80 руб. исходя из ключевой ставки Центрального Банка России, действующей в соответствующие периоды, расходы по уплате государственной пошлины.

14.08.2019 от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований и исправлении описок в исковом заявлении и расчете цены иска от 13.08.2019 без номера. Истец просит принять уточнение исковых требований, просит взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 18 802 719, 80 рублей, сумму процентов за пользованием чужими денежными средствами за период с 15.05.2019 по 27.05.2019 в размере 51 900, 66 рублей и далее с 28.05.2019 по день фактической оплаты на сумму долга 18 802 719, 80 рублей исходя из ключевой ставки Центрального банка России, действующей в соответствующие периоды, расходы по оплате государственной пошлине в сумме 117 278 рублей. 

Определением суда от 22.08.2019 уточнение исковых требований принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

14.10.2019 ответчиком представлен отзыв на исковое заявление с приложенными дополнительными документами.

23.10.2019 от истца поступили заявление об уточнении исковых требований от 23.10.2019 без номера; возражения и пояснения на отзыв на исковое заявление от 21.10.2019 без номера.

В заявлении об уточнении исковых требований от 23.10.2019 истец просит взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 4 944 361,11 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.05.2019 по 23.10.2019 в размере 161 233,57 руб. и далее с 24.10.2019 по день фактической оплаты на сумму долга 4 944 361,11 руб. исходя из ключевой ставки Центрального Банка России, действующей в соответствующие периоды, расходы по уплате государственной пошлины. 

Определением суда от 23.10.2019 судом уменьшение исковых требований принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 10 час. 50 мин. 07 ноября 2019 года. О перерыве сделано публичное извещение на сайте Арбитражного суда Республики Саха (Якутия): http:// yakutsk.arbitr.ru.

После перерыва судебное разбирательство продолжено при участии представителей: от истца -  ФИО2 по доверенности от 14.12.2018, от ответчика -  ФИО3 по доверенности от 13.08.2019 № 13/08-19.

Представитель истца для приобщения к материалам дела копию договора подряда от 23.10.2015 № 23/10/2015-ПНР, копию платежного поручения от 23.10.2015 № 427, копию справки о стоимости выполненных работ и затрат от 31.03.2016 № 4, копию акта о приемке выполненных работ от 31.03.2016 № 4, копию счет-фактуры от 31.03.2016 № 20.

Представленные документы приобщены судом к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом установлены обстоятельства дела.

11.03.2015 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор подряда № 11/03-2015 на выполнение строительно-монтажных работ, по которому (пункт 1.1) подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить комплекс работ по строительству сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Саха (Якутия) (5-9 этап) для нужд ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2014-2015 годах, включая строительство новых объектов сети, монтажные и пусконаладочные работы, выполнить технические условия для подключения объектов сети к сетям инженерно-технологического обеспечения в соответствии с условиями договора, провести предварительные испытания оборудования сети и своевременно сдать результаты выполненных работ заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ.

Согласно пунктам 1.2, 1.4, 1.5, 2.1 все работы подрядчик производит на основании подписанных между подрядчиком и заказчиком дополнительных соглашений к договору, стоимость работ указывается в соответствующем дополнительном соглашении в российских рублях с учетом НДС. Наименование, местонахождение объекта, указываются в дополнительных соглашениях, стоимость работ определяется на основании «Ведомости исполнения работ», составленного и подписанного сторонами для данного конкретного случая, который является составной частью каждого дополнительного соглашения.

По пункту 2.7.1 договора авансовый платеж в размере 25% от стоимости работ, указанной в дополнительном соглашении, о чем стороны договорятся в письменной форме и подпишут соответствующее дополнительное соглашение. Оплата аванса осуществляется в течение 3 календарных дней от даты получения счета от подрядчика на оплату аванса. Счет выставляется в течение 3 рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения.

Разделом 3 договора регулируются сроки выполнения работ. Начало выполнения работ определяется датой подписания договора. Сроки выполнения работ, предусмотренных договором, согласовываются сторонами в дополнительных соглашениях по каждому объекту отдельно.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение № 1, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с. Саскылах, Анабарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 2 725 395,83 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 415 738,35 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 31.03.2016, №24 от 30.06.2016, №1 от 29.12.2017, справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.03.2016 на сумму 1 375 514 руб., №24 от 30.06.2016 на сумму 170 017,23 руб., №1 от 29.12.2017 на сумму 759 023,50 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение № 2, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в п.Юрюнг-Хая, Анабарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 2 770 593,03 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 422 632,84 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №2 от 31.03.2016, №25 от 30.06.2016, №2 от 29.12.2017, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 31.03.2016 на сумму 1 285 564 руб., №25 от 30.06.2016 на сумму 174 740,96 руб., №2 от 29.12.2017 на сумму 708 748,37 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №3, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в п.Оленек, Оленекский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 2 407 498,79 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 367 245,58 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №3 от 31.03.2016, №22 от 29.12.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 31.03.2016 на сумму 1 158 971 руб., №2 от 29.12.2016 на сумму 657 039 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение № 4, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Илимнир, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 730 733,37 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 264 010,18 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №3 от 04.09.2015, №2 от 20.12.2017, справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 12.05.2015 на сумму 286 463,41 руб., №2 от 12.05.2015 на сумму 286 463,41 руб., №3 от 04.09.2015 на сумму 744 034,37 руб., №2 от 20.12.2017 на сумму 318 871,87 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение № 5, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в п.Усун-Кюель, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 920 812,70 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 293 005,33 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 23.07.2015, №1 от 27.09.2017, №2 от 20.12.2017, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 23.02.2015 на сумму 275 124,08 руб., №1 от 27.09.2017 на сумму 890 864,13 руб., №2 от 20.12.2017 на сумму 381 798,91 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение № 6, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в п.Эльгяй, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 577 232,72 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 240 594,82 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 17.12.2015, №1 от 27.09.2017, №2 от 20.12.2017, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 17.12.2015 на сумму 323 897,73 руб., №1 от 27.09.2017 на сумму 634 711,62 руб., №2 от 20.12.2017 на сумму 272 019,26 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №7, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в п.Кемпендяй, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 839 518,28 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 128 062,11 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №3 от 04.09.2015, №2 от 17.12.2017, №1 от 30.09.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 04.09.2015 на сумму 174 160,45 руб., №2 от 17.12.2015 на сумму 279 485,36 руб., №1 от 30.09.2015 на сумму 74 640,19 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение № 8, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Крестях, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 816 227,38 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 124 509,26 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №3 от 29.06.2015, №20 от 30.06.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 17.12.2015 на сумму 263 203,25 руб., №3 от 29.06.2015 на сумму 156 279,20 руб., №20 от 30.06.2016 на сумму 66 976,80 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №9, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Куокуну, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 809 612,16 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 123 500,16 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №3 от 29.06.2015, №2 от 23.07.2015, №21 от 30.06.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 29.06.2015 на сумму 149 446,53 руб., №21 от 30.06.2015 на сумму 64 048,51 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №10, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Кюндяе, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 838 910,19 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 127 969,35 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №3 от 29.06.2015, №2 от 17.12.2015, №1 от 30.09.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 29.06.2015 на сумму 162 239,62 руб., №2 от 17.12.2015 на сумму 255 280,26 руб., №1 от 30.09.2016 на сумму 69 531,26 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №11, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Сарданга, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 828 246,66 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 126 342,71 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №3 от 29.06.2015, №22 от 30.06.2016, №1 от 30.09.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 29.06.2015 на сумму 251 863,92 руб., №3 от 29.06.2015 на сумму 170 453,36 руб., №22 от 30.06.2016 на сумму 73 051,44 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №12, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Толон, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 755 470,60 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 115 241,28 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №3 от 29.06.2016, №1 от 30.09.2016, №2 от 30.09.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 236 526,75 руб., №3 от 29.06.2015 на сумму 144 285,68 руб., №2 от 30.09.2016 на сумму 101 368,61 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №13, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Хордогой, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 121 293,68 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 171 044,80 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №3 от 04.09.2015, №1 от 17.12.2015, №1 от 30.09.2016, №23 от 30.06.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 04.09.2015 на сумму 155 915,76 руб., №1 от 17.12.2015 на сумму 270 472,05 руб., №23 от 30.06.2016 на сумму 66 821,04 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №14, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Хоро, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 824 177,96 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 125 722,06 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №3 от 04.09.2015, №1 от 17.12.2015, №1 от 30.09.2016, №23 от 30.06.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 04.09.2015 на сумму 149 446,53 руб., №1 от 17.12.2015 на сумму 263 494 руб., №1 от 30.09.2016 на сумму 64 048,51 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №15, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:  радио-телевизионная передающая станция в п.Усть-Мая, Усть-Майский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 053 576,23 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 160 715,02 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2016, №1 от 31.03.2017, справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.09.2016 на сумму 495 742,08 руб., №1 от 31.03.2017 на сумму 386 429,47 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №16, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:  радио-телевизионная передающая станция в п.Эльдикан, Усть-Майский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 408 357,61 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 214 834,21 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актом о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2016, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.09.2016 на сумму 137 083 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №17, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:  радио-телевизионная передающая станция в п.Солнечный, Усть-Майский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 2 042 767,89 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 311 608,66 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2016, №1 от 31.03.2017, справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.09.2016 на сумму 235 950,98 руб., №1 от 31.03.2017 на сумму 1 389 670,79 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №18, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:  радио-телевизионная передающая станция в с.Мар, Нюрбинский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 993 193,81 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 304 046,51 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №1 от 27.09.2017, №2 от 20.12.2017, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 301 945,95 руб., №1 от 27.09.2017 на сумму 931 496,72 руб., №2 от 20.12.2017 на сумму 399 212,88 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №19, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:  радио-телевизионная передающая станция в с.Бысыттах, Нюрбинский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 157 271,46 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 176 532,93 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №13 от 30.06.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 299 692,62 руб., №13 от 30.06.2016 на сумму 275 902,88 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №20, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:  радио-телевизионная передающая станция в с.Едей, Нюрбинский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 731 123,75 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 111 527,35 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №3 от 29.06.2015, №1 от 30.09.2016, №2 от 30.09.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 217 046,37 руб., №3 от 29.06.2015 на сумму 144 358,37 руб., №1 от 30.09.2016 на сумму 61 867,87 руб., №2 от 30.09.2016 на сумму 93 019,87 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №21, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Малыкай, Нюрбинский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 840 180,86 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 128 163,18 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №14 от 30.06.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 273 452,26 руб., №14 от 30.06.2016 на сумму 244 647,04 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №22, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Сайылык, Нюрбинский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 942 611,14 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 143 788,14 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №15 от 30.06.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 12.05.2015 на сумму 231 060 руб., №2 от 12.05.2015 на сумму 279 994,18 руб., №15 от 30.06.2016 на сумму 257 523,20 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №23, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Хаты, Нюрбинский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 882 819,08 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 134 667,32 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №25 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №16 от 30.06.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 256 515,95 руб., №16 от 30.06.2016 на сумму 216 194,88 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №24, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Чаппангда, Нюрбинский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 788 557,03 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 120 288,36 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №3 от 29.06.2016, №1 от 30.09.2016, №2 от 30.09.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 266 692,27 руб., №3 от 29.06.2016 на сумму 155 915,76 руб., №1 от 30.09.2016 на сумму 66 821,04 руб., №2 от 30.09.2016 на сумму 114 296,69 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №25, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Чукар, Нюрбинский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 911 694,76 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 139 072,08 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №17 от 30.06.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 287 408,35 руб., №17 от 30.06.2016 на сумму 245 581,60 руб. Подрядчиком работы выполнены.

11.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №26, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Энгольжа, Нюрбинский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 876 210,45 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 133 659,22 руб.

Начальный срок выполнения работ: 11.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №18 от 30.06.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 292 859,95 руб., №18 от 30.06.2016 на сумму 250 462,08 руб. Подрядчиком работы выполнены.

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №27, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Ботулу, Нюрбинский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 028 936,16 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 156 956,36 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №1 от 17.12.2015, №1 от 30.09.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 17.12.2015 на сумму 405 671,73 руб., №1 от 30.09.2016 на сумму 260 638,40 руб. Подрядчиком работы выполнены.

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №28, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Дюллюкю, Верхневилюйский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 025 653,44 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 156 455,61 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 23.07.2015, №1 от 17.12.2015, №1 от 30.09.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 23.07.2015 на сумму 183 173,76 руб., №1 от 17.12.2015 на сумму 410 033,01 руб., №1 от 30.09.2016 на сумму 78 503,04 руб. Подрядчиком работы выполнены.

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №29, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Липпе-Атах, Верхневилюйский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 023 300,16 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 156 096,63 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 23.07.2015, №1 от 17.12.2015, №1 от 30.09.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 23.07.2015 на сумму 182 446,88 руб., №1 от 17.12.2015 на сумму 402 764,21 руб., №1 от 30.09.2016 на сумму 78 191,52 руб. Подрядчиком работы выполнены.

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №30, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Хомустах, Нюрбинский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 996 722,24 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 152 042,38 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №1 от 17.12.2015, №19 от 30.06.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 17.12.2015 на сумму 409 451,50 руб., №19 от 30.06.2016 на сумму 257 523,20 руб. Подрядчиком работы выполнены.

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №31, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Бетюнг, Нюрбинский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 153 635,84 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 175 978,35 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 23.07.2015, №1 от 17.12.2015, №1 от 20.12.2017, справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 12.05.2015 на сумму 304 640 руб., №2 от 23.07.2015 на сумму 183 173,76 руб., №1 от 17.12.2015 на сумму 411 123,33 руб., №1 от 20.12.2017 на сумму 78 503,04 руб. Подрядчиком работы выполнены.

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №32, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Тымпы, Вилюйский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 921 715,04 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 140 600,60 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 23.07.2015, №1 от 17.12.2015, №1 от 30.09.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 23.07.2015 на сумму 178 085,60 руб., №1 от 17.12.2015 на сумму 398 402,93 руб., №1 от 30.09.2016 на сумму 76 322,40 руб. Подрядчиком работы выполнены.

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №33, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Чай, Вилюйский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 282 505,60 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 195 636,45 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 23.07.2015, №1 от 17.12.2015, №1 от 30.09.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 17.12.2015 на сумму 584 556,90 руб., №1 от 30.09.2016 на сумму 89 094,72 руб.  Подрядчиком работы выполнены.

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №34, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Булус (Тюбя), Намский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 1 866 031,68 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 284 648,90 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 23.07.2015, №3 от 15.06.2015, №1 от 23.07.2015, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 361 986,24 руб., №3 от 15.06.2015 на сумму 860 044,42 руб., №1 от 23.07.2015 Подрядчиком работы выполнены.

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №35, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Столбы (Хатырык), Намский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 2 400 934,88 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 366 244,30 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №2 от 17.12.2015, №1 от 30.09.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 485 773,90 руб., №2 от 17.12.2015 на сумму 1 619 384,80 руб.  Подрядчиком работы выполнены.

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №36, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Ергелех, Намский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 884 724,16 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 134 957,92 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 649 643,81 руб. 

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №37, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Кютенг-Ат, Намский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 875 613,76 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 133 568,20 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 640 931,63 руб. Подрядчиком работы выполнены.

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №38, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Хонгор-Бие, Намский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 757 348,48 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 115 527,73 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 572 805,98 руб.  Подрядчиком работы выполнены.

27.03.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №39, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объектам радио-телевизионной передающей станции из материалов «заказчика» на позициях:

- радио-телевизионная передающая станция в с.Ымыяхтах, Намский улус, Республика Саха (Якутия),

Сумма по дополнительному соглашению составляет 919 330,88 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 140 236,91 руб.

Начальный срок выполнения работ: 27.03.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015, №2 от 12.05.2015, №3 от 29.06.2015, справками о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 12.05.2015 на сумму 402 909,58 руб., №3 от 29.06.2015 на сумму 264 792 руб. Подрядчиком работы выполнены.

10.04.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №40, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства по доставке АМС (антенно-мачтового сооружения) до объектов радио-телевизионных передающих станций Заказчика).

Сумма по дополнительному соглашению составляет 383 520 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 58 503,05 руб.

Начальный срок выполнения работ: 10.04.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1 от 12.05.2015 на сумму 383 520 руб. ответчиком работы выполнены.

18.05.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №41, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства по доставке АМС (антенно-мачтового сооружения), антеннового поста, контейнера с оборудованием. Разгрузочной рамы и бетонных плит под фундамент, антивандальное ограждение до объектов радио-телевизионных передающих станций Заказчика.

Сумма по дополнительному соглашению составляет 5 842 480 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 891 225,76 руб.

Начальный срок выполнения работ: 18.05.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Актами о приемке выполненных работ №1-19 от 06.10.2015, №26 от 30.06.2016, справками о стоимости выполненных работ и затрат №1-19 от 06.10.2015, №26 от 30.06.2016 ответчиком работы выполнены.

21.08.2015 стороны подписали дополнительное соглашение №42, согласно которому в рамках договора №11/03-2015 от 11.03.2015, заключенного между сторонами, подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по монтажу систем обеспечения, технологического оборудования и пуско-наладочных работ объектов радио-телевизионных передающих станции из материалов Заказчика на позициях указанных в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

Сумма по дополнительному соглашению составляет 32 608 680,67 руб., в том числе  НДС 18 % в размере 4 974 205,53 руб.

Начальный срок выполнения работ: 21.08.2015.

Конечный срок выполнения работ: 31.12.2015.

Платежными поручениями истцом в счет аванса перечислены денежные средства на общую сумму 64 801 268,49 руб.

Истец обратился к ответчику с претензионным письмом исх.№ 25 от 23.04.2019 об отказе от Договора подряда №11/03-2015 от 11.03.2015 с 14.05.2019, возврате суммы неосновательного обогащения в размере 18 803 719,80 руб.

В связи с отсутствием доказательств возврата суммы неотработанного аванса, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением 25.06.2019, претензия направлена ответчику 24.04.2019.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по выполнению работ истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

С учетом изложенного, суд считает досудебный порядок разрешения спора соблюденным.

Ответчик в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представил отзыв в материалы дела, просит отказать в удовлетворении исковых требований, считая, что сумма неотработанного аванса перед истцом отсутствует.

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Заключенный между сторонами договор является договором подряда, отношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Как следует из пункта 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 года N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В пункте 2 статьи 711 ГК РФ закреплено, что подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Статьей 735 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность оплаты путем выдачи аванса.

Из материалов дела следует, что в соответствии с условиями договора подряда №11/03-2015 с учетом дополнительных соглашений истец платежными поручениями перечислило ответчику аванс в сумме  64 801 268,49 руб.

Кроме того, оплата истцом также произведена зачетом на сумму 6 092 127,76 руб. на основании актов №11 от 30.06.2016, №16 от 30.09.2016.

С учетом изложенного, истцом оплачены по договору №11/03-2015 от 11.03.2015 70 893 396,25 руб.

Между тем, обязательства со стороны подрядчика выполнены не в полном объеме

Так, согласно представленным актам (КС-2) и справкам (КС-3) работы по договору подряда №11/03-2015 от 11.03.2015 выполнены на сумму 51 740 372,37 руб.

Кроме того, сторонами на сумму 10 899 239,97 руб. на основании актов зачета №3 от 31.03.2016, №4 от 31.03.2016 произведен взаимозачет, в связи с которым сумма задолженности уменьшилась на 10 899 239,97 руб.

Также 17.12.2018 на основании Соглашения сумма задолженность ответчика еще уменьшена на 3 309 422,80 руб.

С учетом изложенного, сумма неотработанного аванса составила 4 944 361,11 руб. (70 893 396,25 руб.-51 740 372,37 руб.-10 899 239,97 руб.-3 309 422,80 руб.).

24.04.2019 истец направил в адрес ответчика уведомление  об отказе от исполнения договора на основании пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно пункту 3 статьи 450, пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя и подлежат возвращению другой стороне (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49, пункт 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 N 35).

В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В силу пункта 3 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации правила о неосновательном обогащении применяются к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Следовательно, истец по требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение должен доказать: факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца, отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения.

Для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимо наличие совокупности указанных обстоятельств, бремя доказывания их наличия возложено на истца.

С учетом изложенного, учитывая, что договор подряда №11/03-2015 от 11.03.2015 расторгнут в одностороннем порядке, доказательств оказания услуг на сумму 4 944 361,11 руб. в материалах дела не имеется, оснований для удержания указанной суммы не имеется.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Доводы ответчика о том, что истцом не учтены акты на сумму 5 691 834,81 руб., которые ответчиком выполнены, но истцом не приняты и не подписаны, судом отклоняются, поскольку работы по договору на сумму 5 290 903,68 руб. истцом приняты с учетом цены работ, указанных в дополнительных соглашениях, заключенных сторонами к договору подряда №11/03-2015 от 11.03.2019. Разница между заявленной суммой и суммой, которая принята истцом (400 931,13 руб.), не может быть принята, поскольку размер превышает цену, согласованную сторонами в каждом из дополнительных соглашений, о доказательства того, что стороны увеличили цену, ответчиком не представлено.

На основании изложенного, требования истца являются обоснованными, иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 161 233,57 руб. за период с 15.05.2019 по 23.10.2019 и далее с 24.10.2019 по день фактической оплаты на сумму долга 4 944 361,11 руб. исходя из ключевой ставки Центрального Банка России, действующей в соответствующие периоды.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Принимая во внимание указанные выше нормы права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд приходит к выводу о том, что начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности является обоснованным.

Расчет процентов в размере 161 233,57 руб. истец составил за период с 15.05.2019 по 23.10.2019 с учетом расторжения договора подряда 14.05.2019. Расчет судом проверен и признан верным.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного, судом рассчитаны проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24.10.2019 по день вынесения решения  (07.11.2019): 

4 944 361,11 руб.*4 дня (с 24.10.2019 по 27.10.2019)*7%/365= 3 792,93 руб.;

4 944 361,11 руб.*11 дней (с 28.10.2019 по 07.11.2019)*6,50%/365= 9 685,53 руб.;

Всего 13 478,46 руб.

При таких обстоятельствах, требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению за период с 15.05.2019 по 23.10.2019 в размере 161 233,57 руб., с 24.10.2019 по 07.11.2019 в размере  13 478,46 руб., и далее с 08.11.2019 по день фактической уплаты основного долга, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

При подаче искового заявления истец уплатил государственную пошлину в размере 117 278 руб., что подтверждается платежным поручением №432 от 21.06.2019. 

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при сумме исковых требований 5 105 594,68 руб. (4 944 361,11 руб. + 161 233,57 руб.) рублей размер государственной пошлины составляет 48 528 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в пользу истца следует взыскать 48 528 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Излишне уплаченную государственную пошлину в размере 68 750 руб. следует возвратить истцу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СахаАльянсСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная Компания Стандарт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неосновательное обогащение в размере 4 944 361,11 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.05.2019 по 23.10.2019 в размере 161 233,57 руб., за период с 24.10.2019 по 07.11.2019 в размере 13 478,46 руб., и далее с 08.11.2019 по день фактической оплаты суммы долга исходя из ключевой ставки Центрального Банка России, действующей в соответствующие периоды, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 48 528 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственная Компания Стандарт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 68 750 руб., уплаченную по платежному поручению № 432 от 21.06.2019.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

Судья

                                  В.С.Терских