﻿﻿

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-59723/2019

26 декабря 2019 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     16 декабря 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме  26 декабря 2019 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Масенковой И.В.

судей  Пряхиной Ю.В., Семиглазова В.А.

при ведении протокола судебного заседания:  Утяшевой Т.П., 

при участии:  

согласно протоколу судебного заседания,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-26868/2019) ООО «Балтросс» на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.07.2019 по делу  № А56-59723/2019 (судья  Сурков А.А.), принятое 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «ИГНИС»

к  Обществу с ограниченной ответственностью «Балтросс»

о взыскании,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ИГНИС»   обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области   с иском к обществу с ограниченной ответственностью «БАЛТРОСС»   о взыскании по договору от 10.07.2018 №77 на выполнение работ комплекса работ по огнезащите узлов пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями на объекте «Жилой объект со встроенным детским дошкольным учреждением не менее чем на 40 мест»: 1 576 690 руб. задолженности, 157 669 руб. пеней за просрочку оплаты по состоянию на 15.05.2019, 35 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

Решением от 22.07.2019 Арбитражный суд   города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  исковые требования удовлетворил.

В апелляционной жалобе ООО «Балтросс» просит  решение отменить, в иске отказать. Податель жалобы   ссылается на нарушение судом правил извещения ответчика о времени и месте судебного разбирательства, просит о снижении неустойки в связи с несоразмерностью.

Законность и обоснованность судебного акта   проверены в апелляционном порядке.  

В судебном  заседании  представитель ООО «ИГНИС» поддержал доводы апелляционной жалобы.   

Из материалов дела следует, что    ООО «ИГНИС»   (подрядчик) и ООО «БАЛТРОСС» (заказчик) заключили Договор.

Цена Договора составляет 2 476 690 руб. (пункт 3 Договора). Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 2).

В соответствии с пунктом 3.7 Договора работы подлежат оплате  в течение 15 банковских дней с момента предоставления  всех необходимых документов.

Факт выполнения работ подтвержден   актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 25.12.2018 № 2, 31.10.2018 №1 на 1 576 690 руб., подписанными без замечаний и возражений. 

В связи с неоплатой выполненных работ в претензии от 10.04.2019 № 84 Общество «ИГНИС» потребовало от Общества «БАЛТРОСС»  погасить задолженность в размере 1 576 690 руб.

Претензия   оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения ООО «ИГНИС» с иском в суд. 

Суд первой инстанции признал требования истца обоснованными по праву и размеру. 

Заслушав объяснения истца, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, выводы обжалуемого судебного акта, представленные в материалы дела доказательства, апелляционный суд не усматривает оснований для отмены или изменения решения.

Согласно статьям 702, 708, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) и оплатить обусловленную цену, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе - немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязанности заказчика по оплате работ является сдача подрядчиком результата работ надлежащего качества и их приемка заказчиком.

Производство работ на объекте заказчик не отрицает. Согласно актам приемки, работы приняты со стороны заказчика без возражений и замечаний, претензий к срокам и качеству выполнения работ не заявлено.

Согласно пункту 9.3 Договора в случае просрочки оплаты заказчик по требованию подрядчика обязуется выплатить пени в размере 0,1 % от задержанной к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости просроченного платежа.

Истцом в соответствии с  пунктом 9.3 Договора начислены ответчику пени за просрочку оплаты за период с  24.01.2019 по 15.05.2019 в размере  157 669 руб. Расчет проверен судом, признан арифметически верным.

В качестве доказательства понесенных расходов на оплату услуг представителя истец представил договор на оказания юридических услуг от 10.04.2019, счет на оплату от 15.05.2019 №2/05, платежное поручение от 15.05.2019 № 285 на 35 000 руб.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Как разъяснено в пункте 71 Постановления № 7, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В пункте 77 Постановления № 7 указано, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ). Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика (пункт 73 Постановления № 7). При этом согласно пункту 72 Постановления № 7 заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» и в части 7 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции. В частности, не могут быть приняты и рассмотрены требования о снижении размера пеней, неустойки, штрафа, которые не были заявлены в суде первой инстанции.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В суде первой инстанции ответчик не приводил довод о несоразмерности неустойки, ходатайство о снижении суммы неустойки и применении статьи 333 ГК РФ не заявлял, следовательно, оснований для ее применения у суда апелляционной инстанции не имеется. При заключении соглашения, устанавливающего размер неустойки, ответчик действовал добровольно и, следовательно, должен был предвидеть соответствующие неблагоприятные последствия нарушения условий договора.

Довод о нарушении судом правил извещения противоречит материалам дела, признан судом не состоятельным. В материалах  дела имеются сведения об отправлении судебной корреспонденции  и о вручении ответчику определения о принятии искового заявления к производству (л.д. 42),

С учетом изложенного, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 22.07.2019 по делу №  А56-59723/2019  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

И.В. Масенкова

 

Судьи

 

Ю.В. Пряхина

 В.А. Семиглазов