РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело №А40-52042/2023-52-407

09 ноября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 09 ноября 2023 года.

 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества «ИНСТИТУТ МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ» (105005, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.03.2010, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ «ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» (119180, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА УЛ., Д. 52, СТР. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.01.2003, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 3 767 120,57 руб. по договору от 24.07.2020 №33-20 (ст. 49 АПК РФ),

встречное исковое заявление о взыскании неустойки в размере 750 000 руб.,

 

при участии:

от истца – ФИО2 (паспорт, диплом, дов. от 09.01.2023), ФИО3 (паспорт, диплом, дов. от 09.01.2023),

от ответчика – ФИО4 (паспорт, диплом, дов. от 26.12.2022). 

 

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «ИНСТИТУТ МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ «ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 3 767 120,57 руб. по договору от 24.07.2020 №33-20 (с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Наряду с изложенным ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА МОСКВЫ «ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» заявлено встречное исковое заявление о взыскании неустойки в размере 750 000 руб.

В соответствии с требованиями ст. 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков. Встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если встречное требование направлено к зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

На основании изложенного, учитывая, что требования основаны на положениях договора от 24.07.2020 №33-20, встречный иск принят судом к рассмотрению совместно с первоначальными исковыми требованиями.

Истец первоначальные требования поддержал, по встречным требованиям возражал.

Ответчик по первоначальным требованиям возражал, встречные требования поддержал.

В обоснование исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» между ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» и АО «МосводоканалНИИпроект» заключен Государственный контракт от 24.07.2020 № 201/20 (ПСД) (далее - Контракт).

29.12.2021 в адрес Заказчика переданы комплекты проектной документации на бумажном носителе (Накладная№89 от 27.12.2021 и Накладная №90 от 27.12.2021).

Согласно положениям п. 4.4 Контракта для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

25.04.2022 по указанной выше проектной документации получено положительное заключение экспертизы №77-1-1-2-025571-2022.

Во исполнение своих обязательств по вышеуказанному Контракту Подрядчик (АО «МосводоканалНИИпроект») 27.07.2022 (исх. № 1203/22) направил в адрес ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» положительное заключение повторной экспертизы по объекту, расположенному по адресу: 

<

...>, стр. ЗА (1 этаж). Кроме того, в соответствии с п. 4.1 и 4.3 Контракта Подрядчик повторно направил Акты сдачи-приёмки выполненных работ № 174; 175 и 176 от 27.07.2022 по завершённым этапам работ № 4, № 5 и № 6 календарного плана, а также соответствующие счета и счета-фактуры.

В силу п. 4.6 Контракта в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в настоящей статье Контракта.

После полного выполнения обязательств по настоящему Контракту, но не позднее даты окончания срока действия Контракта, Стороны подписывают итоговый Акт об исполнении обязательств Сторонами, который является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных Заказчиком (п. 4.7 Контракта).

Подписанный Заказчиком и Подрядчиком, Акт сдачи-приемки выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату стоимости этапа работ, согласно п. 4.8 Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

В нарушение вышеуказанных положений Контракта ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» как Заказчик по Государственному контракту от 24.07.2020 № 201/20 (ПСД) необоснованно уклонился от исполнения своего обязательства по оплате выполненных АО «МосводоканалНИИпроект» (Подрядчиком) работ по этапам № 4, № 5 и № 6 календарного плана, соответствие качества которых подтверждается положительным заключением ГАУ «Мосгосэкспертиза» от 25.04.2022 года№ 77-1-1-2-025571-2022.

Суммы стоимости работ с разбивкой по актам с учетом договорной неустойки:

Акт № 174 от 27.07.2022 на сумму 474 838,15 руб., пени начисленное за нарушение сроков выполнения работ - 9 496,76 руб. (срок выполнения работ - 27.11.2021, фактический срок - 25.04.2022), итого: 465 341,39 руб.

Акт № 175 от 27.07.2022 на сумму 949 676,30 руб., пени не начисляются (срок выполнения работ - 04.06.2022, фактический срок - 25.04.2022), итого: 949 676,30 руб.

Акт № 176 от 27.07.2022 на сумму 1 899 352,60 руб., пени не начисляются (срок выполнения работ - 04.06.2022, фактический срок - 19.06.2022), итого: 1 899 352,60 руб.

Общая сумма: 465 341,39+949 676,30+1 899 352,60 = 3 314 370,29 руб.

10.06.2022 между Истцом и Ответчиком заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 119/21 ПСД(А)-6 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением комплекса работ по подготовке помещений под установку ангиографа в ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», по адресу: 

<

...>, корп. ЗА, в рамках гражданско-правового договора бюджетного учреждения от 04.08.2021 № 119/21 (АБС).

По условиям указанного Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению авторского надзора за выполнением комплекса работ по подготовке помещений под установку ангиографа в ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», по адресу: 

<

...>, корп. ЗА, в рамках гражданско-правового договора бюджетного учреждения от 04.08.2021 № 119/21 (ABC), в соответствии с Техническим заданием.

В соответствии с п. 1.5 Технического задания, основания для ведения авторского надзора: Положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза» № 77-1-1-2-025571-2022 от 25.04.2022, проектная и рабочая документация.

Как указывает истец, на момент составления искового заявления строительство (реконструкция) находится в завершающей стадии.

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с настоящим иском в суд.

В обоснование встречных требований ответчик ссылается на следующие обстоятельства.

В соответствии с п. 4.1 Контракта Подрядчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания завершения этапа выполнения работ, указанного в Календарном плане, представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 экземплярах.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 3 от 21.06.2021, работы по третьему этапу работ выполнены Подрядчиком 01.02.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 15.02.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 11.06.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 4 от 21.06.2021, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 09.03.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 23.03.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 11.06.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 5 от 19.08.2021, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 05.05.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 20.05.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 16.08.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 6 от 19.08.2021, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 24.05.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 07.06.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 16.08.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 8 от 19.08.2021, работы по третьему этапу работ выполнены Подрядчиком 26.04.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 12.05.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 16.08.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 9 от 19.08.2021, работы по третьему этапу работ выполнены Подрядчиком 06.05.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 21.05.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 16.08.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 10 от 19.08.2021, работы по третьему этапу работ выполнены Подрядчиком 19.05.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 02.06.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 16.08.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 11 от 19.08.2021, работы по третьему этапу работ выполнены Подрядчиком 27.05.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 10.06.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 16.08.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 12 от 19.08.2021, работы по третьему этапу работ выполнены Подрядчиком 27.05.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 10.06.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 16.08.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 13 от 19.08.2021, работы по третьему этапу работ выполнены Подрядчиком 09.04.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 23.04.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 16.08.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 14 от 26.10.2021, работы по третьему этапу работ выполнены Подрядчиком 21.06.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 05.07.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 18.10.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 15 от 26.10.2021, работы по третьему этапу работ выполнены Подрядчиком 29.07.2021, следовательно,

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 18.10.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 17 от 26.10.2021, работы по третьему этапу работ выполнены Подрядчиком 01.02.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 15.02.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 18.10.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 22 от 24.12.2021, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 06.10.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 20.10.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 15.12.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 23 от 24.12.2021, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 15.07.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 29.07.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 15.12.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 24 от 24.12.2021, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 21.07.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 04.08.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 15.12.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 25 от 24.12.2021, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 30.07.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 13.08.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 15.12.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 26 от 24.12.2021, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 24.06.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 08.07.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 15.12.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 27 от 24.12.2021, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 17.06.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 01.07.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 15.12.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 28 от 24.12.2021, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 30.04.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 18.05.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 30 от 27.12.2021, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 23.09.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 07.10.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 23.12.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 32 от 27.12.2021, работы по третьему этапу работ выполнены Подрядчиком 04.06.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 18.06.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 23.12.2021.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 34 от 01.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 15.11.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 29.11.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 35 от 01.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 22.07.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 05.08.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 36 от 01.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 09.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 23.12.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 37 от 01.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 10.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 24.12.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 38 от 01.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 17.08.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 31.08.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 22.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 39 от 01.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 16.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 30.12.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 40 от 01.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 17.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 10.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 41 от 03.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 17.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 10.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 28.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 42 от 03.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 24.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 17.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 28.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 43 от 03.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 11.11.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 25.11.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 28.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 44 от 03.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 22.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 13.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 28.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 45 от 03.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 06.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 20.12.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 28.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 46 от 03.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 24.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 17.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 28.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 47 от 03.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 06.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 20.12.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 28.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 48 от 03.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 24.12.2021, следовательно, срок для предоставления подрядчиком комплекта отчетной документации был установлено до 17.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 28.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 49 от 03.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 24.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 17.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 28.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 50 от 03.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 24.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 17.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 28.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 51 от 03.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 24.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 17.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 28.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 52 от 03.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 24.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 17.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 28.02.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 62 от 30.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 29.11.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 13.12.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 63 от 30.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 15.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 29.12.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 64 от 30.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 12.10.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 26.10.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 65 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 66 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 23.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 67 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 68 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 69 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 70 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 71 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 72 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 73 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 74 от 30.03.2022, работы по третьему этапу работ выполнены Подрядчиком 27.07.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 10.08.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 75 от 30.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 25.08.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 08.09.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 76 от 30.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 27.08.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 10.09.2021.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 77 от 30.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 27.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 18.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 78 от 30.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 27.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 18.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 79 от 30.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 27.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 18.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 80 от 30.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 27.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 18.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 81 от 30.03.2022, работы по четвертому этапу работ выполнены Подрядчиком 27.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 18.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 82 от 30.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 24.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 17.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 83 от 30.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 11.11.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 25.11.2021.

Вместе с тем, комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 84 от 30.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 85 от 30.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 86 от 30.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 87 от 30.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 88 от 30.03.2022, работы по пятому этапу работ выполнены Подрядчиком 28.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 19.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 89 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 27.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 18.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 90 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 27.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 18.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 91 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 29.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 20.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 92 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 29.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 20.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 93 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 29.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 20.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 94 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 29.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 20.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ № 95 от 30.03.2022, работы по шестому этапу работ выполнены Подрядчиком 29.12.2021, следовательно, срок для представления Подрядчиком комплекта отчетной документации был установлен до 20.01.2022.

Комплект отчетной документации был передан Заказчику 24.03.2022.

Пунктами 7.6, 7.6.3 Контракта установлено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 10 000 руб., если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

В соответствии с п. 2.1 Контракта цена Контракта составляет 56 128 000 руб.

Ответчиком произведено начисление неустойки на сумму 750 000 руб. (10 000 руб. за каждое нарушение обязательства по Контракту).

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения истца и ответчика, оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об удовлетворении первоначальных и встречных требований частично.

Относительно первоначальных требований.

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 309-310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

24.07.2020 между ГБУЗ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» (Заказчик) и АО «МосводоканалНИИпроект» (Подрядчик) был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 201/20(ПСД) на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на переоборудование помещений под установку медицинского оборудования в лечебных учреждениях города Москвы (лот 1).

Согласно п. 1.1 Контракта, Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить комплекс проектно-изыскательских работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на переоборудование помещений под установку медицинского оборудования в лечебных учреждениях города Москвы (лот 1) в объеме, установленном в Техническом задании, а Заказчик обязался принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Заказчиком произведена оплата выполненных Подрядчиком работ в полном объеме, в соответствии с условиями Контракта, ссылка Подрядчика на превышение стоимости по результатам получения положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» по указанным объектам несостоятельна ввиду того, что при оплате выполненных работ учитывалась стоимость объектов, с учетом исключения части помещений.

В разделе 2 Технического задания (в редакции дополнительного соглашения № 7 от 20.09.2021 к Контракту) содержится перечень объектов и помещений, на которых выполнялся комплекс проектно-изыскательских работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на переоборудование помещений под установку медицинского оборудования в лечебных учреждениях города Москвы, в том числе:

- ГБУЗ «Городская клиническая больница им. СП. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...>.

Технико-экономические показатели:

Общая площадь помещения под установку ангиографа - 117,60 м2;

Общая площадь помещения под установку ангиографа - 106,50 м2;

- ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...>.

Технико-экономические показатели:

Общая площадь помещения под установку ангиографа - 90,00 м2;

Общая площадь помещения под установку ангиографа - 90,00 м2;

- ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...>.

Технико-экономические показатели:

Общая площадь помещения под установку ангиографа - 100,00 м2;

Общая площадь помещения под установку ангиографа - 100,00 м2;

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...>.

Технико-экономические показатели:

Общая площадь помещения под установку ангиографа - 68,60 м2;

Общая площадь помещения под установку ангиографа - 71,60 м2;

Общая площадь помещения под установку ангиографа - 68,10 м2;

- ГБУЗ «Городская клиническая больница им. СИ. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> (введен взамен ГБУЗ «Городская клиническая больница им. М.Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы», по адресу: 

<

...>, согласно дополнительному соглашению № 3 от 30.12.2020 к Контракту).

Технико-экономические показатели:

Общая площадь помещения под установку ангиографа - 190,00 м2.

Письмом от 09.08.2021 № 01-06-2203/21 Заказчик сообщил Подрядчику о том, что во исполнение распоряжения Департамента здравоохранения города Москвы от 05.08.2021 № 31-18-928 об изменениях в плане распределения медицинского оборудования, поставляемого в рамках договоров с обязательством по обеспечению работоспособности в период жизненного цикла, не требуется выполнять разработку проектно-сметной документации по нижеследующим объектам:

- ГБУЗ «Городская клиническая больница им. СП. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> (общая площадь помещения под установку ангиографа 117,60 м2) (позиция 1 плана распределения);

- ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> (общая площадь помещения под установку ангиографа - 90,00 м2) (позиция 2 плана распределения);

- ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> (общая площадь помещения под установку ангиографа- 100,00 м2) (позиция 3 плана распределения);

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> (общая площадь помещения под установку ангиографа - 68,10 м2) (позиция 4 плана распределения).

Истец в исковом заявлении указывает, что ГБУЗ «Городская клиническая больница        им.    СП.        Боткина        Департамента        здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> в вышеуказанном письме отсутствует.

В тексте письма отсутствует указание на данный объект, к письму приложена таблица «План распределения медицинского оборудования в рамках КЖЦ», в которой указан объект ГБУЗ «Городская клиническая больница им. СП. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> (позиция 1).

В соответствии с Дополнительным соглашением № 7 от 20.09.2021 к Контракту в связи с допущенной технической ошибкой пункт 2.2 Технического задания изложен в новой редакции и объект «ГБУЗ «Городская клиническая больница им. СП. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...>» указан как «ГБУЗ «Городская клиническая больница им. СП. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...>».

Таким образом, Подрядчик был уведомлен, что не требуется выполнение работ по объекту ГБУЗ «Городская клиническая больница им. СП. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> (общая площадь помещения под установку ангиографа - 117,60 м2).

Как пояснил ответчик, работы по контракту следовало выполнять с учетом письма Заказчика от 09.08.2021 № 01-06-2203/21 (которое не было отозвано Заказчиком).

Таким образом, по части помещений Подрядчиком не выполнялся комплекс проектно-изыскательских работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на переоборудование помещений под установку медицинского оборудования         в          лечебных       учреждениях города            Москвы, а выполненные до приостановления работы были приняты и оплачены Заказчиком, что подтверждается и Ответчиком.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание п. 8 Технического задания, порядок расчетов по Контракту выглядит следующим образом:

- ГБУЗ «Городская клиническая больница им. СП. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> (общая площадь помещения под установку ангиографа - 106,50 м2), стоимость работ, с учетом дополнительного соглашения № 7 от 20.09.2021 к Контракту и письма от 09.08.2021 № 01-06-2203/21 составляет 1 117 779,21 руб. Заказчик принял и оплатил выполненные работы по указанному объекту на общую сумму в размере 1 117 779,21 руб., что подтверждается Актами сдачи-приемки выполненных работ № 2 от 30.12.2020, № 32 от 27.12.2021, № 75, № 82 и № 89 от 30.03.2022;

- ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> (общая площадь помещения под установку ангиографа - 90,00 м2), стоимость работ, с учетом письма от 09.08.2021 № 01-06-2203/21 составляет 1 044 776,17 руб. Заказчик принял и оплатил выполненные работы по указанному объекту на общую сумму в размере 1 044 776,17 руб., что подтверждается Актами сдачи-приемки выполненных работ № 2 от 30.12.2020, № 14 от 26.10.2021, № 30 от 27.12.2021, № 63 и № 68 от 30.03.2022;

- ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> (общая площадь помещения под установку ангиографа - 100,00 м2), стоимость работ, с учетом дополнительного соглашения № 7 от 20.09.2021 к Контракту и письма от 09.08.2021 № 01-06-2203/21 составляет 1 083 219,15 руб. Заказчик принял и оплатил выполненные работы по указанному объекту на общую сумму в размере 1 083 219,15 руб., что подтверждается Актами сдачи-приемки выполненных работ № 2 от 30.12.2020, № 3 от 21.06.2021, №23 от 24.12.2021, №62 и №73 от 30.03.2022;

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> (общая площадь помещений под установку ангиографа - 68,60 м2 и 71,60 м2), стоимость работ, с учетом письма от 09.08.2021 № 01-06-2203/21 составляет 1 558 257,72 руб. Заказчик принял и оплатил выполненные работы по указанному объекту на общую сумму в размере 1 558 257,72 руб., что подтверждается Актами сдачи-приемки выполненных работ № 2 от 30.12.2020,    № 13 от 19.08.2021, № 35 от 01.03.2021, № 64 и № 72 от 30.03.2022;

- ГБУЗ «Городская клиническая больница им. СИ. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 

<

...> (общая площадь помещения под установку ангиографа - 190,00 м2), стоимость работ, с учетом дополнительного соглашения № 3 от 30.12.2020 к Контракту составляет 1 920 223,76 руб. Заказчик принял и оплатил выполненные работы по указанному объекту на общую сумму в размере 1 920 223,76 руб., что подтверждается Актами сдачи-приемки выполненных работ № 2 от 30.12.2020, № 74, № 80, № 87 и № 94 от 30.03.2022.

В соответствии с п. 2.7.2 Контракта Заказчик поэтапно оплачивает работы, выполненные Подрядчиком на соответствующем этапе Графика выполнения работ (Календарного плана), в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, с приложением отчетных документов, в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

На основании п. 4.1 Контракта Подрядчик в срок не позднее 10 рабочих дней после окончания завершения этапа выполнения работ, указанного в Календарном плане, представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 экземплярах.

Таким образом, Заказчиком произведена оплата выполненных Подрядчиком работ в полном объеме, в соответствии с условиями Контракта, а ссылка Подрядчика на превышение стоимости по результатам получения положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» по указанным объектам несостоятельна ввиду того, что при оплате выполненных работ учитывалась стоимость объектов, с учетом исключения части помещений.

Относительно объекта ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова Департамента    здравоохранения    города    Москвы»    по    адресу:    

<

...>- Кудринская, д. 15.

Стоимость работ по Контракту составляла 4 748 381,51 руб.

Заказчик принял и оплатил выполненные в период срока действия Контракта работы по 2-му и 3-му этапу Календарного плана по указанному объекту на общую сумму в размере 1 424 514,45 руб., что подтверждается Актами сдачи-приемки выполненных работ № 2 от 30.12.2020 и № 21 от 26.10.2021.

Как пояснил ответчик, в нарушение условий Контракта Подрядчиком в установленные сроки работы по вышеуказанному объекту не были выполнены в полном объеме, разработанная Подрядчиком проектно-сметная документация получила положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза» от 25.04.2022 № 77-1-1-2-025571-2022 за пределами срока действия Контракта.

Суд, рассмотрев указанный довод ответчика, считает его несостоятельным на основании нижеследующего.

Пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Суд приходит к выводу, что результат выполненных работ находится у заказчика, у него отсутствуют какие-либо замечания по объему и качеству работ и их результат может им использоваться, получено положительное заключение, нарушение исполнителем установленного контрактом срока выполнения работ не может являться основанием для освобождения заказчика от оплаты работ.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца частично на сумму 1 104 417,66 руб. задолженности.

Относительно требования по встречному иску.

Истцом было заявлено о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Материалами дела подтверждается просрочка истца в исполнении обязательств.

Суд приходит к выводу о возможности применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пунктов 69, 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7, подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке. Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом согласно пункту 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме.

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7, правила о снижении размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются также в случаях, когда неустойка определена законом.

Степень соразмерности заявленной ответчиком неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств спора и взаимоотношений сторон.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, Гражданский кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.

В силу ч. 1 ст. 64, ст. 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами ст. ст. 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об относимости и допустимости доказательств.

Оценив представленные в дело доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь названными нормами права, учитывая положения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о снижении размера неустойки до 75 000 руб. (по 1 000 руб.).

На основании изложенного, суд считает первоначальные и встречные исковые требования подлежащими удовлетворению в части, в результате чего произвести взаимозачет.

В силу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны представлять доказательства. Эта обязанность основана на статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Правовая позиция об этом сформулирована в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11, от 08.10.2013 № 12857/12.

Принцип диспозитивности, характерный для гражданских правоотношений, распространяет свое действие и на процессуальные отношения; в арбитражном процессе диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных участников спорных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом.

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ «ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» (ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного общества «ИНСТИТУТ МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ» (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 1 104 417,66 руб., госпошлину в размере 11 601,43 руб.

В остальной части отказать.

Взыскать по встречному иску  с акционерного общества «ИНСТИТУТ МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ» (ИНН: 

<

***>) в пользу ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ «ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» (ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 75 000 руб.

В остальной части отказать.

Взыскать по встречному иску  с акционерного общества «ИНСТИТУТ МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 3 000 руб.

Произвести зачет первоначальных и встречных требований.

Взыскать с ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ «ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» (ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного общества «ИНСТИТУТ МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ» (ИНН: 

<

***>)   денежные средства в размере 1 041 019,09 руб.

 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья

Р.Е. Галиева