Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-15264/2023

г. Хабаровск

12 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2024 года.

В полном объеме решение изготовлено 12 апреля 2024 года.

 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Д.Л. Малашкина

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровский институт инженерно-строительных изысканий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 6800412, 

<

...>, литер А, помещ. 7)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Сибстройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 630040, 

<

...>)

о взыскании 703 638 руб. 00 коп.

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Сибстройпроект»

к Обществу с ограниченной ответственностью «Хабаровский институт инженерно-строительных изысканий»

о признании договора № 007 от 27.07.2023 расторгнутым с 25.08.2023 и о взыскании 650 667 руб. 62 коп.,

при участии в судебном заседании:

от ООО «ХабаровскТизис» – ФИО2 представитель по доверенности от 01.08.2019 № б/н,

от ООО «Сибстройпроект» (в режиме онлайн-заседания) – ФИО3 представитель по доверенности от 01.09.2023 № б/н,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровский институт инженерно-строительных изысканий» (далее – истец, ООО «ХабаровскТисиз») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Сибстройпроект» (далее – ответчик, ООО «Сибстройпроект») о взыскании 593 058 руб. 00 коп, из которых долг по договору № 007 от 27.07.2023 в размере 582 000 руб. 00 коп. и неустойка в размере 11 058 руб. 00 коп.

Определением суда от 27.09.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), возбуждено производство по делу № А73-15264/2023.

05.10.2023 ООО «Сибстройпроект» обратилось в суд со встречным иском к ООО «ХабаровскТисиз» о признании договора № 007 от 27.07.2023  расторгнутым с 25.08.2023 и взыскании 620 300 руб. 00 коп., из которых: 550 000 руб. 00 коп. – долг и 70 300 руб. 00 коп. – неустойка.

Определением суда от 16.11.2023 встречный иск ООО «Сибстройпроект» принят к рассмотрению совместно с первоначальным иском.

Определением от 16.11.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, назначено предварительное судебное заседание на 18.12.2023 в 14 часов 30 минут.

В предварительном судебном заседании представитель ООО «ХабаровскТисиз» на основании статьи 49 АПК РФ уточнил размер исковых требований по первоначальному иску, просил взыскать с ООО «Сибстройпроект» долг в размере 582 000 руб. 00 коп. и неустойку в размере 63 438 руб. 00 коп., всего 645 438 руб. 00 коп.

Представитель ООО «Сибстройпроект» на основании статьи 49 АПК РФ уточнил размер исковых требований по встречному иску, просил взыскать с ООО «ХабаровскТисиз» неотработанный аванс в размере 550 000 руб. 00 коп., неустойку в размере 70 300 руб. 00 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 20 036 руб. 54 коп., всего 640 336 руб. 54 коп.

Уточнения размера исковых требований по первоначальному иску и по встречному иску судом приняты к рассмотрению, поскольку не противоречат закону и не нарушают права других лиц.

Определением от 18.12.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 25.01.2024 в 15 часов 30 минут.

Представитель ООО «ХабаровскТисиз» в судебном заседании в порядке статьи 49 АПК РФ заявил ходатайство об уточнении размера исковых требований по первоначальному иску до 667 554 руб. 00 коп., из которых долг в размере 582 000 руб. 00 коп. и неустойка в размере 85 554 руб. 00 коп.

Уточнение размера исковых требований по первоначальному иску принято судом.

Представитель ООО «Сибстройпроект» в судебном заседании в порядке статьи 49 АПК РФ заявил ходатайство об уточнении встречных исковых требований в части требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами до 30 367 руб. 62 коп.

Уточнение исковых требований по встречному иску в указанной части принято судом к рассмотрению.

Определением от 25.01.2024 судебное разбирательство по делу было отложено на 27.03.2024 в 14 часов 10 минут.

Представитель ООО «ХабаровскТисиз» в судебном заседании в порядке статьи 49 АПК РФ заявил ходатайство об уточнении исковых требований по первоначальному иску до 703 638 руб. 00 коп., из которых: долг в размере 582 000 руб. 00 коп. и неустойка в размере 121 638 руб. 00 коп.

Уточнение размера исковых требований по первоначальному иску принято судом к рассмотрению.

Представитель ООО «ХабаровскТисиз» в судебном заседании поддержал исковые требования по первоначальному иску с учетом уточнений, в обоснование привел доводы, изложенные в исковом заявлении и дополнительных письменных пояснениях; возражал против встречных исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на встречный иск.

Представитель ООО «Сибстройпроект» привел возражения на первоначальный иск, изложенные в отзыве на первоначальный иск; настаивал на удовлетворении встречного иска с учетом уточнения.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО «Сибстройпроект» (заказчик) и ООО «ХабаровскТисиз» (подрядчик) заключен договор № 007 от 27.07.2023 (далее – договор № 007), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору) полевые инженерно-геологические работы по объекту: «Строительство ВЛ 220 кВ Амурская – ГПП ориентировочной протяженностью 60 км. С реконструкцией ПС 500 кВ Амурская (расширение ОРУ 220 кВ на одну линейную ячейку) (для ТП энергопринимающих устройств ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный») (объект).

Содержание и объем работ, технические и другие требования к работам и их результату определены  в Техническом задании (Приложение № 1 к договору – Техническое задание) (пункт 1.2 к договору).

Согласно пункту 2.1 договора ориентировочная стоимость работ составляет 3 700 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения. Стоимость работ определяется из расчета 3 500 руб. 00 коп. без НДС за 1 погонный метр бурения, а также 200 000 руб. 00 коп. без НДС за единоразовую мобилизацию на объект и мобилизацию с объекта.

Согласно пункту 2.6 договора, в случае непредоставления заказчиком подрядчику пропусков и/или допусков необходимых для выполнения работ на объекте, необеспечения заказчиком подъездных путей, невозможности проезда техники подрядчика к месту выполнения работ, согласно выданного технического задания (Приложение № 1 к договору), непредоставления заказчиком согласованных с компетентными органами схем расположения скважин, а также ввиду неисполнения иных обязательств заказчика по настоящему договору (в том числе нарушение заказчиком сроков оплаты, обусловленных пунктом 2.2 договора), препятствующих выполнению работ на объекте, подрядчик вправе выставить заказчику штраф за простой в размере 40 000 руб. 00 коп. без НДС за каждый день простоя, при этом срок выполнения работ, обусловленный пунктом 4.1, приостанавливается с момента начала простоя. Оплата простоя подрядчика, обусловленного настоящим пунктом, осуществляется заказчиком в течение 3 рабочих дней, с даты выставления подрядчиком счета на оплату.

В соответствии с пунктом 3.2 договора, фото и видео материалы, а также фотографии буровых журналов направляются заказчику посредством электронной связи на адрес электронной почты.

Пунктом 3.3 договора установлено, что по окончании выполнения работ подрядчик направляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ посредством электронной связи на адрес электронной почты.

В соответствии с пунктом 3.4 договора, заказчик в течении 2 рабочих дней с момента получения от подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ посредством электронной связи обязан его подписать и направить на адрес электронной почты подрядчика.

В случае не подписания акта сдачи - приемки выполненных работ в электронном виде, в указанный выше срок, работа считается принятой заказчиком и подлежит оплате в соответствии с условиями договора, акт сдачи- приемки выполненных работ в электронном виде считается подписанным.

В соответствии с пунктом 4.1 договора, подрядчик приступает к выполнению работ после подписания настоящего договора с утвержденным заказчиком и согласованным подрядчиком техническим заданием и поступления на расчетный счет подрядчика денежных средств в размере 200 000 руб. 00 коп. без НДС. Срок выполнения работ – 60 рабочих дней.

В соответствии с пунктом 5.1 договора заказчик обязан:

- оплатить стоимость работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

- вынести и закрепить на местности точки бурения (скважин);

- использовать результаты выполненных работ, полученных от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором;

- организовать получение пропусков, необходимых для проведения работ на объекте производства работ;

-обеспечивать подъездные пути, в случае невозможности проезда техники подрядчика к месту проведения работ, согласно выданного технического задания (при необходимости). В случае если в силу данного пункта заказчик не обеспечит подъездные пути к месту проведения работ, вследствие чего подрядчиком будет причинен ущерб благоустроенной территории, а также флоре и фауне, то ответственность за данный ущерб несет заказчик;

- самостоятельно, своими силами или силами привлеченных третьих лиц обеспечить восстановление благоустроенной территории в случае необходимости;

- предоставить согласованные с компетентными органами схемы расположения скважин;

- исполнять иные обязанности, определенные настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 6.3 за нарушение сроков оплаты, предусмотренных пунктами 2.2, 2.6, 2.7, 2.8 договора, заказчик уплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченных сумм за каждый день просрочки.

Срок действия контракта установлен с момента его подписания сторонами и до полного исполнения сторонами принятых обязательств, в том числе в части финансовых расчетов, включая взаимные или арбитражные разногласия (пункт 8.1 договора).

Как следует из материалов дела, 31.07.2023 заказчик перечислил на расчетный счет подрядчика денежные средства в размере 200 000 руб. 00 коп. без НДС. Также 31.07.2023 подрядчик получил от заказчика каталог координат посредством электронной связи. После этого подрядчик приступил к выполнению работ по договору.

В период с 06.08.2023 по 09.08.2023 ООО «ХабаровскТисиз» выполнило работы по бурению инженерно-геологических скважин общим объемом 78 п.м.:

- 23231 (06.08.2023) глубиной 8 п.м.;

- 23233 (06.08.2023) глубиной 8 п.м.;

- 23236 (07.08.2023) глубиной 8 п.м.;

- 23237 (07.08.2023) глубиной 10 п.м.;

- 23238 (07.08.2023) глубиной 8 п.м.;

- 23232 (08.08.2023) глубиной 8 п.м.;

- 23235 (08.08.2023) глубиной 8 п.м.;

- 23214 (09.08.2023) глубиной 10 п.м.;

- 23226 (11.08.2023) глубиной 10 п.м.

Бурение иных инженерно-геологических скважин в рамках договора не представлялось возможным ввиду неисполнения со стороны заказчика обязательств по обеспечению подъездных путей к местам бурения инженерно-геологических скважин, а также не направления сведений о наличии согласований мест бурения с сетедержателями, обусловленных пунктом 5.1 договора, о чем подрядчик неоднократно сообщал в своих письмах исх. № 47 от 04.08.2023, исх. № 48 от 07.08.2023, исх. № 50 от 10.08.2023, исх. № 52 от 11.08.2023, исх. № 53 от 14.08.2023, исх. № 54 от 21.08.2023 , исх. № 55 от 22.08.2023, исх. № 56 от 25.08.2023, которые были направлены на адрес электронной почты заказчика.

Ввиду дальнейшей невозможности выполнения полевых инженерно-геологических работ 28.08.2023 подрядчик письмом исх. № 57 направил на адрес электронной почты заказчика:

1. Акт сдачи-приемки выполненных полевых инженерно-геологических работ от 28.08.2023;

2. Скан-копию акта приемки-сдачи отобранных проб от 25.08.2023, подписанного представителями заказчика и подрядчика;

3. Перечень пробуренных инженерно-геологических скважин;

4. Акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 28.08.2023;

5. Счет № 35 от 28.08.2023 г. на оплату окончательно расчета в размере 582 000 руб. 00 коп.;

6. Фото и видео материалы с мест бурения инженерно-геологических скважин (во исполнение со стороны ООО «ХабаровскТисиз» обязательств, обусловленных положениями пункта 1.4 договора).

Обязательство по оплате выполненных ООО «ХабаровскТисиз» работ ООО «Сибстройпроект» не исполнило, врезультате возник долг в сумме 582 000 руб. 00 коп.

Претензией от 01.09.2023 исх. № 68 ООО «ХабаровскТисиз» обратилось к ООО «Сибстройпроект» с требованием в добровольном порядке исполнить обязательства по оплате выполненных работ.

ООО «Сибстройпроект» претензионные требования ООО «ХабаровскТисиз» оставило без ответа и удовлетворения. 

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «ХабаровскТисиз» в Арбитражный суд Хабаровского края с первоначальным иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ.

ООО «Сибстройпроект» в свою очередь, ссылаясь на нарушение ООО «ХабаровскТисиз» сроков выполнения работ по договору обратилось в арбитражный суд со встречным иском о признании договора № 007 от 27.07.2023  расторгнутым с 25.08.2023 и взыскании 550 000 руб. 00 коп. долга, 70 300 руб. 00 коп. неустойки, до 30 367 руб. 62 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами (с учетом уточнения в порядке статьи 49 АПК РФ).

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Правоотношения сторон регулируются общими обязательственными нормами, изложенными в  первой части  Гражданского  кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), и специальными нормами  параграфа 3 главы  37 ГК РФ «Строительный подряд». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу правила, установленного пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных подрядных работ является сдача результата работ подрядчиком (статьи 711, 746 ГК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения.

В первоначальном иске ООО «ХабаровскТисиз» заявило требования о взыскании с ООО «Сибстройпроект» 703 638 руб. 00 коп., из которых долг в размере 582 000 руб. 00 коп. и неустойка в размере 121 638 руб. 00 коп.

В обоснование первоначального иска ООО «ХабаровскТисиз» ссылается на факт выполнения работ по договору № 007 от 27.06.2023 на общую сумму 582 000 руб. 00 коп. В подтверждение выполнения работ по договору и их сдачи заказчику ООО «ХабаровскТисиз» представило в материалы дела акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 19.09.2023, акт сдачи-приемки выполненных работ от 28.08.2023, акт приемки-сдачи отобранных проб от 25.08.2023, подписанный представителями заказчика и подрядчика, перечень пробуренных инженерно-геологических скважин за весь период выполнения работ.

Доказательств оплаты долга в указанном размере ответчиком по первоначальному иску не представлено.

При таких обстоятельствах исковое требование ООО «ХабаровскТисиз» по первоначальному иску о взыскании с ООО «Сибстройпроект» основного долга в размере 582 000 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению.

Доводы ООО «Сибстройпроект» отклоняются ввиду следующего.

Подрядчик неоднократно сообщал в своих письмах исх. № 47 от 04.08.2023, исх. № 48 от 07.08.2023, исх. № 50 от 10.08.2023, исх. № 52 от 11.08.2023, исх. № 53 от 14.08.2023, исх. № 54 от 21.08.2023, исх. № 55 от 22.08.2023, исх. № 56 от 25.08.2023, которые были направлены на адрес электронной почты заказчика, о том, что заказчик грубого не исполняет обязательств по обеспечению подъездных путей к местам бурения инженерно-геологических скважин, а также не направляет сведений о наличии согласований мест бурения с сетедержателями, обусловленных пунктом 5.1 договора.

Стоит заметить, что за весь период нахождения буровой бригады подрядчика на объекте и после их демобилизации от заказчика, никаким из предусмотренных договором способов, не поступало сообщений с приложением какой-либо документации, подтверждающей существование подъездных путей к местам бурения инженерно-геологических скважин и согласований с сетедержателями.

Подрядчик добросовестно выполнил взятые на себя обязательства по выполнению полевых инженерно-геологических работ, в объеме в котором подрядчик смог это сделать, учитывая грубое нарушение заказчиком обязательств, обусловленных пунктом 5.1 договора.

Кроме того, подрядчик в полном объеме и без нарушения сроков, обусловленных положениями договора, передал заказчику результаты выполненных работ, обусловленных пунктом 1.4 договора.

Так, 25.08.2023 по акту сдачи-приемки отобранных проб представителем подрядчика были переданы представителю Заказчика ФИО4 пробы, отобранные в результате бурения инженерно-геологических скважин, а также оригиналы полевой геологической документации (буровой журнал).

Полномочия представителя ООО «Сибстройпроект», подписавшего акт сдачи-приемки отобранных проб, были подтверждены доверенностью от 22.08.2023, полученной 22.08.2023 с электронной почты ООО «Сибстройпроект», указанной в реквизитах договора.

Отобранные пробы и оригинал бурового журнала были приняты представителем заказчика без замечаний.

Также ООО «Сибстройпроект» в обусловленный договором срок не направило мотивированный отказ от принятия работ и подписания акта после получения 28.08.2023 акта сдачи-приемки выполненных работ.

ООО «ХабаровскТисиз» в первоначальном иске также заявлено требование о взыскании неустойки в размере 121 638 руб. 00 коп. (с учетом уточнения в порядке статьи 49 АПК РФ).

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Пунктом 6.3 договора предусмотрено, что за просрочку любых денежных обязательств заказчик уплачивает исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня неисполнения такого денежного обязательства.

Материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком срока оплаты произведенных работ.

Расчет неустойки (пени) ООО «ХабаровскТисиз» произвело исходя из задолженности в размере 582 000 руб. 00 коп. за период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 27.03.2024. Всего неустойка (пеня) составила 121 638 руб. 00 коп.

Расчет неустойки (пени) за просрочку оплаты на сумму 121 638 руб. 00 коп. судом проверен, является верным арифметически и по праву.

Исковое требование ООО «ХабаровскТизис» по первоначальному иску о взыскании с ООО «Сибстройпроект» неустойки в размере 121 638 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению.

Возражения ответчика, изложенные в отзыве на первоначальный иск, судом рассмотрены и отклоняются как несостоятельные и опровергаемые материалами дела, а также вышеприведенными выводами суда. Относимых и допустимых доказательств в обоснование возражений на первоначальный иск ответчик в материалы дела не представил.

Во встречном ООО «Сибстройпроект» заявил требование о признании договора от 27.07.2023 № 007 расторгнутым с 25.08.2023 и взыскании  долга в размере 550 000 руб. 00 коп., неустойки в размере 70 300 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 30 367 руб. 62 коп.

Суд считает необходимым во встречном иске отказать ввиду следующего.

Фактически заявлено требование о расторжении договора от 27.07.2023 № 007.

Согласно статье 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, другая сторона вправе отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков.

Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случаях, если при наличии оснований для отказа от договора (исполнения договора) сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой стороны предложенного последней исполнения обязательства, последующий отказ по тем же основаниям не допускается.

Если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором, в случаях, когда сторона, осуществляющая предпринимательскую деятельность, при наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором и служащих основанием для осуществления определенного права по договору, заявляет отказ от осуществления этого права, в последующем осуществление этого права по тем же основаниям не допускается, за исключением случаев, когда аналогичные обстоятельства наступили вновь.

В случаях, установленных настоящим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором, правила пункта 6 настоящей статьи применяются при неосуществлении определенного права в срок, предусмотренный настоящим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В силу статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

Согласно статье 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Уведомлением от 06.09.2023 № ССП-5-09 ООО «Сибстройпроект» заявило об одностороннем отказе от исполнения договора от 27.07.2023 № 007.

Таким образом, договор от 27.07.2023 № 007 считается расторгнутым с 06.09.2023, то есть со дня получения уведомления в силу статей 450.1, 716, 717 ГК РФ.

Также суд указывает, что не имеется оснований для взыскания аванса, так как задолженность ООО «Сибстройпроект» перед ООО «ХабаровскТисиз», признанная судом обоснованной, превышает сумму аванса.

Суд также отказывает ООО «Сибстройпроект» во взыскании неустойки за нарушение сроков выполненных работ по доводам ООО «ХабаровскТисиз» о невозможности бурение иных инженерно-геологических скважин ввиду грубого неисполнения со стороны заказчика обязательств по обеспечению подъездных путей к местам бурения инженерно-геологических скважин, а также не направления сведений о наличии согласований мест бурения с сетедержателями.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку имущественные требования по первоначальному иску удовлетворены в полном объеме, с ООО «Сибстройпроект» в пользу ООО «ХабаровскТисиз» следует взыскать  судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 861 руб. 00 коп.

ООО «Сибстройпроект» при предъявлении встречного иска в суд уплачена государственная пошлина в размере 15 406 руб. 00 коп. (платёжное поручение от 25.09.2023 № 73).

Поскольку в удовлетворении встречного иска отказано, судебные расходы в виде государственной пошлины в соответствии со статьёй 110 АПК РФ относятся на ООО «Сибстройпроект».

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сибстройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровский институт инженерно-строительных изысканий» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) основной долг в размере 582 000 руб. 00 коп., неустойку в размере 121 638 руб. 00 коп., всего 703 638 руб. 00 коп. и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 861 руб. 00 коп.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сибстройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 212 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                                                                                           Д.Л. Малашкин