А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й СУД А Л Т А Й С К О Г О К Р А Я 656015, Барнаул, пр. Ленина, д.76, тел.: (3852) 61-92-78, факс: 61-92-93 http://www.altai-krai.arbitr.ru; е-mail: а03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-12507/2020

г. Барнаул

02 июня 2021 года

Арбитражный суд Алтайского края в лице судьи Кулика М.А., при ведении протокола  судебного заседания помощником судьи Бутузовой Я.П., рассмотрев в судебном заседании исковое  заявление общества с ограниченной ответственностью «Стеди» (656066, Алтайский край, г.Барнаул, тр- кт Павловский, д. 126, оф. 56, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Администрации Родинского  района Алтайского края (659780, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании убытков по муниципальному контракту №  0817200000319014037 в размере 859088 руб. 54 коп., расходов по оплате государственной пошлины в  размере 20185 руб., а также по встречному иску Администрации Родинского района Алтайского края к  обществу с ограниченной ответственностью «Стеди» о взыскании неустойки в размере 283849.05 руб. за  период с 17.06.2020 по 18.03.2021, штрафа 359682.01 руб., о признании недействительным решения об  отказе от исполнения муниципального контракта № 0817200000319014037 на выполнение работ по  капитальному ремонту от 16.12.2019, заключенного между обществом с ограниченной  ответственностью «Стеди» (ОГРН 

<

***>) и Администрацией Родинского района Алтайского  края (ОГРН 

<

***>), при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1 по  доверенности от 21.04.20, от ответчика –ФИО2 по доверенности от 11.01.2021,  

Руководствуясь статьями 15, 309,310 393, 330 Гражданского кодекса РФ, а также статьями 65,  71, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.  Встречные исковые требования удовлетворить частично.  

Признать недействительным решение от 29.04.2020 общества с ограниченной  ответственностью «Стеди» (ОГРН 

<

***>) об отказе от исполнения муниципального контракта   № 0817200000319014037 на выполнение работ по капитальному ремонту от 16.12.2019, заключенного  между обществом с ограниченной ответственностью «Стеди» (ОГРН 

<

***>) и  Администрацией Родинского района Алтайского края (ОГРН 

<

***>).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стеди» (ОГРН 

<

***>) в  пользу Администрации Родинского района Алтайского края (ОГРН 

<

***>) штраф в размере  359682 руб. 01 коп., неустойку в размере 51554 руб. 42 коп., в возмещение расходов на проведение  судебной экспертизы 54400 руб.  

В остальной части встречных исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стеди» (ОГРН 

<

***>) в  пользу Федерального бюджета Российской Федерации 15948 руб. 35 коп. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения.  

Судья М.А. Кулик