Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г.Пермь 

12.09.2024 № А50-16462/2023  

по исковому заявлению Администрации закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края (614575, Пермский  край, поселок городского типа Звездный, улица Ленина, 11, А, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Стройинвест" (614025,  

<

...>, ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>)  

о понуждении к исполнению обязательств, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора: ФИО1 (ИНН 

<

***>, адрес  614002, 

<

...>).  

заинтересованное лицо: судебный пристав-исполнитель ОСП по  Пермскому району УФССП России по Пермскому краю (614111, 

<

...>) исполнительное производство   № 78091/22/59034-ИП.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в срок до 01.12.2024 выполнить  усиление и ремонт конструкций нежилого здания медпункта (88), кадастровый  номер 59:41:0000000:203, площадью 6514 кв. м, расположенного по адресу:  Пермский край, п. Звёздный, военный городок № 1:  

1) усиление и ремонт кладки наружных и внутренних стен, включающий:  замену кладки наружных стен на участках, где техническое состояние  аварийное и усиление кладки на участках с повреждениями (трещины,  пустошовка, отсутствие или подвижность кирпича); замену кладки карнизов и  парапетов на участках с повреждением в блоке «В»; усиление кладки  межоконных простенков в наружных стенах на 1 -ом и 2-ом этажах; усиление  

кладки кирпичных столбов и простенков во внутренних стенах на 1 -ом и 2-ом  этажах и в подвале; ремонт кладки наружных и внутренних стен в местах  трещин; ремонт перемычек оконных проемов со стороны фасадов;  

2) устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции на  кирпичной кладке наружных стен находящейся в грунте, с предварительным  демонтажем отмостки по периметру здания и откопкой грунта на глубину до  бетонной части фундаментов и последующим восстановительным ремонтом  кирпичной кладки и восстановлением отмостки;  

3) ремонт железобетонных плит перекрытия над подвалом, включающий  восстановление защитного слоя бетона на участках с оголением арматуры с  предварительной зачисткой арматуры от коррозионных повреждений;  

4) устройство новой кровли в блоках «А» и «Б», восстановление кровли в  блоке «В».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину по иску в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского  края.  

Судья М.М. Лаптева