Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980  тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-10557/2023

06 июня 2024 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Шамаевой Т.С., при  ведении протокола секретарем судебного заседания Файзрахмановым Е.Р., рассмотрев  дело по исковому заявлению Муниципального казенного учреждения "Инвестиционно-строительное управление" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Строй  Импульс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обязать устранить недостатки, о  взыскании 3 799 276,85 руб.,  

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Строй Импульс» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в четырехмесячный срок после вступления решения в  законную силу устранить недостатки на объекте «Детский эстетический центр в  с.Малыкай Нюрбинского района PC(Я)», возникшие в результате работ по  муниципальному контракту от 3 июля 2019 года № 0816300013219000018 89336, а именно:  

1.1.Обеспечить разработку, согласование с МКУ «Инвестиционно-строительное  управление» Нюрбинского района PC(Я), получение положительного заключения  государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт  объекта и предоставить его Муниципальному казенному учреждению «Инвестиционно-строительное управление» Нюрбинского района PC(Я);  

1.2.Выполнить работы по капитальному ремонту объекта в соответствии с  проектно-сметной документацией на капитальный ремонт объекта:  

1.2.1. Выполнить усиление металлической обоймой колонн с подведением металлических балок под плиты чердачного перекрытия;  

1.2.2. После усиления колонн и плит перекрытия выполнить усиление фундаментов  путем устройства буронабивных свай по типу БНС-1 (сваи устанавливаемые  малогабаритным станком из внутри здания);  

1.2.3. Выполнить устройство продухов согласно проекту; 

1.2.4. Усилить защитный слой бетона ленточного фундамента железобетонной  обоймой бетоном «Скрепа М500»;  

1.2.5. Усилить ограждающие конструкции перегородок и стен дополнительным армированием, трещины инъекцировать цементным раствором «Скрепа М700» с последующей отделкой;  

1.2.6. Восстановить гидроизоляцию ленточного фундамента ниже отм. 0.000  обмазкой битумной мастикой «Технониколь»;  

1.3. Усадочные трещины и оголение, коррозию арматуры на ленточном фундаменте  

заделать ремонтным составом с предварительной очисткой арматуры от коррозии; 

1.4. Щели между стяжкой чердачного перекрытия и стеной изолировать изовером и  

зачеканить битумной мастикой; 1.5. Провести работы по загибу края нижней планки ендовы; 

1.6. В чердачном перекрытии на пересечении осей 2 и А на месте образования инея  

провести работы по утеплению стыков между стеной и перекрытием; 

1.7. Обеспечить доступ на чердак; 1.8. Выровнять подвесной потолок в коридоре; 1.9. 3аменить стеклопакеты с трещинами; 1.10.Устранить деформацию фронтона из поликарбоната; 

1.11 .Выявить и устранить причину перегорания светильников;  1.12. Выявить и устранить причину неработоспособности системы вентиляции;  

1.13. Перед проектированием БНС-1 (устройство буронабивных свай) выполнить  

инженерно-геологические изыскания; 

1.14. В период проведения строительно-монтажных работ предусмотреть в сметной  

части проекта мониторинг по деформации здания с установкой деформационных марок.  

Нивелирование применить не ниже II класса. Деформационные марки должны быть  

установлены в период капитального ремонта. Программа наблюдений за осадками здания  

и температурой грунтов основания должна быть разработана в проекте реконструкции.  

Периодичность проведения измерений контролируемых параметров принять по табл. М.2  

СП 25.13330.2012; 

1.15. При обнаружении трещин во время строительства установить гипсовые маяки  

на трещинах с указанием номера в плане здания с датой и временем установки.  

Наблюдение проводить в месяц 3 раза с периодом осмотра 8-10 дней и прописать в  

журнал наблюдения; 

Взыскать с общества с общества с ограниченной ответственностью "Строй  Импульс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Муниципального казенного  учреждения "Инвестиционно-строительное управление" Нюрбинского района Республики  Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) штраф за ненадлежащее  исполнение обязательств по муниципальному контракту от 03.07.2019 года   № 0816300013219000018_89336 в размере 3 799 276,85 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строй Импульс" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 47 996 руб.  государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья Т.С. Шамаева