Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-14980/2020

12 августа 2021 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Касумовой С.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения  "Управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес: 628310, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16-й,  д. 43, помещение 69) к обществу с ограниченной ответственностью Строительная  компания "ЮВ и С" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 143512, Московская  обл., г. Истра, 

<

...>, эт. 2) об обязании выполнения работ,  о взыскании 2 586 633,91 руб., третьи лица акционерное общество "Юганскводоканал"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Департамент муниципального имущества  администрации города Нефтеюганска (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  при участии представителей сторон:  

от истца, третьих лиц – не явились, от ответчика – ФИО2 по доверенности от 11.01.2021, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Строительная компания  "ЮВ и С" в течение 30 дней с даты вступления решения суда в законную силу исполнить  гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 04.12.2014  

 № 0187300012814000784, заключенному между муниципальным казенным учреждением  "Управление капитального строительства" и обществом с ограниченной ответственностью  Строительная компания "ЮВ и С", а именно выполнить работы по восстановлению облицовки поверхности фильтров согласно локально-сметным расчетам ( № 02-03.1-01Доп1  Обществроительные работы. Зал фильтров. 2этап):  

-Облицовка днища и стен фильтров пластиковыми листами; 

-Фильтры второй ступени 3 шт. стены и днище (технологический регламент  облицовки);  

-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях  с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 100  мм диаметром: 20 мм - 841 отверстий;  

-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях  с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной  100 мм диаметром: 20 мм - 171 отверстий;  

-Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами - 1012 шт;  

-Облицовка бетонной поверхности пластиковыми пластинами толщиной  (2,5 мм * 4) 10 мм -252,86 м2;  

-Борты разделители (технологический регламент облицовки); 

-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях  с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 100  мм диаметром: 20 мм - 377 шт.;  

-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях  с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной  100 мм диаметром: 20 мм - 22 шт.;  

-Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами - 399 шт.;  

-Облицовка бетонной поверхности пластиковыми пластинами толщиной  (2,5 мм * 4)10 мм - 99,6 м2;  

-Гидроиспытание фильтров; 

-Испытание на непроницаемость полиизобутилекового покрытия наливом воды -  225 м3.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЮВ и С" в пользу общества  с муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства"  344 610,08 руб., в том числе 110 528,08 руб. неустойки, 234 082 руб. убытков.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЮВ и С" в доход  федерального бюджета 10 808,75 руб. государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что  в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного  судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены  им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены  им под расписку.  

Судья С.Г. Касумова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.03.2021 3:38:23

Кому выдана Касумова Сона Гашам-гызы