Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-28054/2024

1 ноября 2024 г.

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 октября 2024 г.

Решение изготовлено в полном объеме 1 ноября 2024 г.

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Первых Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рыжковым В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «ТОР», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск к обществу с ограниченной ответственностью «Синтез», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, о взыскании 1 084 585 руб. 

при неявке сторон в судебное заседание

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «ТОР» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Синтез» (далее – ответчик) о взыскании задолженности за выполненные работы по договорам подряда в размере 815 000 руб., неустойки в размере 269 585 руб. (л.д. 2-4).

В обоснование исковых требований истец указал, что между ним и ответчиком заключены договоры подряда, при этом выполненные истцом работы по договору, не оплачены.

Отзыв на исковое заявление и доказательства по делу ответчиком не представлены, что не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Стороны в судебное заседание не явились, об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии с ч. 1, 4 ст. 123 АПК РФ (л.д. 36-37). Дело рассмотрено в их отсутствие по правилам ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) заключены следующие договоры подряда 

- от 25.01.2023 № 05/23, по условиям которого исполнитель обязуется по заданию заказчика разработать следующие разделы проектной (ПД) и рабочей (РД) документации объекта: «Врачебная амбулатория ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское» по адресу: 

<

...> а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Начало работ 26.01.2023, окончание работ – 28.04.2023 (п. 2.1. договора). 

Общая стоимость работ по договору составляет 1 520 000 руб. (п. 3.1. договора).

Оплата выполненных работ производится заказчиком в следующем порядке:

- в течение 3 банковских дней с даты подписания договора заказчик перечисляет на счет исполнителя предоплату в размере 50% от общей стоимости работ по договору, что составляет 760 000 руб.;

- расчет за выполненные работы по этапам в размере 50% от стоимости этапа производится заказчиком не позднее 3 банковских дней после окончания работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по этапам на основании выставленного счета (п. 3.3. договора).

В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных договором, исполнитель вправе взыскать с заказчика сумму неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты (п. 6.2. договора).

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору (п. 8.1. договора).

- от 02.05.2023 № 08/23, по условиям которого исполнитель обязуется по заданию заказчика разработать рабочий проект (чертежи марок АС) на капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск» по адресу: 

<

...>, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Начало работ 03.05.2023, окончание работ – 22.05.2023 (п. 2.1. договора). 

Стоимость работ по договору составляет 80 000 руб. (п. 3.1. договора).

Оплата выполненных работ производится заказчиком в следующем порядке:

- в течение 3 банковских дней с даты подписания договора заказчик перечисляет на счет исполнителя предоплату в размере 50% от общей стоимости работ по договору, что составляет 40 000 руб.;

- окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 3 банковских дней после окончания работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по этапам на основании выставленного счета (п. 3.3. договора).

В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных договором, исполнитель вправе взыскать с заказчика сумму неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты (п. 6.2. договора).

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору (п. 8.1. договора).

Дополнительным соглашением № 1 к договору № 08/23 стороны согласовали выполнение дополнительных работ: разработать рабочий проект на капитальный ремонт помещений лестничных клеток и технического этажа здания поликлиники ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск» по адресу: 

<

...> (л.д. 12).

Начало работ 02.08.2023, окончание работ – 30.06.2023 (п. 2.соглашения). 

Стоимость работ по дополнительному соглашению составляет 100 000 руб. (п. 3. соглашения).

Расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 3 банковских дней после окончания работ и подписания акта приемки-передачи выполненных работ (п. 3.1. соглашения).

Дополнительным соглашением № 2 к договору № 08/23 стороны согласовали выполнение дополнительных работ: разработать рабочий проект на капитальный ремонт крылец здания поликлиники ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск» по адресу: 

<

...> (л.д. 11 оборот).

Начало работ 30.06.2023, окончание работ – 31.07.2023 (п. 2.соглашения). 

Стоимость работ по дополнительному соглашению составляет 200 000 руб. (п. 3. соглашения).

Расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 3 банковских дней после окончания работ и подписания акта приемки-передачи выполненных работ (п. 3.1. соглашения).

Дополнительным соглашением № 3 к договору № 08/23 стороны согласовали выполнение дополнительных работ: разработать строительную часть (чертежи марок АС) проекта на капитальный ремонт помещений 1 и 4 этажа здания поликлиники ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск» по адресу: 

<

...> (л.д. 11).

Начало работ 02.08.2023, окончание работ – 21.11.2023 (п. 2.соглашения). 

Стоимость работ по дополнительному соглашению составляет 250 000 руб. (п. 3. соглашения).

Расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 3 банковских дней после окончания работ и подписания акта приемки-передачи выполненных работ (п. 3.1. соглашения).

- от 30.06.2023 № 11/23, по условиям которого исполнитель обязуется по заданию заказчика разработать проектную (Подраздел 5 «Сети связи») и рабочую документацию слаботочных инженерных систем (разделы: АПС и СОУЭ, ОС, СКУД, видеонаблюдение, телефонизация СКС, ЛВС СКС, радиофикация, часофикация, сети связи МГН, система экстренной связи) по двум объектам «Врачебная амбулатория ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское» по адресу: 

<

...>» и «Врачебная амбулатория ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское» по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный район, пос. Мирный», а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Начало работ 03.07.2023, окончание работ – 28.07.2023 (п. 2.1. договора). 

Стоимость работ по договору составляет 182 000 руб. (п. 3.1. договора).

Оплата выполненных работ производится заказчиком в следующем порядке:

- в течение 3 банковских дней с даты подписания договора заказчик перечисляет на счет исполнителя предоплату в размере 50% от общей стоимости работ по договору, что составляет 91 000 руб.;

- окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 3 банковских дней после окончания работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по этапам на основании выставленного счета (п. 3.3. договора).

В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных договором, исполнитель вправе взыскать с заказчика сумму неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты (п. 6.2. договора).

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору (п. 8.1. договора).

Дополнительным соглашением № 1 к договору № 11/23 стороны согласовали выполнение дополнительных работ: проектную (Подраздел 2 «Система водоснабжения» и Подраздел 3 «Система водоотведения») и рабочую документацию (Разделы ВК и НВК) по объекту «Врачебная амбулатория ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское» по адресу: 

<

...>» (л.д. 14).

Начало работ 01.08.2023, окончание работ – 18.08.2023 (п. 2.соглашения). 

Стоимость работ по дополнительному соглашению составляет 88 200 руб. (п. 3. соглашения).

Расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 3 банковских дней после окончания работ и подписания акта приемки-передачи выполненных работ (п. 3.1. соглашения).

Дополнительным соглашением № 2 к договору № 11/23 стороны согласовали выполнение дополнительных работ: разработать проектную и рабочую документацию (Раздел 5 Подраздел 4.1. «Тепловые сети») по объекту «Врачебная амбулатория ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское» по адресу: 

<

...>» (л.д. 14 оборот).

Начало работ 08.08.2023, окончание работ – 31.08.2023 (п. 2.соглашения). 

Стоимость работ по дополнительному соглашению составляет 60 000 руб. (п. 3. соглашения).

Расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 3 банковских дней после окончания работ и подписания акта приемки-передачи выполненных работ (п. 3.1. соглашения).

- от 26.07.2023 № 12/23, по условиям которого исполнитель обязуется по заданию заказчика разработать рабочий проект наружного электроснабжения (чертежи марок ЭС) объекта «Больничный корпус ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск» по адресу: 

<

...>», а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Начало работ 27.07.2023, окончание работ – 18.08.2023 (п. 2.1. договора). 

Стоимость работ по договору составляет 85 000 руб. (п. 3.1. договора).

Оплата выполненных работ производится заказчиком в следующем порядке:

- в течение 3 банковских дней с даты подписания договора заказчик перечисляет на счет исполнителя предоплату в размере 50 000 руб.;

- окончательный расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 3 банковских дней после окончания работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по этапам на основании выставленного счета (п. 3.3. договора).

В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных договором, исполнитель вправе взыскать с заказчика сумму неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты (п. 6.2. договора).

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору (п. 8.1. договора).

Дополнительным соглашением № 1 к договору № 12/23 стороны согласовали выполнение дополнительных работ: разработать рабочий проект наружных сетей канализации (чертежи марок НК) объекта «Больничный корпус ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск» по адресу: 

<

...>» (л.д. 17).

Начало работ 19.09.2023, окончание работ – 05.10.2023 (п. 2.соглашения). 

Стоимость работ по дополнительному соглашению составляет 30 000 руб. (п. 3. соглашения).

Расчет за выполненные работы производится заказчиком не позднее 3 банковских дней после окончания работ и подписания акта приемки-передачи выполненных работ (п. 3.1. соглашения).

03.10.2023 сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № 05/23-1 на сумму 140 000 руб.;

04.10.2023 сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № 05/23-2 на сумму 300 000 руб.;

22.05.2023 сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № 08/23 на сумму 80 000 руб.;

30.06.2023 сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № 08/23-1 на сумму 100 000 руб.;

22.09.2023 сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № 08/23-2 на сумму 200 000 руб.;

12.01.2024 сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № 08/23-3 на сумму 250 000 руб.;

25.08.2023 сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № 11/23 на сумму 182 000 руб. (с учетом предоплаты задолженность по акту 91 000 руб.);

15.09.2023 сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № 11/23-1 на сумму 88 200 руб. (с учетом предоплаты задолженность по акту 44 100 руб.);

08.08.2023 сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № 12/23 на сумму 85 000 руб. (с учетом предоплаты задолженность по акту 35 000 руб.);

05.10.2023 сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № 12/23-1 на сумму 30 000 руб. (л.д. 19-28).

В материалы дела представлен двусторонний акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2023 по 31.01.2024, в соответствии с которым по состоянию на 31.01.2024 задолженность в пользу ООО Инжиниринговая компания «ТОР» составляет 815 000 руб. (л.д. 29-30).

31.01.2024. истец вручил ответчику претензию от 31.01.2024 с требованием о погашении задолженности по спорным договорам в сумме 815 000 руб. и предупреждением о взыскании задолженности и неустойки в судебном порядке в случае неоплаты (л.д. 8).

Неисполнение подрядчиком обязательства по оплате выполненных работ, послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд.

Согласно положениям статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В материалы дела представлены подписанные сторонами без возражений: акты сдачи-приемки выполненных работ, двусторонний акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2023 по 31.01.2024, в соответствии с которым по состоянию на 31.01.2024 задолженность в пользу ООО Инжиниринговая компания «ТОР» составляет 815 000 руб. (л.д. 19-30).

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Факт выполнения истцом работ подтвержден материалами дела и ответчиком не оспорен (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ).

Доказательств предъявления ответчиком претензий по качеству и объему выполненных работ материалы дела не содержат.

Поскольку в нарушение ст. 65 АПК РФ ответчиком доказательств оплаты задолженности не представлено, требование истца о взыскании стоимости выполненных работ в размере 815 000 руб. основано на законе, договоре, подтверждено материалами дел и подлежит удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки по состоянию на 14.08.2024 в размере 269 585 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 6.2. договора в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных договором, исполнитель вправе взыскать с заказчика сумму неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты.

Истцом использован правильный механизм расчета пени.

Поскольку просрочка исполнения обязательства по оплате выполненных работ подтверждена материалами дела и не оспорена ответчиком (ст.ст. 65, 70 АПК РФ), требования о взыскании финансовой санкции являются обоснованными.

В связи с изложенным суд взыскивает с ответчика в пользу истца неустойку в размере 269 585 руб.

При этом суд учитывает, что мотивированного ходатайства о применении ст. 333 ГК РФ ответчиком не заявлено.

При обращении в суд истец уплатил государственную пошлину платежным поручением от 15.08.2024 № 125 в размере 23 846 руб. (л.д. 5).

Государственная госпошлина подлежит распределению по правилам ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Синтез» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «ТОР» задолженность в сумме 815 000 руб., пени в сумме 269 585 руб., всего 1 084 585 руб., а также судебные расходы в виде оплаты государственной пошлины в размере 23 846 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                           Н.А. Первых