ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-18754/2020

Дело № А40-150885/19

г. Москва

03 июля 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июня 2020 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 03 июля 2020 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  С.А. Назаровой,

судей Д.Г. Вигдорчика, А.А. Комарова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Л.И. Кикабидзе,

рассмотрев в открытом судебном  заседании апелляционную жалобу ООО "ИНСТИТУТ "РЯЗАНЬПРОЕКТ" 

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.02.2020 по делу № А40-150885/19 об отказе во включении требования ООО «Институт «Рязаньпроект» в общем размере 7.406.727 рублей 76 копеек в реестр требований кредиторов

по делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО «РОСТ-Е»

при участии в судебном заседании:

от ООО «РОСТ-Е» - ФИО1 по дов.от 29.07.2019,

от ООО "ИНСТИТУТ "РЯЗАНЬПРОЕКТ" – ФИО2 по дов.от 09.01.2020,

Иные лица не явились, извещены. 

 

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2019 в отношении должника ООО «РОСТ-Е» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО3. 

            Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 28.12.2019 №241.

   20.01.2020 (направлено почтовым отправлением 17.01.2020) в Арбитражный суд города Москвы поступило требование ООО «Институт «Рязаньпроект» о включении задолженности в общем размере 7.406.727 рублей 76 копеек в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2020  требование ООО «Институт «Рязаньпроект» признано необоснованным, ООО «Институт «Рязаньпроект» отказано во включении требования в общем размере 7.406.727 рублей 76 копеек в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «РОСТ-Е».

  Не  согласившись с  данным определением ООО "ИНСТИТУТ "РЯЗАНЬПРОЕКТ" обратилось в  Девятый арбитражный суд с апелляционной жалобой, в которой просит  определение отменить, принять по делу новый судебный акт об  удовлетворении требований, в обоснование указывая на нарушение судом  норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

В судебном  заседании представитель апеллянта настаивал на  удовлетворении жалобы.

Представитель ООО «РОСТ-Е» в судебном заседании возражал против  удовлетворения  жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание  не  явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежаще. 

Проверив законность и обоснованность определения в соответствии со статьями  156, 266 и 268  АПК РФ  в отсутствие  иных лиц, участвующих в деле, Девятый арбитражный апелляционный суд с учетом исследованных доказательств по делу, доводов апелляционной жалобы, приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в силу следующего.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу п. 3 - 5 ст. 71 и п. 3 - 5 ст. 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Из материалов дела следует, в обоснование  требования кредитор ссылается на неисполнение должником обязательств по договору подряда от 04.04.2017 №17/44-И на корректировку проектной и рабочей документации, накладную № 6 от 18.01.2019.

Отказывая в удовлетворении требования, суд первой инстанции исходил из того, что не представлено в материалы дела доказательств, подтверждающих обоснованность заявленных требований.

С выводами суда первой инстанции апелляционный соглашается, исходя  из следующего. 

В соответствии с п. 1.1. Договора подряда № 17/44-И от 04.04.2017 (далее по тексту -Договор) ООО «Институт Рязаньпроект» обязалось выполнить корректировку проектной документации и рабочей документации по объекту «Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник», строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, 

<

...>». После получения положительного заключения экспертизы проектной документации ФГКУ «ДСРиР» принимает от Заказчика разработанную (откорректированную) проектную документацию и откорректированную на ее основе рабочую документацию в качестве основания для продолжения строительно-монтажных работ.

Срок выполнения работ по Договору составляет:

корректировка проектной документации - в течение 3-х месяцев с момента внесения платежа в размере 10% от стоимости работ по Договору;

корректировка рабочей документации - в течение 5-ти месяцев с момента внесения платежа в размере 10% от стоимости работ по Договору; ООО «Рост-Е» произвело оплату авансового платежа в размере 10% от стоимости работ по Договору в сроки, предусмотренные Договором, что подтверждается платежным поручением № 669 от 05.04.2017.

20 декабря 2018 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий № 00293-18/СГЭ/14781. выданное Саратовским филиалом ФГАУ «Главгосэкспертизы России».

В обоснование  требования заявитель ссылается на накладную № 6 от 18.01.2019.

Пунктом 1.2. Договора предусмотрено, что результатом выполненных работ является документация, разработанная в соответствии с заданием.

В пункте 1.18 (требования  к оформлению проектной документации) задания  на  корректировку, определены  виды  и количество  экземпляров откорректированной  документации, передаваемых заказчику.

Однако, как следует из накладной № 6 от 18.01.2019, заявителем (исполнитель) переданы должнику (заказчику) лишь на одном диске проектно-сметная документация, счет № 8 от 18.01.2019, акт от 26.12.2018,  тогда как  п. 1.18 задания на корректировку содержит иной объем и формы предоставления откорректированной документации.  

Доказательство того, что заявитель исполнил обязательства  перед должником  по договору с  учетом требований  п. 1.18  задания, материалы дела  не содержат. Не представлено таких доказательств и суду апелляционной инстанции.

При таких обстоятельствах, учитывая повышенный стандарт доказывания при рассмотрении данной категории обособленного спора,  оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется. 

Доводы  апеллянта  не могут  в соответствии со ст. 270  АПК РФ быть отнесены  к числу оснований для отмены  правильного по существу судебного акта. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено. 

 

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.02.2020 по делу № А40-150885/19  оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "ИНСТИТУТ "РЯЗАНЬПРОЕКТ"  – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                                 С.А. Назарова 

Судьи:                                                                                                                      Д.Г. Вигдорчик    

А.А. Комаров