6/2023-108693(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-3782/2023

г. Ярославль

24 июля 2023 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Танцевой В.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Параниной О.Н., секретарем  судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной  ответственностью "УМПРЭО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к Государственному казённому учреждению Ярославской области "Ярославская областная  дорожная служба" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  об обязании заключить дополнительное соглашение  

Третье лицо - Департамент дорожного хозяйства Ярославской области (ИНН 

<

***>).  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Государственное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская  областная дорожная служба" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 30 дней с  момента вступления решения в законную силу заключить дополнительное соглашение с  Обществом с ограниченной ответственностью "УМПРЭО" (ИНН 

<

***>, ОГРН   

<

***>) к государственному контракту № 21-04/3 от 11.01.2022г. на следующих  условиях:  

«Государственное казённое учреждение Ярославской области «Ярославская  областная дорожная служба» (ГКУ ЯО «Ярдорслужба»), именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице директора ФИО2, действующего на  основании Устава и Общество с ограниченной ответственностью «УМПРЭО» (ООО  «УМПРЭО»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора  ФИО3 действующего на основании Устава, с другой стороны,  далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее дополнительное соглашение  (далее - «Соглашение») к государственному контракту № 21-04/3 от 11.01.2022г. на  выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через р. Юхоть на  автомобильной дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск -Череповец, км 191+894, в  Мышкинском муниципальном районе Ярославской области (далее -«Контракт»), о  нижеследующем:  

1. Изменить цену Контракта в связи с возникновением независящих от Сторон  контракта обстоятельств: существенным увеличением цен на строительные ресурсы,  подлежащие использованию при исполнении Контракта.  

2. Сумма увеличения цены Контакта в связи с удорожанием составляет 31 604 999,36  руб. (тридцать один миллион шестьсот четыре тысячи девятьсот девяносто девять рублей 36  копеек), в т.ч. НДС 20%.  

Изменение цены Контракта составляет 21,50% и не приведет к увеличению цены  Контракта более чем на 30 %.  

3. Изложить пункт 4.1. раздела 4. «Цена контракта» Контракта в новой редакции: 

«4.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения  контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других  обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением  обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 178 604  996,36 (Сто семьдесят восемь миллионов шестьсот четыре тысячи девятьсот девяносто шесть  рублей 36 копейки), в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по  налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов в том числе:  

2022 год - 57 860 922,33 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч  девятьсот двадцать два рубля 33 копейки);  

2023 год - 120 744 074,03 руб. (сто двадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи  семьдесят четыре рубля 03 копейки),  

а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с  законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена  контракта НДС не облагается».  

4. Заказчик обязуется оплатить сумму увеличения цены Контакта в связи с  удорожанием в размере 31 604 999,36 руб. (тридцать один миллион шестьсот четыре тысячи  девятьсот девяносто девять рублей 36 копеек), в т.ч. НДС 20% в срок, установленный п. 5.10  Контракта.  

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта. Остальные  условия Контракта остаются без изменений».  

Взыскать с ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ "ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "УМПРЭО"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6000 руб. в возмещение расходов по госпошлине.  Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской  области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного  документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья В.А. Танцева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.04.2023 3:36:00

Кому выдана Танцева Виктория Андреевна