Арбитражный суд Амурской области 

675023, 

<

...> 

тел. 

<

***>, факс 

<

***> http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-877/2024

г. Благовещенск

26 июня 2025 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.А. Стовбуна, протокол вел секретарь судебного заседания Р.В. Галичанина,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление некоммерческой  

организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Импульс Строй" (ОГРН

<

***>, ИНН 

<

***>) 

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "Домино" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

общество с ограниченной ответственностью проектно-строительное объединение "Благовещенскпроект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о возложении обязанности, 

при участии в заседании: от истца: ФИО1 – дов. № 03-07/46-2024 от 22.11.2024 от ответчика: ФИО2 – дов. от 27.03.2025  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Импульс Строй" (ОГРН

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 45 рабочих дней, исключая дни с  

неблагоприятными погодными условиями, со дня вступления в законную силу Решения устранить за свой счет зафиксированные в рекламационном акте от 07.07.2023 недостатки и дефекты выполненных работ по договору № РТС228А200052 (Д) от 08.06.2020 на  

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Амурской области, а именно:  

в отношении многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый, д. 63: очистить 25 кв. метров фасада и цоколя. Выполнить выравнивание (шпатлевание) 25 кв. метров фасада и цоколя, с последующей окраской 25 кв. метров фасада и цоколя; устранить растрескивание штукатурного слоя цоколя  

многоквартирного жилого дома в месте примыкания отмостки путем выпиливания участка отмостки (создать деформационный зазор), после чего восстановить 2,5 кв. метра  

штукатурного слоя цоколя; 

в отношении многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый, д. 62: очистить 34 кв. метров фасада и цоколя  

многоквартирного жилого дома, выполнить выравнивание (шпатлевание) 34 кв. метров  

фасада и цоколя, с последующей окраской 34 кв. метров фасада и цоколя; устранить  

растрескивание штукатурного слоя цоколя многоквартирного дома в месте примыкания отмостки путем выпиливания участка отмостки (создать деформационный зазор), после чего восстановить 2,9 кв. метра штукатурного слоя цоколя.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Импульс Строй" (ОГРН

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд  

капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по госпошлине в размере 6 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Импульс Строй" (ОГРН

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд  

капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки  

исполнения Решения суда, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока для исполнения обязанности, до дня фактического исполнения обязательства.  

В остальной части во взыскании судебной неустойки отказать. 

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья А.А. Стовбун