2045/2023-115830(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-3092/2023

г. Владивосток

19 мая 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 мая 2023 года.  Полный текст решения изготовлен 19 мая 2023 года.  

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "СтройМонтажАльянс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к фонду Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Приморского края" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 3 021 551 рубля 22 копеек при участии в заседании: от истца - ФИО2 доверенность от 11.01.2023, паспорт, диплом от ответчика - ФИО3, доверенность от 27.12.2022. паспорт, диплом,  

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажАльянс" (далее –  истец, общество) обратилось в арбитражный суд с иском к фонду Приморского края  "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края" (далее –  ответчик, Фонд) о взыскании 3 021 551 рубля 22 копеек основного долга по договору  на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных  домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа.  

Истец исковые требования поддержал в полном объеме, мотивировав их  нарушением ответчиком денежного обязательства по оплате фактически выполненных  по договору работ.  

Ответчик заявленные требования оспорил по доводам, изложенным в отзыве на  иск, указал, что истцом ненадлежащим образом оформлены акты КС-2, КС-3, не  выделена сумма налога на добавленную стоимость, объем работ завышен, в связи с чем  основания для оплаты отсутствуют. Полагает, что организация приемочной комиссии не  представляется возможной в связи с тем, что подрядчиком акт о приемке выполненных  работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по капитальному  ремонту крыши многоквартирного дома № 42А по  ул. Адмирала ФИО4 в г. Владивостоке не приведены в соответствие с применяемой  системой налогообложения. По расчетам ответчика стоимость выполненных истцом  работ оставила4 322 974 рубля 34 копейки.  

Из материалов дела суд установил следующее. 

Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями  судей по делу № А51-3092/2023 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных  дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал государственных услуг (ЕСИА). 

25.10.2022 между ООО "СтройМонтажАльянс" (подрядчик) и Фондом  Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского  края" (заказчик) заключен договор № РТС225А220132(Д) на выполнение работ по  капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на  территории Владивостокского городского округа (

<

...>) (далее – договор), в соответствии с условиями которого подрядчик  принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту жилых  домов по адресу 

<

...>, а заказчик обязуется  принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

В соответствии с пунктом 2.1 договора цена договора определена по результатам  электронного аукциона и составляет: 5 525 432 рубля 80 копеек, в том числе НДС (20%)  – 920 905 рублей 47 копеек.  

Согласно пункту 2.2 цена договора является твердой и включает в себя  причитающееся подрядчику вознаграждение и компенсацию его издержек, связанных с  исполнением договора, включая расходы на перевозку, страхование, уплату  таможенных пошлин, натогов, сборов и друтих обязательных платежей, стоимость  изделий, оборудования, материалов, транспортные расходы, стоимость использования  машин и механизмов, рабочей силы, накладные расходы, командировочные расходы,  страхование рисков, и все остальные расходы, которые могут возникнуть в связи с  исполнением договора.  

В силу пункта 4.17 договора объем выполненных работ принимается и  оплачивается заказчиком по унифицированным формам КС-2, КС-3, акта на  дополнительные работы работ (приложения № 4, № 5, № 6). Срок проверки объема  выполненных работ - в течение 10 рабочих дней с момента предоставления всей  необходимой документации, оформленной в соответствии с условиями договора.  

Пунктом 6.2. договора предусмотрено, что в течение 40 рабочих дней заказчик  перечисляет аванс в размере 30 % от цены договора на основании выставленного  подрядчиком счета по каждому объекту.  

Оплата заказчиком оставшейся суммы в размере 70 % от цены договора  осуществляется поэтапно по факту выполнения работ в соответствии с графиком  выполнения работ (приложение № 3 к договору) в срок до 01 марта 2023 года на  основании предоставленных подрядчиком результатов выполненных работ в  соответствии с условиями договора, подписанных в соответствии с требованиями  Закона Приморского края  от 7 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных  домов в Приморском крае» акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справки о  стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), акта на дополнительные объемы  работ, акта приемки выполненных работ, счёта, счёта-фактуры, а также при  предоставлении документов (соответствующие сертификаты соответствия, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования  (инженерного и технологического), комплектующих изделий, строительной техники и  конструкций)), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в  согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. В случае досрочного оказания  услуг и (или) работ по договору заказчик вправе их принять и оплатить при наличии  средств собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды  капитального ремонта на счете регионального оператора. Днем совершения платежа  признаётся день списания денежных средств со счета заказчика.  

В соответствии с пунктом 8.1. договора заказчик создает приемочную комиссию  для проверки соответствия качества работ и (или) услуг требованиям, установленным  договором.  

Работы считаются принятыми после подписания заказчиком форм КС-2 и КС-3,  подписания членами приемочной комиссии и согласования в соответствии с  требованиями Закона Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе  капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» акта приемки  выполненных работ, подтвержденных исполнительной документацией и актами на  скрытые работы (пункт 8.2 договора).  

В соответствии с условиями договора ответчик платежным поручением № 385 от  02.11.2022 произвел оплату аванса 30% стоимости работ в размере 1 657 629 рублей 84  копейки.  

Как следует из иска, подрядчик выполнил работы в полном объёме, и в сроки,  установленные договором.  

Письмом от 20.12.2022 исх. 375 подрядчик уведомил заказчика об окончании  работ (получено ответчиком 20.12.2022 вх. 07176-нд), а также что исполнительная  документация передана заказчику 19.12.2022.  

Согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 21.12.2022,  справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 21.12.2022, акта на  дополнительные объемы работ от 21.12.2022 общая стоимость работ составила 4  679 181 рубль 06 копеек.  

Указанные документы направлены ответчику письмом от 29.12.2022 № 383. 

Письмом от 26.01.2023 ответчик отказал в приемке и оплате стоимости  выполненных работ и сообщил истцу о необходимости привести в соответствие с  применяемой системой налогообложения акт о приемке выполненных работ КС-2,  справку о стоимости выполненных работ КС-3 и другие документа для оплаты  выполненных работ, указал на готовность оплатить полную сумму НДС при условии  выделения полной сумы НДС и выставлении налогоплательщиком счет-фактуры.  

25.01.2023 истец направил в адрес ответчика претензию № 386 с требованием  назначить приемочную комиссию для приемки работ, подписать акт по форме КС-2 и  справку по форме КС-3 и произвести оплату выполненных работ.  

В ответ на претензию заказчик сообщил о необходимости привести в  соответствии с применяемой системой налогообложения акт о приёмке выполненных  работ по форме КС-2 и справку по форме КС-3 (исх. 06-осп/00682-пд).  

Поскольку заказчик приемку и оплату за выполненные работы не произвел,  истец, соблюдая претензионный порядок, обратился в арбитражный суд с настоящим  иском.  

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ,  суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.  

Возникшие между сторонами правоотношения подлежат регулированию  нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и  условиями договора.  

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

Как установлено статьей 740 ГК РФ, по договору строительного подряда  подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется  

создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат  и уплатить обусловленную цену.  

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный  срок.  

Пунктами 1 и 2 статьи 720 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан в сроки и  в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика  осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении  отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в  работе немедленно заявить об этом подрядчику, притом что заказчик, обнаруживший  недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте  либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо  возможность последующего предъявления требования об их устранении.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных  работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51  «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).  

 Статьей 753 ГК РФ определено, что сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным сторонами.  

Согласно части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами; при  отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт  подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата  работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа  от подписания акта признаны им обоснованными.  

Как следует из пункта 14 информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики  разрешения споров по договору строительного подряда", односторонний акт приемки  результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по  договору и при отказе заказчика от оплаты, суд рассматривает доводы заказчика,  обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от  приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают  возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и  не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком, следовательно, наличие  недостатков, исключающих возможность использовать результат работ для  установленной договором цели, исключает оплату таких работ.  

Факт выполнения подрядчиком работ стоимостью 4 679 181 рубль 06 копеек  подтвержден материалами дела, объем и качество ответчиком не оспорены.  

Доказательств наличия недостатков, в соответствии с частью 6 статьи 753  Гражданского кодекса Российской Федерации являющихся основанием для отказа в  приемке выполненных работ, либо несоответствия выполненных работ условиям  договора, суду не предоставлено.  

 Разногласия сторон по размеру оплаты обусловлены лишь несогласием  ответчика со стоимостью выполненных работ, которая, по его мнению, должна быть  уменьшена на сумму налога на добавленную стоимость.  

Фонд ссылается на то, что объем выполненных работ, и их стоимость, как и  способ расчета оплаты были согласованы сторонами при заключении договора,  подрядчики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при выполнении  

работ (оказании услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов к оплате  покупателю соответствующую сумму НДС дополнительно к цене выполняемых работ  (оказываемых услуг) не предъявляют.  

Между тем, доводы отзыва судом отклоняются по следующим основаниям. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт  заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или  приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),  документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с  которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с  названным Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или  приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),  документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.  

Порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)  выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном  доме установлен Положением о привлечении специализированной некоммерческой  организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных  организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением  Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее – положение № 615).  

Пунктом 195 данного Постановления предусмотрено, что закупка у единственной  подрядной организации осуществляется путем заключения заказчиком договора о  проведении капитального ремонта с подрядной организацией, включенной в реестр  квалифицированных подрядных организаций и соответствующей требованиям,  установленным пунктом 23 настоящего Положения, с учетом предмета договора о  проведении капитального ремонта.  

В силу пункта 2 статьи 346.11 НК РФ по общему правилу организации,  применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются  налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом приведенных  положений любой участник закупки, в том числе тот, который освобожден от уплаты  НДС и применяет упрощенную систему налогообложения, вправе участвовать в закупке  для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

 Контракт по итогам аукциона заключается и оплачивается заказчиком по цене,  предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, вне зависимости  от применяемой данным участником системы налогообложения (пункт 32 Обзора  судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2(2021), утвержденного  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021).  

Судом установлено, что истец применяет упрощенную систему  налогообложения, в связи с чем общество имело право принять участие в аукционе,  проводимом фондом, на заключение договора на выполнение работ по капитальному  ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории  Приморского края.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 424 ГК РФ исполнение договора  оплачивается по цене, установленной соглашением сторон, при этом изменение цены  после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных  договором, законом либо в установленном законом порядке.  

В силу пункта 6 статьи 709 ГК РФ подрядчик не вправе требовать увеличения  твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент  заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем  подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.  

Согласно части 10 статьи 70 Закона о контрактной системе контракт заключается  и исполняется по цене, предложенной победителем аукциона. Цена контракта является  твердой и подлежит изменению лишь в случаях, предусмотренных статьями 34, 95  данного закона. При этом в указанном Федеральном законе отсутствуют нормы о  корректировке цены контракта в зависимости от применяемой подрядчиком системы  налогообложения, возможность уменьшения цены контракта на сумму НДС ввиду  применения победителем аукциона упрощенной системы налогообложения не  предусмотрена.  

Пунктом 222 Постановления № 615 предусмотрена возможность изменения цены  договора - цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по  соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с  пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ.  Цена договора о проведении капитального ремонта может быть снижена по соглашению  сторон при уменьшении предусмотренных договором о проведении капитального  ремонта объемов услуг и (или) работ. Изменение стоимости и объемов услуг и (или)  работ производится при соблюдении заказчиком положений, установленных частью 5  статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Иные положения договора о  проведении капитального ремонта изменению не подлежат. Согласно правовой  позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от  12.11.2014 № 304-КГ14-3239, установленная в контракте стоимость оплаты выполнения  работ является обязательством заказчика оплатить контракт в установленном размере  при надлежащем его исполнении. Контракт заключается и оплачивается заказчиком по  цене победителя торгов вне зависимости от применения системы налогообложения у  победителя. При этом цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без  изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и  иных условий исполнения контракта, в том числе на сумму НДС.  

 Сумма, предусмотренная контрактом, должна быть уплачена победителю торгов  в установленном контрактом размере. Соответственно, исключение НДС из состава  цены возможно по обоюдному согласию сторон контракта, если такая возможность  была предусмотрена условиями контракта и документацией о закупке.  

Как указано в пункте 41 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской  Федерации № 3 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской  Федерации 27.11.2019, корректировка заказчиком цены контракта, предложенной  юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, при  проведении аукциона, а также при заключении государственного или муниципального  контракта с таким участником размещения заказа не допускается, и поставленные  товары (выполненные работы, оказанные услуги) оплачиваются по цене, указанной в  контракте.  

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Верховного Суда РФ  от 01.07.2021 № 46-АД21-67-К6, согласно которой поставленные товары (выполненные  работы, оказанные услуги) оплачиваются по цене, указанной в контракте,  корректировка заказчиком цены контракта при заключении государственного или  муниципального контракта с участником, применяющим упрощенную систему  налогообложения, путем исключения из стоимости товаров (работ, услуг) НДС не  допускается.  

Исходя из изложенного, применение победителем аукциона специального  налогового режима либо освобождение его от обязанностей плательщика НДС не дает  заказчику оснований снижать цену контракта при его заключении и исполнении на  сумму НДС, заказчик обязан оплатить выполненные подрядчиком работы по  согласованной цене. Данная правовая позиция нашла свое отражение в судебной  

практике Верховного Суда Российской Федерации (определения от 30.05.2019 № 305- ЭС19-391, от 15.11.2017 № 308-ЭС17-13912, от 01.10.2015 № 303-ЭС15-11466).  

Таким образом, Законом о контрактной системе не предусмотрена возможность  изменения твердой цены контракта на сумму НДС в случае, если победитель аукциона  применяет упрощенную систему налогообложения.  

В соответствии с частью 6 статьи 13 АПК РФ применение законодательства,  регулирующего сходные правоотношения (аналогия закона), допускается только в тех  случаях, когда спорные отношения сторон прямо не урегулированы действующим  законодательством, то есть имеется пробел в законодательном регулировании  конкретного правоотношения.  

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем  Постановлении от 04.02.2014 № 13004/13 указал, что применение норм права по  аналогии согласно статьи 6 ГК РФ и части 6 статьи 13 АПК РФ допускается в случаях,  если спорные отношения прямо не урегулированы федеральным законом и другими  нормативными правовыми актами или соглашением сторон.  

В рассматриваемом случае, исходя из анализа положений Постановления № 615,  суд установил, что основания для изменения цены договора урегулированы пунктом  222. При этом изменение цены договора, определенной по результатам проведенного  электронного аукциона, в связи с применением участником, с которым надлежит  заключить договор, специальных налоговых режимов, в том числе упрощенного,  Постановлением № 615 не предусмотрено, в связи с чем, применению в спорных  правоотношениях в приоритетном порядке подлежат нормоположения Закона о  контрактной системе.  

 Арбитражный Суд Дальневосточного округа в постановлении от 15.10.2021 по  делу № А51-6431/2020 признал, что закрепленное фондом в договоре на выполнение  работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,  расположенных на территории Приморского края условие о том, что в случае, если  подрядная организация, находится на упрощенной системе налогообложения, при  закрытии выполненных работ подрядной организацией к итогам в акте о приемке  выполненных работ (форма КС-2) применяется формула для расчета затрат на  компенсацию НДС при УСН, противоречит действующему законодательству.  

 Таким образом, требование ответчика о выделении подрядчиком и указании в  справке формы КС-3 суммы НДС и выставлении налогоплательщиком счет-фактуры  является неправомерным, поскольку истец применяет упрощенную систему  налогообложения и не является плательщиком НДС.  

Принимая во внимание изложенное, суд полагает, что требования истца о  взыскании 3 021 551 рубля 22 копеек основного долга по договору являются  законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

 Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика по  правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

р е ш и л:

Взыскать с фонда Приморского края "Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Приморского края" в пользу общества с ограниченной  ответственностью "СтройМонтажАльянс" 3 021 551 рубль 22 копейки основного долга и  38 108 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску.  

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  

Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. 

 Судья Плеханова Н.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 19.03.2023 20:16:00

 Кому выдана Плеханова Наталья Александровна