Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-330211/19-51-2533

город Москва

30 июня 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 июня 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 30 июня 2020 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шкурихиной М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКС-ГРУПП» (ОГРН 

<

***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании по договору № 12/12 от 12 декабря 2017 года долга в размере 1 444 149 руб. 07 коп.,

 

при участии:

от сторон – не явились, извещены; 

 

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКС-ГРУПП» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» (далее – ответчик) о взыскании по договору № 12/12 от 12 декабря 2017 года долга в размере 1 444 149 руб. 07 коп.

Стороны в судебное заседание не явились, ответчик отзыва на исковое заявление не представил, учитывая надлежащее уведомление о дате, месте и времени проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства определением суда о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход к рассмотрению дела по существу, в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), дело рассмотрено в отсутствие сторон в судебном заседании суда первой инстанции.

Рассмотрев заявленные требования, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 12 декабря 2017 года между истцом (подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор № 12/12.

В соответствии с пунктом 2.1. договора заказчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательства выполнить собственными и/или привлеченными силами комплекс строительно-монтажных работ в объеме, указанном в «Структуре договорной цены» (приложение № 1 к договору), и сдать в установленный срок результат надлежаще выполненных работ заказчику и заинтересованным организациям в соответствии с утвержденной рабочей документацией, действующими нормами и правилами, в порядке и на условиях, согласованных сторонами в договоре.

В соответствии с пунктом 3.1. договора (в редакции дополнительного соглашения № 4 от 20 марта 2018 к договору) стоимость работ составила 45 445 250 руб. 03 коп.

В соответствии с пунктами 5.1.1., 5.1.2. договора (в редакции дополнительного соглашения № 5 от 10 апреля 2018 года) начало работ - в течение 5 рабочих дней с даты оплаты заказчиком аванса в соответствии с пунктом 4.1.1. договора. Окончание работ – не позднее 20 мая 2018 года.

15 февраля 2018 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 2 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 2 215 171 руб. 41 коп. Сроки выполнения – 24 календарных дня с даты подписания дополнительного соглашения.

12 марта 2018 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 3 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 1 225 733 руб. 67 коп. Сроки выполнения – с даты подписания дополнительного соглашения до 30 марта 2018 года.

12 апреля 2018 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 6 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 2 698 522 руб. 88 коп. Сроки выполнения – с даты подписания дополнительного соглашения до 30 апреля 2018 года.

23 апреля 2018 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 7 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 11 451 893 руб. 78 коп. (в редакции дополнительного соглашения № 10 от 19 июня 2018 года к договору). Сроки выполнения – не позднее 55 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения.

23 апреля 2018 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 8 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 629 440 руб. 64 коп. Сроки выполнения – не позднее 10 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения.

07 мая 2018 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 9 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 1 286 543 руб. 91 коп. Сроки выполнения – не позднее 25 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу статей 309 - 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Факт выполнения работ по договору подтверждается подписанными обеими сторонами формами КС-2, КС-3 № 1 от 20.02.2018 на сумму 1 692 949 руб. 42 коп. (гарантийный депозит – 84 647 руб. 47 коп.), № 2 от 07.03.2018 на сумму 3 333 972 руб. (гарантийный депозит – 166 698 руб. 60 коп.), № 1 от 12.03.2018 на сумму 788 343 руб. 32 коп. (гарантийный депозит – 39 417 руб. 17 коп.), № 3 от 12.03.2018 на сумму 3 003 147 руб. 51 коп. (гарантийный депозит – 150 157 руб. 38 коп.), № 2 от 20.03.2018 на сумму 256 023 руб. 03 коп. (гарантийный депозит – 12 801 руб. 15 коп.), № 4 от 20.03.2018 на сумму 7 500 857 руб. 17 коп. (гарантийный депозит – 375 042 руб. 86 коп.), № 1 от 20.04.2018 на сумму 1 141 421 руб. 28 коп. (гарантийный депозит – 57 071 руб. 28 коп.), № 5 от 20.04.2018 на сумму 10 600 138 руб. 50 коп. (гарантийный депозит – 530 006 руб. 93 коп.), № 1 от 20.05.2018 на сумму 2 190 555 руб. 48 коп. (гарантийный депозит – 109 527 руб. 77 коп.), № 1 от 20.05.2018 на сумму 629 440 руб. 64 коп. (гарантийный депозит – 31 472 руб. 03 коп.), № 6 от 20.05.2018 на сумму 9 808 103 руб. 94 коп. (гарантийный депозит – 490 405 руб. 20 коп.), № 1 от 20.06.2018 на сумму 1 421 448 руб. 76 коп. (гарантийный депозит – 71 072 руб. 44 коп.), № 1 от 20.06.2018 на сумму 1 099 083 руб. 66 коп. (гарантийный депозит – 54 954 руб. 18 коп.), № 7 от 20.06.2018 на сумму 4 837 537 руб. 48 коп. (гарантийный депозит – 241 876 руб. 87 коп.), № 2 от 20.07.2018 на сумму 8 602 019 руб. 42 коп. (гарантийный депозит – 430 100 руб. 97 коп.), № 3 от 20.07.2018 на сумму 999 539 руб. 67 коп. (гарантийный депозит – 49 976 руб. 98 коп.), № 8 от 20.07.2018 на сумму 1 774 255 руб. 86 коп. (гарантийный депозит – 88 712 руб. 79 коп.), № 9 от 07.09.2018 на сумму 1 282 105 руб. 47 коп. (гарантийный депозит – 64 105 руб. 27 коп.), № 3 от 03.10.2018 на сумму 415 540 руб. 21 коп. (гарантийный депозит – 20 777 руб. 01 коп.).

В соответствии с пунктом 4.1.2. договора оплата фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком объёмов работ осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты выставления подрядчиком счета и счета-фактуры на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ (ф. КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), с указанием в ней сумм подлежащих удержанию в счет обеспечения гарантийного депозита в размере 5 % и ранее перечисленного заказчиком аванса, предусмотренного пунктом 4.1.1.договора, пропорционально стоимости выполненных в отчетном периоде работ.

В соответствии с пунктом 4.1.3. договора выплата неиспользованной суммы гарантийного депозита, производится заказчиком при условии полного и надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору, а также при отсутствии замечаний со стороны заказчика и заинтересованных организаций к выполненным на объекте подрядчиком работам в следующем порядке: заказчик выплачивает 50 % от суммы гарантийного депозита по истечении 12 месяцев с даты подписания сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), в течение 25 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления заказчиком, на основании выставленного подрядчиком счета. Заказчик выплачивает остаток неиспользованной суммы гарантийного депозита по истечении 24 месяцев с даты подписания сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), в течение 25 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления заказчиком, на основании выставленного подрядчиком счета.

С учетом частичной оплаты в размере 58 488 184 руб. 68 коп., удержанный гарантийный депозит составил 2 888 298 руб. 13 коп.

Поскольку последний акт выполненных работ подписан сторонами 03 октября 2018 года, с 03 октября 2019 года возврату подрядчику подлежит 50 % суммы удержанного гарантийного депозита, что составляет 1 444 149 руб. 07 коп.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 АПК РФ, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании по договору № 12/12 от 12 декабря 2017 года долга в размере 1 444 149 руб. 07 коп., поскольку материалами дела подтвержден факт выполнения работ на данную сумму.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика.

Поскольку истцом государственная пошлина не была уплачена полностью, исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации подлежит взысканию государственная пошлина в размере 01 руб.

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167 - 170 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКС-ГРУПП» по договору № 12/12 от 12 декабря 2017 года долг в размере 1 444 149 руб. 07 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 441 руб.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 01 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                                   О.В. Козленкова