АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-118082/2023-52-962

г. Москва

07 ноября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2023 года. Решение в полном объеме изготовлено 07 ноября 2023 года. 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «СТ» (191119, ГОРОД САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ОБВОДНОГО КАНАЛА НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 93А, ЛИТЕР А,  ПОМЕЩЕНИЕ 373, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.09.2005, ИНН:  

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью  «НИЖЕГОРОДАВТОДОР» (603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ  НОВГОРОД ГОРОД, КОСТИНА 

<

...> КОМНАТА 7,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.03.2016, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании суммы гарантийного удержания в размере 1 314 089,04 руб. по договору   № 271,  

при участии: от истца – ФИО2 (удост., дов. от 10.11.2022), 

от ответчика – ФИО3 (паспорт, диплом, дов. от 09.01.2023).  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СТ» (далее – истец) обратилось в  

Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной  

ответственностью «НИЖЕГОРОДАВТОДОР» (далее – ответчик) о взыскании суммы  

гарантийного удержания в размере 1 314 089,04 руб. по договору № 271. Истец заявленные требования поддержал. Ответчик по исковым требованиям возражал. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на следующие  

обстоятельства. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2021 по делу А40103489/2021 исковые требования ООО «СТ» удовлетворены в полном объеме, в  удовлетворении встречного искового заявления отказано.  

В соответствии с разделом 9 Договора № 271 расчеты за выполненные работы  должны производиться ежемесячно на основании счета и подписанных актов. При этом  предусмотрено Гарантийное удержание в сумме 10% от КС-2, которое не учитывается  при расчетах.  

В соответствии с пунктом 9.4. Договора - В месячный срок с момента ввода  Объекта в эксплуатацию 50% от суммы гарантийного удержания подлежит выплате  Субподрядчику.  

Выплата второй половины Гарантийного удержания производится  Подрядчиком ежегодно частями, за вычетом средств израсходованных для устранения  выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств - в соответствии с  регламентом исполнения гарантийных обязательств.  

25.12.2020 ГК «Российские автомобильные дороги» (заказчик) получено  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию «А-113 строящаяся Центральная кольцевая  автомобильная дорога (Московская область). Участок Центральной кольцевой  автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового  комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой  М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)» II этап «Строительство  Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (участок  основного хода от транспортной развязки № 18 до транспортной развязки № 31,  включая съезд № 8 транспортной развязки № 31)».  

Таким образом, обязанность выплатить 50% гарантийного обязательства  возникла у ООО «НИЖЕГОРОДАВТОДОР» 26.01.2021.  

Согласно КС-3 № 2 от 23.09.2020 сумма гарантийного удержания составила 1  189 635,40 руб.  

Согласно КС-3 № 3 от 23.09.2020 сумма гарантийного удержания составила  248 907,29 руб.  

Таким образом, общая сумма гарантийного удержания подлежащая оплате  составляет:  

1 189 635,40 руб. + 124 453,64 руб. = 1 314 089,04 руб. 

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок  урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с  настоящим иском в суд.  

Возражая по исковым требования ответчик в своем отзыве ссылается на  следующие обстоятельства.  

Между Истцом (субподрядчиком) и ответчиком (подрядчиком) был заключен  договор № 271 от 07.08.2020.  

По результатам выполнения работ по договору между сторонами были  подписаны следующие акты КС-2 и Справки КС-3:  

- акт № 1 от 30.09.2020 на сумму 3 527 238,61 руб., из которых 10% - 352 723,86  руб. гарантийное удержание и 12% - 423 268,63 руб. услуги генподряда, общая сумма с  учетом суммы удержания и услуг генподряда = 2 751 246,12 руб.  

Оплата произведена в размере 3 527 238,61 руб., то есть Ответчиком оплачена  сумма без учета всех удержаний в полном объёме.  

- Акт № 2 от 27.10.2020 на сумму 3 572 858,66 руб., из которых 10% - 357  285,87руб. гарантийное удержание и 12% - 428 743,04 руб. услуги генподряда, общая  сумма с учетом суммы удержания и услуг генподряда = 2 786 929,75 руб.  

Оплата произведена в размере 3 572 858,66 руб., то есть Ответчиком оплачена  сумма без учета всех удержаний в полном объёме.  

- Акт № 3 от 30.12.2020 на сумму 17 549 725,61 руб., из которых 10% - 1 754  972,56 руб. гарантийное удержание и 12% - 2 105 967,07 руб. услуги генподряда, общая  сумма с учетом суммы удержания и услуг генподряда = 13 688 785,98 руб.  

Оплата произведена в размере 17 549 725,61 руб., то есть Ответчиком оплачена  сумма без учета всех удержаний в полном объёме.  

- Акт № 4 от 31.12.2020 на сумму 6 397 343,34 руб., из которых 10% - 639  734,33 руб. гарантийное удержание и 12% - 767 681,20 руб. услуги генподряда, общая  сумма с учетом суммы удержания и услуг генподряда = 4 989 927,81 руб.  

Оплата произведена в размере 6 397 343,34 руб., то есть Ответчиком оплачена  сумма без учета всех удержаний в полном объёме.  

Арбитражным судом города Москвы вынесено решение от 09.12.2021 по делу  А40-103489/21-52-705, по иску ООО «СТ» к ООО «НАД» о взыскании задолженности  по Договору № 271 от 07.08.2020 по Акту КС-2 и Справке КС-3 № 2 от 23.09.2020 в  размере 11 896 353,98 руб. Исковые требования ООО «СТ» удовлетворены и с ООО  «Нижегородавтодор» взыскано 11 220 632,82 руб., с учетом 10% суммы гарантийного  удержания в размере 1 122 063,28 руб., и 12% услуг генподряда в размере 1 346 475,94  руб.  

Как указывает ответчик, истец заявляет о гарантийном удержании в размере 1  189 635,40 руб., исходя из 10% акта на сумму 11 896 353,98 руб., что является не  верным, ввиду того, что судом взыскано 11 220 632,82 руб., с учетом 10% суммы  гарантийного удержания в размере 1 122 063,28 руб., и 12% услуг генподряда в размере  1 346 475,94 руб.  

Между истцом и ответчиком подписан акт сверки взаимных расчётов по  состоянию на 31.12.2020 года, в котором отражены все вышеуказанные акты на полную  сумму в размере 31 347 166,22 руб. Также в акте сверки отражено, что на 31.12.2020 за  ответчиком числилась задолженность в размере 3 526 636,86 руб., которая была  оплачена в полном объёме 03.02.2021 по платежному поручению № 1233.  

Согласно п.9.4. договора на выполнение работ по строительству № 271 от  07.08.2020 года и раздела 3 и раздела 5 регламента исполнения гарантийных  обязательств, гарантийное удержание - сумма, удерживаемая с целью обеспечения  исполнения гарантийных обязательств субподрядчика в рамках договора, составляет  10% от стоимости выполненных субподрядчиком работ по формам КС-2. В месячный  срок с даты ввода объекта в эксплуатацию на основании предоставленного  субподрядчиком счета подрядчик должен возвратить субподрядчику 50% гарантийной  суммы, удержанной с субподрядчика в соответствии с условиями договора.  

Выплата второй половины гарантийной суммы производится ежегодно частями  за вычетом средств, израсходованных для устранения выявленных дефектов в период  действия гарантийных обязательств - в соответствии с регламентом исполнения  гарантийных обязательств и гарантийным паспортом (приложение № 6.1. и 6.2. к  договору)  

Оставшаяся часть гарантийной суммы (годовой части гарантийной суммы),  выплачиваются ежегодно, начиная с года, следующего за годом ввода объекта в  эксплуатацию, в соответствии с графиком выплаты гарантийной суммы (приложение №  1 к регламенту) на основании акта об исполнении/завершении гарантийных  обязательств, подписанного эксплуатационной организацией (п.5.12. регламента) и  счета, выставленного в декабре соответствующего года, при соблюдении сроков,  установленных п.3.1.1. и п.3.1.2. регламента, за вычетом средств израсходованных  заказчиком / подрядчиком в период гарантийного срока и зачтённых на основании  п.3.5. регламента сумм убытков и неустоек.  

В случае предоставления субподрядчиком банковской гарантии,  обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств, на основании п. 1.6. договора,  подрядчик осуществляет возврат части второй половины гарантийной суммы,  

соответствующей размеру предоставленной банковской гарантии, в срок,  определенный дополнительным соглашением сторон.  

В случае предоставления субподрядчиком обеспечительного платежа в  соответствии с п.1.5. договора гарантийные удержания по договору подрядчиком не  производятся.  

Как указывает ответчик, вышеуказанные документы истцом в адрес ответчика  не предоставлялись, дополнительное соглашение между сторонами не подписывалось.  

Выставленный Подрядчиком/Субподрядчиком счет на оплату части  Гарантийной суммы ранее даты, установленной в п. 3.1.1, 3.1.2 Регламента,  Заказчиком/Подрядчиком не рассматривается и не является основанием для выплаты  части Гарантийной суммы.  

Заказчик/Подрядчик не несет ответственности за невыплату или  несвоевременную выплату части Гарантийной суммы в случае не выставления или  несвоевременного выставления Подрядчиком/Субподрядчиком счета на оплату части  Гарантийной суммы. Проценты на Гарантийную сумму не начисляются.  

Заказчик/Подрядчик вправе зачесть сумму убытков, причиненных  Заказчику/Подрядчику Подрядчиком/Субподрядчиком, а также удержать неустойку из  Гарантийной суммы, направив Подрядчику/Субподрядчику соответствующее  письменное уведомление о зачёте сумм убытков и (или) неустойки.  

Согласно п. 13.2. договора гарантийный срок устранения субподрядчиком  дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на объекте составляет от 2 лет до  13 лет, в зависимости от вида работ.  

Так согласно приложения № 1 к регламенту выплата гарантийной суммы  осуществляется по годам действия гарантийных обязательство с 1 года по 13 год в  размере 7,69%.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения истца и ответчика, оценив  представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об удовлетворении требований в  полном объеме на основании нижеследующего.  

В соответствии с разделом 9 Договора № 271 расчеты за выполненные работы  должны производиться ежемесячно на основании счета и подписанных актов. При этом  предусмотрено Гарантийное удержание в сумме 10% от КС-2, которое не учитывается  при расчетах.  

В соответствии с пунктом 9.4. Договора - в месячный срок с момента ввода  Объекта в эксплуатацию 50% от суммы гарантийного удержания подлежит выплате  Субподрядчику.  

Выплата второй половины Гарантийного удержания производится  Подрядчиком ежегодно частями, за вычетом средств израсходованных для устранения  выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств - в соответствии с  регламентом исполнения гарантийных обязательств.  

Поскольку 25.12.2020 ГК «Российские автомобильные дороги» (заказчик)  получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию «А-113 строящаяся Центральная  кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок Центральной  кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18  пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с  автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5)»  II этап «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской  области (участок основного хода от транспортной развязки № 18 до транспортной  развязки № 31, включая съезд № 8 транспортной развязки № 31)».  

Таким образом, обязанность выплатить 50% гарантийного обязательства  возникла у ООО «НИЖЕГОРОДАВТОДОР» 26.01.2021.  

Согласно КС-3 № 2 от 23.09.20 сумма гарантийного удержания составила 1  189 635,40 руб.  

Поскольку включенные в нее работы не включены в перечень гарантийных  (строительные леса и ограждения, это временные конструкции, которые к моменту  окончания строительства были разобраны) у ООО «НИЖЕГОРОДАВТОДОР» возникла  обязанность вернуть всю сумму гарантийного удержания.  

Согласно КС-3 № 3 от 23.09.2020 сумма гарантийного удержания составила  248 907,29 руб.  

50% гарантийного удержания составляет 248 907,29 руб. / 2= 124 453,64 руб. 

Общая сумма гарантийного удержания подлежащая оплате составляет: 1  189 635,40 руб. + 124 453,64 руб. = 1 314 089,04 руб.  

Довод о том, что сумма гарантийного удержания была учтена судом при  вынесении решения по делу А40-103489/2021 противоречит решению суда и КС-2, КС- 3, и которого следует, что сумма удержание не предъявлялась ко взысканию и не могла  быть учтена в решении суда.  

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не  состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела,  представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм  материального права.  

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по  договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  договором под-ряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы  или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену  после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.  

Согласно ст. 309, п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  определено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов,  а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового  оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся  доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения,  содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации Ф и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые  требования и подлежащими удовлетворению.  

В связи с вышеизложенным, заявленные требования подлежат удовлетворению  в полном объеме.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки относятся на  ответчика в соответствии со статьями 106, 110, 112 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176,  177, 180-182, 226-229, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «НИЖЕГОРОДАВТОДОР» (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «СТ» (ИНН: 

<

***>) сумму гарантийного удержания в размере  1 314 089,04 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «НИЖЕГОРОДАВТОДОР» (ИНН: 5260423649) в доход федерального бюджета  госпошлину в размере 26 141 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Р.Е. Галиева