АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело №  А31-6397/2023

г. Кострома

01 марта 2024  года

Резолютивная часть решения объявлена 07 февраля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 01 марта 2024 года.

Арбитражный суд Костромской области в составе председательствующего судьи Авдеевой Натальи Юрьевны, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Веселовским А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску областного государственного бюджетного учреждения "Управление капитального строительства Костромской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 996133 рублей 48 копеек пени, пени по день исполнения обязательства,

при участии:

от истца: представители ФИО1 по доверенности от 27.12.2023, ФИО2 по доверенности от 23.01.2024,

от ответчика: представители ФИО3 по доверенности от 17.07.2023, ФИО4 по доверенности от 19.01.2024, 

установил:

Областное государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Костромской области" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Виннер" о взыскании 996133 рублей 48 копеек пени, пени по день исполнения обязательства.

Истец уточнил исковые требования и просит взыскать 1009423 рубля 69 копеек пени за период с 01.06.2021 по 19.05.2023, пени по день исполнения обязательства, госпошлину.

Истец исковые требования поддержал.

Ответчик требования не признал, просил снизить размер неустойки.

Исследовав материалы дела, выслушав истца, ответчика, суд установил следующие обстоятельства.

Между областным государственным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства Костромской области» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Виннер» (подрядчик) заключен контракт от  23.10.2020 № 28-10/20 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство поликлиники взрослых ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1», по которому подрядчик принял на себя обязательство выполнить инженерные изыскания и осуществить подготовку проектной документации по объекту: «Строительство поликлиники взрослых ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1», а также выполнить работы по строительству объекта в соответствии с утвержденной заказчиком проектной документацией, передать в соответствии с контрактом заказчику результаты указанных работ, а заказчик обязался принять, оплатить выполненные работы, и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Согласно п. 2.1 контракта (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 18.09.2023), цена контракта является твердой, включает в себя расходы на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, оплату стоимости государственных экспертиз, выполнение работ по строительству объекта и составляет 361770643 рубля 08 копеек (в том числе НДС 20 %):

- стоимость работ по выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации – 5623526 рублей 97 копеек (п. 2.1.1);

- стоимость работ по строительству объекта капитального строительства – 356147116 рублей 11 копеек (п. 2.1.2). 

В соответствии с п. 3.1 контракта (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 18.09.2023) заказчик производит оплату аванса:

- в размере 17,4375 % от стоимости работ по выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения контракта; 

- в размере 30 % от стоимости работ по строительству объекта капитального строительства в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня приемки работ по выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации.

Отсутствие авансирования по контракту не является основанием для невыполнения подрядчиком обязательств по контракту.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ по выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации после выполнения подрядчиком инженерных изысканий и разработки проектной документации на стадии «проектная документация», «рабочая документация», получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, не позднее 30 дней с даты подписания заказчиком соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ (п. 3.2.2 контракта).

Заказчик осуществляет оплату фактически выполненных работ по по строительству объекта в течение 30 дней с даты подписания заказчиком соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ на основании сметы контракта (п. 3.2.3 контракта).

Контрактом определен срок выполнения работ: в соответствии с пунктом 4.2 контракта срок выполнения работ: со дня заключения контракта до 01.07.2024 (включительно) (с учётом  дополнительного соглашения № 2 от 18.09.2023):

- подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий (с учетом проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий): со дня заключения контракта до 31.05.2021 (включительно) (п. 4.2.1);

Строительство объекта капитального строительства: со дня получения подрядчиком от заказчика копии разрешения на строительство до 01.07.2024 (включительно) (4.2.2).

Промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных и иных, предусмотренных контрактом работ, определяются графиком выполнения работ Приложение № 4 к контракту).

В соответствии с п. 7.2 контракта  заказчик обязан не позднее 10 рабочих дней со дня заключения контракта предоставить подрядчику исходную документацию, предусмотренную п. 1.10 технического задания (п. 7.2.1), не позднее 3 рабочих дней со дня заключения контракта подписать акт о соответствии состояния земельного участка условиям контракта и передать его подрядчику (7.2.2).

Согласно п. 9.6, 9.7 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Подрядчик производит оплату неустоек по требованию заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно п. 1.10 технического задания (приложение № 7 к контракту) к исходной документации относятся медико-техническое задание, градостроительный план земельного участка, сведения о технической возможности подключения к инженерным сетям.

Согласно п. 1.11.2 технического задания к обязанностям подрядчика относится предоставление заказчику расчета потребляемых нагрузок и иной информации для получения технических условий, осуществление сбора технических условий и анализ их достаточности.

Согласно п. 1.12 технического задания к обязанностям подрядчика относится получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Согласно п. 1.13 технического задания определено, что подлежит передаче заказчику проектная документация: 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе, в том числе сметы в ПК «WINRIK» или сметы в формате, совместимом с ПК «WINRIK» (единый блок обмена АПРС, xml-файлы формата “Гранд-Смета», файлы форматов «Гектор», «Allplan», «Барс+» и т.п.).

23.10.2020 письмом № 1316 заказчиком выдана подрядчику следующая исходная документация (в копиях): медико-техническое задание; градостроительный план земельного участка РФ-44-2-01-0-00-2020-0197 от 20.10.2020 с назначением земельного участка «дополнительное, начальное и среднее общее образование»м величиной предельной высоты объекта в пределах существующей; технические условия МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 31.08.2020 № Исх.02.11/4863; письмо филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 13.08.2020 № МР1-КМ/5-3/3810/2 о возможности присоединения к электрическим сетям; письмо ПАО «ТГК-2» от 17.08.2020 №4201/106-2020 о технической возможности подключения объекта к системе теплоснабжения; письмо АО «Газпром газораспределение Кострома» от 12.08.2020 № ИС-15/2564 о технической возможности подключения объекта к сетям газораспределения; технические условия МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 12.08.2020 № Исх.02.11/4373 на подключение объекта к сетям ливневой канализации; технические условия ОАО «КГТС» от 17.08.2020 №бту на телефонизацию, обеспечение доступа к сети «Интернет», АПК «Безопасный город», системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»; письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области от 11.08.2020 № 01-23/3044; заключение Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области от 03.08.2020 №99-20; письмо Департамента лесного хозяйства Костромской области от 25.08.2020 № ЛХ/6980; письмо Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 17.08.2020 № 5233; письмо Управления ветеринарии по Костромской области от 13.08.2020 № 02-05/2059.

26.10.2020 сторонами подписан акт о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.

14.12.2020, 23.12 2020, 13.01.2021 письмами № 2012142-ВР,  № 2012234-ВР,  № 2101131-ВР  подрядчик известил заказчика о приостановлении работ в связи с несоответствием общей площади объекта строительства расчетной площади планируемых к проектированию помещений согласно полученному медико-техническому заданию – до получения ответа по выбранному варианту устранения противоречия в исходных данных.

Письмом от 13.01.2021 № 25 заказчик сообщил, что считает приостановление работ необоснованным, разработать проектную документацию необходимо с учетом максимально возможной реализации требований, указанных в медико-техническом задании; изменение существенных условий контракта допускается после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. 

Письмом от 26.01.2021 № 112 заказчик сообщил, что считает приостановление работ необоснованным, медико-техническое задание по объекту будет откорректировано после согласования поэтажных планов здания с ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1».

22.12.2020 подрядчик письмом № 2012221-ВР известил заказчика о получении 17.12.2020 нового градостроительного плана земельного участка  РФ-44-2-01-0-00-2020-0291, утвержденного распоряжением Администрации города Костромы № 1087-р от 14.12.2020, с указанием дополнительного вида использования земельного участка «амбулаторно-клиническое обслуживание», которым установлена предельная этажность и предельная высота строительства, в связи с чем ранее разработанные предварительные планировки подлежат полной замене, и просил инициировать внесение изменений в градостроительный план земельного участка.   

10.06.2021 заказчик направил подрядчику письмо № 1262 с просьбой рассмотреть возможность теплоснабжения объекта от газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Кострома».

11.06.2021 заказчик направил подрядчику претензию № 1334 с требованием принять меры к надлежащему исполнению обязательств по контракту и уплате 21573 рублей 26 копеек пени за просрочку исполнения обязательств по изготовлению проектной документации.

15.07.2021 заказчик направил подрядчику претензию № 1592 с требованием принять меры к надлежащему исполнению обязательств по контракту и уплате 53933 рубля 14 копеек пени за просрочку исполнения обязательств по изготовлению проектной документации, в ответ на которую. заказчик письмом от 27.07.2021 № 2107278-ВР указал на недостатки исходных данных для проектирования.

06.07.2021 распоряжением Администрации города Костромы № 697-р утвержден градостроительный план земельного участка  РФ-44-2-01-0-00-2021-0286, который по виду использования земельного участка, предельной этажности и предельной высоте строительства соответствовал техническому заданию к контракту и медико-техническому заданию.

18.06.2021, 02.09.2021 письмами № 2106181-ВР, №  2109023-ВР подрядчик уведомил заказчика о приостановлении работ в связи с получением письма по вопросу подключения объекта к сетям газораспределения, отсутствием полной информации от ОГКУ «Облстройзаказчик», ресурсоснабжающих организаций о точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и перекладки сетей, попадающих в зону строительства, вследствие чего не представляется возможным определить место возможного размещения газового оборудования.

На указанные уведомления заказчик письмами от 06.09.2021 № 2009, от 09.09.2021 № 2050 сообщил, что считает приостановление работ необоснованным, поскольку указанные обстоятельства не препятствовали выполнению иных работ; вынос сетей теплоснабжения и электроснабжения будет осуществлен ПАО «ТГК-2», ПАО «МРСК Центра» по отдельным договорам, с целью внесения изменений в технические условия МУП «Костромагорводоканал» в части пожарных гидрантов документы будут представлены дополнительно; вынос сетей водоснабжения и водоотведения до жилого дома по ул. Комсомольская, 30г, координаты точек подключения необходимо предусмотреть проектом.

Подрядчик уведомил заказчика о продлении приостановления работ с 16.06.2021 в связи с выполнением всех разделов и частей проектной документации, для разработки которых не требуются исходные данные по ТУ и договорам тех.присоединения; договоры на технологическое присоединение к сетям электроснабжения и ливневой канализации не представлены, по состоянию на 08.09.2021 проекты выноса сетей из-под пятна застройки не выполнены. 

27.10.2021 заказчик направил подрядчику претензию № 2503 с требованием принять меры к надлежащему исполнению обязательств по контракту и уплате 241881 рубль 95 копеек пени за просрочку исполнения обязательств по изготовлению проектной документации, в ответ на которую. заказчик письмом от 03.11.2021 № 2111035-ВР сообщил о возобновлении работ 07.10.2021 и указал, что актуальный градостроительный план земельного участка  получен 07.07.2021, технические условия в части ливневой канализации, сетей связи, электроснабжения и газоснабжения получены в период 21.09.2021 – 06.10.2021, 29.09.2021 получены договоры технологического присоединения в части водоснабжения и водоотведения, не подписанные заказчиком.

14.02.2022 подрядчику было передано медико-техническое задание, в котором площади помещений приведены к минимально допустимым по нормам проектирования, что не оспаривается истцом.

08.09.2022 получено разрешение на строительство № 44-27-141-2022 сроком действия до 08.09.2023 по объекту капитального строительства: «Строительство поликлиники взрослых ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1»

22.09.2022 получено положительное заключение государственной экспертизы № 44-1-1-3-063449-2022 проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство поликлиники взрослых ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1».

14.10.2024 подрядчик передал заказчику проектную документацию в комплектности, достаточной для получения разрешения на строительство (без документации стадии «рабочая документация» и положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства).

Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства по объекту: «Строительство поликлиники взрослых ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1». получено 05.05.2023, что не оспаривается ответчиком.

19.05.2023 сторонами без возражений подписан акт № 1 сдачи-приемки выполненных работ по этапу: «подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий (с учетом проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)» на сумму 5623526 рублей 97 копеек.

Как указал истец, подрядчиком результат работ на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства заказчику в срок не представлены.

Сторонами без разногласий подписан акт № 1 от 19.05.2023 приёма-передачи выполненных работ на сумму 5623526 рублей 97 копеек. 

Заказчиком за просрочку исполнения обязательства начислена подрядчику неустойка за период с 01.06.2021 по 19.05.2023 в размере 1009423 рубля 69 копеек. Истец также просит продолжить начисление неустойки до фактического исполнения обязательства.

Истцом в адрес ответчика направлены претензии с требованием уплаты неустоек за несвоевременное исполнение контракта.

Оценив представленные доказательства на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд находит требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Согласно ст. 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить ее.

Согласно ч. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

В силу ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Договор подряда заключается для выполнения определенного вида работы, результат которой подрядчик обязан сдать, а заказчик принять и оплатить. Следовательно, целью договора подряда является не выполнение работы как таковой, а получение результата, который может быть передан заказчику. Получение подрядчиком определенного (установленного контрактом, строительными нормами и правилами) результата является основанием для оплаты работ по договору подряда.

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке (часть 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (ч. 3 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ч. 1 ст. 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы (ч. 1 ст. 718 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании ч. 1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, в том числе, непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи. 

В силу ст. 719 Кодекса подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком; подрядчик, не предупредивший заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Довод ответчика о несвоевременном предоставлении заказчиком технических условий, неоднократном их изменении и получением актуальных технических условий только 06.10.2021 судом принят быть не может.

Предусмотренная п. 1.10 технического задания обязанность заказчика представить подрядчику сведения о технической возможности подключения к инженерным сетям исполнена истцом 23.10.2020 (письмо № 1316), в том числе были переданы технические условия МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 31.08.2020 № Исх.02.11/4863, письмо филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 13.08.2020 № МР1-КМ/5-3/3810/2 о возможности присоединения к электрическим сетям, письмо ПАО «ТГК-2» от 17.08.2020 № 4201/106-2020 о технической возможности подключения объекта к системе теплоснабжения, письмо АО «Газпром газораспределение Кострома» от 12.08.2020 № ИС-15/2564 о технической возможности подключения объекта к сетям газораспределения, технические условия МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 12.08.2020 № Исх.02.11/4373 на подключение объекта к сетям ливневой канализации, технические условия ОАО «КГТС» от 17.08.2020 №бту на телефонизацию, обеспечение доступа к сети «Интернет», АПК «Безопасный город», системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112».

Осуществление сбора технических условий и анализ их достаточности, а также предоставление заказчику расчета потребляемых нагрузок и иной информации для получения технических условий согласно п. 1.11.2 технического задания относится к обязанностям подрядчика.

Заказчиком оказано подрядчику содействие в вопросах сбора технических условий.

Организации въездов на строительную площадку также относится к   вопросам проектирования, то есть к ответственности подрядчика.

 Вместе с тем, выданные 23.10.2020 заказчиком подрядчику медико-техническое задание, градостроительный план земельного участка РФ-44-2-01-0-00-2020-0197 от 20.10.2020 не отвечали требованиям к условиям проектирования и требовали корректировки, в связи с чем нельзя признать обязанность заказчика по предоставлению исходных данных исполненной своевременно.

В полном объеме надлежащая исходная документация выдана заказчиком подрядчику 14.02.2022, в том числе отвечающий требованиям к условиям проектирования градостроительный план земельного участка  РФ-44-2-01-0-00-2021-0286 от 06.07.2021 получен ответчиком 07.07.2021 (с просрочкой на 247 дней), медико-техническое задание - 14.02.2022 (с просрочкой на 469 дней).

По состоянию на 14.02.2022 вопросы выноса сетей из-под пятна застройки, предоставление градостроительного плана земельного участка с гаражом были разрешены.

С учетом изложенного судом установлен факт нарушения заказчиком срока выполнения обязанности по передаче исходной документации, что исключает ответственность подрядчика за период просрочки кредитора.

Поскольку сторонами согласованы этапы работ, их стоимость и сроки выполнения, и условия контракта предусматривают ответственность за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по контракту без исключения ответственности за нарушение сроков завершения отдельных этапов работы, оснований для освобождения подрядчика от такой ответственности не имеется, истцом обоснованно заявлены требования о применении ответственности по каждому из этапов работ.

В соответствии с ч. 9 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сторона освобождается от уплаты неустойки' (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Срок выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий (с учетом проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) с учетом установленного п. 7.2.1 контракта срока 10 рабочих дней со дня заключения контракта на предоставление исходной документации, должен составлять не более 203 дней.

Таким образом, с учетом получения надлежащей исходной документации в полном объеме 14.02.2022 работа по этапу «подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий» должна была быть завершена не позднее 05.09.2022.

Фактически указанные работы приняты 19.05.2023, то есть с просрочкой на 281 день.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой (штрафом, пеней), которой, согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с ч. 6, 7 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней); пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Аналогичная ответственность предусмотрена пунктами 9.6., 9.7 контракта.

Судом установлен факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по договору, в связи с чем у заказчика имеются правовые основания для начисления пени, предусмотренной контрактом. С учетом просрочки заказчика период начисления пени следует определить с 06.09.2022 по 19.05.2023.

За указанный период подлежит взысканию пеня в размере 395052 рубля 77 копеек (5623526,97 х 7,5 % х 1/300 х 281 = 395052,77).

Ответчиком заявлено о снижении размера пени вследствие ее явной несоразмерности.

Согласно ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд имеет право уменьшить неустойку в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

При подаче ходатайства о снижении размера неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации заявитель должен обосновать заявленную несоразмерность последствиям нарушения обязательства.

Заявление о снижении размера пени ответчиком не мотивировано, доказательств несоразмерности начисленной пени последствиям неисполнения обязательства не представлены, таким образом, оснований для снижения пени, исчисленной в установленном законом размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, не имеется.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению частично. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям..

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу областного государственного бюджетного учреждения "Управление капитального строительства Костромской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 395052 рубля 77 копеек пени, 9038 рублей 18 копеек расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Взыскать с областного государственного бюджетного учреждения "Управление капитального строительства Костромской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 171 рубль государственной пошлины.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении десяти дней со дня вступления решения в законную силу при отсутствии у суда сведений о добровольной уплате государственной пошлины в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Костромской области.

 

Судья                                                                  Н.Ю. Авдеева