0 9 

23/2020-274(1) 

я н 

в 

 а р 

Арбитражный суд Рязанской области я 

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;   

http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru 2 

Именем Российской Федерации 0

2 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

0 

г. Рязань Дело № А54-4872/2019 г 09 января 2020 года о  д 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Медведевой О.М., ру-а  ководствуясь статьями 110, 167, 174, 176 Арбитражного процессуального кодек- 

са Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования Управления благоустройства города администрации  

города Рязани удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой" (ОГРН  

<

***>; 390035, 

<

...>, литера А, А1, офис 6) в  

течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу  

устранить за свой счет и собственными силами недостатки, допущенные при вы- 

полнении работ по муниципальному контракту от 09.07.2018  

 № 0859200001118005554-0113639-01 на выполнение работ по благоустройству  

парковочного пространства в рамках реализации проектов местных инициатив в  

Октябрьском районе г. Рязани, а именно: 

1.1. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Зубковой, д. 23а,  

выполнив следующие виды работ: 

а) Фрезерование а/б покрытия на глубину до 6 см - 4 м2;  б) Устройство а/бетонного покрытия т. В м III h=0,06м - 4 м2;  

1.2. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Зубковой, д. 25,  

к.1, выполнив следующие виды работ: 

а) Фрезерование а/б покрытия на глубину до 5 см - 252 м2;  б) Устройство а/бетонного покрытия т.B м III h=0,05 м - 252 м2;  

1.3. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Зубковой, д. 25,  

к. 2, выполнив следующие виды работ: 

а) Фрезерование а/б покрытия на глубину до 6 см -103 м2;  б) Демонтаж бортового камня - 20 штук;  

в) Установка бортового камня БР 100.30.15 - 20 штук; 

г) Устройство а/бетонного покрытия т. В м III h=0,06 м -103 м2;  

1.4. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Зубковой, д. 25,  

корпус 3, выполнив следующие виды работ: а) Засыпка грунта и засев травы - 30 м2; 

1.5. Произвести устранение недо-статков на парковке на ул. Зубковой, д.  

28, выполнив следующие виды работ: а) Кирковка с добавлением нового материала щебень М400 h=0,l - 84 м2; б) Демонтаж бортового камня - 28 штук; 

в) Установка бортового камня БР 100.30.15 - 28 штук;  г) Устройство а/бетонного покрытия т.В м III h=0,06 м - 84 м2;  

1.6. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Новоселов, д. 40,  

к. 1, выполнив следующие виды работ: 

а) Произвести отсыпку грунта, разравнивание и засыпку травой - 16 м2;  

1.7. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Новоселов, д. 40,  

к. 2, выполнив следующие виды работ: 

а) Произвести отсыпку грунта, разравнивание и засыпку травой - 16 м2;  

1.8. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Новоселов, д. 40,  

к. 3, выполнив следующие виды работ: 

а) Произвести отсыпку грунта, разравнивание и засыпку травой -16 м2;  

1.9. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Тимакова, д. (от  

д. 4 до д. 6), выполнив следующие виды работ: 

а) Кирковка с добавлением нового материала щебень М400 h=0,1 - 192 м2;  б) Демонтаж бортового камня - 61 штука;  

в) Установка бортного камня БР 100.30.15-61 штука;  г) Устройство а/бетонного покрытия т.В м III h=0,06 м - 192 м2;  

1.10. Произвести устранение недостатков па парковке на ул. Тимакова, д.  

(от д. 20 до д. 30), выполнив следующие виды работ: 

а) Кирковка с добавлением нового материала щебень М400 h=0,1 см -250  

м2; б) Демонтаж бортового камня - 93 штуки; 

в) Установка бортового камня БР 100.30.15 - 93 штуки;  г) Устройство а/бетонною покрытия т.В м III h=0,06 м - 250 м2;  

1.10. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Тимакова, д.  

36, выполнив следующие виды работ: 

а) Кирковка с добавлением нового материала - 96 м2;  б) Демонтаж бортового камня - 32 штуки;  

в) Установка бортового камня БР 100.30.15 - 32 штуки;  г. Устройство а/бетонного покрытия т.В м III h=0,06 м - 96 м2.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Капиталстрой"  

(ОГРН 

<

***>; 390035, 

<

...>, литера А, А1, офис  

6) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  

Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской  

области. 

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сро- 

ки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.   Электронная подпись действительна. СудьяД анные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ ФИО1 Медведева  

департаментаДата 23.07.2019 9:32:52

Кому выдана Медведева Оксана Михайловна