АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 59613/23-67-474

г. Москва

15 мая 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 04 мая 2023 года Полный текст решения изготовлен 15 мая 2023 года 

Арбитражный суд в составе:  

Судья: В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола помощником судьи Н.С. Сидоровой, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 5072 

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИП-СТРОЙ № 1" (101000, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 30.04.2014, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ "РИК-2" (423800, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 05.05.2017, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 81 503 620,38 руб., при участии: от истца: ФИО1 по дов-ти от 07.12.2022 от ответчика: неявка, извещен 

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИП-СТРОЙ №  1" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к  ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ "РИК-2" (далее – ответчик) о взыскании неотработанного аванса по  договору № 30-0120-ЗП-МИП1/Н от 07.02.2020 в размере 61 383 537 руб. 05 коп., пени  за период с 01.03.2020 по 14.06.2022 в размере 19 037 513 руб. 20 коп., стоимости  давальческих материалов в размере 1 082 570 руб. 28 коп.  

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих  обязательств по договору строительного подряда в установленные сроки.  

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился,  отзыв не представил.  

Принимая во внимание надлежащее извещение сторон о времени и месте  судебного заседания, отсутствие возражений на переход к рассмотрению дела по  существу, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, пунктом 27 Постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 года № 65 «О подготовке дела к судебному  разбирательству» завершил предварительное заседание и перешел к рассмотрению дела  в судебном заседании в первой инстанции.  

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые  требования подлежащими частичному удовлетворению, исходя из следующего.  

Как усматривается из материалов дела, между ООО «МИП-Строй № 1» (далее -  Подрядчик) и ООО «СК «РИК-2» (далее - Субподрядчик) заключен договор № 30-0120- ЗП-МИП1/Н от 07.02.2020СМР (далее -Договор) на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» -  ст. «Некрасовка». 11.7 этап: «Объединенное здание эксплуатационного персонала на ст.  «Нижегородская улица» (далее - Объект).  

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором  строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися  в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Согласно п. 1.1 Договора, Субподрядчик обязуется в установленный Договором  срок в соответствии с техническим заданием и рабочей документацией, переданной  Подрядчиком на основании рабочей документации, утвержденной Подрядчиком,  

Выполнить работы по устройству: -систем водоснабжения; 

-автоматической установки водяного пожаротушения;  

-систем водоотведения на объекте строительства, а Подрядчик обязуется  принять результат выполненной работы и уплатить установленную Договором цену.  

В силу п. 1.2 Договора, Субподрядчик обязуется выполнить собственными  силами и силами привлеченных специализированных субподрядных организаций все  работы по строительства Объекта, указанного в п. 1.1 Договора, в соответствии с  требованиями и положениями в том числе рекомендуемыми) действующего  законодательства Российской Федерации, СНиП, ГОСТ, технических регламентов,  нормативно-технической документации в объеме и в соответствии с Рабочей  документацией, Техническим заданием и на условиях, определенных Договором и  приложениями к нему.  

В соответствии с п. 3.1 Договора, цена Договора составляет 75 907 149,91 руб., с  НДС 20 % (семьдесят пять миллионов девятьсот семь тысяч сто сорок девять рублей 91  копейка) - п.1.5 в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 26.05.2021 к Договору.  

Сумма авансирования составляет не более 80% от Цены Договора (4.7.2  Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 14.02.2020).  

Подрядчик произвел оплату аванса по Договору в размере 62 639 994,48 рублей,  что подтверждается платежными поручениями.  

В свою очередь Субподрядчик не выполнил работы в полном объеме, сданы  работы на сумму 1 256 457,43 руб.  

Таким образом сумма неотработанного аванса составляет 61 383 537  (Шестьдесят один миллион триста восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать семь  рублей) 05 копеек.  

В соответствии со ст. 450.1 ГК РФ, право на односторонний отказ от договора  (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем  уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор  прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено  настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В  случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или  частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или  измененным (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).  

В соответствии с п. 19.6 Договора Подрядчик имеет право в одностороннем  внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично без  возмещения Субподрядчику убытков, причиненных прекращением Договора, если  Субподрядчик:  

- прямо продемонстрировал намерение прекратить выполнение своих  обязательств по Договору или уклонялся от исполнения своих обязательств по  Договору в течение 30 (Тридцати) календарных дней;  

- задержал выполнение отдельных этапов работ на срок более 30  (Тридцати) календарных дней против сроков, предусмотренных в Графике  производства работ.  

В указанных случаях Подрядчик вправе потребовать компенсацию убытков,  непокрытых неустойкой, а также возврат аванса.  

В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора  полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом,  Субподрядчик компенсирует Подрядчику убытки, связанные с привлечением и  мобилизацией нового Субподрядчика.  

В соответствии с п. 19.3 Договора в случае одностороннего отказа от  исполнения Договора полностью или частично, когда это предусмотрено действующим  законодательством или Договором, Сторона, намеренная отказаться от исполнения  Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне.  

В соответствии с п. 19.3 Договора в случае одностороннего отказа от  исполнения Договора полностью или частично, когда это предусмотрено действующим  законодательством или Договором, Сторона, намеренная отказаться от исполнения  Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне.  

Реализуя предусмотренное законом и Договором право, ООО «МИП-Строй № 1»  направило в адрес ООО «СК «РИК-2» уведомление № 4-914-10311/2022 от 26.05.2022  об отказе от исполнения договора № 30-0120-ЗП-МИП1/Н от 07.02.2020 (почтовый  идентификатор № 80098772116728). Уведомление получено 14 июня 2022 года.  Соответственно, договор считается расторгнутым с 14 июня 2022 года.  

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными  обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или  иными правовыми актами.  

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено,  что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.  По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки  завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не  

установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором,  подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и  промежуточных сроков выполнения работы.  

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата  выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику  обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что  работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия  заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено  положениями статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или  частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор  считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 3 статьи 450  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при  расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до  расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей  их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются  неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49  «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о  неосновательном обогащении»).  

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации  лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой  оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица  (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или  сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев,  предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая  отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в  установленный договором срок на сумму перечисленных денежных средств,  установленный факт расторжения договора подряда и отсутствие правовых оснований  для удержания ответчиком денежных средств, требования истца о взыскании  неотработанного аванса по договору № 30-0120-ЗП-МИП1/Н от 07.02.2020 в размере 61  383 537 руб. 05 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.  

Истцом также заявлено требование о взыскании пени за период с 01.03.2020 по  14.06.2022 в размере 19 037 513 руб. 20 коп.  

Согласно п. 1.3. Договора Субподрядчик обязуется в соответствии с Договором  завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект в сроки, установленные  п. 5.1. Договора.  

В соответствии с п. 5.1. Договора, работы по Договору должны быть выполнены  в соответствии с Графиком производства работ.  

Срок окончания выполнения работ по Договору: 29.02.2020. 

По состоянию на 25.01.2023 работы по Договору Субподрядчиком не  выполнены, исполнительная документация Подрядчику не передана, что является  грубым нарушением принятых Субподрядчиком обязательств по Договору.  

На основании п. 11.2. Договора, Субподрядчик несет ответственность, в том  числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и  объем выполненных работ, сроки, установленные Договором.  

В соответствии с ч. 1 ст. 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность за  нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения  работ.  

Согласно ст. 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в  том числе при просрочке исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку,  определенную законом или договором.  

Согласно п. 11.4. Договора, Субподрядчик в случае нарушения срока окончания  выполнения работ по вине Субподрядчика уплачивает Подрядчику пени с первого дня  просрочки в размере 0,03 (ноль целых три сотых) % от цены Договора, указанной в п.  3.1. Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения  установленного Договором срока исполнения обязательства.  

В соответствии с расчетом истца сумма пени за нарушение срока окончания  выполнения работ по Договору составляет 19 037 513 (Девятнадцать миллионов  тридцать семь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 20 копеек.  

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, а также  период её начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по  существу ответчиком.  

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика пени за период с  01.03.2020 по 14.06.2022 в размере 19 037 513 руб. 20 коп. подлежит удовлетворению в  полном объеме.  

Истцом также заявлено требование о взыскании стоимости давальческих  материалов в размере 1 082 570 руб. 28 коп.  

Положениями п. 7.1.6 Договора установлено, что Подрядчик принимает на себя  обязательства обеспечить поставку Субподрядчику оборудования и давальческих  материалов.  

Субподрядчик обязан принимать давальческие материалы путем подписания  накладной по форме № М-15 (абз. 4 п. 7.1.7 Договора).  

Согласно позиции истца, Подрядчик передал Субподрядчику давальческие  материалы на общую сумму 1 082 570 (Один миллион восемьдесят две тысячи пятьсот  семьдесят) рублей 28 копеек.  

Вместе с тем, в материалы дела представлена накладная № 3803 на отпуск  материалов на сторону, подтверждающая передачу давальческих материалов на сумму  784 584 руб. 07 коп.  

Согласно ст. 713 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик  обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо,  после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а  также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с  учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.  

Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных  заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи  или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением  договора подряда (статья 714 ГК РФ).  

На основании статьи 728 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи  723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить  предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки  (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а  если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и  иного имущества.  

По использованию давальческого материала Подрядчик не отчитался, стоимость  материалов не компенсировал.  

На основании изложенного, требование истца о взыскании стоимости  давальческого материала подлежит удовлетворению в размере 784 584 руб. 07 коп. В  удовлетворении остальной части требований о взыскании стоимости давальческих  материалов суд отказывает.  

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на  исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле  доказательствам.  

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном  и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое  доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими  доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее  установленной силы.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле,  в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Согласно п. 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от  11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при  рассмотрении дел в арбитражных судах" в тех случаях, когда до окончания  рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично  либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины,  увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд,  вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины  разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.  

Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина  взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета  применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований  государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего  размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана  отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.  

Истцу при подаче искового заявления была предоставлена отсрочка по уплате  государственной пошлины. Таким образом, в соответствии с п. 3 ст. 110 АПК РФ с  ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная  пошлина в размере 199 268 руб. 78 коп., с истца - 731 руб. 22 коп.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РИК-2" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИП-СТРОЙ № 1" (ИНН: 

<

***>)  сумму неотработанного аванса по договору № 30-0120-ЗП-МИП1/Н от 07.02.2020 в  размере 61 383 537 (шестьдесят один миллион триста восемьдесят три тысячи пятьсот  тридцать семь) руб. 05 коп., пени за период с 01.03.2020 по 14.06.2022 в размере 19  037 513 (девятнадцать миллионов тридцать семь тысяч пятьсот тринадцать) руб. 20  

коп., стоимость давальческих материалов в размере 784 584 (семьсот восемьдесят  четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) руб. 07 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РИК-2" (ИНН: 

<

***>) в доход федерального  бюджета госпошлину в размере 199 268 (сто девяносто девять тысяч двести шестьдесят  восемь) руб. 78 коп.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИП- СТРОЙ № 1" (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере  731 (семьсот тридцать один) руб. 22 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья В.Г. Джиоев