399/2018-123030(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

город Омск  № дела  12 октября 2018 года А46-15130/2018  

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 11 октября  2018 года. Решение в полном объёме изготовлено 12 октября 2018 года.  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Яркового С.В., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рейтер М.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 120 отдела  Государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны  Российской Федерации (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о привлечении к  административной ответственности по части 6 статьи 19.5 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях акционерному обществу  «Главное управление обустройства войск» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) на основании протокола об административном правонарушении  от 23.08.2018 № 120/08-20/2018, при участии в судебном заседании:  

от заявителя – не явились, извещены, от заинтересованного лица – не явились, извещены, 

УСТАНОВИЛ:

120 отдел государственного архитектурно-строительного надзора  Министерства обороны Российской Федерации (далее по тексту – 120 отдел)  обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о привлечении  акционерному обществу «Главное управление обустройства войск» (далее по  тексту – общество, заинтересованное лицо, АР «ГУОВ») к административной  ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях, на основании протокола об  административном правонарушении от 23.08.2018 № 120/08-20/2018. Заявленные  требования мотивированы невыполнением в установленный срок законного  предписания уполномоченного органа.  

В судебном заседании стороны надлежащим образом извещённые о месте и  времени судебного разбирательства дела, явку своих представителей в судебное  заседание не обеспечили. Ходатайства об отложении судебного заседания не  заявляли. По правилам статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.  

Рассмотрев представленные в материалы дела документы, суд установил  следующие обстоятельства.  

В период с 18 декабря по 25 декабря 2017 года на основании приказа  начальника 120 отдела государственного архитектурно-строительного надзора от  28.11.2017 № 172 и в соответствии с п/п «а» пункта 3 частью 5 статьи 54  Градостроительного кодекса Российской Федерации должностным лицом отдела  проведена проверка деятельности генерального подрядчика АО «ГУОВ» при  строительстве объекта капитального строительства «Хранилище из  металлоконструкций системы «МАРХИ» для размещения вооружения, военной и  специальной техники на базе 225 БХРВТ в/ч 44932, г. Омск» (шифр Ц-42/15-146),  расположенного по адресу: г. Омск, в/ч 44932.  

По результатам проверки был составлен акт проверки от 25.12.2017 № 2396  и, в связи с выявлением нарушений в деятельности Общества, выдано  предписание об устранении нарушений от 25.12.2017 № 2396/1 со сроком  устранения нарушений до 16.03.2018.  

Характер выявленных нарушений заключается в следующем: 

1. Строительство объекта осуществляется в отсутствие разрешения на  строительство, при этом фактически выполнены работы капитального характера  по устройству монолитных железобетонных фундаментов (подземная часть), на  момент проверки выполняются работы по устройству металлического каркаса  надземной части здания;  

2. На строительной площадке отсутствует утвержденная и допущенная в  производство работ путем простановки штампа на каждом листе с подписью  ответственного лица (заказчика) ФКП «Управление заказчика КС Минобороны  России» проектная и рабочая документация, при этом в отсутствие указанных  документов АО «ГУОВ» допущено выполнение строительно-монтажных работ,  влияющих на безопасность здания;  

3. Строительство объекта осуществляется в отсутствие обязательной оценки  соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и  сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства,  монтажа, наладки и утилизации (сноса) в форме государственной экспертизы  результатов инженерных изысканий и проектной документации - положительное  заключение государственной экспертизы проектной документации и материалов  инженерных изысканий не представлено;  

4. Акты освидетельствования скрытых работ не подписаны представителем  заказчика (застройщика), при этом, в процессе строительного контроля и  организации строительства АО «ГУОВ», до завершения процедуры  освидетельствования предыдущих скрытых работ допущено выполнение  последующих работ;  

5. В разделе 5 общего журнала работ отсутствуют записи о строительном  контроле лица, осуществляющего строительство;  

6. При въезде на строительную площадку не установлен стенд пожарной  защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и  сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения  водоисточников, средств пожаротушения.  

01.02.2018 от АО «ГУОВ» в адрес 120 отдела государственного  архитектурно-строительного надзора Минобороны России поступило ходатайство  о продлении срока исполнения предписания до 23.04.2018.  

Письмом отдела указанное ходатайство было удовлетворено, срок  исполнения предписания продлен до 23.04.2018.  

Далее от АО «ГУОВ» вновь поступило ходатайство о продлении срока  исполнения предписания, которое было отклонено в связи с необоснованностью.  

Затем, в период с 16 июля по 30 июля 2018 года на основании приказа  начальника 120 отдела государственного архитектурно-строительного надзора от  06.07.2018 № 89 и в соответствии с п/п «б» пункта 3 части 5 статьи 54  Градостроительного кодекса Российской Федерации должностными лицами  отдела проведена выездная проверка по истечении срока исполнения выданного  предписания об устранении нарушений от 25.12.2017 № 2396/1 со сроком  устранения нарушений до 23.04.2018.  

В результате проверки установлено, что заинтересованным лицом не  исполнены пункты 1, 2, 3, 4 предписания от 25.12.2017 № 2396/1 в установленный  в нём срок.  

На момент истечения срока исполнения предписания (24.04.2018) и на  момент проверки, документального подтверждения выполнения предписания в  

установленный в нём срок в полном объёме или в части органу государственного  строительного надзора представлено не было. Извещения о выполнении  предписания в части или в полном объёме от Общества до истечения срока  исполнения предписания и до проведения проверки, в адрес органа  государственного строительного надзора не поступало (п. 16 РД-11-04-2006  «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного  строительного надзора...», в ред. Приказа Ростехнадзора от 14.07.2015 № 273).  Общество не представило доказательств того, что сразу после получения им  предписания предприняло какие-либо меры по устранению допущенных в  процессе строительства, осуществления строительного контроля и организации  строительства нарушений, напротив, вопреки всем законодательным  требованиям, продолжило выполнение дальнейших работ до устранения  нарушений. Так, с момента предыдущей проверки были выполнены следующие  работы: смонтированы металлические колонны в полном объёме, полностью  возведены перекрёстно-стержневые пространственные металлические  конструкции системы «МАРХИ» (металлические фермы), выполнена кровля  здания из профнастила, выполнен бетонный пол и цоколь здания из кирпича,  навешаны стеновые ограждающие конструкции из сендвич-панелей,  смонтированы ворота, производится монтаж инженерных систем. Для исполнения  предписания был определён разумный срок, с учётом технологии производства  работ, конструктивных и иных характеристик объекта капитального  строительства.  

Таким образом, Обществом не выполнено в установленный срок законное  предписание уполномоченного на осуществление государственного  строительного надзора федерального органа исполнительной власти от 25.12.2017   № 2396/1.  

Вышеуказанные обстоятельства послужили главному инспектору 120  отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны  России ФИО1 поводом для составления протокола об административном  правонарушении от 23.08.2018 № 120/08-20/2018 в отношении юридического лица  АО «ГУОВ», поскольку невыполнение в установленный срок предписания  является нарушением в соответствии частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях.  

На основании указанного протокола заявитель обратился в суд с настоящим  требованием.  

Исследовав в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд  находит факт совершения заинтересованным лицом административного  правонарушения подтверждённым материалами дела.  

В части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации указано, что при рассмотрении дела о привлечении к  административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании  устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся  ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об  административном правонарушении, имелись ли основания для составления  протокола об административном правонарушении и полномочия  административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом  административная ответственность за совершение данного правонарушения и  имеются ли основания для привлечения к административной ответственности  лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры  административной ответственности.  

Согласно статье 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях законодательство об административных правонарушениях  

состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов  субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Административным правонарушением признается противоправное,  виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое  настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об  административных правонарушениях установлена административная  ответственность (часть 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях).  

Часть 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях предусматривает ответственность за невыполнение в  установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление  государственного строительного надзора федерального органа исполнительной  власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и  влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц - от  пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их  деятельности на срок до девяноста суток.  

Объектом данного правонарушения выступают общественные отношения,  складывающиеся в процессе осуществления государственного контроля (надзора).  

Объективная сторона предусматривает невыполнение в установленный срок  законного предписания уполномоченных на осуществление государственного  строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов  исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Субъектами административного правонарушения в данном случае  выступает юридическое лицо, не выполнившее в установленный срок законное  предписание.  

С субъективной стороны правонарушение является умышленным. 

В силу части 6 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, пункта 14 Положения об осуществлении государственного  строительного надзора в Российской Федерации (утвержденного Постановлением  Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54), при выявлении в  результате проведенной проверки нарушений должностным лицом органа  государственного строительного надзора составляется акт, являющийся  основанием для выдачи заказчику, застройщику или подрядчику (в зависимости  от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет  ответственность за допущенные нарушения) предписания об устранении таких  нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный  правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования  которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушений с  учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального  строительства.  

Целью выдачи предписания является устранение выявленного нарушения и  предупреждение его последствий.  

При этом предписание должно содержать только законные требования, то  есть на проверяемое лицо может быть возложена обязанность по устранению  лишь тех нарушений, соблюдение которых обязательно для него в силу закона, а  сами требования должны быть реально исполнимы.  

Таким образом, законность соответствующего правоприменительного акта  выступает важным квалифицирующим признаком административного  правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 19.5  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

В силу части 1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской  Федерации строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а  также их капитальный ремонт регулируется настоящим Кодексом, другими  

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса  Российской Федерации лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо,  осуществляющее строительство), может являться застройщик либо  индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор  строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает  соблюдение требований проектной документации, технических регламентов,  техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за  качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной  документации.  

В силу части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской  Федерации лицо, осуществляющее строительство обязано проводить  строительный контроль, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не  приступать к продолжению работ до составления актов об устранении  выявленных недостатков.  

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 30.05.2018,  Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2018 по  делу № А45-8750/2018 в рамках рассмотрения дела о признании незаконным и  отмене Постановления 120 отдела от 20.02.2018 № 120/02-01/2018 о привлечении  Общества к административной ответственности по части 1 статьи 9.4 Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что  АО «ГУОВ» является генеральным подрядчиком (лицом, осуществляющим  строительство с привлечением третьих лиц), на которое возложена обязанность по  осуществлению строительства в соответствии с действующими  градостроительными нормами. Указанное решение вступило в законную силу  10.08.2018. Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную  силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не  доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в  котором участвуют те же лица. Те же обстоятельства подтверждаются  государственным контрактом, актами освидетельствования скрытых работ и  ответственных конструкций, приказами о закреплении ответственных лиц и  другими материалами.  

Таким образом, исходя из приведенных норм градостроительного  законодательства и положений Государственного контракта следует, что АО  «ГУОВ» является лицом, осуществляющим строительство.  

Обязанности по осуществлению строительства в соответствии с  действующими нормами, по проведению строительного контроля, организации,  координации строительства, по устранению нарушений возложены на Общество,  как на лицо, осуществляющее строительство, подпунктом 3 части 1 статьи 39  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений», частью 4 статьи 52, частью 6 статьи 52,  частью 2, частью 4 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  пунктов 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Положения о проведении строительного  контроля, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от  21.06.2010 № 468.  

Из всего вышеизложенного следует, что АО «ГУОВ» является надлежащим  субъектом ответственности, мер по устранению отраженных в предписании  нарушений, в том числе предусмотренными государственным контрактом  способами, заинтересованным лицом не принималось. Более того, в нарушение  обязательных требований производство работ было продолжено.  

Являясь субъектом строительной деятельности и обладая свидетельством  саморегулируемой организации в области строительства, генеральный подрядчик  АО «ГУОВ» обязан знать и добросовестно выполнять требования действующего  законодательства в рассматриваемой сфере.  

В рассматриваемом случае административная ответственность следует не за  неисполнением каких-либо норм гражданского законодательства, а за  неисполнение публично-правовых норм, установленных законом, т.к.  императивно установленные обязанности (по закону) не могут быть диспозитивно  изменены участниками гражданско-правовой сделки, в противном случае, такое  условие сделки будет являться ничтожным, как противоречащее закону.  

Согласно статье 58 приводимого кодекса, лица, виновные в нарушении  законодательства о градостроительной деятельности, несут дисциплинарную,  имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии  с законодательством Российской Федерации.  

На основании части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в  совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у  него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых  данным кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена  административная ответственность, но данным лицом не были приняты все  зависящие от него меры по их соблюдению.  

Надлежащих и достаточных доказательств того, что заинтересованным  лицом приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований, за  нарушение которых предусмотрена административная ответственность,  материалы дела не содержат.  

Вина Общества заключается в том, что оно не выполнило обязанность  соблюдать требования общеобязательных норм и правил, технических  регламентов при строительстве, выполнять законные требования  контролирующих органов, чего заинтересованным лицом в полной мере  обеспечено не было. Доказательств отсутствия объективной возможности  исполнить предписание к установленному в нём сроку, заинтересованное лицо не  представило.  

Предписание административного органа в установленном порядке не  оспорено, не признано недействительным и не отменено. По убеждению суда,  означенное предписание соответствуют положениям действующего  законодательства.  

При этом суд отклоняет доводы заинтересованного лица об отсутствии  события административного правонарушения ввиду того, что в соответствии с  содержанием означенного предписания устранение допущенных нарушений  поручено ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России», т.к. учитывая  обстоятельства дела, а именно, обращение в административный орган с  ходатайством о продлении срока его исполнения, а также преюдициально  установленные обстоятельства в рамках дела № А45-8750/2018, оспариваемое  предписание исполнимо и у общества фактически не имеется неясности в том, что  ему необходимо предпринять в целях устранения выявленных нарушений  законодательства.  

В силу положений части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях постановление по делу об  административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух  месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому  судьей, - но истечении трех месяцев) со дня совершения административного  правонарушения; а за нарушение законодательства Российской Федерации о  

градостроительной деятельности - по истечении одного года со дня совершения  административного правонарушения.  

Невыполнение заинтересованным лицо рассматриваемого предписания  представляет собой нарушение законодательства Российской Федерации о  градостроительной деятельности, в связи с чем, к такому правонарушению  подлежит применению годичный срок давности привлечения к административной  ответственности. Указанный вывод подтверждается пунктом 17 Обзора по  вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите  конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере  (утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации  16.03.2016).  

Принимая во внимание объём и опасный характер выявленных нарушений,  а также учитывая наличие отягчающих вину обстоятельств, а именно,  неоднократное привлечение к административной ответственности, о чем  представлены сведения в материалах административного производства), суд  считает возможным назначить Обществу наказание в виде наложения  административного штрафа в размере 61 000 руб.  

Исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда по  делу о привлечении к административной ответственности не выдаётся,  принудительное исполнение производится непосредственно на основании  настоящего судебного акта.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170 и 206  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

привлечь акционерное общество «Главное управление обустройства войск»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес (местонахождения): 119021, 

<

...>, зарегистрировано в качестве  юридического лица 08.07.2008 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой  службы № 46 по г. Москве) к административной ответственности,  предусмотренной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях, назначить административное наказание в  виде административного штрафа в размере 61 000 рублей.  

Указанную сумму административного штрафа не позднее шестидесяти дней  необходимо уплатить по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>; КПП  540501001, УФК по Новосибирской области (ФКУ «УФО МО РФ по  Новосибирской области»), л/с 

<

***>, ОКТМО 50701000, Банк  

получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г. Новосибирск, р/с  

<

***>, КБК 18711690020027000140, БИК 045004001. В  назначении платежа указать: Штраф за правонарушение в строительстве по делу   № (указывается номер судебного дела).  

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека  арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья С.В. Ярковой