ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дело № А40-67312/2025

резолютивная часть объявлена 24.09.2025г.

изготовлено в полном объеме 07.10.2025г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.,

судей Гузеевой О.С., Семикиной О.Н.,

при ведении протокола с/з секретарем Исмаиловой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.05.2025г.

по делу № А40-67312/2025

по спору с участием:

истец ООО «Атлант» (ОГРН 

<

***>) 

ответчик ООО «РусТрейнИнжиниринг» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 по дов. от 02.06.2025г., ФИО2 по дов. от 09.01.2025г.,

от ответчика: гендиректор ФИО3 по приказу от 13.08.2019г., ФИО4 по дов. от 08.11.2024г.,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Атлант» (подрядчик) предъявило ООО «РусТрейнИнжиниринг» (заказчик) иск о взыскании по задолженности по оплате стоимости выполненной работы в размере 21 506 517,36руб., пени в размере 2 150 651,74руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 06.05.2025г., изготовленным в полном объеме 15.05.2025г., исковые требования удовлетворены. 

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Ответчик требования и доводы жалобы поддержал, Истец по ним возражал.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Установлено, что 23.06.2022г. между ООО «РусТрейнИнжиниринг» (Генеральный подрядчик) и ООО «Атлант» (Подрядчик) заключен договор № 3-П-ТИВ от 23.06.2022 (далее - Договор 1).

Согласно п. 1.1 Договора 1 Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять строительно-монтажные, ремонтно-восстановительные и пусконаладочные работы по капитальному ремонту, строительству, реконструкции и модернизации (далее - работы) на указанных в пункте 1.2. Договора объектах Заказчика (далее - объект», объекты) в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и дополнительным соглашением к нему, в полном соответствии с проектной документацией, техническими условиями, строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации, и передавать результаты выполненных работ Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принимать результаты выполненных работ и оплачивать их в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором и Дополнительным соглашением к нему.

В соответствии с п. 1.2 Договора наименование Объектов, в отношении которых будут проводится работы, состав, объем, содержание Работ, а также их стоимость и сроки выполнения и финансирования определяются в заключаемых сторонами Дополнительных соглашениях к Договору.

Согласно п. 1 Дополнительного соглашения №1 от 03.08.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли инженерно-лабораторного корпуса АО, НО «ТИВ» с Приложением 1, по адресу: 

<

...> Г.

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №1 от 03.08.2022 к Договору цена составляет 2 502 810,23 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены на общую сумму в размере 2 502 810,23 руб., что подтверждают подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 2 377 669,72 руб. Таким образом, задолженность Генерального подрядчика составляет 125 140,51 руб. (2 502 810,23 руб. - 2 377 669,72 руб.)

Согласно п.3.9 Договора окончательный расчет производится Генеральным подрядчиком в течение 70 календарных дней с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), в порядке установленном п. 4.1.1 - 4.1.3 Договора, подписания Сторонами документов указанных в п. 4.2. - 4.2.3 Договора, оплаты Заказчиком Генеральному подрядчику по Договору генерального подряда Работ указанных в последнем акте (форма КС-2) и предоставления Подрядчиком Генеральному подрядчику полного пакета исполнительной документации (в соответствии с требованиями п. 5.1.21 Договора), а также оригиналов счета на оплату и счета-фактуры. Оплата Работ производится Генеральным подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего расчетный счет Генерального подрядчика.

В обоснование исковых требований истец указал, что с учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.09.2022 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 125 140,51 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 30.11.2022 включительно, в связи с чем в иске произведён расчет неустойки с 01.12.2022 по 02.12.2022.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №2 от 26.09.2022 к Договору 1 Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещений антресольного этажа Здания стендовых испытаний АО, НО «ТИВ» с Приложением 1, по адресу: 

<

...> Г.

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №2 от 26.09.2022 к Договору цена составляет 577 337,16 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 575 591,12 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 546 811,56 руб. Таким образом, задолженность Генерального подрядчика составляет 28 779,56 руб.

В обоснование исковых требований истец указал, что с учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.12.2022 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 28 779,56 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 01.03.2023 включительно, в связи с чем в иске произведен расчет неустойки с 02.03.2023 по 03.03.2023.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №3 от 13.06.2023 к Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по аварийному ремонту кровли инженерно-лабораторного корпуса АО, НО «ТИВ» в соответствии с Приложением 1, по адресу: 

<

...> Г.

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №3 от 13.06.2023 к Договору цена составляет 213 266,16 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 213 266,16 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В обоснование исковых требований истец указал, что с учетом даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.09.2023 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 213 266,16 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 30.11.2023 включительно, в связи с чем в иске произведён расчет неустойки с 01.12.2023 по 02.12.2023.

23.06.2022 между ООО «РусТрейнИнжиниринг» (Генеральный подрядчик, Ответчик) и ООО «Атлант» (Подрядчик, Истец) заключен договор № 5-П-ЦСМ (далее - Договор 2), по условиям которого Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять строительно-монтажные, ремонтно-восстановительные и пусконаладочные работы по капитальному ремонту, строительству, реконструкции и модернизации (далее - работы) на указанных в пункте 1.2. Договора объектах Заказчика (далее - объект, объекты) в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и дополнительным соглашением к нему, в полном соответствии с проектной документацией, техническими условиями, строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации, и передавать результаты выполненных работ Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принимать результаты выполненных работ и оплачивать их в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором и Дополнительным соглашением к нему.

В соответствии с п. 1.2 Договора наименование Объектов, в отношении которых будут проводится работы, состав, объем, содержание Работ, а также их стоимость и сроки выполнения и финансирования определяются в заключаемых сторонами Дополнительных соглашениях к Договору.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №1 от 04.07.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту помещения дежурных высоковольтного участка, ограждающих конструкций зданий и сооружений, производственных, служебных и санитарно-бытовых помещений (здания ТП-11, РП-1, ТП-36) на объекте: ОАО «Центросвармаш», расположенном по адресу: 

<

...> в соответствии с Приложением №1-4.

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №1 от 04.07.2022 к Договору цена составляет 3 074 16,00 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 3 036 354,38 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 2 884 536,67 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 151 817,71 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 21.11.2022 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 151 817,71 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 31.01.2023 включительно, в связи с чем в иске произведён расчет неустойки с 01.02.2023 по 02.02.2023.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №2 от 25.07.2022 к Договору 2 Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли и отмостки здания ОАО «Центросвармаш», расположенном по адресу: 

<

...> в соответствии с Приложением №1. В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №2 от 25.07.2022 к Договору цена составляет 952 070,29 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 615 124,63 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 591 588,66 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 23 535,97 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 31.03.2023 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 23 535,97 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 10.06.2023 включительно, в связи с чем в иске произведён расчет неустойки с 11.06.2023 по 12.06.2023.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения № 3 от 25.07.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли и отмостки здания ТП-37 ОАО «Центросвармаш», расположенном по адресу: 

<

...> в соответствии с Приложением №1.

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения № 3 от 25.07.2022 к Договору цена составляет 1 472 603,52 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 1 472 603,52 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 1 398 973,34 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 73 630,18 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.09.2022 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 73 630,18 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 30.11.2022 включительно, в связи с чем в иске произведён расчет неустойки с 01.12.2022 по 02.12.2022.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения № 4 от 16.08.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли здания котельной ОАО «Центросвармаш». Этап 1, расположенном по адресу: 

<

...> в соответствии с Приложением №1.

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения № 4 от 16.08.2022 к Договору цена составляет 3 061 767,40 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 3 061 767,40 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 2 908 679,03 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 153 088,37 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 21.11.2022 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 153 088,37 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 31.01.2023 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 01.02.2023 по 02.02.2023.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения № 5 от 16.08.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту входного тамбура вестибюля и ступеней лестницы ОАО «Центросвармаш», расположенном по адресу: 

<

...> в соответствии с Приложением №1.

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения № 5 от 16.08.2022 к Договору цена составляет 141 805,82 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 141 805,82 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 134 715,53 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 7 090,29 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.09.2022 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 7 090,29 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 30.11.2022 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 01.12.2022 по 02.12.2022.

14.12.2022 между ООО «РусТрейнИнжиниринг» (Генеральный подрядчик) и ООО «Атлант» (Подрядчик) заключен договор № 17-П-БМЗ от 14.12.2022, (далее - Договор 3).

Согласно п. 1.1 Договора Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять строительно-монтажные, ремонтно-восстановительные и пусконаладочные работы по капитальному ремонту, строительству, реконструкции и модернизации (далее - «Работы») на указанных в пункте 1.2. Договора объектах Заказчика (далее - «Объект», «Объекты») в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и дополнительным соглашением к нему, в полном соответствии с проектной документацией, техническими условиями, строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации, и передавать результаты выполненных работ Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принимать результаты выполненных работ и оплачивать их в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором и Дополнительным соглашением к нему.

В соответствии с п. 1.2 Договора наименование Объектов, в отношении которых будут проводится работы, состав, объем, содержание Работ, а также их стоимость и сроки выполнения и финансирования определяются в заключаемых сторонами Дополнительных соглашениях к Договору.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №1 от 14.12.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту фундамента трансбордера (2 этап), корпус Е в соответствии с Приложением 1, по адресу: 

<

...>.

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №1 от 14.12.2022 к Договору цена составляет 22 550 305,22 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 22 444 154,08 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 14 050 921,58 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 8 393 232,50 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 31.05.2023 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 8 393 232,50 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 10.08.2023 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 11.08.2023 по 12.08.2023.

16.06.2022 между ООО «РусТрейнИнжиниринг» (Генеральный подрядчик, Ответчик) и ООО «Атлант» (Подрядчик, Истец) заключен договор № 32-П-ТВЗ от 16.06.2022 (далее - Договор 4).

Согласно п. 1.1 Договора Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять строительно-монтажные, ремонтно-восстановительные и пусконаладочные работы по капитальному ремонту, строительству, реконструкции и модернизации (далее - работы) на указанных в пункте 1.2. Договора объектах Заказчика (далее - объект, объекты) в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и дополнительным соглашением к нему, в полном соответствии с проектной документацией, техническими условиями, строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации, и передавать результаты выполненных работ Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принимать результаты выполненных работ и оплачивать их в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором и Дополнительным соглашением к нему.

В соответствии с п. 1.2 Договора наименование Объектов, в отношении которых будут проводится работы, состав, объем, содержание Работ, а также их стоимость и сроки выполнения и финансирования определяются в заключаемых сторонами Дополнительных соглашениях к Договору.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №1 от 16.06.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить на объекте комплекс строительно-монтажных работ по Ремонту зданий и сооружений, производственных, служебных и санитарно-бытовых помещений (далее - Работы) на объекте: ОАО «ТВЗ», расположенном по адресу: 170003, 

<

...>. в соответствии с Рабочей документацией, переданной Генеральным подрядчиком Подрядчику со штампом «В производство работ» в рамках Дополнительного соглашения по Акту приема-передачи Рабочей документации, а также Дефектными ведомостями на Ремонт женской раздевалки 2-го этажа ВСЦ ОАО «ТВЗ» (инв. №30001), ремонт женской раздевалки ВСЦ 2-ой этаж (Инв. 30001). Вентиляция, Ремонт женской раздевалки ВСЦ 2-ой этаж (Инв. 30001) ХВС, ГВС, Ремонт женской раздевалки ВСЦ 2-ой этаж (инв. 30001). Канализация, Ремонт женской раздевалки ВСЦ 2-ой этаж (инв. №30001). Электромонтажные работы. Электроосвещение женской раздевалки ОАО «ТВЗ» в г. Тверь, Ремонт бытовых помещений и мужского туалета АБК РМЦ РИП ОАО ТВЗ (инв. №30029), Ремонт мужских бытовых помещений и мужского туалете АБК РМЦ РИП (Инв. № 30029). Канализация, Ремонт мужских бытовых помещений и мужского туалета АБК РМЦ РИП (Инв. №30029). Вентиляция, Ремонт Мужских бытовых помещений и мужского туалета АБК РМЦ РИП (инв. № 30029) Отопление, Ремонт мужских бытовых помещений и мужского туалета АБК РМЦ РИП (Инв. №30029). ХВС, ГВС, Ремонт мужских бытовых помещений и мужского туалета АБК РМЦ РИП (Инв. №30029). Электромонтажные работы. 

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №1 от 16.06.2022 к Договору цена составляет 9 164 015,53 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 15 229 996,68 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 12 289 659,57 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 2 940 337,11 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.06.2023 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 2 940 337,11 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 30.08.2023 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 31.08.2023 по 01.09.2023.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №2 от 29.06.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по Ремонту крановых путей 3-го пролета KMC РКЦ №2 на территории ОАО «ТВЗ» (инв. номер 30263) на объекте ОАО «ТВЗ», расположенном по адресу: 170003, 

<

...>, в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №1).

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №2 от 29.06.2022 к Договору цена составляет 18 619 928,39 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 18 619 928,39 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 17 688 931,97 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 930 996,42 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.10.2022 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 930 996,42 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 30.12.2022 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 31.12.2022 по 01.01.2023.

Согласно п. 1 Дополнительного соглашения №3 от 03.08.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по ремонту кровли и фонарей ВСЦ Этап 1, по ремонту кровли Котельного цеха (инв. № 30058) на Объекте ОАО «ТВЗ», расположенном по адресу: 170003, 

<

...>, в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №3, Приложение №4).

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №3 от 03.08.2022 к Договору цена составляет 4 299 643,09 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 4 299 643,09 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 4 084 660,94 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 214 982,15 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 21.11.2022 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 214 982,15 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 31.01.2023 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 01.02.2023 по 02.02.2023.

Согласно п. 1 Дополнительного соглашения №4 от 03.08.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-восстановительные работы в здании котельного цеха (ивн. №30058), работы по ремонту мужских бытовых помещений РКЦ ОАО «ТВЗ (инв. No3000l.2) на Объекте ОАО «ТВЗ», расположенном по адресу: 170003, 

<

...>, в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №3, Приложение №4). В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №4 от 03.05.2022 к Договору цена составляет 5 546 593,18 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 5 331 813,22 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 5 065 222,56 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 266 590,66 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.03.2023 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 266 590,66 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 30.05.2023 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 31.05.2023 по 01.06.2023.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №5 от 16.08.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по ремонту мужских душевых помещений и туалета 2-го этажа АБК KMC ОАО «ТВЗ» (инв. №30269). Водоснабжение и канализация; по ремонту мужских бытовых помещений и мужского туалета АБК РМЦ РИП ОАО ТВЗ (инв. №30029), расположенном по адресу: 170003, 

<

...>, в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №3-6). В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №5 от 16.08.2022 к Договору цена составляет 3 928 850,50 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 3 912 105,54 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 3 716 500,28 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 195 605,26 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.03.2023 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 195 605,26 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 30.05.2023 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 31.05.2023 по 01.06.2023.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №6 от 12.09.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по устройству бетонной площадки ОАО «ТВЗ для ремонта ЭП-2Т на территории АО «ЦППК» (моторвагонное депо) по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино. ФИО5, д. 1 на основании Приложения №2. В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №6 от 12.09.2022 к Договору цена составляет 2 374 137,47 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 2 374 137,47 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 2 255 430,60 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 118 706,87 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 21.11.2022 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 118 706,87 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 31.01.2023 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 01.02.2023 по 02.02.2023.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №7 от 30.09.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по ремонту крановых путей 2-го пролета корпуса №2 Тележного цеха (инв. 3 30021) и 5-го пролета KMC РКЦ №2 (инв. № 30264) на территории ОАО «ТВЗ» (инв.№30021) в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1 №2).

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №7 от 30.09.2022 к Договору цена составляет 7 515 85,98 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 7 515 858,98 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 7 140 066,03 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 375 792,95 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.12.2022 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 375 792,95 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 01.03.2023 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 02.03.2023 по 03.03.2023.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №8 от 03.11.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по организации производства габарита «Т» на территории ОАО «ТВЗ». Этап 1.

Устройство фундамента сварочной машины SMC «Carlworde» в пролете KMC ОАО «ТВЗ», по адресу: 

<

...> (Приложение №1).

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №8 от 03.11.2022 к Договору цена составляет 31 797 332,34 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 31 759 623,27 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 30 171 642,11 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 1 587 981,16 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.03.2023 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 1 587 981,16 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 30.05.2023 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 31.05.2023 по 01.06.2023.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №9 от 17.11.2022 к Договору Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по ремонту крановых путей 4-го и 5-го пролетов на территории ОАО «ЦСМ» на объекте ОАО «Центросвармаш», расположенном по адресу: 

<

...> в соответствии с Приложением №4.

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №9 от 30.09.2022 к Договору цена составляет 15 400 652,63 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 15 250 351,70 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 14 487 834,12 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 762 517,58 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.04.2023 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 762 517,58 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 30.06.2023 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 01.07.2023 по 02.07.2023.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №10 от 12.01.2023 к Договору Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по ремонту крановых путей 3-го пролета KMC РКЦ №2 на территории ОАО «ТВЗ» (инв. №30263), расположенном по адресу: 

<

...> в соответствии с Приложением №2.

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №10 от 12.01.2023 к Договору цена составляет 2 504 479,13 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 2 504 479,13 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 2 379 255,17 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 125 223,96 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 20.02.2023 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 125 223,96 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 02.05.2023 включительно, в связи с чем в иске истцом начислена неустойка с 03.05.2023 по 04.05.2023.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения №12 от 08.08.2023 к Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту надземных крановых путей мостовых кранов в производственных подразделениях ОАО «ТВЗ» на объекте: ОАО «Центросвармаш», расположенном по адресу: 170003, 

<

...>-Б в соответствии с Приложением №2-11.

В соответствии с п.2 Дополнительного соглашения №12 от 08.08.2023 к Договору цена составляет 19 639 009,08 руб.

В рамках вышеуказанного Договора Подрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 4 783 499,62 руб., что подтверждает подписанные без замечаний Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Во исполнение условий Договора Генеральный подрядчик перечислил в адрес Подрядчика авансовые платежи на сумму 2 447 751,16 руб., задолженность Генерального подрядчика составляет 2 335 748,46 руб.

С учетом даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 22.01.2024 окончательная оплата выполненных работ по договору в размере 2 335 748,46 руб. должна быть произведена Генеральным подрядчиком в срок до 02.04.2024 включительно, в связи с чем истцом начислена неустойка за период с 03.04.2024 по 04.04.2024.

Претензионные требования истца остались без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик), обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить ее.

Из материалов дела следует, что истец принял надлежащие меры по сдаче ответчику выполненных для него работ, замечаний и возражений относительно объема и качества выполнения работ ответчиком заявлено не было, в связи с чем, работы считаются принятыми ответчиком. Доказательств того, что работы были выполнены не в полном объеме либо ненадлежащего качества, в материалы дела не представлено.

Ответчиком не представлено доказательств оплаты задолженности за выполненные работы по Договору № 3-П-ТИВ от 23.06.2022 (Дополнительное соглашение №1 от 03.08.2022 - 125 140,51 руб., Дополнительное соглашение №2 от 26.09.2022 - 28 779,56 руб., Дополнительное соглашение №3 от 13.06.2023 -213 266,16 руб.), задолженности за выполненные работы по Договору № 5-П-ЦСМ от 23.06.2022 (Дополнительное соглашение №1 от 04.07.2022 - 151 817,71 руб., Дополнительное соглашение №2 от 25.07.2022 - 23 535,97 руб., Дополнительное соглашение №3 от 25.07.2022 - 73 630,18 руб., Дополнительное соглашение №4 от 16.08.2022 -153 088,37 руб., Дополнительное соглашение №5 от 16.08.2022 - 7 090,29 руб.), задолженности за выполненные работы по Договору № 17-П-БМЗ от 14.12.2022 (Дополнительное соглашение №1 от 14.12.2022 - 8 393 232,50 руб.), задолженности за выполненные работы по Договору № 32-П-ТВЗ от 16.06.2022 (Дополнительное соглашение №1 от 16.06.2022 - 2 940 337,11 руб., Дополнительное соглашение №2 от 29.06.2022 - 930 996,42 руб., Дополнительное соглашение №3 от 03.08.2022 - 214 982,15 руб., Дополнительное соглашение №4 от 03.08.2022 - 266 590,66 руб., Дополнительное соглашение №5 от 16.08.2022 - 195 605,26 руб., Дополнительное соглашение №6 от 12.09.2022 - 118 706,87 руб., Дополнительное соглашение №7 от 30.09.2022 - 375 792,95 руб., Дополнительное соглашение №8 от 03.11.2022 - 1 587 981,16 руб., Дополнительное соглашение №9 от 17.11.2022 - 762 517,58 руб., Дополнительное соглашение №10 от 12.01.2023 - 125 223,96 руб., Дополнительное соглашение №11 от 03.04.2023 - 2 482 453,53 руб., Дополнительное соглашение №12 от 08.08.2023 - 2 335 748,46 руб.). 

Таким образом, наличие платежного обязательства на общую сумму 21 506 517,36 руб. ответчиком документально не опровергнуто.

Также в соответствии с п.9.13.1 Договоров Подрядчик вправе взыскать с Генерального подрядчика за нарушение Генеральным подрядчиком сроков оплаты за выполненные и принятые работы - неустойку в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности. 

С учетом договорного ограничения, подлежащая взысканию неустойка (пени) составила 2 150 651,74руб.

Доказательств погашения задолженности в добровольном порядке ответчик не представил, доводы истца о нарушении сроков оплаты за выполненные истцом работы документально не опроверг.

Поскольку требование истца об уплате основного долга, ответчиком добровольно не удовлетворено, задолженность в размере в размере 21 506 517,36руб., пени в размере 2 150 651,74руб. подлежат присуждению ко взысканию с него на основании ст.ст. 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ в судебном порядке.

Наличие оснований для применения по ходатайству генподрядчика ст. 333 ГК РФ судами не установлено.

В суде первой инстанции генподрядчик в отзыве на иск (т. 3 л.д. 76-77) заявил о том, что он письмом исх. от 28.03.2025г. № 548-1, направленным подрядчику почтовой связью РПО от 24.04.2025г. № 10714007560784, уведомил подрядчика о зачете в порядке ст. 410 ГК РФ права требования подрядчика, заявленного в иске по настоящему делу (об оплате стоимости выполненной работы), против права требования генподрядчика об уплате штрафа по п. 9.7.4. Договора подряда от 16.06.2022г. № 32-П-ТВЗ в размере 19 667 726,98руб. по ставке 15% от общей стоимости работ за нарушение п. 1.3. Договора, выразившееся в привлечении третьих лиц (подрядных, субподрядных организаций) без письменного согласия генподрядчика (расчет – т. 3 л.д. 76- оборот).

Суд первой инстанции посчитал, что поскольку по сведениям сайта Почты России РПО от 24.04.2025г. № 10714007560784 по состоянию на дату судебного заседания 06.05.2025г. не было вручено адресату (подрядчику), то заявление о зачете не повлекло соответствующих ему правовых последствий.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что поскольку письмо исх. от 28.03.2025г. № 548-1 было приложено к отзыву на иск, поступившему в суд 30.04.2025г., то на дату судебного заседания 06.05.2025г. уведомление о зачете уже считалось доставленным подрядчику (подрядчик узнал о наличии данного заявления и о его содержании из материалов дела).

Соответственно, предъявленное к зачету требование подлежало исследованию судом по существу.

Суд апелляционной инстанции, исследовав предъявленное к зачету требование, пришел к выводу о том, что к зачету было предъявлено несуществующее право, в связи с чем заявление о зачете не повлекло прекращения права требования подрядчика, заявленного в настоящем деле.

П. 1.3. Договора подряда от 16.06.2022г. № 32-П-ТВЗ (т. 1 л.д. 106) предусмотрено, что подрядчик в исключительных случаях, в соответствии с письменным согласием генподрядчика, вправе заключать договоры с третьими лицами (подрядными/ субподрядными организациями).

П. 9.7.4. Договора предусмотрено применение к подрядчику штрафа за привлечение третьих лиц (подрядных, субподрядных организаций) без письменного согласия генподрядчика в нарушение п. 1.3. Договора в размере 15% от общей стоимости работ по соответствующему Дополнительному соглашению, при исполнении которого подрядчик привлек третье лицо.

Генподрядчик указывает, что подрядчик без письменного согласия генподрядчика привлек субподрядчиков, а именно:

- работу по Дополнительному соглашению от 03.11.2022г. № 8 выполняли сотрудники ООО «Астахов Компани» (ФИО6, ФИО7);

- работу по Дополнительному соглашению от 03.11.2022г. № 8 выполняли сотрудники ООО «Строй Системы» (ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16);

- работу по Дополнительному соглашению от 16.08.2022г. № 5 и по Дополнительному соглашению от 03.11.2022г. № 8 выполняли сотрудники ИП ФИО17 (Бородавко Д.Н., ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21);

- работу по Дополнительному соглашению от 03.11.2022г. № 8 выполняли сотрудники ИП ФИО22 (ФИО23, ФИО24, ФИО25).

Исходя из стоимости работ по Дополнительному соглашению от 16.08.2022г. № 5 равной 3 928 850,50руб. и стоимости работ по Дополнительному соглашению от 03.11.2022г. № 8 равной 31 797 332,34руб. генподрядчик начислил подрядчику штраф в размере 19 667 726,98руб. из расчета: (31 797 332,34руб. + 31 797 332,34руб. + 3 928 850,50руб. + 31 797 332,34руб. + 31 797 332,34руб.) х 15% = 19 667 726,98руб.

В подтверждение довода о том, что подрядчик без письменного согласия генподрядчика привлек к выполнению работы субподрядчиков, генподрядчик ссылается на свое письмо исх. от 24.01.2023г. № 6-СБ (т. 4 л.д. 74-75), адресованное подрядчику, с требованием предоставить сведения по лицам (ФИО перечислены), которым оформлены пропуска на строительную площадку, но которые не отражены в форме СЭВ-М в качестве застрахованных лиц, и ответ подрядчика, выраженный в письме исх. от 27.01.2023г. № Ат-017 (т. 3 л.д. 78), согласно которому лица, перечисленные в письме исх. от 24.01.2023г. № 6-СБ, являются трудовым ресурсом субподрядчиков ООО «Астахов Компани», ООО «Строй Системы», ИП ФИО17, ИП ФИО22, привлеченных ООО «Атлант» в рамках выполнения работ по Договору подряда от 16.06.2022г. № 32-П-ТВЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 706 ГК РФ подрядчик, который привлек к исполнению договора субподрядчика в нарушение положений п. 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

Между тем в настоящем деле генподрядчиком не представлено доказательств причинения ему убытков вследствие привлечения подрядчиком к выполнению работы субподрядчиков.

При этом выполнение подрядчиком работы по Договору подряда от 16.06.2022г. № 32-П-ТВЗ завершено, предъявлены требования об оплате стоимости выполненной работы.

При таких обстоятельствах применение к подрядчику штрафа по п. 9.7.4. Договора подряда от 16.06.2022г. № 32-П-ТВЗ не имеет своей целью способствовать соблюдению подрядчиком условий п. 1.3. Договора, т.е. стимулирующая функция штрафа утрачена.

В период выполнения подрядчиком работы по Договору подряда от 16.06.2022г. № 32-П-ТВЗ контроль за допуском всех лиц на строительную площадку осуществлял генподрядчик, который фактически допустил работников субподрядчиков, привлеченных подрядчиком, на строительную площадку, оформив им пропуска, о чем говорится в письме генподрядчика исх. от 24.01.2023г. № 6-СБ (т. 4 л.д. 74-75).

Совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о том, что в период выполнения подрядчиком работы по Договору подряда от 16.06.2022г. № 32-П-ТВЗ генподрядчик знал или должен был знать о том, что подрядчик привлек субподрядчиков, но по данным фактам не предъявлял подрядчику ни требований об устранении нарушения п. 1.3. Договора, ни требований об уплате штрафа по п. 9.7.4. Договора, и тем самым способствовал дальнейшему нарушению подрядчиком п. 1.3. Договора и увеличению количества фактов нарушения п. 1.3. Договора, и, соответственно, увеличению совокупного размера штрафа, требование об уплате которого было предъявлено как способ обогатиться посредством уклонения от оплаты стоимости выполненной работы, получив имущественное предоставление, не предоставить встречного предоставления.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что генподрядчик злоупотребил своим правом, предусмотренным п. 9.7.4. Договора, в связи с чем данное право в силу ст. 10 ГК РФ не подлежит судебной защите.

Соответственно, к зачету было предъявлено несуществующее право требования, в связи с чем оно не повлекло уменьшения стоимости подлежащих оплате работ.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы генподрядчика.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.05.2025г. по делу № А40-67312/2025 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судьяКузнецова Е.Е.

Гузеева О.С.

Семикина О.Н.