АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 Дело № А28-2991/2024 

27 сентября 2024 года  

Резолютивная часть решения объявлена 24 сентября 2024 года  В полном объеме решение изготовлено 27 сентября 2024 года  

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Кулдышева О.Л.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Захарищевой Н.А.,  

рассмотрев материалы дела по исковому заявлению министерства лесного хозяйства Кировской области (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 1074345003963, адрес: 610020, Россия, 

<

...> д.32) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610013, Россия, 

<

...>)  

о взыскании 848 384 рублей 00 копеек при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – ФИО1 по доверенности от 09.01.2024,  от ответчика – ФИО2 по доверенности от 04.07.2022  

установил:

министерство лесного хозяйства Кировской области (далее – истец,  Министерство) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с  ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат» (далее – ответчик,  Общество, ООО «ВФК») о взыскании задолженности по арендной плате и пени в  общей сумме 848384 рублей 00 копеек.  

Ответчик исковые требования не признал, заявил об отсутствии оснований  для применения неустойки, а также заявил о несоразмерности размера неустойки и  ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ, уменьшении размера неустойки.  

Из материалов дела судом установлены следующие фактические  обстоятельства.  

11 февраля 2021 года заключен договор аренды лесного участка для заготовки  древесины № 24-17, между министерством лесного хозяйства Кировской области и  обществом с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат» (далее  Общество) на основании постановления Правительства Российской Федерации от  23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения  лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов  Правительства Российской Федерации», приказа Министерства промышленности и  торговли Российской Федерации от 11.12.2017 № 4313 «О включении  инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в  

области освоения лесов», распоряжения Правительства Кировской области от  28.09.2017 № 5 «Об утверждении заявки ООО «Вятский фанерный комбинат» на  реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов  «Увеличение мощности Вятского фанерного комбината по производству фанеры на  26 тыс.куб. м в год», распоряжения министерства лесного хозяйства Кировской  области от 30.12.2019 № 1390 «О предоставлении лесных участков в аренду».  

Договор зарегистрирован Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области  09.04.2021 года.  

Согласно пункту 1.2 договора аренды арендатору предоставлен во временное  владение и пользование лесной участок общей площадью 13736,0059 га со  следующим местоположением:  

лесной участок № 1: Кировская область, Верхнекамский район, Рудниковское  лесничество, Рудниковское участковое лесничество кварталы 102-104,115-118,128131,139-143,145,146; Заводское участковое лесничество кварталы  133,134,141,145,153-156 с кадастровым номером 43:05:310410:183, учетной записью  в государственном лесном реестре № 24.7-2008-05;  

лесной участок № 2: Кировская область, Верхнекамский район, Рудниковское  лесничество, Рудниковское участковое лесничество кварталы 97,98,100,119,122124,157ч (лесотаксационные выделы №№ 1ч, 2-53),161,163,167 с кадастровым  номером 43:05:000000:482, учетной записью в государственном лесном реестре №  24.29-2011-07.  

Общество разработало проект освоения лесов. Положительное заключение  государственной экспертизы по данному проекту утверждено распоряжением  министерства от 03.12.2021 № 673.  

Согласно подпункту «к» пункта 3.4 договора аренды арендатор обязан  осуществлять меры по предупреждению лесных пожаров в соответствии с  законодательством Российской Федерации, проектом освоения лесов и приложением   № 7 к настоящему договору.  

На основании пунктов 5.1 и 5.2 договора аренды, в связи с существенным  изменением количественных и качественных характеристик лесного участка по  результатам проведенной таксации лесов внесены изменения в договор аренды,  путем заключения между министерством и ООО «ВФК» дополнительного  соглашения от 14.12.2023 № 2.  

Указанным дополнительным соглашением от 14.12.2023 № 2 внесены  изменения в объемы и сроки исполнения работ по обеспечению пожарной и  санитарной безопасности на арендуемых лесных участках, при этом приложение №  7 к договору аренды изложено в новой редакции согласно приложению № 5 к  настоящему дополнительному соглашению.  

Согласно пункту 9 дополнительного соглашения, соглашение вступает в силу  с даты его государственной регистрации и применяется к условиям договора аренды  с 01.01.2023.  

Согласно приложению № 5 к дополнительному соглашению № 2, арендатор  обязан выполнить следующие виды работ – «прокладка квартальных просек длиной  1,9км

<

...>, ежегодно», -«эксплуатация лесных дорог 27,6км, 2-3 кварталы,  ежегодно, предназначенных для охраны лесов от пожаров».  

Указанные виды работ в соответствии с приложением 5 к дополнительному  соглашению № 2 договора аренды, относятся к работам по обеспечению пожарной и  санитарной безопасности на арендуемых лесных участках.  

В нарушение условий договора аренды арендатором в 2023 году по состоянию  на 01.01.2024 не выполнены следующие мероприятия: - эксплуатация лесных дорог,  предназначенных для охраны лесов, в объеме 6,3км, 2-3 квартал ежегодно, - прокладка квартальных просек длиной 1,9км, 2-3 квартал ежегодно.  

Не выполнение указанных работ ответчиком подтверждается актом сверки  выполненных работ с 01.01.2023 по 31.12.2023.  

Ответчик не оспаривает невыполнение указанного объема работ, при этом  указал, что итоговые объемы работ по эксплуатации дорог стали известны Обществу  только после внесения изменений в договор аренды по дополнительному  соглашению в декабре 2023года. Прокладка квартальных просек не относится к  противопожарным мероприятиям, поскольку целью ее устройства является  обозначение границ лесных кварталов, поэтому применение неустойки в данном  случае неправомерно.  

Кроме того, ответчик заявил о несоразмерности заявленной суммы неустойки  допущенному нарушению, заявил ходатайство об уменьшении неустойки в  соответствии со статьей 333 ГК РФ.  

Заслушав доводы сторон, оценив представленные доказательства, суд  приходит к следующим выводам.  

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по  тексту – ГК РФ) одним из оснований возникновения гражданских прав и  обязанностей является договор.  

Статьей 94 Лесного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЛК РФ)  предусмотрено, что использование лесов в Российской Федерации является  платным.  

В соответствии со статьями 606, 607 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее по тексту – ГК РФ) по договору аренды арендодатель обязуется  предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование,  в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные  природные объекты.  

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускается.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ, исполнение  обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи,  должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным  платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом,  пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую  должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Согласно пункту 4.1 договора аренды от 11.02.2021 № 24-17, за неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим  договором, арендодатель и арендатор несут ответственность согласно  законодательству Российской Федерации (включая обязанность возместить в  

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации убытки,  причиненные таким исполнением или ненадлежащим исполнением) и настоящему  договору.  

Подпунктом «о» пункта 4.2 договора аренды предусмотрено, что за  нарушение условий настоящего договора арендатор уплачивает арендодателю  неустойку в следующем размере: невыполнение или несвоевременное выполнение  противопожарных мероприятий – 3-кратная стоимость затрат, необходимых для  выполнения этих мероприятий по нормативам в области лесного хозяйства,  предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством  субъектов Российской Федерации, а при отсутствии таких нормативов – согласно  калькуляции арендодателя.  

Приказом министерства от 24.07.2020 № 129 утверждены нормативы затрат  для исчисления размера ущерба Причиненного лесам вследствие нарушения лесного  законодательства и нормативы затрат для исчисления неустойки за нарушением  условий договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных  насаждений.  

Расчет истца о размере неустойки проверен судом и признается  обоснованным.  

Арифметический расчет размера неустойки ответчиком не оспаривается. 

В целях урегулирования спора в досудебном порядке лесным отделом  Рудниковского лесничества министерства направлена арендатору претензия от  08.02.2024 № 15, претензия получена ООО «ВФК» 13.02.2024, ответ на претензию  не поступил и в добровольном порядке неустойка не оплачена.  

Согласно пункту 3 приказа Федерального агентства лесного хозяйства от  28.12.2018 № 1079 «Об администрировании органами государственной власти  субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия  Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального  бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов» (далее –  приказ Рослесхоза от 28.12.2018 № 1079) утвержден перечень источников доходов  бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, закрепляемых за  органами государственной власти субъектов Российской Федерации,  осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных  отношений.  

В силу вышеуказанных актов, неустойка за нарушение условий договора  аренды подлежит взысканию в бюджет Кировской области.  

Как следует из материалов дела и пояснений сторон, ответчик не оспаривает  невыполнение работ по эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны  лесов от пожаров в размере 6,3 км, а также работ по прокладке квартальных просек в  объеме 1,9 км за 2023год.  

Доводы ответчик о том, что работы по прокладке квартальных просек не  относятся к работам по обеспечению пожарной и санитарной безопасности на  арендуемых лесных участках, судом проверены и признаются необоснованными,  поскольку противоречат подписанному самим Обществом приложению № 5 к  дополнительному соглашению № 2 к договору аренды от 11.02.2021.  

Указанным приложением выполнение работ по прокладке квартальных  просек относится к работам по обеспечению пожарной и санитарной безопасности  на арендуемых лесных участках.  

Ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки в соответствии со  статьей 333 ГК РФ судом рассмотрено и признается обоснованным, по следующим  основаниям.  

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка  явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить  неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии  заявления должника о таком уменьшении.  

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате  лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в  исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в  предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором  необоснованной выгоды.  

Как установлено из материалов дела, размер неустойки за невыполнение  работ по эксплуатации лесных дорог длиной 6,3 км составил 634 526рублей 51  копеек по расчету истца.  

При этом из материалов дела следует, что Обществом при среднегодовом  объеме указанных работ 27,6 км было выполнено 21,3 км.  

Точный объем работ по эксплуатации лесных дорог не был установлен в  течение 2023года до декабря 2023года в связи с внесением изменений в договор  аренды путем заключения дополнительного соглашения от 14.12.2023, при  подписании которого и было установлено окончательное значение объема  указанных работ.  

Кроме того, как следует из пояснений сторон и материалов дела, истцом не  представлено доводов и доказательств того, что Общество систематически  допускает существенные нарушения условий договора аренды, что свидетельствует  об однократном, разовом нарушении условий договора, не повлекших каких-либо  неблагоприятных последствий.  

При данных обстоятельствах, суд признает ходатайство ответчика об  уменьшении размера неустойки обоснованным и уменьшает данный размер до  100 000рублей 00копеек.  

Суд удовлетворяет исковые требования министерства частично на сумму  100 000рублей 00копеек.  

В остальной части, суд признает заявленные требования не подлежащими  удовлетворению в связи с применением статьи 333 ГК РФ.  

На основании статьи 110 АПК РФ государственная пошлина по делу  подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально  размеру удовлетворенных требований в размере 2354рублей 00копеек.  

Руководствуясь статьями 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить частично и взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 610013, Россия, 

<

...>; почтовый адрес: 610035, Россия, ул.  Воровского, д.107, пом.39) в пользу министерства лесного хозяйства Кировской  

области в бюджет Кировской области неустойку за нарушение условий договора  аренды лесного участка для заготовки древесины от 11.02.2021 № 24-17 в сумме 100  000рублей 00копеек, уменьшив размер неустойки в соответствии со статьей 333 ГК  РФ.  

В остальной части - отказать министерству лесного хозяйства Кировской  области в удовлетворении требований.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный  комбинат» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 610013,  Россия, 

<

...>;  почтовый адрес: 610035, Россия, ул. Воровского, д.107, пом.39) в федеральный  бюджет государственную пошлину в размере 2354рублей 00копеек.  

Исполнительные листы подлежат выдаче в порядке, предусмотренном  главой VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд  в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа  в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со  статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.  

Судья О.Л. Кулдышев