Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-2328/2017

г. Хабаровск

06 февраля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 30.01.2020 г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Дюковой СИ.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома Восточный» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 107996, 

<

...>) к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно - строительное управление №6» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>)

третьи  лица,  не  заявляющее  самостоятельных  требований   относительно предмета спора, Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», Акционерное общество «Ланит-Партнер» 

о взыскании 5 298 486 093 руб. 87 коп., об обязании передать документацию

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2 по доверенности №3 от 09.01.2020 г.

от ответчика – ФИО3 по доверенности №4/1 от 01.01.2020 г., ФИО4 №4/48 от 13.01.2020 г.;

от третьих лиц: 

от Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» – ФИО5 по доверенности №263/18 от 06.12.2018 г. (до перерыва);

от АО «Ланит-Партнер» – не явились, извещены надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Федеральное казенное учреждение «Дирекция космодрома Восточный» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» о расторжении государственного контракта № 873-КИ106 /12 от 03.07.2012 г., взыскании неиспользованных авансовых платежей  по государственному контракту  № 873-КИ106 /12 от 03.07.2012 г. в сумме 6 435 760 446 руб. 11 коп., об обязании передать незавершенный строительством объект и освободить строительную площадку, об обязании передать документацию и материалы. 

Определением суда от 09.01.2017 г. исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу № А73-17731/2016, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».

Определением суда от 31.01.2017 г. привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Акционерное общество «Ланит-Партнер».

Представитель истца в предварительном судебном заседании в материалы дела представил ходатайство,  указав на допущенную опечатку в исковом заявлении, пояснил, что требование  об обязании передать материалы истцом не заявлялось.

В предварительном судебном заседании по делу №  А73-17731/2016 в связи с  заключением между  истцом  и ответчиком  мирового соглашения в части заявленных исковых требований о расторжении контракта № 873-КИ106 /12 от 03.07.2012 г., об обязании передать незавершенный строительством объект и освободить строительную площадку, суд, руководствуясь частью 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  выделил  в отдельное производство исковые требования Федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома Восточный» к  Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» о взыскании неиспользованных авансовых платежей  по государственному контракту  № 873-КИ106 /12 от 03.07.2012 г. в сумме 6 435 760 446 руб. 11 коп., и об обязании передать документацию, с присвоением делу А73-2328/2017.

В судебном заседании 31.05.2017 г. по делу А73-2328/2017 судом рассмотрено и удовлетворено  ходатайство Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»  об изменении наименования ответчика  на Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно - строительное управление №6».

Определением суда от 07.06.2017 г. по  делу А73-2328/2017 назначена комиссионная судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено Федеральному бюджетному учреждению Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, экспертам ФИО6, ФИО7 и экспертам ООО «Экспертно-юридический центр «Русгарант» ФИО8, ФИО9, ФИО10.  Производство по делу А73-2328/2017 приостановлено.

Определением суда от 23.01.2018 г. к проведению  экспертизы  привлечен эксперт Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации ФИО11.

18.04.2019 г. в арбитражный суд возвращены материалы дела с  заключением экспертов Федерального  бюджетного  учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Определением суда от 23.04.2019 г. производство по делу возобновлено.

Представителем истца в судебном заседании 29.10.2019 г. и в настоящем судебном   заседании в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнялись  исковые требования, в результате уточнений представитель истца указал, что просит взыскать с ответчика сумму неиспользованных авансовых платежей в размере 5 298 486 093 руб. 87 коп., обязать ответчика в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу передать следующие документы:

1) перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ, с указанием контрактов, видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии у этих организаций свидетельств СРО в 1 экз. на бумажном носителе;

2)копии приказов по закреплению должностных лиц ответственными запроизводство инженерно-технических работ в 1 экз. на бумажном носителе;

3)  заверенные копии свидетельств СРО в 1 экз. на бумажном носителе;

4) комплект оригиналов рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, выполненным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ в 1 экз. на бумажном носителе;

5)исполнительную документацию в составе, установленном требованиямистроительных норм и правил на соответствующие здания, сооружения иконструкции, на исполнительную геодезическую документацию, а такжеусловиями контракта в 1 экз. на бумажном носителе;

6)оригиналы исполнительных схем, сформированных в установленном порядкепо всем инженерным системам в 1 экз. на бумажном носителе;

7)оригиналы сертификатов, технических паспортов и других документов,удостоверяющих качество и свойства материалов, конструкций и изделий,примененных при производстве работ в 1 экз. на бумажном носителе, заисключением следующих объектов:

ГП-1 Стартовое сооружение:

Блок А: Конструкция фундаментной плиты (СП2.1); Конструкция плиты перекрытия 3 этажа (СП2.12); Конструкция плиты перекрытия 2 этажа (СП2.16);

Блок Б: Конструкция фундаментной плиты (СП2.2); Конструкция плиты перекрытия 6 этажа (СП2.4); Конструкция стен 5 этажа и стен с отм.-23,200 до отм.-16,000 (СП2.5);

Инженерные системы:

Система В1;

Система К1Н;

Система К14Н;

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Планы расположения электрооборудования. Заземление. Журнал кабельный.";

ЭМЗ "Электрическое освещение";

ЭМ5 "Система ИДК"; 

ЭС "Электроснабжение";

ГП-2 Укрытие для обслуживающего персонала:

Конструкция плиты покрытия в осях 1-2/А-В до отм.-4,900; до отм.-6,900, отм.-7,100; (СПЗ.З) ;

Инженерные системы:

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 

СВ1 "Система сжатого воздуха сооружения 2"; 

ГП-3 Командный пункт:

Конструкция приямков плиты подвала в осях 1/А до отм.-3,000;

Конструкция стен приямка на отметке -1,400 в осях 1/А;

Конструкция фундаментной плиты в осях 1-10/А-Б до отм.-0,800; Конструкция стен подвала в осях 1-4/Б на отм.-1,400;

Конструкция стен подвала в осях 7-10/А до отм.-1,400; (СП3.1);

Конструкция стен первого этажа и пилонов в осях 1-10/А-Б;

(СП3.2)

Конструкция стен второго этажа и пилонов в осях 1-10/А-Б; (СП3.4); Конструкция перекрытия второго этажа в осях 1-10/А-Б; (СП3.5); 

Конструкция плиты покрытия СП3.7;

Конструкция фундамента под антенну СНИУБСИ в осях 6/Б;

Конструкция фундамента под антенну имитатора в осях 1-2/Б;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Электрическое освещение";

ЭМ4 "Система гарантированного электропитания";

ЭМ5 "Журнал кабельный";

ЭС "Электроснабжение";

Система КЗ; 

Система К14;

12. ОВ1 "Отопление";

13. ОВ2 "Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха;

Система П1.1.

Система В 1.2.

Система П2.1.

Система В2.2.

Система П3.1.

Система В3.2.

Система П4.1.

Система В4.2.

Система П1.3.

Система В1.4.

Система В1.5.

Система П2.3.

Система В 2.4.

Система П2.5

Система В2.8.

Система В 2.6

Система В3.3.

Система В 4.3.

ПА2.9. 

ПА4.4.

ВД4.2 

ПД1. 

ПД2. 

ВГ, ВГ2.

СВ1 "Система сжатого воздуха сооружения 3";

ХС. Холодоснабжение;

ПТЗ. Система газового пожаротушения;

ГП-4 Технологический блок кислорода и азота:

Фундаменты Фм1-Фм17, Фо1-Фо2; (КЖ1.2);

Приливы П1-П8, фундаментная балка ФБм; (КЖ1.3);

Конструкция приямка между осями А-В/10-11 (КЖ 1.6);

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Электрическое освещение";

ЭС "Электроснабжение";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система В14;

Система ТЗ;

Система К1,К1Н;

Система К2;

Система К14;

Система К13;

Система К16;

ОВ1 "Отопление";

ОВ2 "Вентиляция и кондиционирование"; 

Система П1;

Система В2; 

Система ВАЗ, ПАЕЗ; 

Система П4; 

Система В5;

Система П6; 

Система В7;

Система ПА8; 

Система В9; 

Система В10; 

Система В11; 

Система ВД1.ВД2; 

Система ПДЕ1,ПДЕ2; 

Система ЭПУ 114.1, ЭПУ 114,2; 

УУТ "Узел учета тепла";

ГП-5 Технологический блок керосина и нафтила:

"Фундаменты монолитные Фм1- Фм10; Флм1-Флм4; Плита фундаментная

Пм 1 ,Пм2; Фундаменты монолитные Фм 1 -1,

Фм11-Фм13;(КЖ1.2)";

Фундаменты под оборудование Фо1-Фо7 (КЖ1.4);

Конструкция приямка в осях 7-8/А-Е (КЖ 1.6);

Конструкция приямка в осях 13-14/А-Ц (КЖ 1.7);

Колонны 1 этажа в осях 1-4 на отм.-0,100 (КЖ2.1);

Стены 1 этажа в осях 1-4 на отм.-0,100 (КЖ2.1);

Стены 1 этажа в осях 4-11 на отм.-0,100 (КЖ2.1);

Стены 2 этажа в осях 1-4 на отм.+3,520 (КЖ2.1);

Колонны 2 этажа в осях 1-4 на отм.+3,520 (КЖ2.1);

Стены 2 этажа в осях 4-11 на отм.+3,520 (КЖ2.1);

Плита перекрытия ППм1,ППм2,ППмЗ,ППм4,ППм5,ППм6 (КЖ2.2);

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Электрическое освещение";

ЭС "Электроснабжение";

АК "Автоматизация комплексная";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В2;

Система В1;

Система ТЗ, Т4;

Система ВЗ;

Система К1;

Система КЗ,К14Н;

Система К2;

ОВ1 "Отопление";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В2; 

Система В1; 

Система ТЗ, Т4; 

Система ВЗ;

Система Kl; 

Система КЗ, К14Н; 

Система К2;

0В1 "Отопление";

0В2 "Вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система П2; 

Система П3; 

Система П4; 

Система П5; 

Система В7; 

Система В6; 

Система В 9; 

Система В10; 

Система В11; 

Система В12; 

Система В13; 

Система В14;

Система ВД1; 

Система ВД2; 

Система ПДЕ1; 

Система ПДЕ2; 

Система ВГ1;

Система ВГ2;

ГП-6 Технологический блок сжатых газов:

Фундаменты монолитные Фм1-Фм23 (КЖ1.2);

Фундаментные ленты монолитные ФЛм1- ФЛмЗ (КЖ1.2);

Фундаментные балки монолитные ФБм1-ФБм14 (КЖ1.3);

Фундаменты под оборудование Фо1-Фо6 (КЖ1.4);

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Электрическое освещение";

ЭС "Электроснабжение";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В2;

Система К2;

ОВ2 "Вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система В2;

Система П3;

Система В4;

Система П5; 

Система В6; 

Система П7; 

Система В8; 

Система П9; 

Система В10; 

Система В11; 

Система В12;

Система ЭПУ 126.1, ЭПУ 126.2;

Система ВД1;

Система ВД2;

Система ВГ1;

Система ПДЕ1;

Система ПДЕ2;

ГП-7 Насосная станция технологического пожаротушения:

Конструкция фундаментной плиты СП3.1;

Конструкция плиты покрытия СП3.1;

Конструкция входов СП3.1;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭС "Электроснабжение";

АК "Автоматизация комплексная";

ОВ1 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система В2;

Система П3.1, ПЗ.2;

Система В4.1, В4.2;

Система П5;

Система В6;

Система П7.1, П7.2;

Система В8;

Система В9;

ГП-8 Укрытие для обслуживающего персонала:

Конструкция фундаментной плиты СП3.1;

Конструкция покрытия СП3.3;

Конструкции входов СП3.4;

Инженерные системы:

ЭМ «Силовое электрооборудование»;

ОВ «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СВ1 "Система сжатого воздуха сооружения 8";

ГП-10 Холодильный центр:

Фундаменты Фм1-1, Фм2-1, Фм2-2, ФМ3-1, Фм3-2, Фм4-1, Фм4-2, Фм5, Фм6,

Фм7-1, Фм7-2, Фм8-1, Фм8-2, Фм8-3, Фм9, Фм10-1, Фм10-2, Фм10-3, Фм11,

Фм12-1, Фм12-2, Фм13, Фм14;

Монолитные плиты Пм1, Пм2 в осях А-Б/2-5 и 7-8;

Фундаменты под оборудование Фо1, Фо2, Фо3, Фо4, Фо5 в осях А-Б/2-5;

Фундаментная плита приямков Прм1; Прм2, Пр1, Пр2;

Стены приямков Прм1, Прм2, Пр1, Пр2;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭС "Электроснабжение";

АК "Автоматизация комплексная";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система ТЗ;

Система К1;

Система К2;

Система К14Н;

ОВ "Отопление и вентиляция";

ГП-12 Насосная станция оборотного водоснабжения с резервуарами и градирнями:

Фундамент ленточный Фл1, Фл2, КЖ1;

Плита днища монолитная Пм 1 КЖ2;

Стены монолитные Стм1. Колонны К1 КЖ2;

Плита покрытия монолитная Пм2 КЖ2;

Парапет монолитный Пр1 КЖ2;

Плита монолитная ПмЗ;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

АК "Автоматизация комплексная";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система В4,В5;

Система ТЗ;

Система К1, К14, К14Н, К16;

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система В1-В3;

Система ВЕ1-ВЕ5;

ГП-14 Административно-служебное здание:

Фундаментная лента Флм1 в осях 1/8-Г/Ж КЖ1.2; 

Фундаментная лента Флм1 в осях 9/20-ГУЖ КЖ1.2;

Приямок Пр1, Пр2 КЖ1.3; 

Плита перекрытия ППм1 КЖ1.3;

Плиты перекрытия Пм1, Пм2 КЖ1.3; 

Стены Стм1 между осями 1-8/Г-Ж КЖ2.1; 

Стены Стм1 между осями 9-20/Г-Л КЖ2.1; 

Стены Стм3 между осями 1-8/Г-Ж КЖ2.1; 

Стены Стм3 между осями 9-20/Г-Л КЖ2.1; 

Стены Стм4 между осями 5-6/Е-Ж, 9-17/Д-Ж КЖ2.1; 

Парапет Пр1 КЖ2.1;

Плита перекрытия на отм.+3,280 КЖ2.2.1;

Плита покрытия на отм.+3,350 КЖ2.2.1;

Плита покрытия на отм.+6,880 КЖ2.2.2;

Плита покрытия на отм.+10,480 КЖ2.2.3;

Плита покрытия на отм.+14,900 КЖ2.2.4;

Плита покрытия на отм.+13,620 между осями 5, 6 КЖ2.2.4;

Плита покрытия на отм.+13,620 между осями 16,17 КЖ2.2.4;

Плита покрытия на отм.+14,080 КЖ2.2.4;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Электроосвещение";

ЭМ2 "Силовое электрооборудование";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система ТЗ;

Система К2;

Система К1, К1Н;

ОВ2 "Вентиляция";

Система П1;

Система В2;

Система П3;

Система В4;

Система П5;

Система В6;

Система П7;

Система В8;

Система П9;

Система В10;

Система П11;

Система В12;

Система П13;

Система В14;

Система В15;

Система П16; 

Система B l7; 

Система В18; 

Система В19; 

Система МО1; 

Система МО2; 

Система МОЗ;

 Система ВД1;

 Система ВД2;

ГП-15 Караульное помещение с гаражом на 1 автомобиль:

Стены монолитные на отм-0,700; -0,120;

Плита покрытия ППм 1 КЖ2;

Стены монолитные Стм1,Стм2,СтмЗ КЖ4;

Крыльцо КрЗ КЖ4;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система ТЗ;

Система К2;

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; 

Система П1; 

Система В2; 

Система В4; 

Система В5;

ГП-16 Контрольно-пропускной пункт:

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ГП-17 Центральный распределительный пункт:

Фундаментная плита тоннеля на отм.(-5,350, -4,800) в осях 1/Б-В;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭС1 "Конструктивные чертежи";

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система В2;

ГП-18 Хранилище ЗИП:

Крыльцо Kpl;

Фундамент монолитный Фм1 в осях 1-4/А-Б с отм. -3,400 м до отм. -1,700 м; Конструкция плиты основания;

Фрагмент 1 Участок 1 Т16-ГП1;

Фрагмент 1 Участок 2 Т16-Т17;

Фрагмент 1 Участок 3 Т16-ГП5;

Фрагмент 1 Участок 4 Т12-ГП5;

Фрагмент 1 Участок 5 Tl1-Т12;

Фрагмент 1 Участок 6 Т11-ГП4;

Фрагмент 1 Участок 7 Т14-ГП4;

Фрагмент 1 Участок 8 Т15-Т14-Т11;

Фрагмент 1 Участок 9 Т15-ГП1;

Фрагмент 1 Участок 10 Т12-ГП1;

Фрагмент 2 Участок 1 Т10-Т11;

Фрагмент 2 Участок 2 Т9-Т10;

Фрагмент 2 Участок 3 Т8-Т9-ГП17;

Фрагмент 2 Участок 4 Т8-ГП6;

Фрагмент 2 Участок 5 Т10-Т13-ГП7-ГП10;

Фрагмент 2 Участок 6 Т12-Т13;

Фрагмент 2 Участок 7 Т13-ГП12;

Инженерные системы:

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

Система В1;

Система В2;

Система ВЗ;

Система В4;

Система В5.1,В5.2;

Система В6;

Система П7;

Система П8;

Система ВГТ1;

Система ВЕ1-ВЕ9;

ЭС "Электроснабжение";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система В2;

Система ТЗ;

Система К1, К16;

Система К2;

Система К13,17;

ОВ "Отопление и вентиляция";

Система П1;

Система В1-ВЗ;

Система BE 1-ВЕ6;

ЭМ "Силовое электрооборудование";

ЭМ1 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т1 и прилегающих туннелей";

ЭМ2 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т2, прилегающих тоннелей, ВкЗ, Вк4 и Вк7";

ЭМЗ "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т3 и прилегающих туннелей, Вк2";

ЭМ4 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т4 и прилегающих туннелей, Вк1";

ЭМ5 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т5 и прилегающих туннелей";

ЭМ6 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т6 и прилегающих туннелей";

ЭМ7 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т7 и прилегающих туннелей";

ЭМ8 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т8 и прилегающих туннелей";

ЭМ9 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т9 и прилегающих туннелей";

ЭМ10 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т10 и прилегающих туннелей";

ЭМ11 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Tl1 и прилегающих туннелей";

ЭМ12 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т12 и прилегающих туннелей";

ЭМ13 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т13 и прилегающих туннелей";

ЭММ "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т14 и прилегающих туннелей, Вк6";

ЭМ15 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т15 и прилегающих туннелей";

ЭМ16 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т1б и прилегающих туннелей";

ЭМ17 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т17 и прилегающих туннелей, Вк5";

ЭМ18 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т18 и прилегающих туннелей";

Т1-Т18 Камеры разводки коммуникаций:

Сооружение Т1;

Сооружение Т2;

Сооружение ТЗ;

Сооружение Т4;

Сооружение Т5; 

Сооружение Т6; 

Сооружение Т7; 

Сооружение Т8; 

Сооружение Т9; 

Сооружение Т10; 

Сооружение Т11; 

Сооружение Т12; 

Сооружение Т13; 

Сооружение Т14; 

Сооружение Т15; 

Инженерные системы: 

Система В1;

Система К14;

Система К14Н;

Система В1; 

Система К14;

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н;

Система В1; 

Система К14;

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1;

Система В4;

Система В5; 

Система К14; 

Система К14Н;

Система В1;

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система В4; 

Система В5; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система В4; 

Система В5;

Система К14; 

Система К14Н; 

Система К14; 

Система К14Н;

ОВ1 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т1 и примыкающих тоннелей";

Система П1;

Система П2;

ОВ2 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т2 и примыкающих тоннелей";

Система П3;

Система П4;

ОВ3 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ТЗ и примыкающих тоннелей";

Система П5; 

Система П6;

ОВ4 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т4 и примыкающих тоннелей";

Система П7;

Система П8; 

Система В41; 

Система В42;

ОВ5 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т5 и примыкающих тоннелей";

Система П9; 

Система П10;

ОВ6 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т6 и примыкающих тоннелей";

Система П57;

ОВ7 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т7 и примыкающих тоннелей";

Система П77; 

Система П78; 

Система В48;

Система В84;

ОВ8 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т8 и примыкающих тоннелей";

Система П11;

 Система П12; 

Система В49; 

Система В50; 

Система В51;

ОВ9 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т9 и примыкающих тоннелей";

Система П27; 

Система П33;

ОВ10 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т10 и примыкающих тоннелей"; 

Система П79; 

Система П80; 

Система В90;

ОВ 11 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т11 и

примыкающих тоннелей";

Система П13;

Система П14;

Система В 62;

Система В 63;

ОВ12 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т12 и примыкающих тоннелей";

 Система П22; 

Система П23;

ОВ14 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т14 и примыкающих тоннелей";

Система В64; 

Система В65;

ОВ15 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т15 и примыкающих тоннелей";

Система П16;

 Система П88;

 Система В76;

ОВ16 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т16 и примыкающих тоннелей"

Система П21;

 Система В 69;

ОВ17 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т17 и примыкающих тоннелей"

Система П82;

 Система В70;

 Система В71;

ОВ19 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ВК1 и примыкающих тоннелей"

Система В44;

ОВ20 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ВК2 и примыкающих тоннелей"

Система В39; 

Система В40;

ОВ21 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ВКЗ и примыкающих тоннелей"

Система В36;

 Система В37;

ОВ22 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ВК4 и примыкающих тоннелей"

Система В29; 

Система ВЗО;

ГП-31 Площадка обслуживания ТУА:

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система ТЗ;

Система К1;

Система К2;

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" 

Система П1;

 Система BE 1-BE11;

8) Оригиналы актов освидетельствования скрытых работ в 1 экз. на бумажном носителе;

9) Оригиналы актов освидетельствования ответственных конструкций в 1 экз. на бумажном носителе;

10) Оригиналы актов испытаний на все выполненные работы по конструктивам и инженерным системам с приложением реестра на указанные акты в 1 экз. на бумажном носителе;

11) Копии договоров и актов сверок по взаиморасчетам с поставщиками электроснабжения, тепло - водоснабжения в 1 экз. на бумажном носителе;

12) Копии контрактов с подрядчиками и поставщиками, заключенных для исполнения условий контракта, а также копии актов сверки взаиморасчетов с подрядчиками и поставщиками в 1 экз. на бумажном носителе;

13) Копии подтверждающих первичных документов на передаваемые материалы и оборудование (договоров, счетов-фактур, платежных поручений, паспортов материалов и оборудования) в 1 экз. на бумажном носителе;

14) Оригиналы паспортов на передаваемое и смонтированное оборудование в 1 экз. на бумажном носителе;

15) Оригиналы заполненных общих журналов производства работ за период выполнения работ в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в следующем количестве:

ГП-1 Стартовое сооружение: -12 шт.;

ГП-2 Укрытие для обслуживающего персонала: - 1 шт.;

ГП-3 Командный пункт: - 5 шт.;

ГП-4 Технологический блок кислорода и азота: - 4 шт.; ГП-5 Технологический блок керосина и нафтила: - 7 шт.; ГП-б Технологический блок сжатых газов: - 4 шт.; ГП-8 Укрытие для обслуживающего персонала: - 2 шт.; ГП-10 Холодильный центр: - 1 шт.;

ГП-12 Насосная станция оборотного водоснабжения с резервуарами и градирнями: - 1 шт.;

ГП-14 Административно-служебное здание: - 3 шт.;

ГП-15 Караульное помещение с гаражом на 1 автомобиль: - 1 шт.;

ГП-16 Контрольно-пропускной пункт: - 2 шт.;

ГП-17 Центральный распределительный пункт: - 2 шт.;

ГП-31 Площадка обслуживания ТУ А: - 1 шт.

16) Оригиналы заполненных специальных журналов работ и входного контроля за период выполнения строительно-монтажных работ в 1 экз. на бумажном носителе в следующем количестве:

ГП-1 Стартовое сооружение: - 13 шт.; 

ГП-3 Командный пункт: - 3 шт.;

ГП-4 Технологический блок кислорода и азота: - 8 шт.; 

ГП-5 Технологический блок керосина и нафтила: - 9 шт.;

ГП-6 Технологический блок сжатых газов: -4; шт.;

ГП-7 Насосная станция технологического пожаротушения: - 4 шт.;

ГП-8 Укрытие для обслуживающего персонала: - 2 шт.;

ГП-10 Холодильный центр: - 5 шт.;

ГП-14 Административно-служебное здание: - 2 шт.;

ГП-15 Караульное помещение с гаражом на 1 автомобиль: - 1 шт.;

ГП-16 Контрольно-пропускной пункт: - 5 шт.;

ГП-17 Центральный распределительный пункт: - 1 шт.;

ГП-31 Площадка обслуживания ТУА: - 2. шт.

17) Оригиналы заполненных журналов учета выполненных работ (форма КС-ба) в 1 экз. на бумажном носителе;

18) Заверенные копии актов и протоколов по результатам проверок, проведенных в процессе строительства федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, в том числе ГАСН, а также уведомлений об их исполнении в 1 экз. на бумажном носителе;

19) Оригиналы актов об устранении замечаний, выданных в процессе строительства ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» и представителями авторского надзора в 1 экз. на бумажном носителе.

Уточнение исковых требований принято судом.

В судебном заседании 27.01.2020 г. в порядке статьи  163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  объявлялся перерыв до 30.01.2020 г. до 14 часов  30 минут.

Представитель истца в судебном заседании  настаивал на исковых требованиях (учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ) по основаниям, изложенным в исковом  заявлении и  в представленных дополнительных пояснениях по иску.

Представители ответчика в судебном заседании возражали против заявленных требований, поддержали возражения, указанные в отзыве  на иск и  в представленных дополнениях к отзыву на исковое заявление.

Представитель Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в судебном заседании  указал на обоснованность и доказанность заявленных истцом исковых требований, позицию истца  об отсутствии оснований для оставления части  исковых требований  без рассмотрения поддержал.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела,  распоряжением Президента Российской Федерации от 01.09.2009 г.  № 562-рп Спецстрой России определен, как единственный исполнитель подрядных работ по созданию космодрома «Восточный» (пункт 17 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), а право на размещение заказов на выполнение данных работ предоставлено Федеральному космическому агентству.

     03.07.2012г. между Федеральным космическим агентством (Роскосмос) (Государственный Заказчик или заказчик) и ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое «России» (Генподрядчик) заключен государственный контракт № 873-КИ106/12 на выполнение работ для федеральных государственных нужд «Космодром «Восточный». Строительство стартового комплекса РН «Союз-2 площадка 1С. (Амурская область, Свободненский район, ЗАТО Углегорск. 

     Государственный контракт, как записано в преамбуле, заключен во исполнение Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы», утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 28.11.2005 № 2049-р, Федеральной адресной инвестиционной программы на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 13 января 2012 года (программная часть: федеральная целевая программа «Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы», подпрограмма «Создание обеспечивающей инфраструктуры  космодрома «Восточный».

     В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц наименование ответчика изменено на Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 6».

      Пунктом 2.2 контракта предусмотрено, что  заказчик осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ и оказывает необходимое содействие генподрядчику в выполнении им принятых по контракту обязательств. 

     Генподрядчик осуществляет строительно-монтажные работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной и рабочей документацией и другими условиями контракта.  Генподрядчик также обязался выполнить работы в соответствии с условиями контракта на свой риск собственными или привлеченными силами и средствами (пункт 2.3. контракта).

      Дополнительным соглашением № 1 от 14.06.2013 г. в госконтракт включена третья сторона - заказчик-застройщик в лице федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный».     Дополнительным соглашением от 15.09.2014 №3 сторона «Государственный заказчик» исключена из числа сторон контракта, его функции в полном объеме его прав и обязанностей переданы «Заказчику - застройщику».      Контрактом определены сроки выполнения работ (пункт 5.2 контракта в редакции дополнительного соглашения   №1 от 14.06.2013 г.): «Дата начала работ – 01.07.2012 г. Дата окончания работ - 30 июля 2015 г. Окончание работ по контракту  оформляется подписанием Акта приемки законченного строительством приемочной комиссией».

     Пунктом 4.4 контракта определено, что оплата выполненных генподрядчиком строительно-монтажных работ производиться заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания заказчиком оформленных генподрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оригиналов счетов.

      Разделом 6 контракта установлено, что заказчик имеет право осуществлять приемку и проверку стоимости и качества работ, выполненных генподрядчиком при наличии исполнительной документации, представляемой генподрядчиком на предъявляемый к приемке объем работ. В случае отсутствия исполнительной документации заказчик имеет право отказать генподрядчику в рассмотрении форм КС-2 и КС-3 за проверяемый заказчиком период.

     Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) заполняются на основании данных о фактически выполненных в отчетном периоде работах и индексов перерасчета, установленных расчетом цены контракта (приложение №2 к контракту) и проектно-сметной документацией, на которую  дано государственной  экспертизой положительное заключение (пункт 4.5 контракта).    В пункте 4.6 контракта стороны согласовали, что  в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 12.10. 2011 г. № ВП-П7-7294 до получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, генподрядчик производит расчет стоимости выполненных работ за соответствующий  отчетный период по рабочим  чертежам и государственным единичным расценкам (ФЕР-2001 в редакции  2009 г.) с учетом  действующих на дату составления акта индексов (коэффициентов), ежеквартально выпускаемых Министерством регионального развития России.    Генподрядчик в течение 10 рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы предоставляет государственному заказчику акт сверки всей ранее рассчитанной стоимости выполненных работ с данными локальных смет, утвержденных государственной экспертизой. По результатам сверки сторонами определяется корректирующая сумма для взаиморасчетов.  После получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию расчет стоимости выполненных работ за соответствующий период  производится согласно п.4.5 настоящего контракта.

     Оплата выполненных генподрядчиком работ производится заказчиком в порядке, установленном  настоящим разделом контракта до предела, не превышающего 95% от цены контракта. Оставшаяся часть цены контракта будет выплачена при окончательном расчете (пункт 4.7 контракта).     Окончательный расчет по настоящему контракту производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента  подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (пункт 4.8 контракта).

    Генподрядчик представляет заказчику первичные учетные документы, а также исполнительную документацию на выполненные работы, оформленные должным образом с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца (пункт 12.1.2 контракта).

    Согласно пункту  3.1 контракта  (в редакции дополнительного соглашения №4 от 15.04.2015 г.) цена контракта составляет  16 402 289 160 руб. 63 коп. в том числе НДС 18% - 2 502 044 109 руб. 25 коп. с  распределением финансирования по годам:

2012 г. – 5 075 000 000 руб. 00 коп., в том числе  НДС 18% -  774 152 542 руб. 37 коп.;

2013 г. – 9 091 690 000 руб. 00 коп., в том числе  НДС 18% - 1 386 867 966 руб. 10 коп.; 

2014г. – 0 , 00 руб. 

2015г. – 2 235 599  160 руб. 63 коп., в том числе  НДС 18% - 341 023 600 руб. 77 коп.

Источник финансирования работ по контракту: Федеральный  бюджет, РЗ-04, ПР-12, ЦСР-2139999, ВР-413, КОСГУ -3210.

    Цена контракта является  твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и с учетом пункта 4.3 контракта, что оформляется сторонами дополнительными соглашениями к контракту.

      Условиями  дополнительного соглашения №4 от 15.04.2015 г., согласованного сторонами, предусмотрено авансирование строительных работ в размере  85 % от цены контракта, но выше лимита бюджетных обязательств текущего финансового года.

     В соответствии с условиями государственного контракта в пользу генподрядчика  заказчик в полном объеме перечислил денежные средства  16 402 289 160 руб. 63 коп. по платежным поручениям  № 496109 от 04.09.2012 г., № 1601690 от  03.12.2013 г., № 1614561 от 09.12 2013 г., № 887049 от 22.05.2015 г., № 110112 от 29.05.2015 г.,  № 181879 от 30.12.2015 г., № 181880 от 30.12.2015 г. С учетом произведенного 19.02.2018 г. частичного возврата авансовых платежей на сумму  398 837 620 руб. 37 коп., сумма  полученных ответчиком  по контракту денежных средств составила 16 003 451 540 руб. 26 коп., что  ответчиком не оспорено.

      Кроме того, на объект «Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №533 от 02.06. 2015 г.  ответчиком получено дополнительное финансирование  в виде было согласовано расходование субсидии в размере 5 457 007 033 руб. 51 коп., из которых была освоена сумма 4 777 466 680 руб. 78 коп., что подтверждается отчетом по расходованию средств субсидии по объекту строительства: «Стартовый комплекс РН «Союз-2» площадка 1С. Неиспользованный остаток в размере 679 540 352 руб. 73 коп. ответчиком  возвращен в бюджет РФ, что подтверждается справкой-отчетом по использованию субсидии по объектам космодрома на 05.06.2018 г.

      Согласно  подписанных сторонами  без возражений актов формы КС-2, КС-3  стоимость выполненных   генподрядчиком работ  составила  10 698 841 125 руб. 84 коп., принято ТМЦ в сумме  6 124 320 руб. 55 коп. Всего  10 704 965 446 руб. 39 коп., что сторонами в ходе судебного разбирательства не оспорено.

    Выполнение   работ по предъявленным  односторонним  актам  формы КС-2 на  сумму  2 416 544 989 руб. 24 коп. истец считает не доказанным, данные работы не подтверждены как качественные,  в соответствии с проектными требованиями, отсутствует  в полном объеме исполнительная документация.

     В связи с чем, сумма неотработанного аванса по расчету истца составила  5 298 486 093 руб. 93 коп.   (16 402 289 160 руб. 63 коп. (всего перечислено истцом по контракту)  - 10 704 965 446 руб. 39 коп. (фактическое выполнение по подписанным без возражений формам КС-2) -398 837 620 руб. 37 коп. (частичный возврат авансовых платежей)) .

     В нарушение пункта 5.2 контракта строящийся объект не сдан, акт приемки законченного строительством объекта не подписан.

     Истцом в адрес ответчика направлено требование о расторжении госконтракта с применение последствий его расторжения с приложением соглашения о расторжении государственного контракта.      Ответчиком в адрес истца направлено письмо  о готовности к мероприятиям по расторжению госконтракта, однако соглашение о расторжение контракта не подписано.     Определением Арбитражного суда Хабаровского края суда от 06. 03. 2017 года по делу №  А73-17731/2016 утверждено мировое соглашение от 28.02.2017 г.

     Стороны пришли к соглашению о расторжении контракта по соглашению сторон    с даты утверждения Арбитражным судом Хабаровского края мирового соглашения. 

     В соответствии с пунктом 4 мирового соглашения Строительная площадка подлежит передаче истцу по Акту приема-передачи строительной площадки  в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения.      Согласно пункту 5 мирового соглашения объемы работ, определенные на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), по состоянию на дату утверждения судом настоящего мирового соглашения, подлежат передаче истцу по Акту приема-передачи в течение 1 (одного) месяца с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения.      В течение 1 (одного) месяца с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения сторонами будет составлен Акт сверки взаиморасчетов, фиксирующий перечень и стоимость работ, принятых и оплаченных истцом на дату утверждения судом настоящего мирового соглашения.   

      Согласно пункту 7 мирового соглашения стороны выражают намерение после утверждения судом настоящего Мирового соглашения осуществлять приемку выполненных, но не сданных Истцу до даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения работ, а также закупленных материалов и оборудования.       Приемка работ осуществляется в порядке и на условиях, установленных контрактом. Материалы и оборудование, закупленные ответчиком до даты утверждения судом настоящего мирового соглашения, могут быть приняты истцом при условии соответствия их качества спецификациям, указанным в Проектно-сметной и Рабочей документации, государственным стандартам, техническим условиям и при предоставлении соответствующих сертификатов, технических паспортов, счетов-фактур или других первичных документов, удостоверяющих их качество и стоимость, а также при обеспечении ответчиком гарантийных сроков в отношении таких материалов и оборудования.

      Стороны решили, что в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения ими будут составлены Перечень и План-график передачи материалов и оборудования, при этом срок передачи материалов и оборудования согласно Плану-графику в любом случае не должен превышать 6 (шести) месяцев с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения. 

     Гарантийные сроки в отношении объемов работ (качества работ, материалов и смонтированного оборудования), а также материалов и оборудования, принятых истцом после даты утверждения настоящего мирового соглашения, начинают течь с момента их приемки по акту (актам), подписанному (подписанным) сторонами».

      В силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  указанные обстоятельства, установленные арбитражным судом и имеющие преюдициальное значение для настоящего спора, подтверждает факт того, что сторонами настоящего спора достигнуты существенные условия, касающиеся, в том числе приемки выполненных, но не сданных до даты утверждения судом мирового соглашения работ, а также документации и  закупленных ответчиком  материалов и оборудования, оговорены сроки передачи.

      Истец, ссылаясь на данные обстоятельства, на неисполнение ФГУП «ГВСУ №6» обязанностей по государственному контракту № 873-КИ106/12 от  03.07.2012 г.  обратился в арбитражный суд  с  настоящим иском о взыскании неотработанных авансовых платежей в размере 5 298 486 093 руб. 87 коп. и об обязании  ответчика передать документацию. 

       Правоотношения сторон возникли из договора подряда, регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации,общими нормами об исполнении обязательств надлежащим образом, а также положениями Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действующего в период заключения контракта (далее - Закон о размещении заказов,  Закон - № 94-ФЗ),  Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе, Закон  №  44-ФЗ).

   В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса, по государственному или муниципальному контракту на выполнение работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие, связанные со строительством, ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

       В соответствии с пунктом 1 статьи 743 Гражданского кодекса подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

     Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса,  разъяснениям, изложенным в пункте 8 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

        Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ). 

    Пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса установлено, что  оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором подряда; при отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ.     Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации  от 11.01.2000 №  49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» (далее - письмо ВАС РФ № 49) полученные стороной до расторжения договора денежные средства подлежат возврату другой стороне, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.

      В рассматриваемом случае  в рамках дела  № А73-17731/2016  контракт № 873-КИ106/12 от 03.07.2012 г. расторгнут по соглашению сторон с 06.03.2017 г.

     В соответствии с пунктом  4 статьи 453 Гражданского кодекса в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

     Учитывая приведенные нормы в предмет исследования  по возникшему спору входит определение  размера средств оплаченных генеральному подрядчику по контракту, а также объем и стоимость выполненных работ.

       Истец обратился  с исковым требованием о взыскании неотработанных авансовых платежей в размере  5 298 486 093 руб. 87 коп. (с учетом уточнения требований в порядке ст. 49 АПК РФ). 

      Исковое  требование истец обосновал фактом перечисления денежных средств в сумме 16 402 289 160 руб. 63 коп. по платежным поручениям  № 496109 от 04.09.2012 г., № 1601690 от  03.12.2013 г., № 1614561 от 09.12 2013 г., № 887049 от 22.05.2015 г., № 110112 от 29.05.2015 г.,  № 181879 от 30.12.2015 г., № 181880 от 30.12.2015 г. С учетом произведенного 19.02.2018 г. частичного возврата авансовых платежей на сумму  398 837 620 руб. 37 коп., сумма  полученных ответчиком  по контракту денежных средств составила 16 003 451 540 руб. 26 коп.

    Согласно  подписанных сторонами  без возражений актов формы КС-2, КС-3  стоимость выполненных   генподрядчиком работ  составила  10 698 841 125 руб. 84 коп., принято ТМЦ в сумме  6 124 320 руб. 55 коп. Всего  10 704 965 446 руб. 39 коп., что сторонами не оспорено.

      В ходе судебного разбирательства судом установлено, что заказчиком мотивированным отказом не приняты работы по предъявленным  ответчиком односторонним  актам  формы КС-2. 

     В связи с наличием спора  по качеству  и объему выполненных работ, указанных ответчиком в односторонних актах о приемке выполненных работ КС-2 и не принятых заказчиком, суд определением от 07.06.2017 г. в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначил по делу комиссионную судебную строительно-техническую экспертизу, проведение которой поручил Федеральному бюджетному учреждению Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, экспертам ФИО6, ФИО7 и экспертам ООО «Экспертно-юридический центр «Русгарант» ФИО8, ФИО9, ФИО10.  

      Определением суда от 23.01.2018 г. к проведению  экспертизы  привлечен эксперт Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации ФИО11.

       Из  заключения судебной экспертизы от 27.03.2019 г.   № 2957/19-3 (с учетом дополнения к заключению экспертизы, представленного  03.10.2019 г. в связи с устранением допущенных технических ошибок) следует, что стоимость работ, являющаяся предметом проведения экспертизы, составила 2 416 544 989 руб. 24 коп.    Экспертами установлено, что виды и объем работ, указанные в представленных односторонне подписанных  актах о приемке выполненных работ  по форме КС-2 и не принятых заказчиком, не соответствуют фактически выполненным ответчиком работам по государственному   контракту №873-КИ106/12 от 03.07.2012 г. Качество работ, указанных в представленных односторонних актах о приемке выполненных работ КС-2 и не принятых заказчиком частично не соответствует качеству работ, установленным контрактом, проектно-сметной документации и действующим строительным  нормам и правилам.

    Фактическая  общая стоимость выполненных работ  с затратами на временные здания и сооружения составила 742 802 384 руб. 40 коп. (с учетом НДС 18%) (723 601 880 руб. 23 коп. (стоимость выполненных работ) +  19 200 504 руб. 17 коп. (затраты на временные здания и сооружения, рассчитанные по текущим СМР (3,1% от СМР) = 742 802 384 руб. 40 коп.)

     По результатам проведенной экспертизы стоимость работ, факт выполнения которых установить не представляется возможным 817 717 369 руб. 62 коп. (с учетом НДС 18%), указанная сумма не включена экспертами в фактическую стоимость выполненных работ. 

     Затраты на временные здания и сооружения по работам факт выполнения которых установить не представляется возможным составляет  53 269 026 руб. 94 коп. (с учетом НДС 18%).

      Кроме того, экспертами установлено, что   стоимость по устранению явных недостатков на вышеуказанном объекте составляет  38 293 893 руб. 60 коп. (с учетом НДС 20%). 

      Стоимость работ по восстановлению исполнительной документации на объекте в соответствии с Постановлением  №468 от 21.06.2010 г. составила  12 445  952 руб. 34 коп. (с учетом НДС 18%). 

       Экспертами также указано, что  в связи с невозможностью определить в рамках данной экспертизы фактическую стоимость устранения недостатков, выявленных в конструкциях деформационных швов между блоками А и Б, в пешеходных потернах к сооружениям №8 и №2, между блокам А и непосадочным основанием, а также по устранению щелей в месте сопряжения фундаментов и стен сооружения №15, была составлена таблица №48, в которой определена стоимость указанных некачественно выполненных работ в соответствии с представленными односторонне подписанными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, которая составила  27 013 443 руб. 82 коп. (с учетом НДС 18%).

       Допрошенные в суде эксперты ФИО8, ФИО10, ФИО11, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, полностью подтвердили заключение судебной экспертизы от 27.03.2019 г.   № 2957/19-3 (с учетом дополнения к заключению экспертизы, представленного  03.10.2019 г.).

      Оценив представленное в материалы дела экспертное заключение, суд пришел к выводу о том, что заключение соответствует требованиям, предъявляемым законом, экспертами всесторонне исследованы представленные по делу доказательства, даны подробные пояснения по вопросам, поставленным на его разрешение.

      Доказательств, опровергающих выводы, содержащиеся  в  заключении судебной  экспертизы, сторонами не представлено, равно как и доказательств, позволивших суду усомниться в компетенции экспертов. 

       Как установлено судебной  экспертизой фактическая  общая стоимость выполненных работ  с затратами на временные здания и сооружения составила 742 802 384 руб. 40 коп. (с учетом НДС 18%) (723 601 880 руб. 23 коп. (стоимость выполненных работ) +  19 200 504 руб. 17 коп. (затраты на временные здания и сооружения, рассчитанные по текущим СМР (3,1% от СМР) = 742 802 384 руб. 40 коп.).

     При этом учитывая выводы  экспертизы из стоимости фактически выполненных работ 723 601 880 руб. 23 коп. установленных экспертами  подлежит исключению стоимость по устранению недостатков на объекте «Строительство стартового комплекса РН «Союз-2 площадка 1С.» в размере  38 293 893 руб. 60 коп. 

     Выводы экспертов относительно определения стоимости устранения  недостатков истцом не опровергнуты, в связи с чем, оснований считать доводы истца в этой части обоснованными и доказанными не имеется.

      С учетом выводов  судебной экспертизы, принимая во внимание условия контракта,  а также п. 3.2 ГСН 81-05-01-2001, согласно которым расчеты между  заказчиком и генподрядчиком производятся только за фактически построенные временные здания и сооружения (далее - ВЗиС),  суд также считает обоснованными доводы истца   о подлежащих исключению работ стоимостью  19 200 504 руб. 17 коп. (определены экспертами в размере 3.1% от СМР).

     Пунктом  12.1.2 контракта предусмотрено, что генподрядчик предоставляет заказчику первичные документы (акты формы КС-3, КС-3) на выполненные работы.

      Регламентом оплаты временных зданий и сооружений на объектах космодрома «Восточный» предусмотрено, что генподрядчик должен предоставить заказчику для оплаты затрат на ВЗиС следующие документы:

- реестр затрат титульных ВЗиС, основанных на данных проекта организации строительства (ПОС) и выполненных дополнительно по поручению государственного заказчика. Реестр утверждается государственным заказчиком строительства;

- исполнительную документацию, включающая план-схемы расположения ВЗиС с указанием характеристик каждого сооружения (площадь, объем, протяженность и т.п.), другие документы, позволяющие определить объем работ, подлежащих выполнению по возведению временных зданий и сооружений, паспорта;

- сметы на возведение, демонтаж и ликвидацию ВЗиС, согласованных с государственным заказчиком строительства;

- акты выполненных работ по форме № КС-2, №КС-3 на возведение ВЗиС;-акты ввода в эксплуатацию ВЗиС, в том числе вахтовых городков (кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов);

- акты приема-передачи между государственным заказчиком и генподрядчиком введенных в эксплуатацию ВЗиС, для зачисления в основные средства государственного заказчика;

- документы на передачу между государственным заказчиком и генподрядчиком для дальнейшей передачи в пользование генподрядчику в порядке, установленном договором подряда;

- реестр затрат, связанных с арендой ВЗиС, потреблением тепло-энергоресурсов (ТЭР), заверенный директором предприятия и главным бухгалтером предприятия с предоставлением первичных документов (договоры, счет-фактуры и т.п.).

      В нарушение положений ГСН  81-05-01-2001 и условий контракта генподрядчиком   документы, подтверждающие фактическое выполнение работ по ВЗиС и возникновение связанных с ними затрат не представлены. При этом судом принято во внимание, что эксперты в судебном заседании не подтвердили фактического наличия временных зданий и сооружений на  объекте «Строительство стартового комплекса РН «Союз-2 площадка 1С.»  

      Поскольку документы, подтверждающие выполнение  данных работ не представлены, суд считает обоснованными доводы истца  об  исключении из общей стоимости фактически выполненных работ, установленных экспертами, работ стоимостью  19 200 504 руб. 17 коп. 

     Кроме того, из представленных истцом   материалы дела  документов (исполнительной документации,  актов о приемке выполненных работ) следует, что  часть работ на сумму  8 137 153 руб. 74 коп., отраженных  в односторонних актах формы КС-2 генподрядчиком не выполнялись, а  были выполнены силами иного лица -  ФГУП «ЦЭНКИ». 

    Ответчиком факт выполнения части работ на вышеуказанную сумму  не доказан.

    При этом судом принято во внимание, что в ходе проведенного 03.10. 2019 г. судебного заседания, экспертами было подтверждено, что они обследовали выполненные работы и не определяли исполнителя работ. 

     В связи с  тем, что факт выполнения вышеуказанных работ  ответчиком не доказан,  доводы истца о том, что стоимость данных работ  на сумму  8 137 153 руб. 74 коп. подлежит исключению  из стоимости фактически  выполненных работ, установленных экспертами, суд считает обоснованными. 

      Экспертами указано на выполнение работ в размере 1 974 907 руб.  00  коп., имеющим скрытый характер, по которым исполнительная документация представлена частично,  исследования, необходимые для проверки качества работ не проводились. В экспертном заключении  отсутствует вывод о том, что данные работы  выполнены с надлежащим качеством. 

     В связи с чем, доводы истца относительно того, что данные работы не подлежат оплате и приемке в связи с отсутствием доказательств качества их выполнения, являются обоснованными.

      При проведении  судебной экспертизы установлено, что работы на сумму  6 013 621 руб. 02 коп. выполнены с применением материалов, не соответствующий проекту.

      В ходе судебного разбирательства установлено, что при согласовании применённых материалов ответчику указывалась истцом на необходимость согласно статье 49 градостроительного кодекса Российской Федерации, организовать совместно с проектным институтом мероприятия по внесению изменений в проектную и рабочую документацию, для возможности в дальнейшем приемки работ.

      Доказательств о том, что ответчиком установленным порядком внесены  изменения в проектную и рабочую документацию, не представлено.

      В связи с чем, доводы истца относительно того, что в отсутствие подписанной со стороны заказчика документации, подтверждающей применение материала, соответствующего проекту, работы не могут считаться выполненными качественно и подлежащими оплате, суд считает обоснованными. При этом судом принято во внимание, что государственный архитектурно-строительный надзор не уполномочен выдать заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства на работы, выполненные с применением материалов, не соответствующий проекту, или не внесённые установленным порядком в проектную документацию.

     Кроме того, работы на сумму 135 109 288 руб.46 коп. ответчиком выполнены с отклонением от требований проектной и рабочей документации, а также  с нарушением качества работ. Данные факты зафиксированы предписаниями заказчика и государственным архитектурно-строительным надзором, что ответчиком не опровергнуто. 

    В связи с  тем, что факт выполнения вышеуказанных работ  ответчиком с надлежащим  качеством не доказан,  доводы истца о том, что стоимость данных работ  на сумму  135 109 288 руб.46 коп.  подлежит исключению  из стоимости фактически  выполненных работ, установленных экспертами, суд считает обоснованными. 

     Помимо этого,  по работам  на сумму 85 667 477 руб. 50 коп.  полностью отсутствует исполнительная документация,  что не позволило определить качество выполненных работ, соответствие выполненных объемов работ проектным требованиям и условиям контракта. Исследования, необходимые для проверки и подтверждения качества  этих работ, не проводились. Вывод о том, что данные работы выполнены с надлежащим качеством, отсутствует в экспертном заключении.

    Поскольку отсутствуют доказательства качества выполнения работ на сумму 85 667 477 руб. 50 коп., доводы истца относительно того, что данные работы не подлежат  приемке  и оплате по условиям контракта, суд считает обоснованными.

    В отношении выполнения работ на сумму 267 782,12 рублей (остаток по смете)  суд также считает обоснованными доводы  истца о невозможности принять данные работы, поскольку эти работы  фактически не выполнялись и с учетом проекта и Технологии производства работ не должны были выполняться ответчиком (как например: 0,4 куб.м. бетона пп.1-4 КС-2 № 970/1. При этом в КС-2 указана расценка по стоимости арматуры,  но отсутствует позиция по монтажу арматуры).

    Ответчиком доказательств, свидетельствующих об обратном не представлено.

     Доводы истца в отношении остальных  работ,  по которым эксперты установили фактическое выполнение, но отсутствует исполнительная документация  и потому данные работы не подлежат оплате,  суд считает необоснованными.

     Согласно статье 726 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

     Положения Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие отношения по договорам подряда, не связывают факт оплаты выполненных работ с необходимостью представления исполнительной документации.     В пункте 4.4 спорного контракта обязанность заказчика произвести окончательный расчет с генподрядчиком не поставлена в зависимость от предоставления подрядчиком всей исполнительной документации.     Из заключения  судебной экспертизы  выводов о  выполнении  генподрядчиком указанных  работ с  ненадлежащим качеством  не усматривается.     Факт отсутствия потребительской ценности выполненных работ ввиду  не представления необходимой исполнительной документации, истцом  по первоначальному иску не доказан.

      В связи с изложенным оснований признать   указанные доводы  истца обоснованными не имеется. При этом судом  принято во внимание, что требование о передаче исполнительной документации может быть предметом самостоятельного требования и  такое требование заявлено истцом по настоящему делу.

     Возражения ответчика ссылкой на подписание в апреле 2016 года комиссией в составе представителей ГК «Роскосмос», ФГУП «ЦЭНКИ», ФГУП «ГВСУ № 6» акта о проведении первого этапа комплексных испытаний стартового комплекса, в котором отражено, что системы и агрегаты, входящие в его состав, соответствуют требованиям технического задания и конструкторской документации, выдержали первый этап комплексных испытаний, судом отклонены, поскольку  в акте не указано о готовности стартового комплекса, истец (заказчик строительства) не участвовал в комиссии и не подписывал данный акт по причине неготовности строительством объектов стартового комплекса.

      Возражения ответчика об ошибочно допущенном выводе экспертов о том, что на работы  в сумме  2 817 711 руб. 38 коп. необходимо проведение пусконаладочных работ (ПНР), судом не приняты, поскольку  эксперты обобщили этапы работ в формате ПНР. По факту согласно нормативной и проектной документации перед проведением подключения оборудования к электросети, необходимо провести проверку электрооборудования и электрических кабельных сетей с составлением актов готовности к монтажу, которые разрешают производить подключения оборудования и дальнейшее проведение индивидуального испытания оборудования. Доводы истца в этой части суд считает обоснованными.

     Возражения ответчика о том, что по дренчерной системе пожаротушения по односторонним актам КС-2 № 615/ПНР от 12.2017 г., № 616/ПНР от 12.2017 г., № 617/ПНР от 12.2017 г.; № 618/ПНР от 12.2017 г.  ФГУП «ГВСУ № б» проводились работы по продувке трубопроводов и испытание трубопроводов на прочность и герметичность, документально не подтверждены. При этом судом принято во внимание, что в  указанных односторонних актах предъявлялись пусконаладочные работы по подсистеме газового пожаротушения автоматизированной системы управления I категории технической сложности, в которых проводятся работы по наладке автоматизированной системы. 

       Проанализировав в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, суд считает, что стоимость фактически выполненных работ, обозначенных в односторонних актах приемки работ и подлежащих оплате, составляет  435 691 804 руб. 45 коп. (742 802 384 руб. 40 коп. – 19 200 504 руб. 17 коп, - 38 293 893 руб. 60 коп. – 8 137 153 руб. 74 коп. – 1 974 907 руб. 00 коп. – 6 013 621 руб. 02 коп. – 135 109 288 руб. 46 коп. - 85 667 477 руб. 50 коп. – 267 782 руб. 12 коп. – 12 445 952 руб. 34 коп..  = 435 691 804 руб. 45 коп.)

     Оснований утверждать, что выполненные работы стоимостью 435  691 804 руб. 45 коп.    не направлены на достижение цели заключения сторонами контракта, не представляют для истца потребительской ценности, не имеется.

      В силу пункта 4 статьи 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

     В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 г. № 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении", при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

     В силу статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

     Факт получения ответчиком от заказчика денежных средств в сумме 16 003 451 540 руб. 26 коп. (с учетом произведенного 19.02.2018 г. частичного возврата авансовых платежей на сумму  398 837 620 руб. 37 коп.), подтверждаются представленным в материалы дела платежными поручениями и не оспаривается ответчиком.

        При этом материалами дела подтверждено выполнение  генподрядчиком работ по контракту № 873-КИ106/12 от 03.07.2012 г.  только на сумму 11 140 657 250 руб.  84 коп. (10 704 965 446 руб. 39 коп. (по  подписанным сторонами  без возражений актам  формы КС-2) + 435 691 804 руб. 45 коп. (по односторонним актам формы КС-2)).

        Доказательств выполнения  работ в полном объеме, равно как  и доказательств, свидетельствующих о возврате неиспользованных авансовых платежей, ответчик не представил.

       В судебном заседании представитель истца настаивал на рассмотрении исковых требований в рамках  настоящего дела, указал на  отсутствие оснований для оставления части  исковых требований  без рассмотрения, так как в рассматриваемом случае заявленные им исковые требования не подлежат рассмотрению в деле о банкротстве ответчика.

      Однако суд, исследовав представленные в материалы дела доказательства, считает данные доводы истца ошибочными на основании следующего.

       Из материалов дела следует, что определением Арбитражного суда Хабаровского края от 15.06.2015 г. возбуждено производство по делу А73-8059/2015 о несостоятельности (банкротстве) ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России».

   На основании Приказа директора департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ от 31.03.2017 № 944 ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» переименовано на ФГУП «ГВСУ № 6».

  Определением от 09.06.2017 г. по делу А73-8059/2015 (резолютивная часть от 08.06.2017 г.) в отношении ФГУП «ГВСУ №6» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён ФИО12, член Ассоциации «Центральное агентство арбитражных управляющих».

      Определением суда от 02.03.2018 г. по делу А73-8059/2015 (резолютивная часть 28.02.2018 г.) в отношении ФГУП «ГВСУ №6» введено внешнее управление, внешним управляющим должника утвержден ФИО12, из числа членов Ассоциации «Центральное агентство арбитражных управляющих».

     Решением суда от  29.08.2019 г. по делу А73-8059/2015 (резолютивная часть 28.08.2019 г.) ФГУП «ГВСУ №6» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО12 - член Ассоциации «Центральное агентство арбитражных управляющих».

     Иск по настоящему делу предъявлен после вынесения определения о принятии заявления  о признании  ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» о несостоятельности (банкротстве) и до введения  в отношении  ответчика процедуры наблюдения.

     Согласно ст. 5 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом.

     В п. 8 постановления от 23.07.2009 г. № 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве" Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил следующее. В частности, если кредитор до возбуждения дела о банкротстве произвел должнику предварительную оплату по договору, то требование кредитора о ее возврате в связи с расторжением данного договора не относится к текущим платежам независимо от даты его расторжения.

     Как указано выше, сумма оплаченных истцом (заказчиком) денежных  средств в данном случае  составила  16 402 289 160 руб. 63 коп. (15 701 856 410 руб. 31 коп. (перечислено по платежным поручениям  № 496109 от 04.09.2012 г., № 1601690 от  03.12.2013 г., № 1614561 от 09.12 2013 г., № 887049 от 22.05.2015 г., № 110112 от 29.05.2015 г. до принятия заявления о признании  ответчика несостоятельным (банкротом) + 700 432 750 руб. 32 коп. (перечислено по платежным поручениям № 181879 от 30.12.2015 г., № 181880 от 30.12.2015 г.  после принятия заявления о признании  ответчика несостоятельным (банкротом).  Ответчик  19.02.2018 г. произвел частичный возврат авансовых платежей на сумму  398 837 620 руб. 37 коп.

     Согласно пункту 4 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве.

     В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 названного Федерального закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

      Согласно статье 5 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими. Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов.

     В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 г. № 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве" разъяснено, что денежные обязательства относятся к текущим платежам, если они возникли после даты принятия заявления о признании должника банкротом, то есть даты вынесения определения об этом.

      Как разъяснено в п. 27 постановления от 22.06.2012г. № 35 в силу абз. 2 п. 1 ст. 63, абз. 2 п. 1 ст. 81, абз. 2 п. 1 ст. 94 и абз. 7 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты введения наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве в порядке ст. 71 или 100 Закона. В связи с этим все исковые заявления о взыскании с должника долга по денежным обязательствам и обязательным платежам, за исключением текущих платежей и неразрывно связанных с личностью кредитора обязательств должника-гражданина, поданные в день введения наблюдения или позднее во время любой процедуры банкротства, подлежат оставлению без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

      В пункте 28 постановления от 22.06.2012 г. № 35 разъяснено, что согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения наступает следующее последствие: по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным с взысканием с должника денежных средств, и кредитор в этом случае вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, установленном данным Законом.

      По этой причине, если исковое заявление о взыскании с должника долга по денежным обязательствам или обязательным платежам, за исключением текущих платежей, было подано до даты введения наблюдения, то в ходе процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления право выбора принадлежит истцу: либо по его ходатайству суд, рассматривающий его иск, приостанавливает производство по делу на основании части 2 статьи 143 АПК РФ, либо в отсутствие такого ходатайства этот суд продолжает рассмотрение дела в общем порядке; при этом в силу запрета на осуществление по подобным требованиям исполнительного производства в процедурах наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления (абзац четвертый пункта 1 статьи 63, абзац пятый пункта 1 статьи 81 и абзац второй пункта 2 статьи 95 Закона о банкротстве) исполнительный лист в ходе упомянутых процедур по такому делу не выдается. Суд не вправе приостановить по названному основанию производство по делу по своей инициативе или по ходатайству ответчика.

      При наличии соответствующего ходатайства истца суд приостанавливает производство по делу до даты признания должника банкротом (абзац седьмой пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве) или прекращения производства по делу о банкротстве, на что указывается в определении о приостановлении производства по делу. Впоследствии, если должник будет признан банкротом, суд по своей инициативе или по ходатайству любого участвующего в деле лица возобновляет производство по делу и оставляет исковое заявление без рассмотрения на основании пункта 4 части 1 статьи 148 АПК РФ.

     По смыслу разъяснений, изложенных в абз. 3 п. 28 постановления от 22.06.2012 г. № 35, право выбора порядка рассмотрения требований к должнику (в деле о банкротстве или в порядке искового судопроизводства) принадлежит кредитору только в процедурах наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления; с момента открытия в отношении имущества должника конкурсного производства рассмотрение денежных требований кредитора, возникших до принятия судом заявления о признании должника банкротом, возможно только в рамках дела о банкротстве в порядке, установленном статьей 142 Закон о банкротстве.

      Согласно правовой позиции, сформулированной в пункте 33 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016 г., если до вынесения решения судом первой инстанции в отношении ответчика будет открыто конкурсное производство, суд на основании пункта 4 части 1 статьи 148 АПК РФ должен оставить иск без рассмотрения, за исключением случаев, когда согласно законодательству о банкротстве соответствующее требование может быть рассмотрено вне рамок дела о банкротстве.

        В пункте 34 постановления от 22.06.2012 г. №35 разъяснено, что согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия судом решения о признании должника банкротом все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, перечисленных в пункте 1 статьи 134 данного Закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. 

       Как указано выше,  определением Арбитражного суда Хабаровского края от 15.06.2015 г. возбуждено производство по делу А73-8059/2015 о несостоятельности (банкротстве) ФГУП «ГВСУ №6».

      Решением суда от  29.08.2019 г. по делу А73-8059/2015 (резолютивная часть 28.08.2019 г.) ФГУП «ГВСУ №6» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

       Иск по настоящему делу предъявлен после вынесения определения о принятии заявления  о признании   ответчика о несостоятельности (банкротстве) и до введения  в отношении  ФГУП «ГВСУ №6»  процедуры наблюдения.

       Истец о приостановлении производства по настоящему делу после введения в отношении ответчика процедуры наблюдения не ходатайствовал.

       Между тем, на день принятия решения по настоящему делу (резолютивная часть  объявлена 30.01.2020 г.), в отношении ФГУП «ГВСУ №6»   введено конкурсное производство.

      Истцом заявлены исковые требования о взыскании неотработанного аванса  в сумме 5 298 486 093 руб. 87 коп., перечисленного  ответчику в период  с  04.09.2012 г. по 30.12.2015 г.  

      Указанный период следует разделить в зависимости от даты принятия заявления о признании ответчика банкротом (15.06.2015г.).

       Из материалов дела следует, что  после  15.06.2015 г.  истец перечислил ответчику  аванс  в сумме 700 432 750 руб. 32 коп. (платежные поручения № 181879 от 30.12.2015 г., № 181880 от 30.12.2015 г.). Ответчик  19.02.2018 г. произвел частичный возврат авансовых платежей истцу  на сумму  398 837 620 руб. 37 коп.  Таким образом, требование истца  в части взыскания авансовых платежей в размере 301 595 129 руб. 95 коп. (700 432 750 руб. 32 коп. - 398 837 620 руб. 37 коп.) относятся к текущим платежам и подлежит рассмотрению в порядке искового производства.

       Поскольку материалами дела подтвержден факт невыполнения ответчиком работ  по государственному  контракту  № 873-КИ106/12 от 03.07.2012 г. на сумму  перечисленных авансовых  (текущих) платежей 301 595 129 руб. 95 коп., не представлено доказательств возврата истцу денежных средств в  указанной сумме, исковое требование истца подлежит удовлетворению в сумме 301 595 129 руб. 95 коп.

      В остальной части  требования истца о взыскании авансовых платежей, перечисленных до 15.06.2015 г., не  относится  к текущим платежам, конкурсное производство в отношении ответчика открыто ранее  принятия решения суда по настоящему делу, заявленные истцом подлежат рассмотрению в деле о банкротстве.

      При таких обстоятельствах, исковое заявление  в этой части подлежит оставлению без рассмотрения на основании пункта 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

      По требованию ФКУ «Дирекция космодрома Восточный»  об обязании ответчика  передать документацию по контракту № 873-КИ106/12 от 03.07.2012г.  суд приходит к  следующим выводам.

     Истец просил обязать ответчика передать следующую документацию:  

1) перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ, с указанием контрактов, видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии у этих организаций свидетельств СРО в 1 экз. на бумажном носителе;

2)копии приказов по закреплению должностных лиц ответственными запроизводство инженерно-технических работ в 1 экз. на бумажном носителе;

5)  заверенные копии свидетельств СРО в 1 экз. на бумажном носителе;

6) комплект оригиналов рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, выполненным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ в 1 экз. на бумажном носителе;

5)исполнительную документацию в составе, установленном требованиямистроительных норм и правил на соответствующие здания, сооружения иконструкции, на исполнительную геодезическую документацию, а такжеусловиями контракта в 1 экз. на бумажном носителе;

6)оригиналы исполнительных схем, сформированных в установленном порядкепо всем инженерным системам в 1 экз. на бумажном носителе;

7)оригиналы сертификатов, технических паспортов и других документов,удостоверяющих качество и свойства материалов, конструкций и изделий,примененных при производстве работ в 1 экз. на бумажном носителе, заисключением следующих объектов:

ГП-1 Стартовое сооружение:

Блок А: Конструкция фундаментной плиты (СП2.1); Конструкция плиты перекрытия 3 этажа (СП2.12); Конструкция плиты перекрытия 2 этажа (СП2.16);

Блок Б: Конструкция фундаментной плиты (СП2.2); Конструкция плиты перекрытия 6 этажа (СП2.4); Конструкция стен 5 этажа и стен с отм.-23,200 до отм.-16,000 (СП2.5);

Инженерные системы:

Система В1;

Система К1Н;

Система К14Н;

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Планы расположения электрооборудования. Заземление. Журнал кабельный.";

ЭМЗ "Электрическое освещение";

ЭМ5 "Система ИДК"; 

ЭС "Электроснабжение";

ГП-2 Укрытие для обслуживающего персонала:

Конструкция плиты покрытия в осях 1-2/А-В до отм.-4,900; до отм.-6,900, отм.-7,100; (СПЗ.З) ;

Инженерные системы:

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 

СВ1 "Система сжатого воздуха сооружения 2"; 

ГП-3 Командный пункт:

Конструкция приямков плиты подвала в осях 1/А до отм.-3,000;

Конструкция стен приямка на отметке -1,400 в осях 1/А;

Конструкция фундаментной плиты в осях 1-10/А-Б до отм.-0,800; Конструкция стен подвала в осях 1-4/Б на отм.-1,400;

Конструкция стен подвала в осях 7-10/А до отм.-1,400; (СП3.1);

Конструкция стен первого этажа и пилонов в осях 1-10/А-Б;

(СП3.2)

Конструкция стен второго этажа и пилонов в осях 1-10/А-Б; (СП3.4); Конструкция перекрытия второго этажа в осях 1-10/А-Б; (СП3.5); 

Конструкция плиты покрытия СП3.7;

Конструкция фундамента под антенну СНИУБСИ в осях 6/Б;

Конструкция фундамента под антенну имитатора в осях 1-2/Б;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Электрическое освещение";

ЭМ4 "Система гарантированного электропитания";

ЭМ5 "Журнал кабельный";

ЭС "Электроснабжение";

Система КЗ;

Система К14;

12. ОВ1 "Отопление";

13. ОВ2 "Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха;

Система П1.1.

Система В 1.2.

Система П2.1.

Система В2.2.

Система П3.1.

Система В3.2.

Система П4.1.

Система В4.2.

Система П1.3.

Система В1.4.

Система В1.5.

Система П2.3.

Система В 2.4.

Система П2.5

Система В2.8.

Система В 2.6

Система В3.3.

Система В 4.3.

ПА2.9. 

ПА4.4.

ВД4.2 

ПД1. 

ПД2. 

ВГ, ВГ2.

СВ1 "Система сжатого воздуха сооружения 3";

ХС. Холодоснабжение;

ПТЗ. Система газового пожаротушения;

ГП-4 Технологический блок кислорода и азота:

Фундаменты Фм1-Фм17, Фо1-Фо2; (КЖ1.2);

Приливы П1-П8, фундаментная балка ФБм; (КЖ1.3);

Конструкция приямка между осями А-В/10-11 (КЖ 1.6);

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Электрическое освещение";

ЭС "Электроснабжение";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система В14;

Система ТЗ;

Система К1,К1Н;

Система К2;

Система К14;

Система К13;

Система К16;

ОВ1 "Отопление";

ОВ2 "Вентиляция и кондиционирование"; 

Система П1;

Система В2; 

Система ВАЗ, ПАЕЗ; 

Система П4; 

Система В5;

Система П6; 

Система В7;

Система ПА8; 

Система В9; 

Система В10; 

Система В11; 

Система ВД1.ВД2; 

Система ПДЕ1,ПДЕ2; 

Система ЭПУ 114.1, ЭПУ 114,2; 

УУТ "Узел учета тепла";

ГП-5 Технологический блок керосина и нафтила:

"Фундаменты монолитные Фм1- Фм10; Флм1-Флм4; Плита фундаментная

Пм 1 ,Пм2; Фундаменты монолитные Фм 1 -1,

Фм11-Фм13;(КЖ1.2)";

Фундаменты под оборудование Фо1-Фо7 (КЖ1.4);

Конструкция приямка в осях 7-8/А-Е (КЖ 1.6);

Конструкция приямка в осях 13-14/А-Ц (КЖ 1.7);

Колонны 1 этажа в осях 1-4 на отм.-0,100 (КЖ2.1);

Стены 1 этажа в осях 1-4 на отм.-0,100 (КЖ2.1);

Стены 1 этажа в осях 4-11 на отм.-0,100 (КЖ2.1);

Стены 2 этажа в осях 1-4 на отм.+3,520 (КЖ2.1);

Колонны 2 этажа в осях 1-4 на отм.+3,520 (КЖ2.1);

Стены 2 этажа в осях 4-11 на отм.+3,520 (КЖ2.1);

Плита перекрытия ППм1,ППм2,ППмЗ,ППм4,ППм5,ППм6 (КЖ2.2);

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Электрическое освещение";

ЭС "Электроснабжение";

АК "Автоматизация комплексная";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В2;

Система В1;

Система ТЗ, Т4;

Система ВЗ;

Система К1;

Система КЗ,К14Н;

Система К2;

ОВ1 "Отопление";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В2; 

Система В1; 

Система ТЗ, Т4; 

Система ВЗ;

Система Kl; 

Система КЗ, К14Н; 

Система К2;

0В1 "Отопление";

0В2 "Вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система П2; 

Система П3; 

Система П4; 

Система П5; 

Система В7; 

Система В6; 

Система В 9; 

Система В10; 

Система В11; 

Система В12; 

Система В13; 

Система В14;

Система ВД1; 

Система ВД2; 

Система ПДЕ1; 

Система ПДЕ2; 

Система ВГ1;

Система ВГ2;

ГП-6 Технологический блок сжатых газов:

Фундаменты монолитные Фм1-Фм23 (КЖ1.2);

Фундаментные ленты монолитные ФЛм1- ФЛмЗ (КЖ1.2);

Фундаментные балки монолитные ФБм1-ФБм14 (КЖ1.3);

Фундаменты под оборудование Фо1-Фо6 (КЖ1.4);

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Электрическое освещение";

ЭС "Электроснабжение";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В2;

Система К2;

ОВ2 "Вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система В2;

Система П3;

Система В4;

Система П5; 

Система В6; 

Система П7; 

Система В8; 

Система П9; 

Система В10; 

Система В11; 

Система В12;

Система ЭПУ 126.1, ЭПУ 126.2;

Система ВД1;

Система ВД2;

Система ВГ1;

Система ПДЕ1;

Система ПДЕ2;

ГП-7 Насосная станция технологического пожаротушения:

Конструкция фундаментной плиты СП3.1;

Конструкция плиты покрытия СП3.1;

Конструкция входов СП3.1;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭС "Электроснабжение";

АК "Автоматизация комплексная";

ОВ1 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система В2;

Система П3.1, ПЗ.2;

Система В4.1, В4.2;

Система П5;

Система В6;

Система П7.1, П7.2;

Система В8;

Система В9;

ГП-8 Укрытие для обслуживающего персонала:

Конструкция фундаментной плиты СП3.1;

Конструкция покрытия СП3.3;

Конструкции входов СП3.4;

Инженерные системы:

ЭМ «Силовое электрооборудование»;

ОВ «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СВ1 "Система сжатого воздуха сооружения 8";

ГП-10 Холодильный центр:

Фундаменты Фм1-1, Фм2-1, Фм2-2, ФМ3-1, Фм3-2, Фм4-1, Фм4-2, Фм5, Фм6,

Фм7-1, Фм7-2, Фм8-1, Фм8-2, Фм8-3, Фм9, Фм10-1, Фм10-2, Фм10-3, Фм11,

Фм12-1, Фм12-2, Фм13, Фм14;

Монолитные плиты Пм1, Пм2 в осях А-Б/2-5 и 7-8;

Фундаменты под оборудование Фо1, Фо2, Фо3, Фо4, Фо5 в осях А-Б/2-5;

Фундаментная плита приямков Прм1; Прм2, Пр1, Пр2;

Стены приямков Прм1, Прм2, Пр1, Пр2;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭС "Электроснабжение";

АК "Автоматизация комплексная";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система ТЗ;

Система К1;

Система К2;

Система К14Н;

ОВ "Отопление и вентиляция";

ГП-12 Насосная станция оборотного водоснабжения с резервуарами и градирнями:

Фундамент ленточный Фл1, Фл2, КЖ1;

Плита днища монолитная Пм 1 КЖ2;

Стены монолитные Стм1. Колонны К1 КЖ2;

Плита покрытия монолитная Пм2 КЖ2;

Парапет монолитный Пр1 КЖ2;

Плита монолитная ПмЗ;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

АК "Автоматизация комплексная";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система В4,В5;

Система ТЗ;

Система К1, К14, К14Н, К16;

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система В1-В3;

Система ВЕ1-ВЕ5;

ГП-14 Административно-служебное здание:

Фундаментная лента Флм1 в осях 1/8-Г/Ж КЖ1.2; 

Фундаментная лента Флм1 в осях 9/20-ГУЖ КЖ1.2;

Приямок Пр1, Пр2 КЖ1.3; 

Плита перекрытия ППм1 КЖ1.3;

Плиты перекрытия Пм1, Пм2 КЖ1.3; 

Стены Стм1 между осями 1-8/Г-Ж КЖ2.1; 

Стены Стм1 между осями 9-20/Г-Л КЖ2.1; 

Стены Стм3 между осями 1-8/Г-Ж КЖ2.1; 

Стены Стм3 между осями 9-20/Г-Л КЖ2.1; 

Стены Стм4 между осями 5-6/Е-Ж, 9-17/Д-Ж КЖ2.1; 

Парапет Пр1 КЖ2.1;

Плита перекрытия на отм.+3,280 КЖ2.2.1;

Плита покрытия на отм.+3,350 КЖ2.2.1;

Плита покрытия на отм.+6,880 КЖ2.2.2;

Плита покрытия на отм.+10,480 КЖ2.2.3;

Плита покрытия на отм.+14,900 КЖ2.2.4;

Плита покрытия на отм.+13,620 между осями 5, 6 КЖ2.2.4;

Плита покрытия на отм.+13,620 между осями 16,17 КЖ2.2.4;

Плита покрытия на отм.+14,080 КЖ2.2.4;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Электроосвещение";

ЭМ2 "Силовое электрооборудование";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система ТЗ;

Система К2;

Система К1, К1Н;

ОВ2 "Вентиляция";

Система П1;

Система В2;

Система П3;

Система В4;

Система П5;

Система В6;

Система П7;

Система В8;

Система П9;

Система В10;

Система П11;

Система В12;

Система П13;

Система В14;

Система В15;

Система П16; 

Система B l7; 

Система В18; 

Система В19; 

Система МО1; 

Система МО2; 

Система МОЗ;

 Система ВД1;

 Система ВД2;

ГП-15 Караульное помещение с гаражом на 1 автомобиль:

Стены монолитные на отм-0,700; -0,120;

Плита покрытия ППм 1 КЖ2;

Стены монолитные Стм1,Стм2,СтмЗ КЖ4;

Крыльцо КрЗ КЖ4;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система ТЗ;

Система К2;

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; 

Система П1; 

Система В2; 

Система В4; 

Система В5;

ГП-16 Контрольно-пропускной пункт:

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ГП-17 Центральный распределительный пункт:

Фундаментная плита тоннеля на отм.(-5,350, -4,800) в осях 1/Б-В;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭС1 "Конструктивные чертежи";

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система В2;

ГП-18 Хранилище ЗИП:

Крыльцо Kpl;

Фундамент монолитный Фм1 в осях 1-4/А-Б с отм. -3,400 м до отм. -1,700 м; Конструкция плиты основания;

Фрагмент 1 Участок 1 Т16-ГП1;

Фрагмент 1 Участок 2 Т16-Т17;

Фрагмент 1 Участок 3 Т16-ГП5;

Фрагмент 1 Участок 4 Т12-ГП5;

Фрагмент 1 Участок 5 Tl1-Т12;

Фрагмент 1 Участок 6 Т11-ГП4;

Фрагмент 1 Участок 7 Т14-ГП4;

Фрагмент 1 Участок 8 Т15-Т14-Т11;

Фрагмент 1 Участок 9 Т15-ГП1;

Фрагмент 1 Участок 10 Т12-ГП1;

Фрагмент 2 Участок 1 Т10-Т11;

Фрагмент 2 Участок 2 Т9-Т10;

Фрагмент 2 Участок 3 Т8-Т9-ГП17;

Фрагмент 2 Участок 4 Т8-ГП6;

Фрагмент 2 Участок 5 Т10-Т13-ГП7-ГП10;

Фрагмент 2 Участок 6 Т12-Т13;

Фрагмент 2 Участок 7 Т13-ГП12;

Инженерные системы:

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

Система В1;

Система В2;

Система ВЗ;

Система В4;

Система В5.1,В5.2;

Система В6;

Система П7;

Система П8;

Система ВГТ1;

Система ВЕ1-ВЕ9;

ЭС "Электроснабжение";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система В2;

Система ТЗ;

Система К1, К16;

Система К2;

Система К13,17;

ОВ "Отопление и вентиляция";

Система П1;

Система В1-ВЗ;

Система BE 1-ВЕ6;

ЭМ "Силовое электрооборудование";

ЭМ1 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т1 и прилегающих туннелей";

ЭМ2 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т2, прилегающих тоннелей, ВкЗ, Вк4 и Вк7";

ЭМЗ "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т3 и прилегающих туннелей, Вк2";

ЭМ4 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т4 и прилегающих туннелей, Вк1";

ЭМ5 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т5 и прилегающих туннелей";

ЭМ6 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т6 и прилегающих туннелей";

ЭМ7 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т7 и прилегающих туннелей";

ЭМ8 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т8 и прилегающих туннелей";

ЭМ9 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т9 и прилегающих туннелей";

ЭМ10 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т10 и прилегающих туннелей";

ЭМ11 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Tl1 и прилегающих туннелей";

ЭМ12 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т12 и прилегающих туннелей";

ЭМ13 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т13 и прилегающих туннелей";

ЭММ "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т14 и прилегающих туннелей, Вк6";

ЭМ15 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т15 и прилегающих туннелей";

ЭМ16 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т1б и прилегающих туннелей";

ЭМ17 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т17 и прилегающих туннелей, Вк5";

ЭМ18 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т18 и прилегающих туннелей";

Т1-Т18 Камеры разводки коммуникаций:

Сооружение Т1;

Сооружение Т2;

Сооружение ТЗ;

Сооружение Т4;

Сооружение Т5; 

Сооружение Т6; 

Сооружение Т7; 

Сооружение Т8; 

Сооружение Т9; 

Сооружение Т10; 

Сооружение Т11; 

Сооружение Т12; 

Сооружение Т13; 

Сооружение Т14; 

Сооружение Т15; 

Инженерные системы: 

Система В1;

Система К14;

Система К14Н;

Система В1; 

Система К14;

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н;

Система В1; 

Система К14;

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1;

Система В4;

Система В5; 

Система К14; 

Система К14Н;

Система В1;

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система В4; 

Система В5; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система В4; 

Система В5;

Система К14; 

Система К14Н; 

Система К14; 

Система К14Н;

ОВ1 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т1 и примыкающих тоннелей";

Система П1;

Система П2;

ОВ2 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т2 и примыкающих тоннелей";

Система П3;

Система П4;

ОВ3 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ТЗ и примыкающих тоннелей";

Система П5; 

Система П6;

ОВ4 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т4 и примыкающих тоннелей";

Система П7;

Система П8; 

Система В41; 

Система В42;

ОВ5 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т5 и примыкающих тоннелей";

Система П9; 

Система П10;

ОВ6 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т6 и примыкающих тоннелей";

Система П57;

ОВ7 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т7 и примыкающих тоннелей";

Система П77; 

Система П78; 

Система В48;

Система В84;

ОВ8 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т8 и примыкающих тоннелей";

Система П11;

 Система П12; 

Система В49; 

Система В50; 

Система В51;

ОВ9 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т9 и примыкающих тоннелей";

Система П27; 

Система П33;

ОВ10 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т10 и примыкающих тоннелей"; 

Система П79; 

Система П80; 

Система В90;

ОВ 11 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т11 и

примыкающих тоннелей";

Система П13;

Система П14;

Система В 62;

Система В 63;

ОВ12 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т12 и примыкающих тоннелей";

 Система П22; 

Система П23;

ОВ14 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т14 и примыкающих тоннелей";

Система В64; 

Система В65;

ОВ15 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т15 и примыкающих тоннелей";

Система П16;

 Система П88;

 Система В76;

ОВ16 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т16 и примыкающих тоннелей"

Система П21;

 Система В 69;

ОВ17 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т17 и примыкающих тоннелей"

Система П82;

 Система В70;

 Система В71;

ОВ19 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ВК1 и примыкающих тоннелей"

Система В44;

ОВ20 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ВК2 и примыкающих тоннелей"

Система В39; 

Система В40;

ОВ21 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ВКЗ и примыкающих тоннелей"

Система В36;

 Система В37;

ОВ22 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ВК4 и примыкающих тоннелей"

Система В29; 

Система ВЗО;

ГП-31 Площадка обслуживания ТУА:

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система ТЗ;

Система К1;

Система К2;

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" 

Система П1;

 Система BE 1-BE11;

8) Оригиналы актов освидетельствования скрытых работ в 1 экз. на бумажном носителе;

9) Оригиналы актов освидетельствования ответственных конструкций в 1 экз. на бумажном носителе;

10) Оригиналы актов испытаний на все выполненные работы по конструктивам и инженерным системам с приложением реестра на указанные акты в 1 экз. на бумажном носителе;

11) Копии договоров и актов сверок по взаиморасчетам с поставщиками электроснабжения, тепло - водоснабжения в 1 экз. на бумажном носителе;

12) Копии контрактов с подрядчиками и поставщиками, заключенных для исполнения условий контракта, а также копии актов сверки взаиморасчетов с подрядчиками и поставщиками в 1 экз. на бумажном носителе;

13) Копии подтверждающих первичных документов на передаваемые материалы и оборудование (договоров, счетов-фактур, платежных поручений, паспортов материалов и оборудования) в 1 экз. на бумажном носителе;

14) Оригиналы паспортов на передаваемое и смонтированное оборудование в 1 экз. на бумажном носителе;

15) Оригиналы заполненных общих журналов производства работ за период выполнения работ в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в следующем количестве:

ГП-1 Стартовое сооружение: -12 шт.;

ГП-2 Укрытие для обслуживающего персонала: - 1 шт.;

ГП-3 Командный пункт: - 5 шт.;

ГП-4 Технологический блок кислорода и азота: - 4 шт.; ГП-5 Технологический блок керосина и нафтила: - 7 шт.; ГП-б Технологический блок сжатых газов: - 4 шт.; ГП-8 Укрытие для обслуживающего персонала: - 2 шт.; ГП-10 Холодильный центр: - 1 шт.;

ГП-12 Насосная станция оборотного водоснабжения с резервуарами и градирнями: - 1 шт.;

ГП-14 Административно-служебное здание: - 3 шт.;

ГП-15 Караульное помещение с гаражом на 1 автомобиль: - 1 шт.;

ГП-16 Контрольно-пропускной пункт: - 2 шт.;

ГП-17 Центральный распределительный пункт: - 2 шт.;

ГП-31 Площадка обслуживания ТУ А: - 1 шт.

16) Оригиналы заполненных специальных журналов работ и входного контроля за период выполнения строительно-монтажных работ в 1 экз. на бумажном носителе в следующем количестве:

ГП-1 Стартовое сооружение: - 13 шт.; 

ГП-3 Командный пункт: - 3 шт.;

ГП-4 Технологический блок кислорода и азота: - 8 шт.; 

ГП-5 Технологический блок керосина и нафтила: - 9 шт.;

ГП-6 Технологический блок сжатых газов: -4; шт.;

ГП-7 Насосная станция технологического пожаротушения: - 4 шт.;

ГП-8 Укрытие для обслуживающего персонала: - 2 шт.;

ГП-10 Холодильный центр: - 5 шт.;

ГП-14 Административно-служебное здание: - 2 шт.;

ГП-15 Караульное помещение с гаражом на 1 автомобиль: - 1 шт.;

ГП-16 Контрольно-пропускной пункт: - 5 шт.;

ГП-17 Центральный распределительный пункт: - 1 шт.;

ГП-31 Площадка обслуживания ТУА: - 2. шт.

17) Оригиналы заполненных журналов учета выполненных работ (форма КС-ба) в 1 экз. на бумажном носителе;

18) Заверенные копии актов и протоколов по результатам проверок, проведенных в процессе строительства федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, в том числе ГАСН, а также уведомлений об их исполнении в 1 экз. на бумажном носителе;

19) Оригиналы актов об устранении замечаний, выданных в процессе строительства ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» и представителями авторского надзора в 1 экз. на бумажном носителе.

   Данное требование ФКУ «Дирекция космодрома Восточный»  суд, принимая во внимание условия заключенного между сторонами государственного контракта № 873-КИ106/12 от 03.07.2012 г. и  условия утвержденного мирового соглашения от 28.02.2017 г., считает  обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

     В соответствии с пунктами  2, 3 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. 

     Разделом 7 контракта установлены обязанности генподрядчика, согласно которым генподрядчик обязан: 

     - обеспечить производство работ на объекте необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, строительной техникой, трудовыми ресурсами, оборудованием (пункт 7.2.9.); 

     - все поставляемые генподрядчиком для производства работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

     Копии сертификатов должны быть представлены заказчику (пункт 7.2.10.); 

   - предоставлять по требованию заказчика ежемесячные отчеты о ходе отработки полученного аванса и предоставлять необходимые документы (пункт 7.2.13);

     - передать по окончании работ государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период работ и сохраняемых до их окончания (пункт 7.2.19); 

     - нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками, заключившими договор (контракты) с генподрядчиком (пункт 7.2.20); 

    - осуществлять охрану строительной площадки и объекта в порядке, установленном контрактом (пункт 7.2.23); 

     - нести расходы по содержанию объекта до даты подписания итогового акта выполненных работ по контракту (пункт 7.2.21); 

     - к моменту приемки объекта представить заказчику необходимые исполнительные чертежи наружных коммуникаций, согласованные с соответствующими специализированными организациями, акты скрытых работ и иных работ по указанным коммуникациям, в том числе акты приема-передачи по проложенным инженерным сетям и сооружениям, оформленные в установленном порядке, и акты приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию инженерных сооружений, входящих в объем работ по контракту, а также иные документы, установленные статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (пункт 7.2.22); 

     - представить заказчику, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы власти свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, приказ о назначении представителя генподрядчика, ответственного за строительство, его подписку по установленной форме и другие необходимые документы (пункт 7.2.26); 

     - разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ, при необходимости согласовать проекты производства работ субподрядных организаций (пункт 7.2.28); 

     - представить заказчику для промежуточной приемки выполненных работ исполнительную документацию на объем выполненных работ (пункт 7.2.31);

     - постоянно вести журнал производства работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы (пункт 7.2.36);

     Согласно пункту 8.2 контракта при необходимости генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение. 

     Пунктом 9.1 контракта предусмотрено, что для осуществления строительного контроля и технического надзора за выполнением работ заказчик соответствующим приказом назначает на строительной площадке своих уполномоченных представителей и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания контракта направляет копию этого приказа генподрядчику. 

     Уполномоченные представители заказчика от его имени и в пределах своих полномочий обязаны осуществлять технический надзор и контроль выполнения генподрядчиком работ, а также проверку соответствия используемых генподрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования условиям настоящего контракта и рабочей документации, строительным нормам и правилам, и другими нормативными актами Российской Федерации. 

     Уполномоченные представители государственного заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых генподрядчиком работ в течение всего периода их выполнения. При этом они не вмешиваются в финансово-хозяйственную деятельность генподрядчика. В случае замены своих уполномоченных представителей государственный заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить об этом генподрядчика. 

     В соответствии с пунктом 12.1.1 контракта промежуточная приемка выполненных работ за отчетный месяц производится заказчиком следующим образом: сдача-приемка выполненных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма № КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма № КС- 2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

     Генподрядчик предоставляет заказчику первичные учетные документы, а также исполнительную документацию на выполненные работы, оформленные должным образом, с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца (пункт 12.1.2 контракта).

     В соответствии с пунктом 19.2 контракта при расторжении контракта до завершения работ генподрядчик возвращает заказчику в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства работ финансовые средства, в т.ч. авансовые платежи, и незавершенный строительством объект и представляет государственному заказчику документы, подтверждающие стоимость выполненных работ, а также освобождает строительную площадку и передает заказчику проектную, рабочую и исполнительную документации. 

     В соответствии с п. (б) ч. 6 раздела II Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (утвержденных приказом Федеральной службы но экологическому, технологическому атомному надзору от 26.12.2006 № 1128. РД-11-02-2006) в состав исполнительной документации включаются следующие материалы: б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

     В перечень итоговой исполнительной документации для получения заключения о соответствии (ЗОС) входит Первичная исполнительная документация (СП 70.13330.2012, п. 3.23): 1. Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; 

     2. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; 

     3. Сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, санитарно-эдидемиологические сертификаты, технические паспорта, технические свидетельства и т.д. удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ; 

     4. Акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке ответственных конструкций. Исполнительные геодезические схемы; 

     5. Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; 

     6. Акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом;

     7. Акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей; 8. Акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации; 

     9. Акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасноеть и молниезащиту; 

     10. Акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах; 

     11. Журналы общие, специальные и авторского надзора; 

     12. Материалы обследований и строительно-технических экспертиз, проведенных в процессе строительства проектными организациями и независимыми экспертными учреждениями; 

     13. Документы (акты и исполнительные схемы) на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства; 

     14. Паспорта на оборудование и механизмы. Кроме того, без наличия первичной документации невозможно формирование полной стоимости объекта строительства, соответственно невозможно и оформление Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) и ввод объекта в эксплуатацию.      В соответствии со статьей 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда), проектной документацией, требованиями к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

     Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных  недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов. 

     В соответствии с п. (в, г) ч. 6 раздела II Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору от 26.12.2006 № 1128, РД-11-02-2006), в состав исполнительной документации включаются следующие материалы:

     в) акты испытания и опробования технических устройств;      г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

     В соответствии с п. 4.17 СНиП 3.01.04-87 Строительные нормы и правила Заказчик (ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный») представляет государственным приемочным комиссиям документацию, перечисленную в п. 3.5, а также:  паспорта на оборудование и механизмы;  акты о приемке здании и сооружений, смонтированного оборудования, составленные рабочими комиссиями. 

     Таким образом, условиями контракта, нормами Градостроительного кодекса, СниПами, требованиями, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору от 26.12.2006 № 1128. РД-11-02-2006, предусмотрено наличие запрашиваемых у ответчика пакета документов. 

     Поскольку ответчик не доказал, что  в полном объеме передал истцу  вышеуказанный комплект документов, возражения ответчика судом отклонены.   

      Оценив представленные доказательства в совокупности,   принимая во внимание, что контракт в настоящее время расторгнут, приёмка законченного строительством объекта не производилась,  учитывая при этом необходимость соблюдения истцом своих обязанностей перед государственной приемочной комиссией  по приемки объекта в эксплуатацию,  суд приходит к выводу  об обоснованности, доказанности данных заявленных истцом требований.

      На основании установленных по делу  обстоятельств, исковые требования ФКУ «Дирекция космодрома Восточный»  об обязании ответчика передать документацию подлежат удовлетворению.

      Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

    В соответствии с   частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

     В ходе рассмотрения настоящего дела для определения стоимости выполненных работ по предъявленным ответчиком односторонним актам формы КС-2 по государственному контракту № 873-КИ106/12 от 03.07.2012 г., судом назначалась комиссионная судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено Федеральному бюджетному учреждению Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, экспертам ФИО6, ФИО7 и экспертам ООО «Экспертно-юридический центр «Русгарант» ФИО8, ФИО9, ФИО10.  

      Определением суда от 23.01.2018 г. к проведению  экспертизы  привлечен эксперт Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации ФИО11.

     Как следует из материалов дела, определением суда от 07.06.2017 г.  обязанность по оплате  судебной экспертизы возложена на Федеральное казенное учреждение «Дирекция космодрома Восточный», Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос».

     Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» перечислены на депозитный счет Арбитражного суда Хабаровского края денежные средства на оплату судебной экспертизы  в сумме 16 000 000 руб. 00 коп. по платежному поручению № 13608 от 26.05.2017 г.

     Федеральным бюджетным учреждением Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации  проведена судебная строительно-техническая экспертиза, заключение судебной  экспертизы представлено в материалы дела. 

       Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации после проведения экспертизы  обратилось с письмом об оплате стоимости  экспертизы, указав, что величина расходов данного экспертного учреждения, составляющих стоимость экспертизы, на момент окончания экспертизы в общем размере составила  8 135 593 руб. 22 коп. (в том числе перечисленный аванс в размере 2 400 000 руб. 00 коп. определением суда от  26.01.2018 г.).

     ООО «Экспертно-юридический центр «Русгарант» величина расходов данного экспертного учреждения, составляющих стоимость экспертизы, на момент окончания экспертизы  определена в общей сумме  8 000 000 руб. (в том числе перечисленный аванс в размере 2 400 000 руб. 00 коп. определением суда от  26.01.2018 г.).

     Федеральным бюджетным учреждением Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации представлен счет № 0000-000258 от 25.03.2019 г. на оплату за проведение строительно-технической экспертизы №2957/19-3 по делу №А73-2328/2017 на сумму 5 735 593 руб. 22 коп., в т.ч. НДС 20%. (8 135 593 руб. 22 коп. -2 400 000 руб. 00 коп.).

      ООО «Экспертно-юридический центр «Русгарант» представлен счет № 17 от 01.04.2019 г. на оплату за проведение строительно-технической экспертизы №2957/19-3 по делу №А73-2328/2017 на сумму 5 600 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается) (8 000 000 руб.  - 2 400 000 руб. 00 коп.).

     Определением суда от 29.05.2019 г. Федеральному бюджетному учреждению Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского края выплачены денежные средства в сумме  5 600 000 руб. 00 коп.  за проведение судебной экспертизы по делу № А73-2328/2017  на основании счета №  0000-000258 от 25.03.2019 г., перечисленные Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» платежным поручением № 1360 от 26.05.2017 г.       Определением суда от 29.05.2019 г. ООО «Экспертно-юридический центр «Русгарант» с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского края выплачены денежные средства в сумме  5 600 000 руб. 00 коп.  за проведение судебной экспертизы по делу № А73-2328/2017  на основании счета № 17 от 01.04.2019 г., перечисленные Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» платежным поручением № 1360 от 26.05.2017 г.      На основании вышеизложенного расходы по оплате судебной экспертизы в  размере 16 000 000 руб. 00 коп. подлежат взысканию с Федерального  государственного унитарного предприятия «Главное военно - строительное управление №6» в пользу Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

     Поскольку стоимость проведения      Федеральным бюджетным учреждением Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации строительно-технической экспертизы №2957/19-3 по делу №А73-2328/2017  составила 8 135 593 руб. 22 коп. с ответчика  в пользу      Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации подлежат взысканию  расходы за выполненную судебную  экспертизу в сумме  135 593 руб. 22 коп. (8 135 593 руб. 22 коп. – 2 400 000 руб. 00 коп. (аванс)  - 5 600 000 руб. 00 коп. (перечислено экспертному учреждению с депозитного счета суда  после проведения экспертизы) = 135 593 руб. 22 коп.). 

      Расходы по госпошлине распределяются в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 148, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно - строительное управление №6» в пользу Федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома Восточный» долг в сумме 301 595 129 руб. 95 коп.

Обязать Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно - строительное управление №6» передать Федеральному казенному учреждению «Дирекция космодрома Восточный» в тридцатидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда следующие документы: 

1) перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ, с указанием контрактов, видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии у этих организаций свидетельств СРО в 1 экз. на бумажном носителе;

2)копии приказов по закреплению должностных лиц ответственными запроизводство инженерно-технических работ в 1 экз. на бумажном носителе;

7)  заверенные копии свидетельств СРО в 1 экз. на бумажном носителе;

8) комплект оригиналов рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, выполненным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ в 1 экз. на бумажном носителе;

5)исполнительную документацию в составе, установленном требованиямистроительных норм и правил на соответствующие здания, сооружения иконструкции, на исполнительную геодезическую документацию, а такжеусловиями контракта в 1 экз. на бумажном носителе;

6)оригиналы исполнительных схем, сформированных в установленном порядкепо всем инженерным системам в 1 экз. на бумажном носителе;

7)оригиналы сертификатов, технических паспортов и других документов,удостоверяющих качество и свойства материалов, конструкций и изделий,примененных при производстве работ в 1 экз. на бумажном носителе, заисключением следующих объектов:

ГП-1 Стартовое сооружение:

Блок А: Конструкция фундаментной плиты (СП2.1); Конструкция плиты перекрытия 3 этажа (СП2.12); Конструкция плиты перекрытия 2 этажа (СП2.16);

Блок Б: Конструкция фундаментной плиты (СП2.2); Конструкция плиты перекрытия 6 этажа (СП2.4); Конструкция стен 5 этажа и стен с отм.-23,200 до отм.-16,000 (СП2.5);

Инженерные системы:

Система В1;

Система К1Н;

Система К14Н;

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Планы расположения электрооборудования. Заземление. Журнал кабельный.";

ЭМЗ "Электрическое освещение";

ЭМ5 "Система ИДК"; 

ЭС "Электроснабжение";

ГП-2 Укрытие для обслуживающего персонала:

Конструкция плиты покрытия в осях 1-2/А-В до отм.-4,900; до отм.-6,900, отм.-7,100; (СПЗ.З) ;

Инженерные системы:

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 

СВ1 "Система сжатого воздуха сооружения 2"; 

ГП-3 Командный пункт:

Конструкция приямков плиты подвала в осях 1/А до отм.-3,000;

Конструкция стен приямка на отметке -1,400 в осях 1/А;

Конструкция фундаментной плиты в осях 1-10/А-Б до отм.-0,800; Конструкция стен подвала в осях 1-4/Б на отм.-1,400;

Конструкция стен подвала в осях 7-10/А до отм.-1,400; (СП3.1);

Конструкция стен первого этажа и пилонов в осях 1-10/А-Б;

(СП3.2)

Конструкция стен второго этажа и пилонов в осях 1-10/А-Б; (СП3.4); Конструкция перекрытия второго этажа в осях 1-10/А-Б; (СП3.5); 

Конструкция плиты покрытия СП3.7;

Конструкция фундамента под антенну СНИУБСИ в осях 6/Б;

Конструкция фундамента под антенну имитатора в осях 1-2/Б;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Электрическое освещение";

ЭМ4 "Система гарантированного электропитания";

ЭМ5 "Журнал кабельный";

ЭС "Электроснабжение";

Система КЗ;

Система К14;

12. ОВ1 "Отопление";

13. ОВ2 "Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха;

Система П1.1.

Система В 1.2.

Система П2.1.

Система В2.2.

Система П3.1.

Система В3.2.

Система П4.1.

Система В4.2.

Система П1.3.

Система В1.4.

Система В1.5.

Система П2.3.

Система В 2.4.

Система П2.5

Система В2.8.

Система В 2.6

Система В3.3.

Система В 4.3.

ПА2.9. 

ПА4.4.

ВД4.2 

ПД1. 

ПД2. 

ВГ, ВГ2.

СВ1 "Система сжатого воздуха сооружения 3";

ХС. Холодоснабжение;

ПТЗ. Система газового пожаротушения;

ГП-4 Технологический блок кислорода и азота:

Фундаменты Фм1-Фм17, Фо1-Фо2; (КЖ1.2);

Приливы П1-П8, фундаментная балка ФБм; (КЖ1.3);

Конструкция приямка между осями А-В/10-11 (КЖ 1.6);

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Электрическое освещение";

ЭС "Электроснабжение";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система В14;

Система ТЗ;

Система К1,К1Н;

Система К2;

Система К14;

Система К13;

Система К16;

ОВ1 "Отопление";

ОВ2 "Вентиляция и кондиционирование"; 

Система П1;

Система В2; 

Система ВАЗ, ПАЕЗ; 

Система П4; 

Система В5;

Система П6; 

Система В7;

Система ПА8; 

Система В9; 

Система В10; 

Система В11; 

Система ВД1.ВД2; 

Система ПДЕ1,ПДЕ2; 

Система ЭПУ 114.1, ЭПУ 114,2; 

УУТ "Узел учета тепла";

ГП-5 Технологический блок керосина и нафтила:

"Фундаменты монолитные Фм1- Фм10; Флм1-Флм4; Плита фундаментная

Пм 1 ,Пм2; Фундаменты монолитные Фм 1 -1,

Фм11-Фм13;(КЖ1.2)";

Фундаменты под оборудование Фо1-Фо7 (КЖ1.4);

Конструкция приямка в осях 7-8/А-Е (КЖ 1.6);

Конструкция приямка в осях 13-14/А-Ц (КЖ 1.7);

Колонны 1 этажа в осях 1-4 на отм.-0,100 (КЖ2.1);

Стены 1 этажа в осях 1-4 на отм.-0,100 (КЖ2.1);

Стены 1 этажа в осях 4-11 на отм.-0,100 (КЖ2.1);

Стены 2 этажа в осях 1-4 на отм.+3,520 (КЖ2.1);

Колонны 2 этажа в осях 1-4 на отм.+3,520 (КЖ2.1);

Стены 2 этажа в осях 4-11 на отм.+3,520 (КЖ2.1);

Плита перекрытия ППм1,ППм2,ППмЗ,ППм4,ППм5,ППм6 (КЖ2.2);

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Электрическое освещение";

ЭС "Электроснабжение";

АК "Автоматизация комплексная";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В2;

Система В1;

Система ТЗ, Т4;

Система ВЗ;

Система К1;

Система КЗ,К14Н;

Система К2;

ОВ1 "Отопление";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В2; 

Система В1; 

Система ТЗ, Т4; 

Система ВЗ;

Система Kl; 

Система КЗ, К14Н; 

Система К2;

0В1 "Отопление";

0В2 "Вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система П2; 

Система П3; 

Система П4; 

Система П5; 

Система В7; 

Система В6; 

Система В 9; 

Система В10; 

Система В11; 

Система В12; 

Система В13; 

Система В14;

Система ВД1; 

Система ВД2; 

Система ПДЕ1; 

Система ПДЕ2; 

Система ВГ1;

Система ВГ2;

ГП-6 Технологический блок сжатых газов:

Фундаменты монолитные Фм1-Фм23 (КЖ1.2);

Фундаментные ленты монолитные ФЛм1- ФЛмЗ (КЖ1.2);

Фундаментные балки монолитные ФБм1-ФБм14 (КЖ1.3);

Фундаменты под оборудование Фо1-Фо6 (КЖ1.4);

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭМ2 "Электрическое освещение";

ЭС "Электроснабжение";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В2;

Система К2;

ОВ2 "Вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система В2;

Система П3;

Система В4;

Система П5; 

Система В6; 

Система П7; 

Система В8; 

Система П9; 

Система В10; 

Система В11; 

Система В12;

Система ЭПУ 126.1, ЭПУ 126.2;

Система ВД1;

Система ВД2;

Система ВГ1;

Система ПДЕ1;

Система ПДЕ2;

ГП-7 Насосная станция технологического пожаротушения:

Конструкция фундаментной плиты СП3.1;

Конструкция плиты покрытия СП3.1;

Конструкция входов СП3.1;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭС "Электроснабжение";

АК "Автоматизация комплексная";

ОВ1 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система В2;

Система П3.1, ПЗ.2;

Система В4.1, В4.2;

Система П5;

Система В6;

Система П7.1, П7.2;

Система В8;

Система В9;

ГП-8 Укрытие для обслуживающего персонала:

Конструкция фундаментной плиты СП3.1;

Конструкция покрытия СП3.3;

Конструкции входов СП3.4;

Инженерные системы:

ЭМ «Силовое электрооборудование»;

ОВ «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СВ1 "Система сжатого воздуха сооружения 8";

ГП-10 Холодильный центр:

Фундаменты Фм1-1, Фм2-1, Фм2-2, ФМ3-1, Фм3-2, Фм4-1, Фм4-2, Фм5, Фм6,

Фм7-1, Фм7-2, Фм8-1, Фм8-2, Фм8-3, Фм9, Фм10-1, Фм10-2, Фм10-3, Фм11,

Фм12-1, Фм12-2, Фм13, Фм14;

Монолитные плиты Пм1, Пм2 в осях А-Б/2-5 и 7-8;

Фундаменты под оборудование Фо1, Фо2, Фо3, Фо4, Фо5 в осях А-Б/2-5;

Фундаментная плита приямков Прм1; Прм2, Пр1, Пр2;

Стены приямков Прм1, Прм2, Пр1, Пр2;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭС "Электроснабжение";

АК "Автоматизация комплексная";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система ТЗ;

Система К1;

Система К2;

Система К14Н;

ОВ "Отопление и вентиляция";

ГП-12 Насосная станция оборотного водоснабжения с резервуарами и градирнями:

Фундамент ленточный Фл1, Фл2, КЖ1;

Плита днища монолитная Пм 1 КЖ2;

Стены монолитные Стм1. Колонны К1 КЖ2;

Плита покрытия монолитная Пм2 КЖ2;

Парапет монолитный Пр1 КЖ2;

Плита монолитная ПмЗ;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

АК "Автоматизация комплексная";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система В4,В5;

Система ТЗ;

Система К1, К14, К14Н, К16;

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система В1-В3;

Система ВЕ1-ВЕ5;

ГП-14 Административно-служебное здание:

Фундаментная лента Флм1 в осях 1/8-Г/Ж КЖ1.2; 

Фундаментная лента Флм1 в осях 9/20-ГУЖ КЖ1.2;

Приямок Пр1, Пр2 КЖ1.3; 

Плита перекрытия ППм1 КЖ1.3;

Плиты перекрытия Пм1, Пм2 КЖ1.3; 

Стены Стм1 между осями 1-8/Г-Ж КЖ2.1; 

Стены Стм1 между осями 9-20/Г-Л КЖ2.1; 

Стены Стм3 между осями 1-8/Г-Ж КЖ2.1; 

Стены Стм3 между осями 9-20/Г-Л КЖ2.1; 

Стены Стм4 между осями 5-6/Е-Ж, 9-17/Д-Ж КЖ2.1; 

Парапет Пр1 КЖ2.1;

Плита перекрытия на отм.+3,280 КЖ2.2.1;

Плита покрытия на отм.+3,350 КЖ2.2.1;

Плита покрытия на отм.+6,880 КЖ2.2.2;

Плита покрытия на отм.+10,480 КЖ2.2.3;

Плита покрытия на отм.+14,900 КЖ2.2.4;

Плита покрытия на отм.+13,620 между осями 5, 6 КЖ2.2.4;

Плита покрытия на отм.+13,620 между осями 16,17 КЖ2.2.4;

Плита покрытия на отм.+14,080 КЖ2.2.4;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Электроосвещение";

ЭМ2 "Силовое электрооборудование";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система ТЗ;

Система К2;

Система К1, К1Н;

ОВ2 "Вентиляция";

Система П1;

Система В2;

Система П3;

Система В4;

Система П5;

Система В6;

Система П7;

Система В8;

Система П9;

Система В10;

Система П11;

Система В12;

Система П13;

Система В14;

Система В15;

Система П16; 

Система B l7; 

Система В18; 

Система В19; 

Система МО1; 

Система МО2; 

Система МОЗ;

 Система ВД1;

 Система ВД2;

ГП-15 Караульное помещение с гаражом на 1 автомобиль:

Стены монолитные на отм-0,700; -0,120;

Плита покрытия ППм 1 КЖ2;

Стены монолитные Стм1,Стм2,СтмЗ КЖ4;

Крыльцо КрЗ КЖ4;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система ТЗ;

Система К2;

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; 

Система П1; 

Система В2; 

Система В4; 

Система В5;

ГП-16 Контрольно-пропускной пункт:

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ГП-17 Центральный распределительный пункт:

Фундаментная плита тоннеля на отм.(-5,350, -4,800) в осях 1/Б-В;

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ЭС1 "Конструктивные чертежи";

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

Система П1;

Система В2;

ГП-18 Хранилище ЗИП:

Крыльцо Kpl;

Фундамент монолитный Фм1 в осях 1-4/А-Б с отм. -3,400 м до отм. -1,700 м; Конструкция плиты основания;

Фрагмент 1 Участок 1 Т16-ГП1;

Фрагмент 1 Участок 2 Т16-Т17;

Фрагмент 1 Участок 3 Т16-ГП5;

Фрагмент 1 Участок 4 Т12-ГП5;

Фрагмент 1 Участок 5 Tl1-Т12;

Фрагмент 1 Участок 6 Т11-ГП4;

Фрагмент 1 Участок 7 Т14-ГП4;

Фрагмент 1 Участок 8 Т15-Т14-Т11;

Фрагмент 1 Участок 9 Т15-ГП1;

Фрагмент 1 Участок 10 Т12-ГП1;

Фрагмент 2 Участок 1 Т10-Т11;

Фрагмент 2 Участок 2 Т9-Т10;

Фрагмент 2 Участок 3 Т8-Т9-ГП17;

Фрагмент 2 Участок 4 Т8-ГП6;

Фрагмент 2 Участок 5 Т10-Т13-ГП7-ГП10;

Фрагмент 2 Участок 6 Т12-Т13;

Фрагмент 2 Участок 7 Т13-ГП12;

Инженерные системы:

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

Система В1;

Система В2;

Система ВЗ;

Система В4;

Система В5.1,В5.2;

Система В6;

Система П7;

Система П8;

Система ВГТ1;

Система ВЕ1-ВЕ9;

ЭС "Электроснабжение";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система В2;

Система ТЗ;

Система К1, К16;

Система К2;

Система К13,17;

ОВ "Отопление и вентиляция";

Система П1;

Система В1-ВЗ;

Система BE 1-ВЕ6;

ЭМ "Силовое электрооборудование";

ЭМ1 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т1 и прилегающих туннелей";

ЭМ2 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т2, прилегающих тоннелей, ВкЗ, Вк4 и Вк7";

ЭМЗ "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т3 и прилегающих туннелей, Вк2";

ЭМ4 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т4 и прилегающих туннелей, Вк1";

ЭМ5 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т5 и прилегающих туннелей";

ЭМ6 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т6 и прилегающих туннелей";

ЭМ7 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т7 и прилегающих туннелей";

ЭМ8 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т8 и прилегающих туннелей";

ЭМ9 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т9 и прилегающих туннелей";

ЭМ10 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т10 и прилегающих туннелей";

ЭМ11 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Tl1 и прилегающих туннелей";

ЭМ12 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т12 и прилегающих туннелей";

ЭМ13 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т13 и прилегающих туннелей";

ЭММ "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т14 и прилегающих туннелей, Вк6";

ЭМ15 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т15 и прилегающих туннелей";

ЭМ16 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т1б и прилегающих туннелей";

ЭМ17 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т17 и прилегающих туннелей, Вк5";

ЭМ18 "Электрооборудование и электроосвещение камеры разводки

коммуникации Т18 и прилегающих туннелей";

Т1-Т18 Камеры разводки коммуникаций:

Сооружение Т1;

Сооружение Т2;

Сооружение ТЗ;

Сооружение Т4;

Сооружение Т5; 

Сооружение Т6; 

Сооружение Т7; 

Сооружение Т8; 

Сооружение Т9; 

Сооружение Т10; 

Сооружение Т11; 

Сооружение Т12; 

Сооружение Т13; 

Сооружение Т14; 

Сооружение Т15; 

Инженерные системы: 

Система В1;

Система К14;

Система К14Н;

Система В1; 

Система К14;

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н;

Система В1; 

Система К14;

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1;

Система В4;

Система В5; 

Система К14; 

Система К14Н;

Система В1;

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система В4; 

Система В5; 

Система К14; 

Система К14Н; 

Система В1; 

Система В4; 

Система В5;

Система К14; 

Система К14Н; 

Система К14; 

Система К14Н;

ОВ1 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т1 и примыкающих тоннелей";

Система П1;

Система П2;

ОВ2 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т2 и примыкающих тоннелей";

Система П3;

Система П4;

ОВ3 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ТЗ и примыкающих тоннелей";

Система П5; 

Система П6;

ОВ4 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т4 и примыкающих тоннелей";

Система П7;

Система П8; 

Система В41; 

Система В42;

ОВ5 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т5 и примыкающих тоннелей";

Система П9; 

Система П10;

ОВ6 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т6 и примыкающих тоннелей";

Система П57;

ОВ7 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т7 и примыкающих тоннелей";

Система П77; 

Система П78; 

Система В48;

Система В84;

ОВ8 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т8 и примыкающих тоннелей";

Система П11;

 Система П12; 

Система В49; 

Система В50; 

Система В51;

ОВ9 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т9 и примыкающих тоннелей";

Система П27; 

Система П33;

ОВ10 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т10 и примыкающих тоннелей"; 

Система П79; 

Система П80; 

Система В90;

ОВ 11 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т11 и

примыкающих тоннелей";

Система П13;

Система П14;

Система В 62;

Система В 63;

ОВ12 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т12 и примыкающих тоннелей";

 Система П22; 

Система П23;

ОВ14 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т14 и примыкающих тоннелей";

Система В64; 

Система В65;

ОВ15 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т15 и примыкающих тоннелей";

Система П16;

 Система П88;

 Система В76;

ОВ16 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т16 и примыкающих тоннелей"

Система П21;

 Система В 69;

ОВ17 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций Т17 и примыкающих тоннелей"

Система П82;

 Система В70;

 Система В71;

ОВ19 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ВК1 и примыкающих тоннелей"

Система В44;

ОВ20 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ВК2 и примыкающих тоннелей"

Система В39; 

Система В40;

ОВ21 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ВКЗ и примыкающих тоннелей"

Система В36;

 Система В37;

ОВ22 "Отопление и вентиляция камеры разводки коммуникаций ВК4 и примыкающих тоннелей"

Система В29; 

Система ВЗО;

ГП-31 Площадка обслуживания ТУА:

Инженерные системы:

ЭМ1 "Силовое электрооборудование";

ВК "Системы водоснабжения и водоотведения";

Система В1;

Система ТЗ;

Система К1;

Система К2;

ОВ "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" 

Система П1;

 Система BE 1-BE11;

8) Оригиналы актов освидетельствования скрытых работ в 1 экз. на бумажном носителе;

9) Оригиналы актов освидетельствования ответственных конструкций в 1 экз. на бумажном носителе;

10) Оригиналы актов испытаний на все выполненные работы по конструктивам и инженерным системам с приложением реестра на указанные акты в 1 экз. на бумажном носителе;

11) Копии договоров и актов сверок по взаиморасчетам с поставщиками электроснабжения, тепло - водоснабжения в 1 экз. на бумажном носителе;

12) Копии контрактов с подрядчиками и поставщиками, заключенных для исполнения условий контракта, а также копии актов сверки взаиморасчетов с подрядчиками и поставщиками в 1 экз. на бумажном носителе;

13) Копии подтверждающих первичных документов на передаваемые материалы и оборудование (договоров, счетов-фактур, платежных поручений, паспортов материалов и оборудования) в 1 экз. на бумажном носителе;

14) Оригиналы паспортов на передаваемое и смонтированное оборудование в 1 экз. на бумажном носителе;

15) Оригиналы заполненных общих журналов производства работ за период выполнения работ в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в следующем количестве:

ГП-1 Стартовое сооружение: -12 шт.;

ГП-2 Укрытие для обслуживающего персонала: - 1 шт.;

ГП-3 Командный пункт: - 5 шт.;

ГП-4 Технологический блок кислорода и азота: - 4 шт.; ГП-5 Технологический блок керосина и нафтила: - 7 шт.; ГП-б Технологический блок сжатых газов: - 4 шт.; ГП-8 Укрытие для обслуживающего персонала: - 2 шт.; ГП-10 Холодильный центр: - 1 шт.;

ГП-12 Насосная станция оборотного водоснабжения с резервуарами и градирнями: - 1 шт.;

ГП-14 Административно-служебное здание: - 3 шт.;

ГП-15 Караульное помещение с гаражом на 1 автомобиль: - 1 шт.;

ГП-16 Контрольно-пропускной пункт: - 2 шт.;

ГП-17 Центральный распределительный пункт: - 2 шт.;

ГП-31 Площадка обслуживания ТУ А: - 1 шт.

16) Оригиналы заполненных специальных журналов работ и входного контроля за период выполнения строительно-монтажных работ в 1 экз. на бумажном носителе в следующем количестве:

ГП-1 Стартовое сооружение: - 13 шт.; 

ГП-3 Командный пункт: - 3 шт.;

ГП-4 Технологический блок кислорода и азота: - 8 шт.; 

ГП-5 Технологический блок керосина и нафтила: - 9 шт.;

ГП-6 Технологический блок сжатых газов: -4; шт.;

ГП-7 Насосная станция технологического пожаротушения: - 4 шт.;

ГП-8 Укрытие для обслуживающего персонала: - 2 шт.;

ГП-10 Холодильный центр: - 5 шт.;

ГП-14 Административно-служебное здание: - 2 шт.;

ГП-15 Караульное помещение с гаражом на 1 автомобиль: - 1 шт.;

ГП-16 Контрольно-пропускной пункт: - 5 шт.;

ГП-17 Центральный распределительный пункт: - 1 шт.;

ГП-31 Площадка обслуживания ТУА: - 2. шт.

17) Оригиналы заполненных журналов учета выполненных работ (форма КС-ба) в 1 экз. на бумажном носителе;

18) Заверенные копии актов и протоколов по результатам проверок, проведенных в процессе строительства федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, в том числе ГАСН, а также уведомлений об их исполнении в 1 экз. на бумажном носителе;

19) Оригиналы актов об устранении замечаний, выданных в процессе строительства ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» и представителями авторского надзора в 1 экз. на бумажном носителе.

      В остальной части исковые требования оставить без рассмотрения. 

       Взыскать с    Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно - строительное управление №6» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 200 000 руб. 00 коп.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно - строительное управление №6» в пользу Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» судебные расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 16 000 000 руб. 00 коп.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно - строительное управление №6» в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения Российской федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации расходы за выполненную судебную экспертизу в сумме 135 593 руб. 22 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

       Судья                                                                                             С.И. Дюкова