Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-51764/23

04 сентября 2023 года

г.Москва

 

Резолютивная часть объявлена 04 сентября 2023

Полный текст решения изготовлен 04 сентября 2023

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.В. Анисимовой при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гавриковой В.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску АО "МОСОБЛГАЗ" к ООО "АКБ "АРХПРО"

при участии в судебном заседании представителей - согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ:

АО "МОСОБЛГАЗ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области к ООО "АКБ "АРХПРО" (далее - ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 5 400 000 руб., и расходов по госпошлине в сумме                                           50 000 руб.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования и не возражал против рассмотрения дела по существу.

Суд, в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершил стадию предварительного судебного заседания и перешел в основное для рассмотрения спора по существу заявленных требований.

От ответчика каких-либо заявлений и ходатайств не поступило.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие надлежащим образом извещенного ответчика.

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела и пояснений истца, между АО «Мособлгаз» (Заказчик) и ООО «АКБ «АРХПРО» (Подрядчик) заключен Договор № 2022.153028                        от 22.09.2022 на выполнение проектных и (или) изыскательских и строительно-монтажных работ по догазификации населенного пункта: Московская область, г. Мытищи (далее - Договор).

Согласно условиям п.1.1 Договора Подрядчик обязуется выполнить проектные и (или) изыскательские работы и строительно-монтажные работы (далее работы) по догазификации населенного пункта из материалов Заказчика, расположенного по адресу: Московская обл., г. Мытищи (далее - Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) в объеме, установленном в Приложении № 2 к Договору и проектной документацией, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Сторонами подписано Дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2022, согласно которому Стороны пришли к соглашению, что условия Договора, касающиеся предоставления Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ по Договору, утрачивают силу с даты подписания Дополнительного соглашения.

В связи с этим Стороны договорились, что строительно-монтажные работы по Договору должны быть выполнены Подрядчиком с применением собственных материалов и оборудования (п.1. Дополнительного соглашения).

Стороны пришли к соглашению об определении порядка оплаты выполненных строительно-монтажных работ. Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 40 (сорок) % от общей стоимости строительно-монтажных работ, что составляет 5400 000,00 руб., НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ (п.п. 2, 2.1 Дополнительного соглашения).

АО «Мособлгаз» перечислило Ответчику аванс в размере 5 400 000,00 руб. (платежное поручение от 14.12.2022 № 18600). В соответствии с условиями Договора (пункты 1.2, 4.1, 4.2) работы выполняются поэтапно, в следующем порядке:

1 этап - проектно-изыскательские работы;

2 этап - строительно-монтажные работы. Сроки выполнения работ:

1 этап начало работ в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Договора; -окончание работ 31.12.2022; 2 этап - начало работ в течение 5 (пяти) дней с даты окончания работ по 1 этапу, - окончание работ 28.02.2023.

После завершения проектных и (или) изыскательских работ по Объекту Подрядчик передает Заказчику проектную документацию и результаты инженерных изысканий в составен определенном Техническим заданием, с приложением накладной, акта сдачи-приемки выполненных проектных и (или) изыскательских работ (п.7.1.2 Договора).

Порядок сдачи-приемки строительно-монтажных работ определен п.7.2, 7.2.1. Договора. B течение 10 (десяти) рабочих дней после предусмотренных Договором работ в целом Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке завершения выполнения выполненных работ (по форме № КС-2), подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 1 (одном) экземпляре, счет на оплату выполненных работ и Отчет об использовании Подрядчиком материалов и (или) оборудования.

Ответчик в нарушении принятых на себя обязательств работы в установленный Договором срок не выполнил, результат работ Истцу не передал. 

Согласно п.10.2 Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в том числе в случае, если Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или нарушает График выполнения работ, предусмотренный Договором, либо в ходе исполнения Подрядчиком условий Договора стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок (п.10.2.2 Договора).

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора (п. 10.5 Договора).

АО «Мособлгаз» направило адрес Подрядчика уведомление о расторжении договора от 07.04.2023 № 2022.153028 (трек номер 14102080242813), которое им получено 19.04.2023.

Таким образом, последним днем действия Договора является 04.05.2023, расторгнутым Договор считается с 05.05.2023.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных подрядных работ является сдача результата работ подрядчиком (статьи 711, 746 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

На основании пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (статьи 309, 310 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 450 ГК РФ предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункты 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ).

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (пункт 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения, полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, о чем прямо указано в абзаце 2 указанного пункта, а именно: в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно статье 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.

По требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение, на основании части 1 статьи 1102, части 2 статьи 1105 ГК РФ истец должен доказать: факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (статьи 9, 65 АПК РФ).

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи в порядке статьи 71 АПК РФ, в том числе условия договора, установив факт перечисления истцом ответчику авансового платежа в размере 5 400 000 руб., исходя из недоказанности ответчиком выполнения и передачи результатов выполненных работ истцу на сумму перечисленного аванса, учитывая факт расторжения договора на основании претензии истца, суд приходит к выводу о наличии на стороне ответчика неосновательного обогащения, равного сумме неосвоенного аванса.

При таких условиях исковые требования следует удовлетворить. 

Расходы по госпошлине распределяются по правилам ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с ООО "АКБ "АРХПРО" в пользу АО "МОСОБЛГАЗ" сумму неотработанного аванса в размере 5 400 000 руб., и расходы по госпошлине в сумме                     50 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в установленном порядке.

 

Судья                                                                                              О.В. Анисимова