63/2023-36093(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-33222/2022

г. Новосибирск

08 февраля 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Сурмановой Л.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление  дорожного строительства» (ОГРН 1065406101265), г. Новосибирск,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Перлит-Строй» (ОГРН 1075403000661), г. Новосибирск, 

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «СТС-Плюс» (ОГРН  1165476085345), г. Новосибирск,  

об обязании исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту   № 24/19 от 02.04.2019,  

при участии представителей: истца – Свинаренко Г.Г. доверенность № 1 от 09.01.2023, диплом, паспорт; ответчика – Родионов К.А. доверенность от 08.08.2022, паспорт, диплом; третьего лица – не явился, извещен надлежащим образом, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Перлит-Строй» в срок  до 15.06.2023 устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах  по муниципальному контракту № 24/19 от 02.04.2019:  

на объекте «ул. Ключ-Камышенское плато» - выбоины асфальтобетонного  покрытия (напротив планетария, перед Ж/Д путепроводом) - 37 м2, выкрашивание  

асфальтобетонного покрытия проезжей части - 14 м2, образование колейности на  асфальтобетонном покрытии проезжей части h=13/14-40/40 мм (на всем  протяжении участка) - 1500 м2;  

на объекте «ул. Каменское шоссе» - колейность по полосам наката 10-40 мм  правая полоса на всем протяжении - 1400 м2, застой воды Флористический центр  «Сказка» - 50 м2;  

на объекте «УЛ. Ласточкина» - выкрашивание асфальтобетонного покрытия  (вблизи дома № 15) - 3 м2, колейность в асфальтобетонном покрытии h=28 мм - 600  м2;  

на объекте «ул. Новоуральская» - образование колейности на  асфальтобетонном покрытии проезжей части h = 3,0 см (лево) от ул. Магистральная  протяженностью 160 м - 480 м2, выкрашивание по полосам наката от дома № 4 до  дома № 14 средней шириной 7 м протяженностью 380 м - 2660 м2, выкрашивание  асфальтобетонного покрытия: напротив съезда к дому № 1а (право), напротив  дома № 2 (право), напротив дома № 7 (право), напротив дома № 6 (лево), между  домом № 14 и № 14а - 24 м2, просадка смотрового колодца напротив дома № 14-1  шт., выкрашивание асфальтобетонного покрытия в местах отбора проб - 1 шт.,  раскрытие продольного шва от дома № 14а до дома № 14-30 п.м.;  

на объекте «ул. Чекалина» - выкрашивание асфальтобетонного покрытия:  примыкание к ул. Новоуральская, перед домом № 23, между домом № 17 и № 15 –  6,4 м2.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Перлит-Строй» в  доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 6 000  рублей.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента  его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в  Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в  законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского  округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в  законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  

суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 24.12.2021 3:48:15

Кому выдана Гребенюк Диана Валерьевна