АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

 

Дело № А37-2049/2018

г. Магадан

30 мая 2019 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи М.В. Ладуха, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства строительства,  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 685000, 

<

...> Магаданки, д. 15)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Магаданстальизделия» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 685000, 

<

...>)  

об обязании выполнить работы, предусмотренные государственным контрактом, 

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора - Администрации Ягоднинского городского округа (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, место нахождения: 686230, Магаданская обл., Ягоднинский р-н, пгт.  Ягодное, ул. Спортивная, д. 6),  

Руководствуясь статьями 41, 49, 159, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить ходатайство истца об уточнении исковых требований от 29.05.2019. 

2. Обязать ответчика, общество с ограниченной ответственностью  «Магаданстальизделия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

 произвести в срок, не превышающий 25 календарных дней со дня, 

следующего за днем вступления решения суда в законную силу, на территории объекта  «Строительство детского сада на 175 мест в пос. Ягодное Ягоднинского района (на основе  полнокомплектных зданий)» следующие работы по озеленению:  

- разбивка участка в количестве 4 193,2 кв. м., 

- посадка кустарников-саженцев рябины в группы, размер ямы 0,5х,0,5 м в количестве  210 кустарников-саженцев,  

- посадка деревьев березы плосколистной в количестве 3 штук,  - посадка кустарников рябины сибирской в количестве 4 штук,  

 в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня, следующего за днем  

вступления решения суда в законную силу, в рамках гарантийных обязательств по контракту  устранить за свой счет следующие недостатки работ:  

а) установление недостающих и подключение приборов учета горячего и холодного  водоснабжения, тепловой энергии в индивидуальном тепловом пункте подвала объекта  «Строительство детского сада на 175 мест в пос. Ягодное Ягоднинского района (на основе  полнокомплектных зданий)»:  

- подключение приборов учета холодного и горячего водоснабжения: ротаметра,  счетчика и преобразователя (диаметр условного прохода до 32 мм) в количестве 2 штук,  

 - установление и подключение на фланцевых соединениях тепловых сетей ротаметра,  счетчика с диаметром условного прохода до 50 мм в количестве 1 штуки,  

- установление и подключение на фланцевых соединениях тепловых сетей ротаметра,  счетчика с диаметром условного прохода до 32 мм в количестве 1 штуки,  

б) устранить обрушение трубы приточной вентиляции в здании объекта  «Строительство детского сада на 175 мест в пос. Ягодное Ягоднинского района (на основе  полнокомплектных зданий)» путем ее установления в соответствии с проектной  документацией к государственному контракту,  

 в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня, следующего за днем  

вступления решения суда в законную силу, в рамках гарантийных обязательств по  дополнительным работам по государственному контракту устранить течь чаши бассейна  объекта «Строительство детского сада на 175 мест в пос. Ягодное Ягоднинского района (на  основе полнокомплектных зданий)».  

Истцу выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. 

3. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью  «Магаданстальизделия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек, о чем налоговому  органу выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.  

 4. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.  

5. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа  через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было предметом  рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.В. Ладуха