ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А52-3560/2021

г. Вологда

11 июля 2022 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 06 июля 2022 года.

В полном объёме постановление изготовлено 11 июля 2022 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Шадриной А.Н., судей Колтаковой Н.А. и Ралько О.Б.

при ведении протокола секретарем судебного заседания                 ФИО1

при участии от индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО3 по доверенности от 15.05.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СкандинавияСтрой» на решение Арбитражного суда Псковской области от 21 апреля 2022 года по делу № А52-3560/2021,

у с т а н о в и л:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (ОГРНИП 319784700260231, ИНН 

<

***>, адрес: г. Санкт-Петербург; далее – Предприниматель) обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СкандинавияСтрой»                             (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 194355, Санкт-Петербург, внутренняя территория города, муниципальный округ Шувалово-Озерки, Выборгское шоссе, дом 25, литер А, квартира 560; далее – Общество) о взыскании  673 830 руб., в том числе 638 301 руб. 76 коп. задолженности по оплате выполненных работ, 35 528 руб. 67 коп. пеней за период с 23.05.2020 по 08.02.2022 (с учетом выделения требований и неоднократного уточнения исковых требований).

Решением суда от 21 апреля 2022 года с Общества в пользу Предпринимателя взыскано 671 966 руб. 81 коп., в том числе 638 301 руб.            76 коп. основного долга, 33 665 руб. 05 коп. пеней, а также 12 337 руб.                   35 коп. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано. 

Общество с решением суда не согласилось и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт. В обоснование доводов жалобы ссылается на следующее. Оплата Предпринимателю не произведена в силу положений пункта 2.7 договора, поскольку отсутствовала исполнительная документация. Договоры подряда в полном объеме истцом не исполнены.

Предприниматель в отзыве на апелляционную жалобу и представитель в судебном заседании просят обжалуемое решение суда оставить без изменения.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии со статьями 123, 156, 266 АПК РФ.   

Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность решения, арбитражный суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Предпринимателем (подрядчик) и Обществом (генеральный подрядчик) были заключены договоры строительного подряда по объекту, расположенному по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 

<

...> (корпуса 1, 2, 3, 4, 6): № 05/06-ув от 05.06.2020, № 301120/2К от 30.11.2020,               № 121120/1К от 12.11.2020, № 12/05/2020 от 12.05.2020, № 25092020/К6 от 25.09.2020, № 05/06-бн от 05.06.2020, № 270720 от 27.07.2020, № 191120/2,3,4К от 19.11.2020 на общую сумму 4 505 460 руб. 80 коп., а именно:

1) согласно заключенному сторонами договору № 05/06-ув от 05.06.2020 (далее – договор 1) подрядчик осуществлял работы по устройству кладки вентиляционных блоков на объекте строительства: «Жилой комплекс с внешними сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 

<

...>, 3, 4, 6».

Сроки выполнения работ сторонами определены в пункте 3.1 договора: начало работ - 05.06.2020, окончание - 30.12.2020 (с учетом пункта 1 дополнительного соглашения от 14.09.2020 № 2 к договору).

В соответствии с пунктом 2.1 договора цена подлежащей выполнению работы по договору составляет 2 167 083 руб. 15 коп. (с учетом дополнительного соглашения от 14.09.2020 № 2 к договору).

Пунктом 2.4 договора стороны предусмотрели, что окончательный расчет генеральный подрядчик производит с подрядчиком в течение 10 рабочих дней на основании счетов после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за вычетом авансов и гарантийного удержания.

Согласно пункту 2.9 договора при оплате выполненных работ генеральный подрядчик имеет право произвести гарантийное удержание на период производства работ в размере 10% от общей стоимости работ по договору, из которых 8% возвращается подрядчику в течение 30 рабочих дней после окончательной приемки работ по акту КС-2, а 2 % от общей стоимости работ по договору удерживается генеральным подрядчиком в течение первых 365 дней с начала гарантийного периода.

В рамках договора № 05/06-ув подписаны следующие акты о приемке выполненных работ: № 1 от 15.08.2020 на сумму 732 582 руб. 76 коп., № 2 от 15.09.2020 на сумму 488 483 руб. 45 коп., № 3 от 30.09.2020 на сумму 289 498 руб. 14 коп., № 4 от 30.11.2020 на сумму 100 800 руб., № 5 от 20.12.2020 на сумму 426 232 руб.  40 коп., а также соответствующие им справки о стоимости выполненных работ. 

Общая стоимость выполненных по договору работ составила                          2 037 596 руб. 75 коп.

Ответчик взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ в порядке и сроки, установленные договором, в полном объеме не исполнил, в связи с чем за ним образовалась задолженность по оплате работ по договору в сумме 255 844 руб. 75 коп.

С учетом пункта 2.9 договора, предусматривающего удержание генеральным подрядчиком 2% от общей стоимости работ по договору в течение первых 365 дней с начала гарантийного периода, сумма задолженности составила 215 092 руб. 81 коп.

2) согласно заключенному сторонами договору № 301120/2К от 30.11.2020 подрядчик осуществлял работы по устройству кирпичных перегородок в подвальном помещении на объекте строительства: «Жилой комплекс с внешними сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 

<

...>».

Сроки выполнения работ сторонами определены в пункте 3.1 договора: начало работ - 30.11.2020, окончание - 07.12.2020.

В соответствии с пунктом 2.1 договора цена подлежащей выполнению работы по договору составляет 140 000 руб.

Пунктом 2.3 договора стороны предусмотрели, что окончательный расчет генеральный подрядчик производит с подрядчиком в течение 10 рабочих дней на основании счетов после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) за вычетом удержания.

Согласно пункту 2.7 договора при оплате выполненных работ генеральный подрядчик имеет право произвести гарантийное удержание на период производства работ в размере 10% от общей стоимости работ по договору, из которых 8% возвращается подрядчику в течение 30 рабочих дней после окончательной приемки работ по акту КС-2, а 2% от общей стоимости работ по договору удерживается генеральным подрядчиком в течение первых 365 дней с начала гарантийного периода.

Между сторонами в рамках договора № 301120/2К от 30.11.2020 подписан акт о приемке выполненных работ: № 1 от 05.12.2020 на сумму             140 000 руб.

Ответчик взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ исполнил несвоевременно, оплатив задолженность (с учетом удержания генеральным подрядчиком 2% от общей стоимости работ) 29.01.2021.

3) согласно заключенному сторонами договору № 121120/1К от 12.11.2020 подрядчик осуществлял работы по устройству перегородок из газобетонных блоков толщиной 200 мм на объекте строительства: «Жилой комплекс с внешними сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 

<

...>».

Сроки выполнения работ сторонами определены в пункте 3.1 договора: начало работ - 12.11.2020, окончание - 05.12.2020.

В соответствии с пунктом 2.1 договора цена подлежащей выполнению работы по договору составляет 286 727 руб.

Пунктом 2.3.2 договора стороны предусмотрели, что окончательный расчет генеральный подрядчик производит с подрядчиком в течение 3 рабочих дней после подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) за вычетом удержания.

Согласно пункту 2.8 договора при оплате выполненных работ генеральный подрядчик имеет право произвести гарантийное удержание на период производства работ в размере 10% от общей стоимости работ по договору-3, из которых 8% возвращается подрядчику в течение 30 рабочих дней после окончательной приемки работ по акту КС-2, а 2% от общей стоимости работ по договору удерживается генеральным подрядчиком в течение первых 365 дней с начала гарантийного периода.

Между сторонами в рамках договора № 121120/1К подписаны следующие акты о приемке выполненных работ: № 1 от 30.11.2020 на сумму 208 551 руб. 75 коп. и № 2 от 05.12.2020 на сумму 78 175 руб. 25 коп. и соответствующие им справки о стоимости выполненных работ.

Общая стоимость выполненных по договору работ составила 286 727 руб.

Ответчик взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ в порядке и сроки, установленные договором, не исполнил, в связи с чем за ним образовалась задолженность по оплате работ в сумме 286 727 руб.

С учетом пункта 2.8 договора, предусматривающего удержание генеральным подрядчиком 2% от общей стоимости работ по договору в течение первых 365 дней с начала гарантийного периода, сумма задолженности составила 280 992 руб. 45 коп.

4) согласно заключенному сторонами договору №12/05/2020 от 12.05.2020 подрядчик осуществлял работы по устройству кирпичной кладки на объекте строительства: «Жилой комплекс с внешними сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 48, корпус 1,2,3,4,6».

Сроки выполнения работ сторонами определены в пункте 3.1 договора: начало работ - 12.05.2020, окончание: по корпусу 2, 3, 4, 6 - 30 сентября 2020 года, по корпусу 1 - 15.10.2020 (с учетом пункта 1 дополнительного соглашения № 1 от 15.10.2020 к договору).

В соответствии с пунктом 2.1 договора цена подлежащей выполнению работы по договору составляет 663 750 руб.

Пунктом 2.3.2 договора стороны предусмотрели, что окончательный расчет генеральный подрядчик производит с подрядчиком в течение 5 рабочих дней после подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Согласно пункту 2.8 договора при оплате выполненных работ генеральный подрядчик имеет право произвести гарантийное удержание на период производства работ в размере 10% от общей стоимости работ по договору, из которых 8% возвращается подрядчику в течение 30 рабочих дней после окончательной приемки работ по акту КС-2, а 2% от общей стоимости работ по договору удерживается генеральным подрядчиком в течение первых 365 дней с начала гарантийного периода.

Между сторонами в рамках договора № 12/05/2020 подписаны следующие акты о приемке выполненных работ: № 1 от 30.11.2020 на сумму 208 551 руб. 75 коп. и № 2 от 05.12.2020 на сумму 78 175 руб. 25 коп. и соответствующие им справки о стоимости выполненных работ без замечаний и разногласий. 

Общая стоимость выполненных по договору работ составила 663 750 руб. 

Ответчик взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ в порядке и сроки, установленные договором, надлежащим образом не исполнил, в связи с чем за ним образовалась задолженность по оплате работ в сумме                 33 187 руб. 50 коп.

С учетом пункта 2.8 договора, предусматривающего удержание генеральным подрядчиком 2% от общей стоимости работ по договору в течение первых 365 дней с начала гарантийного периода, сумма задолженности составила 19 912 руб. 50 коп.

5) согласно заключенному сторонами договору № 25092020/К6 от 25.09.2020 подрядчик осуществлял работы по устройству столбчатых фундаментов и плит ПМ2 и ПМЗ на объекте строительства: «Жилой комплекс с внешними сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 

<

...>».

Сроки выполнения работ сторонами определены в пункте 3.1 договора: начало работ - 25.09.2020, окончание - 30.08.2020.

В соответствии с пунктом 2.1 договора цена подлежащей выполнению работы по договору составляет 404 741 руб. 50 коп.

Пунктом 2.3 договора стороны предусмотрели, что окончательный расчет генеральный подрядчик производит с подрядчиком в течение 10 рабочих дней на основании счетов после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за вычетом гарантийного удержания.

Согласно пункту 2.8 договора при оплате выполненных работ генеральный подрядчик имеет право произвести гарантийное удержание на период производства работ в размере 10% от общей стоимости работ по договору, из которых 8% возвращается подрядчику в течение 30 рабочих дней после окончательной приемки работ по акту КС-2, а 2% от общей стоимости работ по договору удерживается генеральным подрядчиком в течение первых 365 дней с начала гарантийного периода.

Между сторонами в рамках договора № 25092020/К6 подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2020 на сумму  404 741 руб. 50 коп. и соответствующая справка о стоимости выполненных работ.

Ответчик взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ исполнил несвоевременно, оплатив задолженность (с учетом удержания генеральным подрядчиком 2% от общей стоимости работ) 30.11.2020.

6) согласно заключенному сторонами договору № 05/06-бн от 05.06.2020 подрядчик осуществлял работы по устройству наружных стен из газобетонных блоков на объекте строительства: «Жилой комплекс с внешними сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 

<

...>».

Сроки выполнения работ сторонами определены в пункте 3.1 договора: начало работ - 05.06.2020, окончание - 31.08.2020 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13.11.2020).

В соответствии с пунктом 2.1 договора цена подлежащей выполнению работы по договору составляет 506 377 руб. 65 коп.

Пунктом 2.4 договора стороны предусмотрели, что окончательный расчет генеральный подрядчик производит с подрядчиком в течение 10 рабочих дней на основании счетов после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за вычетом авансов и гарантийного удержания.

Согласно пункту 2.9 договора при оплате выполненных работ генеральный подрядчик имеет право произвести гарантийное удержание на период производства работ в размере 10% от общей стоимости работ по договору, из которых 8% возвращается подрядчику в течение 30 рабочих дней после окончательной приемки работ по акту КС-2, а 2% от общей стоимости работ по договору удерживается генеральным подрядчиком в течение первых 365 дней с начала гарантийного периода.

Между сторонами в рамках договора № 05/06-бн от 05.06.2020 подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.06.2020 на сумму 147 910 руб.              51 коп., № 2 от 15.08.2020 на сумму 220 063 руб. 27 коп. и № 3 от 31.08.2020 на сумму 138 403 руб. 87 коп., и соответствующие справки о стоимости выполненных работ. 

Общая стоимость выполненных по договору работ составила 506 377 руб. 65 коп.

Ответчик взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ исполнил несвоевременно, оплатив задолженность в полном объеме (с учетом удержания генеральным подрядчиком 2% от общей стоимости работ) 05.06.2020 (120 000 руб.), 12.08.2020 (27 910 руб. 51 коп.), 01.09.2020                   (200 000 руб.), 08.10.2020 (100 000 руб.) и 30.11.2020 (48 339 руб. 59 коп).

7) согласно заключенному сторонами договору № 270720 от 27.06.2020 подрядчик осуществлял работы по устройству внутренних перегородок из ГБ на объекте строительства: «Жилой комплекс с внешними сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 

<

...>»; устройство выходов на кровлю на объекте строительства: «Жилой комплекс с внешними сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения по адресу: Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Кингисепское городское поселение, г. Кингисепп,      пр. Карла Маркса, д.48, корпус 1,2,3,4, 6».

Сроки выполнения работ сторонами определены в пункте 3.1 договора: начало работ - 28.07.2020, окончание - 30.10.2020.

В соответствии с пунктом 2.1 договора цена подлежащей выполнению работы по договору составляет 341 467 руб. 60 коп.

Пунктом 2.3 договора стороны предусмотрели, что окончательный расчет генеральный подрядчик производит с подрядчиком в течение 5 рабочих дней после подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Согласно пункту 2.8 договора при оплате выполненных работ генеральный подрядчик имеет право произвести гарантийное удержание на период производства работ в размере 10% от общей стоимости работ по договору, из которых 8% возвращается подрядчику в течение 30 рабочих дней после окончательной приемки работ по акту КС-2, а 2% от общей стоимости работ по договору удерживается генеральным подрядчиком в течение первых 365 дней с начала гарантийного периода.

Между сторонами в рамках договора № 270720 от 27.07.2020 подписаны следующие акты о приемке выполненных работ: № 1 от 31.08.2020 на сумму           81 777 руб. 17 коп., № 2 от 15.09.2020 на сумму 202 253 руб. 81 коп. и № 3 от 30.10.2020 на сумму 57 436 руб. 92 коп., и соответствующие справки о стоимости выполненных работ.

Общая стоимость выполненных по договору работ составила                          341 467 руб. 90 коп.

Ответчик взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ исполнил несвоевременно, оплатив задолженность (с учетом удержания генеральным подрядчиком 2% от общей стоимости работ) 01.09.2020                       (120 000 руб.), 30.11.2020 (50 607 руб. 56 коп.), 15.10.2020 (82 260 руб.                   98 коп.), 18.09.2020 (81 770 руб.).

8) согласно заключенному сторонами договору № 191120/2,3,4К от 19.11.2020 подрядчик осуществлял работы по устройству кровли входных групп на объекте строительства: «Жилой комплекс с внешними сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 

<

...>».

Сроки выполнения работ сторонами определены в пункте 3.1 договора: начало работ - 19.11.2020, окончание - 05.12.2020.

В соответствии с пунктом 2.1 договора цена подлежащей выполнению работы по договору составляет 129 600 руб.

Пунктом 2.3.2 договора стороны предусмотрели, что окончательный расчет генеральный подрядчик производит с подрядчиком в течение 10 рабочих дней после подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) за вычетом удержания.

Согласно пункту 2.8 договора при оплате выполненных работ генеральный подрядчик имеет право произвести гарантийное удержание на период производства работ в размере 10% от общей стоимости работ по договору, из которых 8% возвращается подрядчику в течение 30 рабочих дней после окончательной приемки работ по акту КС-2, а 2% от общей стоимости работ по договору удерживается генеральным подрядчиком в течение первых 365 дней с начала гарантийного периода.

После окончания выполненных работ истец составил и направил в адрес ответчика акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.12.2020 на общую сумму 124 800 руб., который последним не подписан и не оплачен.

С учетом пункта 2.8 договора, предусматривающего удержание генеральным подрядчиком 2% от общей стоимости работ по договору в течение первых 365 дней с начала гарантийного периода, сумма задолженности по расчету истца составила 122 304 руб.

Истцом 24.05.2021 в адрес ответчика были направлены претензии с приложением актов сверки взаимных расчетов и расчетов неустойки на дату составления претензий с требованием погасить задолженность.

Поскольку оплата выполненных работ в добровольном порядке ответчиком не произведена, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, рассмотрев заявленные требования, иск удовлетворил частично. 

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации   (далее – ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (статья 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 настоящего Кодекса).

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 данного Кодекса.

В силу статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Факт выполнения работ по рассматриваемым договорам подтверждается актами приемки выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными ответчиком без замечаний и возражений.

Из материалов дела следует, что подрядчиком в рамках договора                   № 191120/2,3,4К от 19.11.2020 выполнены работы на общую сумму                       124 800 руб.

Вместе с тем акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.12.2020 формы КС-2 ответчиком не подписан.

При этом мотивированных возражений относительно неподписания указанного акта ответчиком не заявлено.

Поскольку доказательств, свидетельствующих о погашении долга, ответчиком не представлено, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требования Предпринимателя о взыскании задолженности в полном объеме.

Ссылка ответчика на неисполнение истцом обязанности по передаче генеральному подрядчику полного объема исполнительной документации несостоятельна.

По смыслу положений статьи 726 ГК РФ сам по себе факт не предоставления подрядчиком какой-либо части исполнительной документации не может являться основанием для отказа в оплате выполненных работ, если заказчик не докажет, что отсутствие такой исполнительной документации исключает возможность использования результата работ по назначению.

В рассматриваемом случае, из материалов дела видно, что все объекты, на которых истец осуществлял строительные работы, расположенные по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 

<

...> (корпуса 1, 2, 3, 4, 6), введены в эксплуатацию (том 2, листы 55–59, листы 138–147). 

Также истцом заявлено требование о взыскании 35 528 руб. 67 коп. пеней за период с 23.05.2020 по 08.02.2022.

Пунктом 1 статьи 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Из содержания статьи 330 ГК РФ следует, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Таким образом, неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств.

Расчет пеней судом первой инстанции проверен и признан ошибочным в части начисления пеней по договору от 19.11.2020 № 191120/2,3,4К за период с 31.12.2020 по 13.07.2021.

Как верно указал суд, расчет пеней в рамках указанного договора должен быть произведен на сумму 112 320 руб. за период с 16.06.2021 по 08.02.2022 и на сумму 9 984 руб. за период с 14.07.2021 по 08.02.2022, итого в общей сумме 2882 руб. 88 коп.

Суд апелляционной инстанции с расчетом суда согласен, находит его верным.

По существу, доводы подателя апелляционной жалобы повторяют позицию Общества, изложенную при рассмотрении дела, не опровергают выводы суда первой инстанции, основаны на неверном толковании положений действующего законодательства и не свидетельствуют о нарушении судом норм материального права. Иное толкование положений законодательства, а также иная оценка обстоятельств дела не свидетельствуют о неправильном применении судом норм материального права.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда Псковской области от 21 апреля 2022 года по делу № А52-3560/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СкандинавияСтрой» – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

      А.Н. Шадрина                                                                                        

 

Судьи                                                               

      Н.А. Колтакова 

      О.Б. Ралько