АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А74-11703/2024

06 февраля 2025 года

г. Абакан

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2025 года. Решение в полном объеме изготовлено 06 февраля 2025 года.

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.Е. Аношкиной при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.Л. Ходаковой рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Абаза-Энерго» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) 

к администрации города Абазы (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>)

о взыскании 368 463 руб. 77 коп.,

при участии в судебном заседании представителя истца – ФИО1 на основании доверенности от 09.01.2025 №0501/15.

Общество с ограниченной ответственностью «Абаза-Энерго» обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с исковым заявлением к администрации города Абазы о взыскании 368 463 руб. 77 коп. неустойки за период с 14.05.2024 по 13.12.2024 по муниципальному контракту от 29.12.2023 № 03-чс с последующим начислением неустойки до момента фактической оплаты долга.

Представитель истца в судебном заседании поддержал иск, заявил ходатайство об  уточнении иска, просил взыскать с ответчика 368 463 руб. 77 коп. неустойки за период с 14.05.2024 по 13.12.2024.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд принял уточнение иска.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в судебное заседание не явился, отзыв на иск не направил. 

На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Между истцом и ответчиком был заключен муниципальный контракт от 29.12.2023 № 03-чс, согласно которому истец (подрядчик) обязался выполнить капитальный ремонт системы теплоснабжения в МО г. Абаза (капитальный ремонт теплосети по улице Транспортная), а ответчик (заказчик) оплатить выполненные работы на условиях настоящего контракта (пункты 1.1 – 1.3 контракта). Цена контракта составила 5 856 312 руб. 18 коп. (пункт 2.1 контракта). 

В соответствии с пунктом 2.5 контракта оплата за выполненные работы осуществляется безналичным расчетом путем перечисления с расчетного счета заказчика на расчетный счет подрядчика в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке в порядке, предусмотренном разделом 5 контракта. Контрактом предусмотрена выплата аванса в размере 50 % от размера цены контракта. Выплата производится единовременно в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, на основании выставленного счета.

В соответствии с пунктами 6.3, 6.4 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе  требовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Между сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ по формам КС-2 от 31.01.2024 №№ 7, 7(1), КС-3 от 31.01.2024 № 3 по контракту на общую сумму 5 856 312 руб. 18 коп. Акт о приемке выполненных работ от 10.04.2024 № 1 на сумму 5 856 312 руб. 18 коп. подписан заказчиком в единой информационной системе 13.05.2024.

Задолженность по контракту в размере 5 856 312 руб. 18 коп. оплачена заказчиком платежными поручениями от 02.02.2024 № 232451, от 02.02.2024 № 232450, от 02.02.2024 № 232449, от 26.07.2024 № 874380, от 13.12.2024 № 518080, от 13.12.2024 № 518081, от 13.12.2024 № 518079.

Ответчик в установленный срок обязательства по оплате выполненных работ не исполнил, во исполнение обязательного претензионного порядка урегулирования споров истец направил ответчику претензию об уплате задолженности по контракту.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате выполненных работ явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. 

После подачи искового заявления в суд, заказчик оплатил долг в полном объеме.

Оценив доводы иска и представленные в дело доказательства, суд пришёл к следующим выводам.

По своей правовой природе муниципальный контракт от 29.12.2023 № 03-чс является контрактом на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд, предусмотренным статьёй 763 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В предмет доказывания по настоящему делу входят такие условия, как наличие заключённого контракта; факт нарушения условий контракта или факт его неисполнения ответчиком; размер неисполненного обязательства.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Факт выполнения работ по контракту и принятия их ответчиком подтверждается представленными в материалы дела актами о приёмке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными сторонами без разногласий к качеству и объёму работ. Данное обстоятельство ответчиком не оспорено.

Работы по контракту оплачены ответчиком платежными поручениями от 02.02.2024 № 232451, от 02.02.2024 № 232450, от 02.02.2024 № 232449, от 26.07.2024 № 874380, от 13.12.2024 № 518080, от 13.12.2024 № 518081, от 13.12.2024 № 518079, с нарушением, установленного контрактом срока.

В связи с допущенной просрочкой оплаты, истец просит взыскать с ответчика 368 463 руб. 77 коп. неустойку за период с 14.05.2024 по 13.12.2024. 

Проверив расчет неустойки, суд признал его неверным, поскольку истцом неверно применена ключевая ставка Банка России. 

Согласно расчету суда сумма неустойка составила 376 990 руб. 59 коп., в том числе:

Задолженность

Дата начала начисления неустойки

Дата окончания начисления неустойки

Количество дней

Ключевая ставка

Доля ставки

Размер неустойки

2 928 156,09  

23.05.2024

26.07.2024

65

16,00%

   1/300

101 509,41  

2 811 032,42  

27.07.2024

13.12.2024

140

21,00%

   1/300

275 481,18  

Однако истец, воспользовавшись своим правом, предъявил неустойку в меньшем размере, что не нарушает прав ответчика.

Таким образом, по результатам рассмотрения дела с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 368 463 руб. 77 коп. неустойки за период с 23.05.2024 по 13.12.2024. 

Государственная пошлина по делу в размере 23 423 руб. уплачена истцом при подаче иска платежным поручением от 17.12.2024 № 2319. 

В соответствии с частью 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 23 423 руб. относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в пользу истца, поскольку оплата должна произведена ответчиком после подачи иска в суд.

Настоящее решение считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом или вручены под расписку.

Руководствуясь статьями 49, 110, 166 - 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить иск: 

взыскать с администрации города Абазы в пользу общества с ограниченной ответственностью «Абаза-Энерго» 368 463 руб. 77 коп. неустойки, а также 23 423 руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением от 17.12.2024    № 2319. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья                                                                                                                             И.Е.Аношкина