АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-11793/2020

г. Ярославль

01 декабря 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена  23 ноября 2020 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Шадриновой Л.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Давыдовой М.В.   

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества "Рыбинская городская электросеть" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к муниципальному бюджетному учреждению городского округа город Рыбинск "Управление городского хозяйства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1480758.64 руб.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа город Рыбинск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

при участии

от истца - ФИО1 представитель по доверенности от 19.08.2020,

от ответчика - не явился,

установил:

Открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к муниципальному бюджетному учреждению городского округа город Рыбинск "Управление городского хозяйства" о взыскании 1480758.64 руб., в том числе 1 477 434, 41 руб. задолженности, 3 324 руб. 23 коп. пени по состоянию на 15.07.2020 с продолжением начисления по день фактической оплаты долга.

В ходе судебного разбирательства ответчик направил отзыв на исковое заявление, ссылается на оплаты основного долга.

В ходе судебного разбирательства истец заявил об отказе от иска в части основного долга в размере 1 447 434, 41 руб., заявил об уточнении исковых требований в части неустойки до 19 553 руб. 15 коп. за период с 01.07.2020 по 18.10.2020.

Согласно п. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Рассмотрев ходатайство об отказе от исковых требований к муниципальному бюджетному учреждению городского округа город Рыбинск "Управление городского хозяйства", суд полагает, что оно соответствует ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, удовлетворяет его.

Производство по требованию в части взыскания основного долга подлежит прекращению в порядке ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

В ходе судебного разбирательства истец заявил об уточнении исковых требований, просил взыскать пени в размере 19 553, 15 руб.

Судом ходатайство об уточнении размера исковых требований признано соответствующим ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, принято к рассмотрению. 

30.12.2019 между муниципальным бюджетным учреждением городского округа город Рыбинск «Управление городского хозяйства» (Заказчик) и открытым акционерным обществом "Рыбинская городская электросеть" (Подрядчик) заключен контракт №429, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по организации освещения улиц в городском округе город Рыбинск в соответствии со сметой (приложение №1 к контракту), техническим заданием (приложение № 2 к контракту).

Согласно п. 1.2 Срок выполнения Работ: с 01.01.2020 по 31.12.2019.

Согласно п. 2.1 Цена контракта составляет 17 658 672 руб.

Согласно п.2.4 оплата, но настоящему контракту производится в российских рублях в безналичной форме. Оплата выполненных работ заказчиком осуществляется в срок 30 календарных дней со дня подписания документов о приемке выполненных работ (актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка по форме КС-3) и предоставления Подрядчиком  счетов, счетов-фактур (при наличии).

Согласно п. 6.6 в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенных договоров истцом выполнены работы, сторонами подписаны акты о приемки выполненных работ от 31.05.2020 № 5 на сумму 1 447 434, 41 руб.

29.06.2020 истцом в адрес ответчика направлена претензия № 2975 с требованием об оплате выполненных работ.

Оставление претензии без удовлетворения, послужило основанием обращения с иском в суд.  

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, суд считает требования подлежащими удовлетворению частично в силу следующего.

В силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Статьей 71 названного Кодекса предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В  силу п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Истцом заявлено требование о взыскании пени с учетом уточнения в размере 19 553, 15 руб. по состоянию на 18.10.2020.

В соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Оснований для применения положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ у суда не имеется.

Учитывая изложенное, требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в размере 19 553, 15 руб.

Производство по делу в части требования о взыскании 1 447 434, 41 руб. задолженности подлежит прекращению в силу отказа истца от иска в данной части и принятия его судом.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы истца по оплате госпошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями п/п 4 п. 1 ст. 150, ст.ст.110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Производство по требованию о взыскании 1 447 434 руб. 41 коп. (основной долг) прекратить.

Взыскать с  Муниципального бюджетного учреждения городского округа город Рыбинск "Управление городского хозяйства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Открытого акционерного общества "Рыбинская городская электросеть"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 19 553 руб. 15 коп. пени, 23 840 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Шадринова Л.А.