АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-175829/23-159-1466

г. Москва

15 декабря 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 04 декабря 2023года Полный текст решения изготовлен 15 декабря 2023 года 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судьи Константиновской Н.А., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРКОН" (123610,  РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ,  КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 12, ПОМЕЩ. 1/18, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 21.02.2012, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику: АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ № 13" (143500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРА ГОРОД,  ЧЕХОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  16.10.2002, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 3 254 075,58 руб. при участии: от истца: Однорог Н.А. по доверенности от 24.03.2023г. от ответчик: ФИО2 по доверенности от 25.11.2022г. 

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Эркон» обратилось в суд с иском к АО «ПСО-13» о взыскании неустойки  

по договору поставки от 03.08.2020 № ЭРПБ-1171/20 в сумме 3 254 075 руб. 58 коп. 

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком  

свои обязательств по договору от 03.08.2020 № ЭРПБ-1171/20 

Истец в судебном заседании заявленные требования поддержал.  

Ответчик, заявленные требования не признал по доводам письменного отзыва на  

иск. 

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив представленные  доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам:  

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что в соответствии с  условиями Договора поставки от 03.08.2020 г. № ЭРПБ-1171/20 заключенного между  ООО «ЭРКОН» (поставщик) и АО «ПСО-13» (покупатель), поставщик поставил, а  Покупатель принял бетонные смеси.  

Поставка Товара подтверждается подписанными сторонами универсальными  передаточными документами (УПД).  

Претензий относительно качества и количества Товара от Ответчика не  поступало.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-218661/22-141-1653 с  Ответчика в пользу Истца была взыскана задолженность (основной долг) по Договору в  размере 4 985 712,50 рублей, а также неустойка за период с 01.10.2022 по 19.01.2023г. в  размере 498 571,25 рублей (10% от суммы задолженности в размере 4 985 712,50  рублей).  

Согласно п.4.3 Договора Покупатель осуществляет 100% предварительную  оплату товара и его доставки не позднее 3-х дней до даты поставки товара. Если  Поставщик поставил товар не дожидаясь оплаты, Покупатель обязан оплатить  поставленный товар не позднее 5-ти рабочих дней с даты поставки.  

Всего с 07.09.2020г. по 13.08.2022г. Поставщик поставил, а Покупатель принял  товар на сумму 244 621 882,50 руб.  

Ссылаясь на наличие просроченных обязательств, истец полагает правомерным  начислить ответчику неустойку в соответствии с п. 6.2.1. договора за период с  07.09.2020 по 13.07.2022 в сумме 3 254 075 руб. 58 коп.  

Согласно п. 6.2.1 Договора определен размер неустойки - 0,1% от неоплаченной  в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.  

19.07.2023г. в адрес Ответчика была направлена претензия с требованием  погасить неустойку по Договору, однако на дату подачи искового заявления Ответчик  требование о выплате неустойки не исполнил, мотивированный ответ не направил.  

Поскольку претензионные требования истца остались без ответа и  удовлетворения, истец обратился в суд с настоящими требованиями.  

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик в свою  очередь указывает на то, что п. 6.2.1. договора предусматривает предел взыскиваемой  неустойки 10% от суммы долга, что не учтено истцом в своем расчёт.  

Суд, анализируя представленные по делу доказательства, доводы и возражения  сторон приходит к следующему:  

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота  или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных законом.  

Согласно ст.314 ГК РФ, если в обязательстве предусмотрен срок исполнения,  оно должно быть исполнено в обусловленный договором срок.  

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий  предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или  сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в  предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным,  семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).  

В соответствии со ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона  (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне  (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него  определенную денежную сумму (цену).  

В силу п. 1. ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до  или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим  Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и  не вытекает из существа обязательства.  

В соответствии со ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с  соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если  соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты  осуществляются платежными поручениями.  

Принятие товара ответчиком подтверждается представленным в материалы дела  документами, при этом доказательств оплаты поставленного товара в полном объеме  ответчиком суду не представлено.  

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

В соответствии с п. 6.2 Договора за нарушение покупателем срока оплаты  товара, установленного договором, поставщик имеет право взыскать с покупателя  неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но  не более 10% от общей суммы заложенности.  

Согласно расчету истца размер неустойки составил 3 254 075 руб. 58 коп. за  период с 07.09.2020 по 13.07.2022, истец рассчитывает неустойку исходя из общей  стоимости партии товара, установленной в рамках дела А40-218661/22-141-1653,  239 636 170 руб.  

Суд полагает, что с учетом представленных доказательств имеются основания  для начисления пени за ненадлежащее исполнение обязательств.  

Размер начисленной неустойки проверен судом и признан правильным. 

При этом доводы ответчика о неверном расчете неустойки суд считает  ошибочными. Неустойка рассчитана отдельно по каждой поставке с учетом сроков  оплаты и ограничения размера неустойки 10 % от задолженности.  

Между тем, рассматривая настоящее дело, суд пришел к выводу о  несоразмерности заявленной неустойки, с учетом компенсационного характера  неустойки по смыслу норм действующего законодательства, толкования, данного  Определением Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 N 263-О. Так, одним из  оснований признания суммы неустойки несоразмерной последствиям нарушения  обязательства, перечисленных в п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от  14.07.1997 № 17, является чрезмерно высокая процентная ставка неустойки.  

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 21.12.2000 №  263-О разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в  случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств  является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены  против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть,  по существу, на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской  Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не  должно нарушать права и свободы других лиц. Таким образом, суд должен установить  баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой  действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате  конкретного правонарушения.  

При таких обстоятельствах задача суда состоит в устранении явной  несоразмерности штрафных санкций, следовательно, суд может лишь уменьшить  размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной,  причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по  своему внутреннему убеждению.  

В данном случае, неустойка в заявленной сумме является явно чрезмерной, при  этом суд учитывает, что товар поставлен, тем самым, суд основываясь на том, что  степень соразмерности начисленной истцом неустойки последствиям нарушения  обязательства является оценочной категорией, оценив указанный критерий исходя из  своего внутреннего убеждения и обстоятельств настоящего дела, пришел к выводу о  наличии правовых оснований для снижения заявленного размера неустойки.  

Суд полагает, что снижение суммы неустойки обеспечит баланс интересов  сторон и позволит истцу в должной мере компенсировать имущественные потери в  результате нарушения ответчиком своих обязательств по договору. Делая такой вывод,  суд принимает во внимание принцип соразмерности гражданско-правовой  ответственности последствиям нарушения обязательства. кроме того, суд учитывает,  что истцом не представлено доказательств наличия существенных негативных  последствий, вызванных ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по  договору. Поскольку факт несвоевременного исполнения ответчиком обязательства  судом установлен, в соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской  Федерации, требование истца о взыскании с ответчика неустойки подлежит  удовлетворению частично в сумме неустойки 1 627 037 руб. 79 коп. сниженного судом  в порядке ст. 333 ГК РФ.  

Судебные издержки и расходы на оплату госпошлины распределяется судом в  порядке ч. 1 п. 1 ст. 110 АПК РФ, с учетом итогов рассмотрения дела.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, ГК РФ, ст. 4, 64-68, 70-71,  101-103, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 АПК РФ арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ № 13" (143500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРА ГОРОД,  ЧЕХОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  16.10.2002, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРКОН" (123610, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д.  12, ПОМЕЩ. 1/18, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.02.2012, ИНН:  

<

***>) 1 627 037 (один млн. шестьсот двадцать семь тыс. тридцать семь) руб. 79  коп. - неустойки, а также 39 270 (тридцать девять тыс. двести семьдесят) руб. –  расходы по госпошлине.  

 В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия.  

 Судья Н.А. Константиновская