10513_5252631  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А53-19681/2018

13 ноября 2018 года

город Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи О.М. Брагиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.С.  Хатламаджияном,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело, возбужденное по иску Департамента  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации города  Новочеркасска (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об осязании устранить недостатки выполненных работ, 

при участии в судебном заседании: от истца – представитель ФИО1, по доверенности № 17 от 30.07.2018 г., от ответчика – представитель не явился. 

 Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьями 65, 110, 121, 156, 163, 167, 168, 169, 170, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение одного месяца с даты вступления  судебного акта в законную силу безвозмездно устранить следующие недостатки работ,  выполненных в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту №  0158300060115000070 от 13.10.2015 г., а именно: привести в соответствие толщину слоев  дорожной одежды проектным показателям – несоответствие проектных толщин слоев  дорожной одежды на площади 19 950,0 м2 на общую сумму 15 039,05 тыс. руб., а именно:  ПК 0+30 (правая сторона), верхний слой 3,7 см, нижний слой 5 см (проектные толщины 6  см оба слоя); ПК 5+70 (правая сторона), верхний слой 4,3 см, нижний слой 6,5 см  (проектные толщины 6 см оба слоя); ПК 10+70 (правая сторона), верхний слой 4,5 см,  нижний слой 6 см (проектные толщины 6 см оба слоя); ПК 15+70 (правая сторона),  верхний слой 5,7см (проектная толщина 6 см); ПК 20+70 (правая сторона), верхний слой  5,5 см (проектная толщина 6 см); ПК 25+70 (правая сторона), верхний слой 4,8 см  

(проектная толщина 6 см); ПК 30+70 (правая сторона), верхний слой 3,5см (проектная  толщина 6 см); ПК 39+70 (правая сторона), верхний слой 5 см (проектная толщина 6 см);  ПК 0+50 (левая сторона от кольца), верхний слой 4,2 см (проектная толщина 6 см); ПК  6+00 (левая сторона от кольца), верхний слой 5,4 см (проектная толщина 6 см); ПК 13+00  (левая сторона от кольца), верхний слой 3 см (проектная толщина 6 см); ПК 18+00 (левая  сторона от кольца), верхний слой 3,8 см (проектная толщина 6 см); ПК 28+00 (левая  сторона от кольца), верхний слой 4,6 см (проектная толщина 6 см).  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета Российской Федерации 6 000  руб. государственной пошлины.  

 Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

 Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в арбитражный  суд апелляционной инстанции в течение месяца с даты принятия решения, а также в  арбитражный суд кассационной инстанции в течение двух месяцев с даты вступления  решения по делу в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.М. Брагина