РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-102539/2024-52-711

10 января 2025 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 декабря 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 10 января 2025 года

Арбитражный суд в составе:

председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ждакаевым И.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.01.2003, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙХИМПРОЕКТ» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.10.2015, ИНН: 

<

***>)

о взыскании неустойки в размере 31 877 000,47 руб. по контракту от 29.10.2020 № 2010-25-СМР(СУБ). (49 АПК РФ)

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО1 по доверенности от 03.07.2024 (паспорт, диплом),

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 17.07.2024 (паспорт, диплом).

УСТАНОВИЛ:

ФГУП «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ»   (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙХИМПРОЕКТ»    (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере 31 877 000,47 руб. по контракту от 29.10.2020 № 2010-25-СМР(СУБ) за период с 05.05.2021 по 25.09.2024г.

Истец исковые требования поддержал.

Ответчик по иску возражал по доводам изложенным в отзыве.

Истец в обоснование иска ссылается на следующие обстоятельства.

Между ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (далее - Генподрядчик, Истец) и ООО «СХП» (далее - Субподрядчик, Ответчик) заключён Контракт от 02.09.2020 № 2010-25-СМР(СУБ) на выполнение работ по объекту: «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети МО РФ (далее - Объект, Контракт).

Контракт заключён в целях реализации Государственного контракта от 02.09.2020, заключённого между Генподрядчиком и Минобороны России   (п. 2.5 Контракта).

По условиям Контракта Генподрядчик осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а Субподрядчик выполняет работы по инженерным изысканиям, обследованиям и обмерам для подготовки Проектной документации, разработку Проектной и Рабочей документаций, строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Контракта, в том числе раздела 23 Контракта, ведение Авторского надзора и с условиями Контракта (Возведение объекта «под ключ») (далее - Работы).

Согласно разделу 1 Контракта его  сторонами согласовано, что  выполнение Субподрядчиком проектно-изыскательских работ подтверждается подписанным Генподрядчиком после проверки Актом о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, который Субподрядчик  обязан оформить и представить Генподрядчику; выполнение Субподрядчиком  строительно-монтажных работ  подтверждается подписанными Генподрядчиком после проверки Актом о приемке выполненных строительно-монтажных работ и  Справкой  о стоимости выполненных работ и затрат, который Субподрядчик  обязан оформить  (Формы № КС-2 и № КС-3 составляются на основании выполненных в соответствии с утвержденным проектом фактических объемов работ за отчетный период) и представить Генподрядчику (п.п. 1.1.4, 1.1.5 Контракта). 

Цена Контракта составляет 45 426 559,24 руб. (п. 3.1 Контракта), при этом, согласно Приложению № 3 к Контракту «Расчет цены контракта», цена Контракта по этапу выполнение проектно-изыскательских работ составляет 13 825 180,00 руб., цена Контракта по этапу выполнение строительно-монтажных работ составляет 17 840 475,00 руб.

Разделом 5 Контракта предусмотрено, что Субподрядчик обязан начать выполнение Работ с даты заключения Контракта (т.е. с 02.09.2020), а окончить их выполнение не позднее 30.07.2021.

При этом выполнение всех обязательств Субподрядчика по Контракту (за исключением гарантийных) подтверждается подписанием сторонами Итогового акта приёмки выполненных работ.

Положениями п. 5.2. Контракта предусмотрены промежуточные сроки окончания выполнения этапов Работ:

- выполнение проектно-изыскательских -31.03.2021;

- выполнение строительно-монтажных работ – 30.07.2021;

- подписание итогового акта приемки выполненных работ – 20.11.2021.

Во исполнение условий Контракта Генподрядчик перечислил Субподрядчику денежные средства в сумме  32 155 102,18   руб.

В соответствии с п. п.  8.2.15, 8.2.16 Контракта Субподрядчик обязан  передать по накладной Генподрядчику законченную и оформленную в установленном порядке Документацию (согласно п. 1.1.11 Контракта Документация - Проектная документация, Рабочая документация и отчет об Инженерных изысканиях, обследованиях, обмерах) в 4 (четырех) экземплярах, электронную версию выполненной документации (Этапа работ) и акт о приемке выполненных проектных работ (Этапов работ) в соответствии с условиями Контракта. Датой сдачи Субподрядчиком проектных Работ в соответствии с условиями Контракта является дата подписания Акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ.

Согласно п. 13.1.3 Контакта Генподрядчик, получивший от Субподрядчика Документацию, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения приступает к приемке Результата работ, проверяет комплектность Документации и её соответствие требованиям Контракта, в том числе разделу 23 Контракта, и иным исходным данным. Принятие Документации подтверждается подписанием Акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ. Акт о приемке выполненных проектно-изыскательских работ подписывается после получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации.

Условиями Контракта (п. 5.2) установлен срок на выполнение проектно-изыскательских работ (в том числе: инженерные изыскания, проектная и градостроительная документация, рабочая документация, получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации) - 31.03.2021.

Разработанная Подрядчиком сметная часть проектной документации  получила положительное заключение государственной экспертизы Минобороны России по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства № 63-1-3-00006-23 только 18.09.2023, Решение об утверждении проектно-сметной документации вынесено Департаментом строительства Минобороны России 10.10.2023 № 12/144/031023.

До указанной даты Субпроектировщиком производилось устранение замечаний к сметной и технической части проектной документации, выданных по результатам рассмотрения государственным заказчиком, а затем и 7-м отделом Госэкспертизы Минобороны России, которые своевременно направлялись в адрес Субподрядчика.

Согласно п. 5.2. раздела 5 Контракта «сроки и порядок выполнения Работ» получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации входит в обязанности Субпроектировщика.  В цену Контракта включена стоимость всех затрат, издержек и вознаграждение Субподрядчика, необходимых для выполнения Работ по Контракту, в том числе стоимость прохождения государственной, а в необходимых случаях, экологической экспертиз (пп. 3.2.8 п. 3.2 Контракта), при этом разделом 23 Контракта в состав Работ входит получение Субподрядчиком совместно с Генподрядчиком положительного заключения государственной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации по проектной документации, по определению достоверности сметной стоимости.

Согласно п. 1.1.26 Рабочая документация - документация, разработанная на основании утвержденной Проектной документации и предназначенная для проведения строительных работ и работ по реконструкции.

До настоящего времени Субпроектировщиком не представлен Генпроектировщику в соответствии  с п.п.  8.2.15, 8.2.16  Акт о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, соответственно,   проектные работы по Контракту не сданы и не приняты.

В соответствии с положениями п. 13.2 Контракта сдача-приёмка выполненных строительно-монтажных работ за текущий (отчётный) период осуществляется по журналу учёта выполненных работ (форма КС-6а), Акту о приёмке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Субподрядчик предоставляет Генподрядчику первичные учетные документы, а также Исполнительную документацию на выполненные работы, оформленные должным образом, с сопроводительным письмом. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Субподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний, и сроков их устранения. Субподрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний. При отсутствии замечаний Генподрядчик производит оплату выполненных работ за текущий (отчетный) период.

Согласно п. 7.1.4 Контракта приемка строительно-монтажных работ осуществляется с оформлением акта приемки по каждому Этапу работ. В случае просрочки выполнения любого из Этапов работ Субподрядчиком, Генподрядчик вправе не принимать от него к рассмотрению формы № КС-2 и № КС-3 по Работам, следующим за просроченным Этапом работ, до момента его сдачи. Рассмотрение форм № КС-2 и №КС-3, отклоненных Генподрядчиком по вышеуказанной причине, производится после сдачи просроченного Этапа работ в сроки, установленные Контрактом.

В соответствии с п. 13.7 Контракта сдача законченного строительством (реконструкцией) Объекта Субподрядчиком и его приемка осуществляются в разумный срок, необходимый для приемки, и оформляется Актом приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14), подписанным всеми членами приемочной комиссии, указанной в пункте 13.3. Контракта.

Условиями Контракта (п. 5.2) установлен срок на выполнение строительно-монтажных работ – 30.07.2021.

Субподрядчиком в адрес Генподрядчика 25.08.2022 представлена Исполнительная документация (в соответствии с п. 1.1.14 Контракта Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, выполненные в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства и реконструкции объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ).

Приказом Департамента строительства Минобороны России от 08.09.2022 №154дсп (далее – Приказ), после передачи Субподрядчиком Исполнительной документации, назначена комиссия по приемке законченного строительством объекта.  

В соответствии с требованиями п. 4.10  СП «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.СП 68.13330.2017»: После выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных проектной документацией или договором строительного подряда (контрактом), лицом, осуществляющим строительство, направляется застройщику (техническому заказчику) заявление (приложение А) о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов и проектной документации с приложением:

-  исполнительной документации, 

- общего и специальных журналов учета выполнения работ, соответствующих по составу и порядку ведения требованиям нормативных документов. 

Акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-14) утвержден 29.09.2022, то есть в месячный срок после издания соответствующего Приказа.

При этом, ввиду непередачи до настоящего времени Субподрядчиком комплекта первичных учетных документов, подтверждающих факт надлежащего приобретения оборудования и материалов для строительства Объекта и их стоимость (указанные первичные учетные документы в состав Исполнительной документации не входят), а также непредоставления Генподрядчику Актов по форме КС-3 и Справок о стоимости работ по форме КС-3, Акт по форме КС-14 от 29.09.2022 не содержит указание на объемы и стоимость выполненных работ и считается предварительным.  

Окончательно такой акт считается  подписанным, с указанием стоимости выполненных и принятых работ, после представления Субподрядчиком Генподрядчику, согласно условиям Контракта, актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 (с приложением первичных учетных документов), которые входят в число обязательных документов для оплаты по Контракту.

Указанный Акт только зафиксировал завершение работ на Объекте и не  может подменять собой перечень документов, которые предусмотрены Контрактом и которые надлежат передаче Субподрядчиком Генподрядчику для подтверждения объемов и стоимости выполненных работ.

Следовательно, Работы будут считаются выполненными и принятыми в полном объеме, с соблюдением требований Контракта, только после оформления необходимых документов, предусмотренных Контрактом, а именно, актов по форме КС-2, справок по форме КС-3, Итогового акта, который, согласно п. 1.1.15 Контракта, - документ, подтверждающий выполнение Субподрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением гарантийных обязательств), в том числе государственной регистрации права собственности Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав объекта (в том числе на нежилые помещения, объекты инженерной инфраструктуры), передачи Субподрядчиком выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора, на каждый объект капитального строительства, входящий в состав объекта (в том числе на нежилые помещения, объекты инженерной инфраструктуры), и являющийся основанием для окончательного расчета за выполненные работы.

В соответствии с п. 18.4. Контракта Субподрядчик, в случае нарушения сроков этапов работ/промежуточных сроков, установленных в п. 5.2 настоящего Контракта, выплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, не выполненных в надлежащий срок, за каждый день просрочки.

Ответчик возражая против иска указал, что нарушение сроков работ было вызвано просрочкой кредитора, отсутствием или несвоевременным предоставлением содействия Истцом, о чем ему неоднократно сообщалось. Кроме того, ответчик указал, что  согласно разделу 5  получение положительного заключения  по проектной документации не входит в обязанности ответчика по договору. Кроме того ответчик заявил о пропуске истцом срока давности за период с 01.04.2021 по 08.05.2021г., заявлено о применении ст. 333 ГК РФ.

Истцом уточнен период начисления неустойки, уточнение приняты судом в порядке ст. 49 АПК РФ. Размер подлежащей уплате неустойки за период с 08.05.2021 по 25.09.2024 составляет 14 571 739,72 руб., за период с 31.07.2021 по 25.09.2024г. составляет 17 305 260,75 руб., а всего 31 877 000,47 руб., исключив период моратория.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения сторон, оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска   на основании нижеследующего.

Между сторонами заключен договор подряда, к правоотношениям сторон применяются положения гл. 37 ГК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Согласно ст. 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

Согласно ст. 760 ГК РФ По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ Подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

В соответствии со ст. 762 ГК РФ По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ Заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:

уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;

использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;

оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;

участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;

привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

В силу п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, который, в свою очередь, обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 5.1 Контракта от 29.10.2020 года между ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (Генподрядчик) и ООО «СтройХимПроект» (Субподрядчик) №2022187376332554164000000/2010-25-СМР (СУБ) на выполнение полного комплекта работ по объекту: «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ, дата начала работ – дата вступления договора в силу.

Согласно п. 5.2 Контракта дата окончания работ:

Выполнение проектно-изыскательских работ (в том числе: инженерные изыскания, проектная и градостроительная документация, рабочая документация, получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации)

31 марта 2021

Выполнение строительно-монтажных работ

30 июля 2021

Подписание Итогового акта приемки выполненных работ

20 ноября 2021

В соответствии с п. 18.4. Контракта Субподрядчик, в случае нарушения сроков этапов работ/промежуточных сроков, установленных в п. 5.2 настоящего Контракта, выплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, не выполненных в надлежащий срок, за каждый день просрочки.

Истцом начислена неустойка за период с 08.05.2021 по 25.09.2024 в размере  14 571 739,72 руб., за период с 31.07.2021 по 25.09.2024г.  в размере  17 305 260,75 руб., а всего 31 877 000,47 руб.

В материалы дела представлены проектная, рабочая, исполнительная документация, подписанная истцом, а также акт №МТСС/ЦВО/437-Ж приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 от 29.09.2022.  Данные доказательства подтверждают факт выполнения работ. Так, из указанного акта по форме КС-14 от 29.09.2022 следует: Проектно-сметная документация на строительство разработана ООО «СтройХимПроект» (п. 4 Акта); Исходные данные для проектирования выданы Главным управлением связи Вооруженных Сил Российской Федерации, ПАО «Ростелеком» (п. 5 Акта); Проектно-сметная документация утверждена Департаментом строительства Министерства обороны РФ (п. 6 Акта); Строительно-монтажные работы произведены в общие сроки с октября 2020 по июнь 2022 (п. 7 Акта); Предъявленный к приемке Объект выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и вводится в действие (решение приемочной комиссии).

Указанный Акт подписан представителями конечного Заказчика (РУЗКС ЦВО), представителями пользователей (войсковых частей), а также непосредственно истцом (Генподрядчиком) и ответчиком.

Пункт 1 ст. 406 ГК РФ о просрочке кредитора предусматривает, что кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Из раздела 7 Контракта следует, что Генподрядчик (Истец) выполняет такие функции, как: Своевременно передает Субподрядчику в установленном порядке Исходные данные, необходимые для выполнения проектно-изыскательских Работ (п. 7.1.8 Контракта); Своевременно передает Субподрядчику в установленном порядке на период строительства (реконструкции) Объекта Строительную площадку по Акту передачи строительной площадки, а также всю необходимую для строительства (реконструкции) Объекта документацию (Проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, Рабочую документацию, журнал производства работ, порубочный билет (в случае необходимости), технические условия на временные присоединения в соответствии с ПОС, разрешение на строительство) (п. 7.1.9 Контракта); Оказывает содействие Субподрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Генподрядчика (п. 7.1.11 Контракта).

Задание на проектирование Объекта направлено 02.02.2022 и утверждено заместителем руководителя Департамента строительства Министерства Обороны РФ 17.02.2022.

При этом, согласование проектной документации, направленной Ответчиком, поступило от Истца в марте 2022 (письмо №38/1778-дсп от 02.03.2022):

Письмом №38/3187-дсп от 12.04.2022 Истец направил Субподрядчику откорректированную схему организации связи по Объекту, согласованную с командованием ГУС ВС РФ.

Таким образом, задание на проектирование поступило, а согласование документации происходило только в 2022 году, т.е. уже за пределами срока производства работ по Контракту.

На протяжении всего хода работ и после их завершения между сторонами велась переписка, письма о передаче рабочей документации, исполнительной документации, проектной документации, прочих документов и др. (исх. №279 от 01.07.2021, исх. №283 от 01.07.2021, исх. №325 от 14.07.2021, исх. №473 от 02.11.2021, исх. №73 от 11.03.2021, исх. №165 от 27.04.2021, исх. №193 от 14.05.2021, исх. №388 от 08.09.2021, исх. №392 от 10.09.2021, исх. №178 от 29.04.2021, исх. №180 от 29.04.2021, исх. №260 от 22.06.2021, исх. №72 от 17.03.2022, исх. №70 от 17.05.2022, исх. №67-дсп от 24.05.2022, исх. №126 от 25.05.2022 и др.).

Впоследствии работы были выполнены Ответчиком в заявленные в Контракте сроки, исходя из предполагаемой их продолжительности.

Работы начались в сентябре 2020. На первый этап, по условиям Контракта, закладывалось 7 месяцев (до 31 марта 2021). Простой, вызванный как отсутствием содействия со стороны истца, так и поздним предоставлением задания на проектирование, по итогам которых Ответчик был вынужден переделывать документацию, закончился в декабре 2022 - январе 2023 годов.

После этого, письмом исх. № 79-дсп от 06.06.2022 Ответчик направил Истцу уведомление о завершении работ.

Результатом проведения этой комиссии и стал Акт по форме КС-14 от 29.09.2022, подтверждающий полное выполнение работ.

Согласно п. 2 ст. 406 ГК РФ просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают. Согласно п. 3 ст. 406 ГК РФ по денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.

Согласно п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно п. 1 ст. 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

Согласно п. 2 ст. 330 ГК РФ кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее обязанностей.

Суд приходит к выводу, что нарушение ответчиком  установленных сроков допущено по независящим от него причинам, что является основанием для освобождения ответчика от обязанности по оплате неустойки.

Согласно ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Статьей 307 ГК РФ предусмотрено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствие со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить ГУП «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.01.2003, ИНН: 

<

***>) из дохода федерального бюджета госпошлину в размере 17 615 руб. по платежному поручению № 2070 от 26.04.2024г.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

Р.Е. Галиева