Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040 http://kaliningrad.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Калининград Дело № А21-9496/2022  «06» апреля 2023 года  

Резолютивная часть решения объявлена «03» апреля 2023 года  Решение изготовлено в полном объеме «06» апреля 2023 года  

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.  

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО  «КАЛИНИНГРАДПРОМСТРОЙПРОЕКТ» к АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ» о взыскании  488 681,69 рублей  

при участии в заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от ответчика: ФИО3 по доверенности установил. 

 ООО «КАЛИНИНГРАДПРОМСТРОЙПРОЕКТ» обратилось в суд с иском к  АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ» о взыскании основного долга в сумме 488 681,69 рублей.  

 Судом установлено.  Между сторонами был заключен договор от 29.12.2018 года № 1546. 

По условиям договора ООО «КАЛИНИНГРАДПРОМСТРОЙПРОЕКТ»  (подрядчик) обязалось выполнить проектно-изыскательские работы по ряду объектов  для строительства участков ЛЭП и ТП, а АО «Янтарьэнерго» (заказчик) обязалось  работы принять и оплатить.  

В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ 3 месяца со дня  заключения договора.  

В соответствии с разделом 6 договора общая цена договора согласована  690 000 рублей. Стоимость работ по отдельным объектам приведена в пункте 6.1  договора.  

Дополнительными соглашениями от 20.092019 года № 1, от 10.11.2011 года №  

2 стороны уточнили объекты и стоимость работ по ним. По договору от 29.12.2018 года № 1546: 

заказчик принял работы 19.11.2019 года на сумму 46 932 рублей, оплатил  

25.08.2020 года 22 622,57 рублей, задолженность – 24 309,43 рублей;  

заказчик принял работы 06.02.2020 года на сумму 39 100 рублей, оплатил  

25.08.2020 года 9110 рублей, задолженность – 30 000 рублей; 

заказчик принял работы 15.08.2019 года в сумме 72 738 рублей, оплатил  

25.08.2020 года 43 796,09 рублей, задолженность - 28 941,91 рублей;  

заказчик принял работы 15.08.2019 года в сумме 91 058 рублей, оплатил  

25.08.2020 года 32 116,09 рублей, задолженность - 58 941,91 рубль; 

заказчик принял работы 06.02.2020 года в сумме 45 920 рублей, оплатил  

25.08.2020 года 35 920 рублей, задолженность – 10 000 рублей; 

заказчик принял работы 19.11.2019 года в сумме 33 523 рублей, оплатил  

25.08.2020 года 22 622,58 рублей, задолженность – 10 900,42 рублей;  

заказчик принял работы 15.08.2019 года в сумме 129 973 рублей, оплатил  

25.08.2020 года 112 089,18 рублей, задолженность – 17 883,82 рублей;  

заказчик принял работы 15.08.2019 года в сумме 36 981 рубля, оплатил  

25.08.2020 года 22 622,57 рублей, задолженность – 14 358,43 рублей;  

заказчик принял работы 19.11.2019 года в сумме 99 135 рублей, оплатил  

25.08.2020 года 40 193,09 рублей, задолженность – 58 941,91 рублей;  

заказчик принял работы 15.08.2019 года в сумме 41 371 рубля, оплатил  

25.08.2020 года 33 625,14 рублей, задолженность -7745,86 рублей; 

заказчик принял работы 19.11.2019 года в сумме 11 620 рублей, оплатил  

25.08.2020 года 11 620 рублей, задолженность – 0. Между сторонами был заключен договор от 29.05.2019 года № 480. 

По условиям договора ООО «КАЛИНИНГРАДПРОМСТРОЙПРОЕКТ»  

(подрядчик) обязалось выполнить проектно-изыскательские работы по двум объектам  

для строительства участков ЛЭП и ТП, а АО «Янтарьэнерго» (заказчик) обязалось  

работы принять и оплатить. 

В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ 2 месяца со дня  

заключения договора. 

В соответствии с разделом 6 договора общая цена договора согласована  

190 000 рублей. 

По договору от 29.05.2019 года № 480: 

заказчик принял работы 06.02.2020 года в сумме 94 465 рублей, работы не  оплачены, задолженность – 94 465 рублей;  

заказчик принял работы 06.02.2020 года в сумме 95 535 рублей, оплатил  25.08.2020 года 93 860 рублей, задолженность -1675 рублей.  

Между сторонами был заключен договор от 29.05.2019 года № 481. 

По условиям договора ООО «КАЛИНИНГРАДПРОМСТРОЙПРОЕКТ»  (подрядчик) обязалось выполнить проектно-изыскательские работы по двум объектам  для строительства участков ЛЭП и ТП, а АО «Янтарьэнерго» (заказчик) обязалось  работы принять и оплатить.  

В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ 2 месяца со дня  заключения договора.  

В соответствии с разделом 6 договора общая цена договора согласована  159 000 рублей.  

В соответствии с пунктом 7.1 договора расчет за выполненные работы  производится заказчиком в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки  работ по объекту.  

В соответствии с пунктом 9.2 договора подрядчик за нарушение срока  окончания работ уплачивает пени в размере 0,2% от цены договора за каждый день  просрочки до фактического завершения обязательств.  

По договору от 29.05.2019 года № 481: 

заказчик принял работы 27.12.2019 года в сумме 74 770 рублей, оплатил  25.08.2020 года в сумме 52 189,46 рублей, задолженность – 22 580,54;  

заказчик принял работы 27.12.2019 года в сумме 84 230 рублей, оплатил  25.08.2020 года в сумме 58 792,54 рублей, задолженность –25 437,46 рублей.  

Между сторонами был заключен договор от 06.02.2020 года № 98. 

По условиям договора ООО «КАЛИНИНГРАДПРОМСТРОЙПРОЕКТ»  (подрядчик) обязалось выполнить проектно-изыскательские работы по объекту для  строительства участков ЛЭП и КТП, а АО «Янтарьэнерго» (заказчик) обязалось  работы принять и оплатить.  

В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ 30 дней со дня  заключения договора.  

В соответствии с разделом 6 договора общая цена договора согласована 82 500  рублей.  

В соответствии с пунктом 7.1 договора расчет за выполненные работы  производится заказчиком в течение 15 дней с даты подписания акта сдачи-приемки  работ по объекту.  

По накладной от 14.05.2020 года № 14/05/2020 заказчик принял документацию.  

С письмом от 09.10.2020 года № 129 подрядчик направил заказчику акт на  сумму 82 500 рублей, копию накладной и просил работы оплатить.  

Мотивированных возражений по акту заказчик не представил, работы не  оплатил.  

АО «Янтарьэнерго» изменило наименование на АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ».  

Всего по четырем договорам подрядчик просит взыскать задолженность в  сумме 488 681,69 рублей.  

В отзыве на иск заказчик заявил о зачете штрафных санкций по договорам в  счет оплаты выполненных работ и просил отказать в иске.  

В соответствии с разъяснениями абзаца второго пункта 19 постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 N 6 "О некоторых  вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о  прекращении обязательств" обязательства могут быть прекращены зачетом после  предъявления иска по одному из требований. В этом случае сторона по своему  усмотрению вправе заявить о зачете как во встречном иске (статьи 137, 138 ГПК РФ,  статья 132 АПК РФ), так и в возражении на иск, юридические и фактические  основания которых исследуются судом равным образом (часть 2 статьи 56, статья 67,  часть 1 статьи 196, части 3, 4 статьи 198 ГПК РФ, часть 1 статьи 64, части 1 - 3.1  статьи 65, часть 7 статьи 71, часть 1 статьи 168, части 3, 4 статьи 170 АПК РФ).  

В претензиях заказчик просил оплатить неустойку за нарушение сроков  выполнения работ по положениям пунктов 9.2 договоров:  

по договору от 29.12.2018 года № 1546 с базы 372 121 рублей за период с  30.03.2019 года по 15.08.2019 года в сумме 103 449,36 рублей, с базы 191 210 рублей  за период с 30.03.2019 года по 19.11.2019 года в сумме 89 868,7 рублей, с базы 85 030  рублей за период с 30.03.2019 года по 06.02.2020 года в сумме 68 704,24 рублей;  

по договору от 29.05.2019 года № 480 с базы 190 000 рублей за период с  29.07.2019 года по 06.02.2020 года в сумме 96 140 рублей;  

по договору от 29.05.2019 года № 481 с базы 159 000 рублей за период с  29.07.2019 года по 27.12.2019 года в сумме 48 018 рублей, всего 406 180,3 рублей.  

Представитель ответчика просил применить положения статьи 333 ГК РФ и  снизить размер неустойки.  

Мотивированных возражений в отношении результата работ по договору от  06.02.2020 года № 98 заказчиком не представлено.  

Доказательств оплаты долга по договорам также не представлено. 

Учитывая высокий процент неустойки, периоды просрочки выполнения работ  по положениям статьи 333 ГК РФ суд определяет общий размер неустойки в сумме  180 000 рублей.  

Требования подрядчика в части основного долга в сумме 308 681,69 рублей  (488 681,69 – 180 000) подлежат удовлетворению на основании положений статей 309,  310 ГК РФ, положений договора.  

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,  

участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети  «Интернет» в режиме ограниченного доступа.  

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «РОССЕТИ ЯНТАРЬ» (ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «КАЛИНИНГРАДПРОМСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 

<

***>) основной долг в  сумме 308 681,69 рублей, расходы по госпошлине в сумме 8069 рублей.  

Во взыскании остальной суммы отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный  апелляционный суд.  

Судья О.Н.Шкутко 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 07.02.2022 12:25:04

Кому выдана Шкутко Ольга Николаевна