АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-13285/2023

г. Салехард

21 июня 2024 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Воробьёвой В.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Вагазовым Р.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения Новопортовский детский сад «Теремок» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Спецстройинвест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) об  устранении недостатков работ,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, государственного  казенного учреждения «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало- Ненецкого автономного округа» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: 

от истца – представитель ФИО1, заведующая детским садом (согласно  выписке из ЕГРЮЛ);  

от ответчика – ФИО2 представитель по доверенности № 13 от 07.12.2022,  управляющий обществом ФИО3;  

от третьего лица – представитель не явился. 

Руководствуясь статьями 9, 16, 49, 65, 71, 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Спецстройинвест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в срок до  конца октября 2025 года безвозмездно устранить дефекты, обнаруженные в пределах  гарантийного срока на объекте: «Детский сад на 120 мест в с. Новый Порт Ямальский  район, Ямало-Ненецкий автономный округ», а именно:  

1. Выполнить водопонижение участка застройки для исключения негативного  влияния на фундаменты здания, отвода поверхностных вод (дождевых, талых и др.)  через лотки и приемные колодцы ливневой канализации с учетом фактического  расположения газонов, дорог и площадок вокруг здания; осуществить устройство  дополнительных лотков и приемных колодцев для надлежащего отвода поверхностных  вод.  

2. Восстановить конвертовку подполья (места просадки грунта) для отвода  поверхностных вод (аварийных разливов, дождевых, талых и др.).  

 

3. Устранить трещины в оштукатуривании фундаментных балок. 

4. Выполнить антикоррозионную защиту стальных конструкций с учетом  требований СП28.13330.2017. С помощью гидропескоструйного аппарата с  применением ингибиторов коррозии типа «Амидал» (фирмы ООО «Ариан МК») или  при помощи проволочных абразивных щёток с УШМ очистить стальные конструкции  крылец от ржавчины.  

5. Выполнить антикоррозионную защиту стальных конструкций крылец при  помощи составов MAXREST PASSIVE или аналогов.  

6. Для предотвращения коррозии рабочей арматуры свай, в местах  расположения сквозных и несквозных трещин, необходимо произвести инъецирование  трещин акрилатными и метилакрилатными гелями.  

7. Восстановить опирание балок пандуса, ж/б плит крыльца на осевшие сваи,  путём подвода стальных пластин.  

8. Установить отсутствующие крышки на термометрических скважинах в  количестве 2 штук.  

9. Установить термометрические скважины в количестве 3 штук, где они  находятся в неработоспособном состоянии.  

10. Укрепить армированием и заделкой трещины в несущих стенах здания. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения  формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  http://yamal.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного  производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайте Восьмого арбитражного апелляционного  суда http://8aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Западно-Сибирского округа  http://faszso.arbitr.ru.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

В.С. Воробьёва

Судья