Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А21- 5876/2019

г.Калининград

16 июля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 июля 2019 года

Полный текст решения изготовлен 16 июля 2019 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе: судьи  Т.В.Пахомовой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ГАУЗ «Гурьевская центральная районная больница» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 238300, 

<

...>) (далее – ГАУЗ Гурьевская ЦРБ,Больница, истец) к ООО «СК Вертикаль» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 119311, 

<

...>, подвал, пом. IV А, комн. 3, офис 43) (далее – ответчик, Общество) 

- о взыскании 44 944 руб. стоимости завышения работ  по контракту № 0135200000517001023-0687874-01 от 25.09.2017г.;

- об обязании устранения недостатков в выполненных работах по контракту;

третьи лица: Государственное казенное учреждение Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства», Контрольно-счетная палата Калининградской области. 

В судебном  заседании приняли участие:

от истца: ФИО2– представитель по доверенности, паспорту;

от ответчика: извещенный, не явился;

от ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального строительства»: ФИО3;

от Контрольно-счетной палаты Калининградской области: явка представителя не обеспечена.

Суд,

У С Т А Н О В И Л:

25.09.2017 г. ГАУЗ Гурьевская ЦРБ (Заказчик), ООО «СК Вертикаль» (Подрядчик) и ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального строительства» (Технический заказчик) заключен контракт № 0135200000517001023-0687874-01 на выполнение работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта (с обслуживанием до 800 человек) 

<

...>» (далее - Контракт). 22 декабря 2017 года на основании акта приемки законченного строительством объекта работы были подрядчиком завершены. Согласно дополнительному соглашению №2 от 28.12.2017г. стоимость фактически выполненных работ составила 4 078 118,94 руб. Работы были оплачены Подрядчику на основании актов выполненных работ.

Актом Контрольно-счетной палаты Калининградской области от 10.12.2018 г. установлено завышение объемов работ ООО «СК Вертикаль» при выполнении Контракта на сумму 44 900 руб. в части:

- устройства плинтусов из плиток керамических 45 м.;

- установки дверного доводчика к металлическим дверям - 1 шт.;

- установки конвекторов настенных - 3 шт.

Указанные объемы были включены в акт по форме кс-3 от 30.11.2017г. №2 и соответствующие акты по форме кс-2 и оплачены Заказчиком на основании платежного поручения от 13.12.2017г. №386919. 

Отчетом о результатах контрольного мероприятия № 23 «Проверка использования средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» в 2017 году (строительство фельдшерско-акушерского пункта (с обслуживанием до 80D человек), 

<

...>) в отношении государственного автономного учреждения здравоохранения Калининградской области «Гурьевская центральная больница», утвержденным председателем контрольно-счетной палаты Калининградской области ФИО4 от 28.12.2018 г. (далее - Отчет), выявлены следующие нарушения и недостатки, допущенные ООО «СК Вертикаль» при исполнении Контракта:

-отделка внутреннего помещения кабинета приема выполнена керамической глазурованной плиткой на высоту 1,97 м., вместо предусмотренных проектом 2,5 м.;

-в помещении для ожидания приема отбойная доска смонтирована по периметру стен в одном уровне вместо двух, как это предусмотрено проектной документацией.;

-пандус имеет одностороннее ограждение с поручнем, вместо двухстороннего;

- не обеспечена глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании двери (размер входной площадки при входе в здание составляет 1,3*2,1 м., вместо 1,4*2,0 м.);

- наружные входные двери имеют высоту порога 0,04 м., что превышает допускаемые 0,014 м.;

- ширина двери в помещении санузла для маломобильных групп составляет 0,67 м. вместо 0,9 м. (не обеспечен въезд кресла-коляски);

- в нарушение п. 3.12 МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» - нижние звенья труб (отметы) установлены на отмостку или выше отмостки на 0,05 м., 0,11 м., 0,48 м. (следовало 0,2 м.);

- в нарушение технологии устройства тротуарного плиточного покрытия - межплиточные швы тротуарной плитки не заполнены песком;

В соответствии со статьей 722 ГК РФ В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Пунктом 8.5.9. Контракта предусмотрено, что в случае выявления завышений объемов и/или стоимости фактически выполненных Работ (материалов, оборудования) данные Работы с указанием их стоимости отражаются в акте контрольного обмера. Стоимость выявленных завышений в бесспорном порядке возвращается Подрядчиком в течение 5(пяти) дней с момента их выявления на счет Заказчика.

Разделом 7 Контракта, в том числе предусмотрено, что ООО «СК Вертикаль» гарантирует:

Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта (п.7.1.).

Качество выполнения Работ в соответствии с Документацией, условиями Контракта и действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами (п.7.2.).

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта. В случае, если Заказчиком/ Техническим заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества (п.7.3.).

Пунктом 7.4. Контракта установлен гарантийный срок качества выполненных Работ продолжительностью пять лет с момента подписания итогового акта выполненных Работ за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

Контракт был заключен 25.09.2017 г., на момент подготовки Отчета Контрольно-счетной палаты Калининградской области (28.12.2018 г.) нарушения и недостатки, допущенные ООО «СК Вертикаль» при исполнении Контракта, были выявлены в рамках действия гарантийного срока.

05 февраля 2019 года Больница направила в адрес Общества требование о возврате излишне полученных денежных средств и устранении выявленных в период гарантийного срока недостатках в выполненных работах.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения Больницы в суд с иском о взыскании с Общества 44 944 руб. стоимости завышения работ  по контракту № 0135200000517001023-0687874-01 от 25.09.2017г. и обязании в течение тридцати календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийное обязательство по контракту от 25.09.2017г. № 0135200000517001023-0687874-01 на выполнение работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта (с обслуживанием до 800 человек) 

<

...>», а именно устранить следующие дефекты:

-отделка внутреннего помещения кабинета приема выполнена керамической глазурованной плиткой на высоту 1,97 м., вместо предусмотренных проектом 2,5 м.;

-в помещении для ожидания приема отбойная доска смонтирована по периметру стен в одном уровне вместо двух, как это предусмотрено проектной документацией.;

-пандус имеет одностороннее ограждение с поручнем, вместо двухстороннего;

- не обеспечена глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании двери (размер входной площадки при входе в здание составляет 1,3*2,1 м., вместо 1,4*2,0 м.);

- наружные входные двери имеют высоту порога 0,04 м., что превышает допускаемые 0,014 м.;

- ширина двери в помещении санузла для маломобильных групп составляет 0,67 м. вместо 0,9 м. (не обеспечен въезд кресла-коляски);

- в нарушение п. 3.12 МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» - нижние звенья труб (отметы) установлены на отмостку или выше отмостки на 0,05 м., 0,11 м., 0,48 м. (следовало 0,2 м.);

- в нарушение технологии устройства тротуарного плиточного покрытия - межплиточные швы тротуарной плитки не заполнены песком.

- Судебное заседание проведено в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик возражений по иску не представил. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений. 

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ закреплено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены,  или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Суд, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 307, статей 309, 310, 1102, 722, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями контракта, пришел к выводу об удовлетворении требований в полном объеме.

При этом суд исходил из того, что материалами дела подтверждается факт завышения стоимости фактически выполненных Обществом  работ. Ответчик приглашался для участия в контрольных обмерах. Как следует из материалов дела, представитель Подрядчика присутствовал при работе комиссии, но от подписания итогового акта проверки отказался. Обществом не оспорены результаты проверки КРУ. Доказательств обратного ответчиком не представлено. Ходатайств о проведении экспертизы Обществом не заявлено. Отзыв на иск не представлен. При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «СК Вертикаль» в пользу ГАУЗ «Гурьевская центральная районная больница» 44 944 руб. завышения стоимости фактически выполненных работ по контракту № 0135200000517001023-0687874-01 от 25.09.2017г., 8000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Обязать ООО «СК «Вертикаль» в течение тридцати календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийное обязательство по контракту от 25.09.2017г. № 0135200000517001023-0687874-01 на выполнение работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта (с обслуживанием до 800 человек) 

<

...>», а именно устранить следующие дефекты:

-отделка внутреннего помещения кабинета приема выполнена керамической глазурованной плиткой на высоту 1,97 м., вместо предусмотренных проектом 2,5 м.;

-в помещении для ожидания приема отбойная доска смонтирована по периметру стен в одном уровне вместо двух, как это предусмотрено проектной документацией.;

-пандус имеет одностороннее ограждение с поручнем, вместо двухстороннего;

- не обеспечена глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании двери (размер входной площадки при входе в здание составляет 1,3*2,1 м., вместо 1,4*2,0 м.);

- наружные входные двери имеют высоту порога 0,04 м., что превышает допускаемые 0,014 м.;

- ширина двери в помещении санузла для маломобильных групп составляет 0,67 м. вместо 0,9 м. (не обеспечен въезд кресла-коляски);

- в нарушение п. 3.12 МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» - нижние звенья труб (отметы) установлены на отмостку или выше отмостки на 0,05 м., 0,11 м., 0,48 м. (следовало 0,2 м.);

- в нарушение технологии устройства тротуарного плиточного покрытия - межплиточные швы тротуарной плитки не заполнены песком.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                           Т.В.Пахомова